Company: КонсультантПлюс Версия 4022.00.55

Путеводитель по договорной работе. Подряд. Рекомендации по заключению договора

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.09.2023

Путеводитель по договорной работе. Подряд. Рекомендации по заключению договора

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 14.09.2023

| | КонсультантПлюс | Изменения за последний месяц | Актуально на 13.09.2023 |
Рецензенты:
П.В. Крашенинников, доктор юридических наук
О.А. Рузакова, доктор юридических наук

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ

ПОДРЯД.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Статьи 702, 703 ГК РФ

Основным условием, которое необходимо согласовать сторонам в договоре подряда, является его предмет - существенное условие договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 703, ст. 726 ГК РФ предметом договора подряда признается работа и ее результат.

- Судебную практику, подтверждающую, что для согласования предмета договора подряда стороны должны определить результат работ, см. в Путеводителе по судебной практике.

Подлежащая выполнению работа определяется через ее содержание и объем. Данные понятия содержатся только в нормах о строительном подряде (п. 1 ст. 743 ГК РФ), однако используются и при согласовании предмета договора подряда на выполнение других видов работ (см. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.03.2010 по делу N А82-8136/2009-26, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.12.2009 по делу N А29-2516/2009).
Таким образом, для согласования условия о предмете договора подряда необходимо определить содержание, объем и результат выполняемой подрядчиком работы.
Чтобы условия о правах и обязанностях сторон правильно сформулировать в договоре подряда, подробно изложите, какие именно действия они должны совершить. Исходя из ст. 702 ГК РФ укажите, какие действия совершает подрядчик, чтобы выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику. Подробнее о том, какие действия по выполнению работы должен совершить подрядчик, см. п. 1.1 настоящих Рекомендаций. Для заказчика установите обязанность принять результат работы и оплатить его. Подробнее об оплате работ заказчиком см. п. 8 настоящих Рекомендаций.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"По настоящему договору подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика следующую работу: _______________ (указывается содержание и объем работы) и сдать ее результат в виде ____________________ заказчику, а заказчик обязуется принять результат выполненной работы и оплатить его".
--------------------------------

Если предмет договора подряда не согласован
Договор может быть признан незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ). В таком случае заказчик не вправе потребовать от подрядчика выполнения работы и передачи ее результата, в том числе в судебном порядке обязать подрядчика исполнить договор (см. Риск заказчика 1.1). Подрядчик не вправе будет требовать оплаты выполненной работы, а также уплаты неустойки и процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ. Однако при решении вопроса о заключенности договора суды учитывают совместные действия сторон по его исполнению (см. Риск подрядчика 1.1).
Кроме того, сторона, которая полностью или частично приняла исполнение по договору или другим образом подтвердила его действие, не вправе требовать признания договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств противоречит принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ).
Указанное положение означает, что действия заказчика, который принял работы, но не оплатил их, а затем при взыскании с него задолженности и неустойки в суде заявил о незаключенности договора ввиду несогласования предмета, могут быть расценены как недобросовестное поведение (попытка избежать ответственности за нарушение обязательств по оплате). Соответственно, такое заявление, скорее всего, не будет принято во внимание с учетом положений п. 3 ст. 432 ГК РФ.

1.1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

Условие о содержании работы определяет, какая именно работа подлежит выполнению по договору подряда и какие действия в рамках этой работы должен совершить подрядчик.

Согласование условия о содержании работы
Стороны должны отразить в договоре содержание работы, поскольку оно, наряду с объемом работы и ее результатом, составляет предмет договора (п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 703, п. 1 ст. 432 ГК РФ).
Определение содержания работы дает сторонам возможность согласовать все остальные условия договора: цену работы, сроки ее выполнения, другие положения (о необходимых материалах и оборудовании, способах выполнения работы и т.п.).
Содержание работы определяется исходя из видов работы, предусмотренных п. 1 ст. 703 ГК РФ:
- изготовление вещи из собственных материалов подрядчика;
- изготовление вещи путем переработки вещи (материала) заказчика;
- обработка вещи, предоставленной заказчиком;
- выполнение иной работы, имеющей овеществленный (материально выраженный) результат, который передается заказчику, например установка, сборка или разборка вещи, предоставленной заказчиком.
В связи с этим при согласовании содержания требуется определить также и результат работы. Подробнее о согласовании результата работы см. п. 1.3 настоящих Рекомендаций.

Для согласования содержания работы сторонам рекомендуется определить в договоре следующее:
- перечень работ, подлежащих выполнению, и их состав;
- передаваемую подрядчику вещь (в случае заключения договора на обработку вещи).

Если стороны не согласовали условие о содержании работы
В таком случае предмет договора подряда может быть признан несогласованным. Подробнее о последствиях несогласования предмета договора подряда см. п. 1 настоящих Рекомендаций.

1.1.1. Перечень и состав работ, подлежащих
выполнению по договору подряда

Содержание работы следует описывать в договоре подряда достаточно подробно, чтобы из договора можно было сделать однозначный вывод о порученной подрядчику работе.
Для согласования содержания работы в договоре необходимо указать наименование работ, которые будет производить подрядчик. Если содержание работы носит общий характер и включает в себя разные виды работ, то в договоре следует определить конкретный состав работ, подлежащих выполнению. Например, работы по благоустройству и озеленению территории - это обобщенное название комплекса различных работ. Поэтому в договоре следует перечислить все виды работ, которые подлежат выполнению (например, вырубка и вывоз с территории сухих, погибших деревьев, покраска заборов, создание клумб, посадка растений и т.п.).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автомобиля, которые включают в себя: замену передних фар на аналогичные (снятие старых фар, установка новых), покраску переднего бампера в цвет кузова".
--------------------------------

Перечень и состав работ могут быть указаны в самом договоре либо в отдельном приложении к нему: в технической документации, техническом задании, смете, ином приложении - при условии, что в этих приложениях содержится ссылка на договор подряда.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работу, предусмотренную настоящим договором, а заказчик обязуется принять ее результат и оплатить в соответствии с условиями договора. Перечень и состав работ, подлежащих выполнению, определяется в смете (приложение N 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора".
--------------------------------

Если стороны не согласовали конкретный перечень или состав работ, подлежащих выполнению
Суд может признать предмет договора подряда несогласованным. Подробнее о последствиях несогласования предмета договора подряда см. п. 1 настоящих Рекомендаций.

1.1.2. Конкретизация вещи заказчика,
передаваемой для обработки или выполнения
иной работы по договору подряда

Обработкой можно считать нанесение на вещь специального защитного покрытия (антикоррозийного, антисептического, противоударного и т.п.), обновление ее окраски, другое механическое, химическое, тепловое и прочее воздействие на эту вещь в целях изменения или улучшения ее качественных характеристик (см., например, п. 3.5 "ГОСТ 4.8-2003 (ИСО 10290:1993)". То есть в результате обработки вещь, переданная заказчиком, приобретает новые свойства.
При заключении договора подряда на обработку вещи заказчика (п. 1 ст. 703 ГК РФ) рекомендуется подробно описать эту вещь в договоре: указать ее наименование и другие конкретизирующие признаки, например индивидуальные номера, присвоенные изготовителем. Если работы будут проводиться в месте расположения вещи (например, в случае с громоздким производственным оборудованием, недвижимым имуществом), следует отразить его в договоре.
При передаче для обработки нескольких вещей каждую из них необходимо определить указанным образом.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"По настоящему договору подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика ремонт токарных станков, расположенных по адресу: ____________ (указывается местоположение станков), имеющих следующие номера: ______________ (указываются номера станков согласно технической документации изготовителя), согласно требованиям, изложенным в приложении к настоящему договору".
--------------------------------

Конкретизация вещи требуется для надлежащего определения содержания работы, а также для того, чтобы при приемке от подрядчика результата работ заказчик мог идентифицировать обработанную вещь, т.е. удостовериться, что работы были произведены в отношении именно той вещи, которую он передал подрядчику по договору.
Аналогичным образом следует конкретизировать вещь, передаваемую заказчиком для выполнения иных работ, подобных обработке (сборки, установки, ремонта и т.п.).

Если вещь, передаваемая заказчиком для обработки или выполнения иной работы, в договоре не конкретизирована
В этом случае предмет договора подряда может быть признан несогласованным, а договор - незаключенным (п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 702 ГК РФ). Заказчик не сможет потребовать от подрядчика исполнения каких-либо обязательств по договору (см. Риск заказчика 1.1.1). Подрядчик в соответствии с п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 711 ГК РФ не сможет потребовать принять и оплатить выполненную работу или оплатить выполненную, но не принятую заказчиком работу. Однако при решении вопроса о заключенности договора суды учитывают действия сторон по его исполнению (см. Риск подрядчика 1.1.1).
Кроме того, сторона, которая полностью или частично приняла исполнение по договору или другим образом подтвердила его действие, не вправе требовать признания договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств противоречит принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ).
О последствиях несогласования предмета договора подряда см. также п. 1 настоящих Рекомендаций.

1.2. ОБЪЕМ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

Объем работы является количественной характеристикой выполняемых подрядчиком действий и их результата.

Согласование условия об объеме работы
Объем работы, наряду с содержанием, позволяет определить предмет договора подряда (п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 703 ГК РФ) и подлежит согласованию как существенное условие договора (Определение ВАС РФ от 21.06.2010 N ВАС-6393/10 по делу N А12-12230/2009).
Также объем служит основой для расчета цены работы по договору.
Для согласования объема работы стороны должны указать такие сведения, как:
- количество вещей заказчика, подлежащих переработке, обработке, уничтожению (например, объем перерабатываемого сырья, количество подлежащих вырубке деревьев, окрашиваемых деталей или ремонтируемой мебели);
- количество действий, которые должны быть совершены подрядчиком при выполнении работы (например, двойное окрашивание деталей);
- размеры (площадь, величину, толщину и т.п.) вещей, подлежащих обработке, уничтожению, переработке;
- количество новой продукции, подлежащей изготовлению или получаемой в результате переработки. О согласовании других характеристик результата работы см. п. 1.3 настоящих Рекомендаций.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик обязуется по заданию заказчика изготовить визитки в количестве _____ штук согласно оригинал-макету заказчика, являющемуся приложением к настоящему договору".
--------------------------------

Стороны могут согласовать объем работы в договоре, в приложениях к нему (смете, календарном плане) или предусмотреть в договоре порядок определения объема. Так, в договоре подряда на переработку давальческого сырья заказчика могут быть указаны нормы выхода готовой продукции, рассчитанные сторонами в процентном соотношении к массе перерабатываемого сырья (см., например, Единые нормы отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве пищевой продукции из осетровых рыб, утвержденные Госкомрыболовством России 29.04.2002).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"По настоящему договору подрядчик обязуется по заданию заказчика переработать предоставленные заказчиком семена подсолнечника в подсолнечное масло, жмых, фузу согласно следующим нормам выхода готовых продуктов ________________. Количество семян подсолнечника, предоставляемых заказчиком для переработки, согласовывается сторонами в приложении N 1 к настоящему договору".
--------------------------------

Если в договоре не указан объем подлежащей выполнению работы
В таком случае предмет договора может быть признан судом несогласованным, в связи с чем договор подряда будет являться незаключенным и не будет порождать для сторон никаких прав и обязанностей (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Заказчик не сможет обязать подрядчика выполнить работу по договору или привлечь его к ответственности за ненадлежащее выполнение (см. Риск заказчика 1.2.1). Вместе с тем сторона, которая полностью или частично приняла исполнение по договору или другим образом подтвердила его действие, не вправе требовать признания договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств противоречит принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ).
Подробнее о последствиях несогласования предмета договора подряда см. п. 1 настоящих Рекомендаций.

1.3. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

Согласование результата работы
Обязательным условием договора подряда является передача подрядчиком заказчику результата выполненной работы (ст. ст. 702, 703, 720 ГК РФ). В связи с этим результат работы признается составной частью предмета договора подряда и подлежит согласованию наряду с содержанием и объемом работы.

- Судебную практику, подтверждающую, что стороны должны согласовать результат работ как составную часть предмета договора подряда, см. в Путеводителе по судебной практике.

Согласование результата работы необходимо сторонам в том числе для надлежащего определения содержания выполняемой работы, а также ее объема.
Для надлежащего согласования результата работы сторонам рекомендуется:
- учитывать требования к наличию и характеру результата работы;
- определить название и характеристики результата работы;
- указать дополнительные конкретизирующие признаки результата работы.

Если результат работы не согласован
Предмет договора может быть признан несогласованным. В таком случае договор считается незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ) и не порождает для его сторон никаких прав и обязанностей. Вместе с тем сторона, которая полностью или частично приняла исполнение по договору или другим образом подтвердила его действие, не вправе требовать признания договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств противоречит принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ).
Подробнее о последствиях несогласования предмета договора подряда см. п. 1 настоящих Рекомендаций.

1.3.1. Требования к наличию и характеру результата
работы по договору подряда

При согласовании предмета договора подряда сторонам следует учитывать, что наличие и характер результата работы являются критериями, отличающими этот договор от других видов договоров, например от договора возмездного оказания услуг и договора авторского заказа.
Правильное согласование результата работы позволит избежать спора, в рамках которого суд может квалифицировать заключенный договор не как договор подряда, а как договор иного вида и применить к отношениям сторон нормы, регулирующие соответствующий вид договора.
Если стороны намерены взаимодействовать именно в рамках договора подряда, им рекомендуется придерживаться следующих требований при согласовании условия договора о результате работы.

Наличие овеществленного результата
Работа по договору подряда должна иметь овеществленный результат, подлежащий передаче заказчику.
Как следует из ст. 220, п. 1 ст. 703 ГК РФ, результатом работы по договору подряда может быть:
- новая вещь (продукция, изделие), изготовленная подрядчиком из собственных материалов или созданная в результате переработки материала заказчика (например, станок, детали для оборудования, продукты переработки семян подсолнечника);
- обработанная подрядчиком вещь (например, отремонтированная техника, покрашенные трубы);
- иной овеществленный, имеющий материальное выражение результат работ (отходы, образовавшиеся при уничтожении (взрыве, сжигании, деформации) вещи и т.п.).
Соответственно, в договоре должно быть четко указано, что выполняемые работы имеют целью достижение конечного, согласованного сторонами материального результата, который передается заказчику.

Если в договоре предусмотрено совершение действий по поручению заказчика, но не предусмотрена передача ему какого-либо овеществленного, материального результата
Такой договор может быть квалифицирован как договор возмездного оказания услуг, и отношения сторон будут регулироваться гл. 39 ГК РФ. Это связано с тем, что в рамках договора возмездного оказания услуг в отличие от договора подряда ценность представляют сами действия исполнителя, а не их овеществленный результат.

- Судебную практику, подтверждающую, что в рамках договора возмездного оказания услуг в отличие от договора подряда ценность представляют действия исполнителя, а не их овеществленный результат, см. в Путеводителе по судебной практике.

В данном случае стороны могут лишиться тех прав, которые им предоставлены по договору подряда. Так, заказчик не сможет отказаться от оплаты, ссылаясь на отсутствие акта приема-передачи результата работ (см. Риск заказчика 1.3.1). Подрядчик в случае одностороннего отказа заказчика от договора сможет взыскать только фактически понесенные расходы в порядке ст. 782 ГК РФ (Риск подрядчика 1.3.1).
Подробнее о согласовании предмета договора об оказании услуг см. п. 1 Рекомендаций по заключению договора возмездного оказания услуг.

Характер (вид) результата работы
Конечным результатом работы по договору подряда не должен быть объект интеллектуальной собственности.
Целью заключения договора подряда является получение овеществленного результата. Однако такой договор не может быть заключен на создание объектов интеллектуальных прав, поскольку отношения по их созданию регулируются специальными нормами Гражданского кодекса РФ и оформляются договорами заказа (ст. ст. 1296, 1372, 1463 ГК РФ) и авторского заказа (ст. 1228 ГК РФ). В связи с этим сторонам не следует указывать в качестве конечного результата заключаемого договора такие объекты, как:
- программа для ЭВМ, база данных, изобретение, полезная модель, промышленный образец;
- произведение науки, литературы или искусства.
Данные объекты могут быть созданы в ходе исполнения договора подряда, но только как сопутствующий результат, если договор заключался на выполнение иных работ (ст. ст. 1297, 1371, 1462 ГК РФ).
Результатом договора подряда может быть материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (п. 1 ст. 1227 ГК РФ).

Если по договору подряда конечным результатом работы является объект интеллектуальной собственности
Договор может быть признан:
- договором на выполнение научно-исследовательских работ или опытно-конструкторских и технологических работ. В таком случае применяются общие положения о подряде (§ 1 гл. 37 ГК РФ), а также правила ст. 738 ГК РФ (ст. 778 ГК РФ);
- договором заказа, авторского заказа. В случае его неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчик не вправе будет требовать возмещения упущенной выгоды (ст. 15 ГК РФ), поскольку ответственность автора ограничивается суммой реального ущерба (ст. 1290 ГК РФ).

1.3.2. Название и характеристики результата
работы по договору подряда

Названием (наименованием) результата работы является наименование изготавливаемой продукции. Название результата работы при обработке вещи или выполнении иной работы может быть определено исходя из содержания работы (названия вещи и способа, метода ее обработки, перечня иных работ). Подробнее о согласовании содержания работы см. в п. 1.1 настоящих Рекомендаций.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик в соответствии с настоящим договором обязуется осуществить переработку принадлежащих заказчику корнеплодов сахарной свеклы и передать ему полученные из них сахар-песок и патоку в объеме, предусмотренном договором".
--------------------------------

Помимо названия результата работы стороны должны указать его количество, например количество изготавливаемых изделий, объем продукции, получаемой при переработке. Количество результата работы указывается в тоннах, метрах, штуках и т.п. и может быть определено при согласовании объема работы. Подробнее по данному вопросу см. п. 1.2 "Объем работы по договору подряда" настоящих Рекомендаций.
Стороны также могут отразить следующие характеристики результата работы:
- качественные признаки и свойства, функциональное или целевое назначение, по которому заказчик предполагает использовать результат работы. Подробнее по вопросу согласования целей использования результата работы см. п. 2.1.3 настоящих Рекомендаций;
- размер, цвет, технические характеристики, внешний вид, графическое или фотоизображение. Указанные параметры могут быть согласованы сторонами в приложениях к договору (техническом задании, макете, оригинал-макете, чертеже, рисунках и т.п.).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик обязуется в согласованный договором срок изготовить по заданию заказчика и передать ему столы офисные (именуемые далее - результат работы) в количестве 15 штук со следующими характеристиками: цвет серый, габариты и дизайн указаны в чертеже (приложение N 1 к договору), материал для изготовления - древесноволокнистые плиты средней плотности МДФ. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы в порядке и сроки, установленные настоящим договором".
--------------------------------

Если в договоре не согласованы характеристики изготавливаемой вещи
Существенное условие договора подряда о предмете может быть признано несогласованным (ст. ст. 432, 702 ГК РФ). В таком случае договор считается незаключенным и не порождает прав и обязанностей сторон. Заказчик не вправе будет привлечь подрядчика к ответственности за выполненную ненадлежащим образом работу в порядке ст. 723 ГК РФ (см. Риск заказчика 1.3.2).
Вместе с тем сторона, которая полностью или частично приняла исполнение по договору или другим образом подтвердила его действие, не вправе требовать признания договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств противоречит принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ).
Подробнее о последствиях несогласования предмета договора подряда см. п. 1 настоящих Рекомендаций.

1.4. ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

Задание заказчика представляет собой описание выполняемой подрядчиком работы (ее содержания, объема и результата), т.е. определяет предмет договора (п. 1 ст. 702 ГК РФ).

Согласование задания заказчика
В зависимости от сложности и характера работы задание может быть согласовано сторонами при заключении договора либо после заключения.

Если задание заказчика отсутствует
Предмет договора может быть признан несогласованным. В этом случае договор не считается заключенным и не порождает для его сторон прав и обязанностей (п. 1 ст. 432, ст. ст. 8, 307 ГК РФ). Вместе с тем сторона, которая полностью или частично приняла исполнение по договору или другим образом подтвердила его действие, не вправе требовать признания договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств противоречит принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ).
Подробнее о последствиях несогласования предмета договора подряда см. п. 1 настоящих Рекомендаций.

1.4.1. Согласование задания при заключении договора подряда

Задание заказчика не является самостоятельным условием договора подряда, отличным от его предмета. Поэтому оно считается согласованным, если стороны определили в договоре содержание, объем и результат работы.
Задание может разработать одна из сторон до заключения договора и затем включить его в проект договора. В таком случае задание будет согласовано в момент принятия другой стороной условий данного проекта, т.е. при заключении договора (ст. ст. 433 - 435, 438 ГК РФ). Подрядчик разрабатывает задание, если ему для этого не требуется длительного изучения потребностей заказчика, особенностей его деятельности. Заказчик может составить задание, если он обладает для этого необходимыми знаниями и квалифицированными специалистами.

Внимание! При составлении задания заказчику следует удостовериться, что при выполнении работы не будут нарушены права третьих лиц. Так, если необходима прокладка кабелей по чужому зданию, в силу п. 3 ст. 6 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" это можно сделать только на основании договора с собственником или иным владельцем здания. Соответственно, заказчику необходимо заключить такой договор. В противном случае собственником или владельцем здания может быть предъявлен иск об устранении нарушений его права, допущенных подрядчиком при выполнении работ. Ответчиком по этому иску будет выступать заказчик, так как работы выполняются по его заданию и под его контролем (п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 N 153 "Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения").

Согласование задания в тексте договора
В тексте договора подряда задание обычно указывается в виде условия (раздела) о предмете (см. п. 4 Письма ПФР от 04.12.1997 N 09-12/8660-ИН).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"По настоящему договору подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика следующую работу: _______________ (указывается содержание и объем работы) и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат выполненной работы и оплатить его".
--------------------------------

Согласование задания в приложении к договору
Если задание объемно, содержит схемы или таблицы, его можно описать в приложении к договору.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик обязуется выполнить работу согласно заданию заказчика (Приложение N 1 к договору) и сдать ее результат, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его".
--------------------------------

Приложение может быть названо по-разному ("задание", "техническое задание") или вовсе не иметь названия. Кроме задания заказчика (предмета договора) оно может содержать и другие условия: сроки выполнения работы, требования к качеству и т.д. Необходимо, чтобы приложение содержало ссылку на договор и было подписано сторонами.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Настоящее техническое задание является Приложением к договору подряда N ____ от "___" _____ _____ г., заключенному следующими сторонами: __________ (указывается наименование, место нахождения, ОГРН каждой из сторон договора)".
--------------------------------

Если приложение к договору, содержащее задание, не согласовано
Предмет договора может быть признан не определенным. В этом случае договор не считается заключенным и не порождает для его сторон прав и обязанностей (п. 1 ст. 432, ст. ст. 8, 307 ГК РФ). Соответственно, заказчик не вправе потребовать от подрядчика выполнения работы и передачи ее результата, в том числе в судебном порядке (см. Риск заказчика 1.4.1). Подрядчик, в свою очередь, может не получить оплаты выполненной работы (см. Риск подрядчика 1.4.1). Кроме того, он не вправе будет потребовать передачи документации для выполнения работы (см. Риск подрядчика 1.4.2). На него также может быть возложена обязанность вернуть заказчику сумму неотработанного аванса и уплатить проценты на нее согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ (см. Риск подрядчика 1.4.3).
Вместе с тем сторона, которая полностью или частично приняла исполнение по договору или другим образом подтвердила его действие, не вправе требовать признания договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств противоречит принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ).
Дополнительно о последствиях несогласования предмета договора подряда см. п. 1 настоящих Рекомендаций.

1.4.2. Согласование задания после заключения
договора подряда

Если работа носит сложный технологический характер, подготовка задания может потребовать от заказчика дополнительных временных затрат и специальных знаний, и в такой ситуации он может в силу свободы договора (ст. 421 ГК РФ) поручить разработку задания подрядчику. Такая разработка будет являться самостоятельным видом работы.
Стороны могут заключить отдельный договор на выполнение работы, предусмотренной в составленном подрядчиком задании. В то же время стороны могут согласовать обязанности подрядчика составить задание и выполнить работу по нему в одном договоре. В этом случае договор подряда будет содержать два вида работы: по составлению задания и по его выполнению. Следует учитывать, что обязанность по выполнению работ, предусмотренных заданием, возникнет у подрядчика только после того, как заказчик утвердит это задание. Содержание, объем и результат работы (то есть предмет договора подряда) описываются в задании. Поэтому пока последнее не согласовано, договор подряда в части работы, указанной в задании, не считается заключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик обязуется составить задание на выполнение работы и передать его заказчику. После утверждения задания заказчиком подрядчик обязуется выполнить работу, обусловленную заданием, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Требования к составлению задания, сроки выполнения работы указаны в Приложении N 1 к договору".
--------------------------------

В договоре подряда необходимо согласовать ряд условий, касающихся работы по составлению задания.

Предмет и сроки выполнения работы по составлению задания
Составление задания является самостоятельным видом подрядной работы (п. 1 ст. 703 ГК РФ), поскольку у него есть отдельный овеществленный результат - изготовленный документ. В связи с этим сторонам необходимо согласовать существенные условия договора подряда на такую работу - предмет договора и сроки выполнения работы (п. 1 ст. 432, ст. ст. 702, 703, 708 ГК РФ).
Чтобы согласовать предмет договора, необходимо предусмотреть:
- обязанность подрядчика составить задание на выполнение работы;
- требования к содержанию задания (общие сведения о работе, которая будет описана в задании). Например, может быть указан вид работы, ее результат, задачи производственной деятельности заказчика, которые предполагается решить с помощью работы подрядчика, потребности заказчика и т.д.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик обязуется составить задание на разработку программного обеспечения для заказчика. Назначение программного обеспечения:
1. Организация документооборота в юридическом отделе заказчика (учет и хранение материалов судебных дел, договоров и иных документов).
2. Планирование работы этого отдела (постановка задач, контроль их исполнения)".
--------------------------------

Срок разработки задания должен быть определен в соответствии со ст. 708 ГК РФ. Подробнее о согласовании сроков выполнения работы см. п. 3 настоящих Рекомендаций.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Сроки составления задания: с "__" _____ ____ г. по "__" _________ г.".
--------------------------------

Если подрядчик нарушает сроки составления задания, заказчик может отказаться от исполнения договора на основании п. 2 ст. 715 ГК РФ. При этом он будет вправе потребовать возврата аванса, уплаты неустойки, обусловленной договором, и процентов по п. 1 ст. 395 ГК РФ (см. Риск подрядчика 1.4.4).

Порядок составления и утверждения задания
Для составления задания подрядчику могут понадобиться от заказчика какие-либо исходные данные (например, цели использования или желаемые технические характеристики результата работы, документация и т.п.), поэтому в его интересах согласовать их перечень, сроки и порядок предоставления заказчиком. В случае просрочки предоставления данных подрядчик может приостановить работу или отказаться от исполнения договора (ст. 719 ГК РФ).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Для составления подрядчиком задания на выполнение работы заказчик обязан предоставить следующие исходные данные: ___________ (указывается перечень сведений, документов, количество экземпляров документов и другие требования к ним) до "___" _____ _____ г. Все сведения и документы должны быть предоставлены в письменной форме с нарочным или письмом с объявленной ценностью с уведомлением о его вручении и описью вложения".
--------------------------------

Рекомендуется установить в договоре порядок передачи разработанного задания. Например, в интересах подрядчика согласовать условие о передаче задания по двустороннему акту, чтобы в случае спора иметь надлежащие доказательства выполнения работы (см. Постановление ФАС Московского округа от 25.02.2009 N КГ-А40/542-09). О согласовании данного условия см. п. 9 "Приемка выполненной по договору подряда работы" настоящих Рекомендаций.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"До истечения конечного срока составления задания оно должно быть передано заказчику. Приемка осуществляется по акту, подписанному сторонами".
--------------------------------

Задание, разработанное подрядчиком, станет частью договора и обязательным для исполнения сторонами только после его утверждения заказчиком (ст. 307, ст. 432, п. 1 ст. 433 ГК РФ). Поэтому в интересах обеих сторон определить сроки и порядок согласования задания заказчиком.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"После получения задания на выполнение работы, составленного подрядчиком, заказчик обязан в течение ______ дней утвердить его или мотивированно отказаться от его согласования. В противном случае подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. Все уведомления осуществляются сторонами в письменной форме с нарочным или письмом с объявленной ценностью с уведомлением о его вручении и описью вложения".
--------------------------------

Прочие условия, касающиеся составления задания
Заказчик может указать в договоре особые требования к оформлению задания, в том числе к использованию графических материалов, наличию ссылок на применяемые технические нормы, научную литературу и др.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Задание должно быть составлено подрядчиком в письменной форме, должно быть обоснованным и содержать ссылки на технические нормы и научную литературу, примененные подрядчиком при разработке задания".
--------------------------------

2. КАЧЕСТВО РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

2.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА О КАЧЕСТВЕ РАБОТЫ
Статья 721 ГК РФ

Условие о качестве работы определяет свойства результата работы, а также те функции, для выполнения которых он должен быть пригоден (ст. 721, п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 703 ГК РФ).

Согласование условия о качестве работы
Для надлежащего согласования этого условия сторонам рекомендуется определить в договоре следующее:
- требования к качеству работы;
- свойства результата работы;
- целевое назначение результата работы.

Если условие о качестве работы не согласовано
При отсутствии в договоре указанного условия качество работы определяется требованиями, обычно предъявляемыми к работе такого рода (п. 1 ст. 721 ГК РФ), либо обязательными требованиями, предусмотренными законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке (п. 2 ст. 721 ГК РФ).

2.1.1. Требования к качеству работы по договору подряда

Стороны могут установить в договоре подряда определенные требования к качеству подлежащей выполнению работы, которые подрядчик будет обязан соблюдать (п. 1 ст. 721 ГК РФ). Эти требования можно отразить в самом договоре либо в приложении к нему.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Качество работы по настоящему договору должно соответствовать следующим требованиям _______ (указываются требования к выполняемой работе)".
--------------------------------

Кроме того, стороны вправе установить в договоре требования к качеству с помощью ссылки на документы по стандартизации, например: национальные стандарты, своды правил, стандарты организаций (ст. 2, п. 1 ст. 4, ст. 14, п. 1 ст. 26 Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации").

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Качество работы должно соответствовать требованиям технических условий (ТУ) ______ (указываются номер, дата, название ТУ). Копия ТУ прилагается к настоящему договору".
--------------------------------

Обязательные требования к качеству работы
Стороны свободны в определении требований к качеству работы (п. 4 ст. 421 ГК РФ), однако подрядчик, являющийся предпринимателем, должен выполнять работу, соблюдая обязательные требования, предусмотренные законом, иными правовыми актами или в предусмотренном ими порядке (п. 2 ст. 721 ГК РФ).
Обязательные требования к качеству работы могут быть установлены в следующих нормативных правовых актах:
- санитарных правилах (см. ст. ст. 1, 13, 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- технических регламентах Российской Федерации (см. ст. ст. 2, 6, 7 Закона о техническом регулировании);
- технических регламентах государств - участников Таможенного союза (в состав Союза, кроме Российской Федерации, входят Казахстан и Республика Беларусь) и документах Европейского союза, если содержащиеся в них требования введены в качестве обязательных Правительством РФ до дня вступления в силу технического регламента в соответствии с п. 6.2 ст. 46 Закона о техническом регулировании. Такие требования предусмотрены, в частности, Постановлением Правительства РФ от 09.03.2010 N 132 "Об обязательных требованиях в отношении отдельных видов продукции и связанных с требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, содержащихся в технических регламентах Республики Казахстан, являющейся государством - участником Таможенного союза";
- технических регламентах Таможенного союза (см., например, Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823.
Если в отношении согласованного сторонами вида работы действует нормативный правовой документ, содержащий обязательные требования, подрядчик должен соблюдать их при выполнении работы независимо от того, предусмотрена такая обязанность договором или нет.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Качество работы должно соответствовать обязательным требованиям, установленным _____________ (указываются номер, дата, наименование нормативного акта)".
--------------------------------

Стороны могут установить в договоре обязанность подрядчика выполнить работу, отвечающую более высоким требованиям по сравнению с обязательными (абз. 2 п. 2 ст. 721 ГК РФ).
В таком случае сдача работы, не соответствующей повышенным требованиям, является нарушением условия договора о качестве и дает заказчику право предъявить подрядчику требования в связи с ненадлежащим качеством работы (ст. 723 ГК РФ).

Если стороны не согласовали требования к качеству работы
Подрядчик должен будет выполнить работу в соответствии с требованиями, обычно предъявляемыми к аналогичной работе, либо обязательными требованиями, предусмотренными законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке (п. п. 1, 2 ст. 721 ГК РФ).
При этом заказчик не вправе будет заявлять о ненадлежащем качестве работы со ссылкой на несоответствие результата работы требованиям документов, которые являются добровольными и применение которых договором не предусмотрено (см. Риск заказчика 2.1.1).

Потребительская ценность результата работ
В законодательстве отсутствует определение потребительской ценности результата работ. Вместе с тем на практике суды зачастую связывают ее с качеством результата работ.

- Судебную практику, подтверждающую, что результат работы, не пригодный для использования по назначению, т.е. не имеющий для заказчика потребительской ценности, не является качественным, см. в Путеводителе по судебной практике.

По вопросу о том, какие требования может предъявить заказчик в связи с ненадлежащим качеством работы (ее результата), см. разд. 2.4 настоящих Рекомендаций.

2.1.2. Свойства результата работы по договору подряда

Если заказчик заинтересован в получении результата с определенными свойствами, следует отразить их в договоре (подробно описать физические качества результата работы, его эксплуатационные показатели, характеристики энергопотребления, надежности, безопасности и т.п.). Необходимые свойства результата работы могут быть указаны также и в чертеже, эскизе или рисунке результата работы. Заказчик может предоставить подрядчику готовое изделие в качестве образца результата работы.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен на момент передачи заказчику обладать следующими свойствами: ________________ (указываются необходимые качественные характеристики результата работы)".
--------------------------------

Заказчику следует учитывать, что в случае согласования индивидуальных свойств результата работы в договоре (например, при изготовлении нестандартных изделий по специально разработанным чертежам) он не сможет предъявить требования, предусмотренные ст. 723 ГК РФ, в том числе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков, ссылаясь на несоответствие результата работы обычно предъявляемым требованиям (см. Риск заказчика 2.1.2).

Определение свойств результата работы с помощью национальных стандартов
Если результатом работы является изготовленная или полученная в процессе переработки продукция, то ее качественные характеристики могут содержаться в таких нормативных документах, как национальные стандарты.
К национальным стандартам относятся, в частности, государственные стандарты (ГОСТы), принятые Госстандартом России до 1 июля 2003 г. (Постановление Госстандарта России от 30.01.2004 N 4 "О национальных стандартах Российской Федерации"). При согласовании свойств результата работы стороны могут сделать ссылку на соответствующий национальный стандарт (ГОСТ).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям ______ (указываются наименование национального стандарта (ГОСТа), его номер и дата)".
--------------------------------

Требования указанных стандартов применяются в добровольном порядке (ст. 2, п. 1 ст. 4, п. 1 ст. 26 Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации"). При этом в силу п. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" до принятия соответствующих технических регламентов они подлежат обязательному исполнению в части защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей; обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.

Внимание! Подрядчику следует учитывать, что если экспертизой будет установлено несоответствие результата работы требованиям нормативных документов, в частности СНиПа, ГОСТа, то работа в целом может быть признана некачественной.

- Судебную практику, подтверждающую, что результат работы, выполненной с нарушением требований ГОСТа, признается некачественным, см. в Путеводителе по судебной практике.

Если стороны не указали в договоре свойства результата работы
Подрядчик должен передать заказчику результат работы, обладающий свойствами, которые определяются обычными требованиями (п. 1 ст. 721 ГК РФ). В таком случае потребительская ценность результата работы может оказаться ниже той, на которую рассчитывал заказчик при заключении договора.
При несоответствии результата работы обычным требованиям подрядчик будет нести установленную ст. 723 ГК РФ ответственность за ненадлежащее качество работы. В частности, заказчик вправе будет отказаться от принятия и оплаты выполненной работы либо расторгнуть договор в судебном порядке в связи с его существенным нарушением подрядчиком и взыскать причиненные убытки (см. Риск подрядчика 2.1.1).

2.1.3. Целевое назначение результата
работы по договору подряда

Если заказчик намерен использовать результат работы по определенному назначению, стороны могут указать его в договоре. В этом случае подрядчик должен будет обеспечить пригодность результата работы для согласованного использования (п. 1 ст. 721, п. 1 ст. 723 ГК РФ).
При наличии у результата работы (продукции, изделия) нескольких назначений в зависимости от применяемых при его изготовлении материалов подрядчику рекомендуется выяснить у заказчика точное назначение результата работы и указать его в договоре. Это нужно для правильного выбора материала.
Подробнее о согласовании условия о предоставлении материалов и оборудования подрядчиком см. п. 4.1 настоящих Рекомендаций.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Результат работы должен быть пригоден для использования по следующему назначению: ________________".
--------------------------------

Если стороны не согласовали целевое назначение результата работы
Подрядчик должен передать заказчику результат, пригодный для обычного использования результата работы такого рода (п. 1 ст. 721 ГК РФ).
При этом он несет риск того, что из-за выбранного им материала результат работы окажется непригодным для использования, которое подразумевал заказчик. В таком случае на подрядчика может быть возложена ответственность за ненадлежащее качество работы (ст. 723 ГК РФ), несмотря на то что в договоре не была указана цель использования результата работы (см. Риск подрядчика 2.1.2).

2.2. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статьи 721, 722, 724, 725 ГК РФ

Гарантия качества работы заключается в том, что результат работы должен соответствовать условиям договора о качестве не только в момент передачи заказчику, но и в течение всего гарантийного срока, предусмотренного для результата работы законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота (п. 1 ст. 721, п. 1 ст. 722 ГК РФ).

Согласование условия о гарантии качества работы
Для согласования условия о гарантии качества работы сторонам необходимо определить следующее:
- гарантийный срок и порядок его исчисления;
- объем гарантии качества результата работы;
- сроки и порядок гарантийного обслуживания результата работы.

Если условие о гарантии качества работы не согласовано
Подрядчик будет нести ответственность за ненадлежащее качество работы, в том числе за недостатки результата работы, в соответствии со ст. 723 ГК РФ при условии, что эти недостатки обнаружены заказчиком в течение гарантийного срока, предусмотренного законом, иным правовым актом или обычаями делового оборота (п. 1 ст. 722 ГК РФ), либо в течение разумного срока, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы (п. 2 ст. 724 ГК РФ).

2.2.1. Гарантийный срок по договору подряда
и порядок его исчисления

Гарантийный срок - это срок, в течение которого подрядчик обязуется обеспечить соответствие качества результата работы условиям договора и несет ответственность перед заказчиком за выявленные недостатки результата работы (п. 1 ст. 722, п. 3 ст. 724 ГК РФ).
Согласуя условие о продолжительности такого срока, нужно учитывать следующее. Если он будет составлять менее двух лет, заказчик все равно сможет предъявить претензии в связи с недостатками результата работы, обнаруженными по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком. Однако в соответствии с п. п. 4, 5 ст. 724 ГК РФ заказчик будет обязан доказать, что недостатки возникли до передачи ему результата работы или по причинам, возникшим до этого момента (см. Риск заказчика 2.2.1).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"На результат работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью пять лет с момента исполнения подрядчиком обязанности передать результат работы заказчику".
--------------------------------

При согласовании гарантийного срока в договоре подряда необходимо учитывать, что такой срок может быть предусмотрен законом, иным правовым актом (например, ГОСТ Р 51968-2002 "Термосы бытовые с сосудами из стекла. Общие технические условия", РД 64-800-01 "Тара потребительская полимерная для лекарственных средств. Общие технические условия", РД 45.286-2002 "Аппаратура волоконно-оптической системы передачи со спектральным разделением. Технические требования") или обычаями (п. 1 ст. 722 ГК РФ).
Установление гарантийного срока влияет на порядок исчисления специального срока исковой давности для требований о ненадлежащем качестве работы (п. 1 ст. 725, п. 1 ст. 197 ГК РФ). При согласованном гарантийном сроке течение срока исковой давности начинается со дня заявления о недостатках, если оно сделано в пределах гарантийного срока (п. 3 ст. 725 ГК РФ).

Если гарантийный срок договором не установлен
Результат работы должен соответствовать условиям договора о качестве в течение гарантийного срока, предусмотренного законом, иным правовым актом или обычаями делового оборота (п. 1 ст. 722 ГК РФ). Если такой срок не установлен, то результат работы должен быть пригоден для использования по назначению в течение разумного срока с момента его передачи заказчику (п. 1 ст. 721 ГК РФ).
При отсутствии гарантийного срока заказчик вправе предъявить требования в связи с недостатками работы, только если они обнаружены в пределах двух лет со дня передачи результата работы (п. п. 1, 3 ст. 723, п. 2 ст. 724 ГК РФ).
Если недостатки обнаружены в пределах установленного п. 2 ст. 724 ГК РФ срока, заказчик может осуществить защиту своих прав в судебном порядке только в течение срока исковой давности, исчисляемого согласно п. 1 ст. 725 ГК РФ, т.е. в течение одного года с момента, когда он узнал или должен был узнать о ненадлежащем качестве выполненной работы, а также о том, кто является надлежащим ответчиком по иску (п. 2 ст. 197, п. 1 ст. 200 ГК РФ). При пропуске этого срока заказчику может быть отказано в иске по заявлению подрядчика (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 29.01.2008 N Ф03-А73/07-1/6286).

Начало гарантийного срока
Стороны могут определить в договоре момент, с которого начинает течь гарантийный срок (п. 5 ст. 724 ГК РФ). Это может быть:
- момент принятия результата работы заказчиком;
- момент, когда результат работы должен быть принят заказчиком согласно условиям договора;
- истечение определенного периода с момента принятия результата работы заказчиком;
- момент передачи результата работы (продукции, изделий) конечному потребителю, использующему его по прямому назначению (при дальнейшей продаже результата работы заказчиком);
- момент ввода результата работы (например, оборудования) в эксплуатацию и др.
Оптимальным для сторон началом течения гарантийного срока можно считать момент, когда результат выполненной работы принят или должен быть принят заказчиком, как и определено в п. 5 ст. 724 ГК РФ. Этот же момент может быть согласован в договоре.

Внимание! Необходимо помнить, что независимо от договоренности сторон гарантийный срок не начнет течь, если заказчик не может использовать результат работы по причинам, которые зависят от подрядчика (п. 6 ст. 724 ГК РФ, п. 2 ст. 471 ГК РФ), например ввиду непредставления документации на изготовленную продукцию или иной информации в соответствии со ст. 726 ГК РФ.

Если начало течения гарантийного срока не установлено
Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком (п. 5 ст. 724 ГК РФ). Отсутствие акта о приемке выполненных работ не освобождает подрядчика от ответственности за их ненадлежащее выполнение, а устанавливает иной порядок исчисления гарантийного срока (см. Постановление ФАС Московского округа от 22.09.2008 N КГ-А40/8390-08). Например, этот срок может быть исчислен с момента фактической передачи результата. Данный момент может быть определен исходя из момента полной оплаты работы, если по условиям договора окончательный расчет осуществляется после выполнения работ.

- Судебную практику, подтверждающую, что гарантийный срок исчисляется с момента фактической передачи, определенного моментом окончательной оплаты работы, если по условиям договора работа оплачивается после ее выполнения, см. в Путеводителе по судебной практике.

В случае несвоевременного принятия заказчиком результата работы гарантийный срок начинается с даты приемки, указанной в договоре, т.е. до того, как заказчик приступит к использованию результата работы.

Продление гарантийного срока
В соответствии с п. 6 ст. 724 ГК РФ к исчислению гарантийного срока по договору подряда применяются правила абз. 2 п. 2 ст. 471 ГК РФ, т.е. гарантийный срок продлевается на период, когда заказчик не мог пользоваться результатом работы из-за обнаруженных в нем недостатков.
Однако стороны вправе установить в договоре собственный порядок продления гарантийного срока или отменить возможность его продления.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Гарантийный срок, установленный договором, продлевается на период, когда заказчик не мог пользоваться результатом работы из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что подрядчик был извещен заказчиком об обнаружении недостатков в письменной форме в срок, предусмотренный настоящим договором".
--------------------------------

Гарантийный срок на результат работы, предоставляемый взамен некачественного результата работы
В соответствии с п. 4 ст. 471 ГК РФ, положения которого применяются к исчислению гарантийного срока по договорам подряда (п. 6 ст. 724 ГК РФ), на результат работы, переданный подрядчиком после выполнения работы заново в порядке п. 2 ст. 723 ГК РФ, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на первоначальный результат работы. Однако стороны могут изменить (увеличить, уменьшить) этот срок.

Действие гарантийных обязательств после расторжения договора
При расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства (п. 2 ст. 453 ГК РФ).
Условие о гарантийных обязательствах относится к числу условий, применение которых после расторжения договора предполагается исходя из их природы. При этом соглашением сторон может быть установлено иное (п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения договора"). Следовательно, при отсутствии такого соглашения заказчик в течение гарантийного срока вправе требовать, чтобы подрядчик выполнил гарантийные обязательства, даже если договор подряда расторгнут.

- Судебную практику, подтверждающую указанный вывод, см. в Путеводителе по судебной практике.

2.2.2. Объем гарантии качества результата
работы по договору подряда

Согласно п. 2 ст. 722 ГК РФ гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы. Однако в договоре стороны могут установить, что гарантия не распространяется на какие-либо отдельные части результата работы (детали, комплектующие изготовленной продукции и др.).
Объем гарантии может быть зафиксирован в документах, относящихся к результату работы, например в гарантийных талонах, гарантийных сертификатах. В таком случае в договоре нужно сделать ссылку на эти документы.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Гарантия не распространяется на следующие детали (части результата работы): ________________ (указывается перечень или приводится ссылка на документ, в котором содержится этот перечень)".
--------------------------------

Если в договоре не указан объем гарантии
В таком случае согласно п. 2 ст. 722 ГК РФ подрядчик будет обязан в течение гарантийного срока выполнить требования заказчика, связанные с ненадлежащим качеством как всего результата работы, так и отдельных его частей (ст. 723 ГК РФ).

2.2.3. Сроки устранения недостатков в течение гарантийного
срока по договору подряда и порядок возврата результата
работы ненадлежащего качества

Стороны могут установить в договоре сроки, в которые подрядчик должен удовлетворить претензии по качеству работы, предъявляемые заказчиком в течение гарантийного срока. В частности, в договоре может быть предусмотрен конкретный срок для безвозмездного устранения подрядчиком недостатков результата работы в соответствии с п. 1 ст. 723 ГК РФ.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик обязан устранить недостатки результата работы в течение ___________ рабочих дней с момента предъявления соответствующих требований заказчиком".
--------------------------------

Согласно п. 2 ст. 723 ГК РФ заказчик обязан вернуть подрядчику ранее полученный результат работы, если подрядчик вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнит работу заново и если по характеру работы такой возврат возможен. Однако порядок возврата результата работы ненадлежащего качества и распределения расходов на его возврат указанной нормой не установлен. Поэтому такой порядок следует предусмотреть в договоре.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Возврат некачественного результата работы в соответствии с п. 2 ст. 723 ГК РФ осуществляется силами и за счет подрядчика".
--------------------------------

2.3. СРОКИ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА
РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статьи 722, 724 ГК РФ

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, при условии, что недостатки обнаружены в течение:
- в течение срока для обнаружения недостатков, установленного договором (п. п. 1, 2 ст. 724 ГК РФ);
- гарантийного срока, предусмотренного законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота (п. 3 ст. 724, п. 1 ст. 722 ГК РФ);
- в пределах двух лет с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком, если гарантийный срок составляет менее двух лет и он истек (п. 4 ст. 724 ГК РФ);
- в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота не предусмотрен гарантийный или иной срок обнаружения недостатков (п. п. 1, 2 ст. 724, п. 1 ст. 722 ГК РФ).

Согласование срока обнаружения недостатков в результате работы
В силу диспозитивной нормы п. 1 ст. 724 ГК РФ стороны могут согласовать любую продолжительность срока для обнаружения ненадлежащего качества результата работы.
Однако такое условие защищает в большей степени интересы подрядчика, поскольку он не будет нести ответственность за недостатки, выявленные по истечении определенного договором срока (п. п. 1, 2 ст. 724 ГК РФ).
Сторонам следует учитывать, что положения ст. 724 ГК РФ не позволяют установить одновременно и срок обнаружения недостатков по п. 1 ст. 724 ГК РФ, и гарантийный срок. В случае согласования собственного срока обнаружения недостатков (при условии, что гарантийный срок не установлен) положения п. 4 ст. 724 ГК РФ о предельном сроке обнаружения недостатков к отношениям сторон применяться не будут (п. 1 ст. 724 ГК РФ). Если же договором или законом определен гарантийный срок на результат работы, сроки обнаружения недостатков будут рассчитываться по правилам п. п. 3, 4 ст. 724 ГК РФ.
Подробнее о согласовании гарантийного срока см. п. 2.2.1 настоящих Рекомендаций.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение ___________ (указывается период времени) с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком".

"Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение срока службы результата работы".
--------------------------------

Если стороны не установили в договоре срок обнаружения ненадлежащего качества результата работы в соответствии с п. 1 ст. 724 ГК РФ
Заказчик вправе будет предъявить претензии в связи с недостатками результата работы, если недостатки обнаружены в сроки, предусмотренные п. п. 2, 3, 4 ст. 724 ГК РФ.

2.4. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА В СВЯЗИ С НЕНАДЛЕЖАЩИМ КАЧЕСТВОМ
РАБОТЫ (ЕЕ РЕЗУЛЬТАТА) ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статья 723 ГК РФ

Общий перечень требований, одно из которых заказчик вправе предъявить при обнаружении недостатков результата работы, установлен п. 1 ст. 723 ГК РФ:
- безвозмездное устранение недостатков в разумный срок.
Критерии для определения разумного срока устранения недостатков по договору подряда законодательством не установлены. Если такой срок не закреплен договором, заказчик устанавливает его самостоятельно. Рекомендуем исходить из того, что разумный срок должен быть, с одной стороны, достаточным для того, чтобы подрядчик успел устранить недостатки, а с другой - не слишком продолжительным, чтобы заказчик не утратил интерес в получении результата работы;
- соразмерное уменьшение установленной за работу цены;
- возмещение расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре (ст. 397 ГК РФ).
Последствия выполнения работ ненадлежащего качества определены в п. п. 2 - 5 ст. 723 ГК РФ.
Заказчик, обнаруживший недостатки, не может предъявить подрядчику одновременно несколько требований, указанных в п. 1 ст. 723 ГК РФ (например, о безвозмездном устранении недостатков и соразмерном уменьшении цены работы).

- Судебную практику, подтверждающую, что заказчик вправе реализовать только одно из предусмотренных п. 1 ст. 723 ГК РФ правомочий, см. в Путеводителе по судебной практике.

Следует учитывать, что в судебной практике удовлетворение требования, определенного п. 1 ст. 723 ГК РФ, не препятствует взысканию согласованной неустойки. Так, заказчик, который предъявил требование безвозмездно устранить недостатки в разумный срок, являющееся самостоятельным способом защиты, вправе потребовать с подрядчика неустойку, предусмотренную договором в случае невозможности эксплуатировать результат работ в течение гарантийного срока в связи с их ненадлежащим качеством.

- Судебную практику, подтверждающую указанный вывод, см. в Путеводителе по судебной практике.

Подробнее о неустойке см. п. 11.3 настоящих Рекомендаций.

Внимание! Если помимо некачественно выполненных работ подрядчик просрочил исполнение своего обязательства, вследствие чего это исполнение утратило интерес для заказчика, то последний вправе отказаться от принятия результата работ и потребовать возмещения убытков в соответствии с п. 2 ст. 405 ГК РФ (Постановление Президиума ВАС РФ от 17.12.2013 N 9223/13). Подробнее об основаниях для возмещения убытков см. п. 11.1.1 настоящих Рекомендаций.

В силу диспозитивности нормы п. 1 ст. 723 ГК РФ стороны вправе:
- изменить перечень и условия удовлетворения требований заказчика, предусмотренных п. 1 ст. 723 ГК РФ;
- установить право заказчика устранять недостатки в выполненной работе (ее результате) самостоятельно с целью возмещения расходов на устранение недостатков.

Если условие о требованиях заказчика в связи с ненадлежащим качеством работы не согласовано
Заказчик вправе по своему выбору предъявить одно из требований, предусмотренных п. 1 ст. 723 ГК РФ. При несогласовании условия о праве заказчика самостоятельно устранять недостатки выполненных работ он не вправе будет требовать возмещения расходов на их устранение (см. Риск заказчика 2.4.3).

2.4.1. Изменение перечня требований заказчика,
предусмотренных п. 1 ст. 723 ГК РФ, и условий
их удовлетворения в рамках договора подряда

Согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ стороны могут изменить перечень требований заказчика, связанных с ненадлежащим качеством работы, или условия их удовлетворения подрядчиком.
В частности, стороны могут расширить перечень требований, которые вправе предъявлять заказчик в соответствии с п. 1 ст. 723 ГК РФ, например установить право требовать безвозмездной замены результата работы (выполнения работы заново).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"В случае обнаружения недостатков в результате работы заказчик вправе по своему выбору потребовать от подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- безвозмездной замены результата работы (выполнения работы заново);
Вместо предъявления указанных требований заказчик вправе устранить недостатки самостоятельно и потребовать возмещения понесенных в связи с этим расходов".
--------------------------------

Кроме того, стороны могут исключить применение одного из требований, предусмотренных в п. 1 ст. 723 ГК РФ. Так, при наличии в договоре условия о том, что подрядчик обязан устранить выявленные недостатки по их обнаружении в определенном порядке, суды указывают, что заказчик не вправе предъявлять иные требования, установленные п. 1 ст. 723 ГК РФ (см. Риск заказчика 2.4.1).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"В случае обнаружения заказчиком недостатков в результате работы он вправе предъявить только одно из следующих требований:
- о безвозмездном устранении недостатков в разумный срок;
- о возмещении своих расходов на устранение недостатков".
--------------------------------

Также стороны могут установить иной порядок устранения недостатков подрядчиком, например указать, что недостатки устраняются не безвозмездно, а с частичной оплатой заказчиком стоимости работ.

- Судебную практику, подтверждающую возможность согласования иного по сравнению с предусмотренным ст. 723 ГК РФ порядка устранения недостатков работ, см. в Путеводителе по судебной практике.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик по требованию заказчика должен устранить выявленные недостатки в срок не более ___________ дней с момента выявления недостатка. При этом заказчик возмещает подрядчику _________% стоимости следующих работ _______________________________".
--------------------------------

Если условие об изменении перечня и условий удовлетворения требований заказчика, предусмотренных п. 1 ст. 723 ГК РФ, не согласовано
Заказчик вправе предъявить одно из требований, предусмотренных п. 1 ст. 723 ГК РФ по своему выбору.

2.4.2. Право заказчика требовать возмещения
расходов на устранение недостатков результата
работы в рамках договора подряда

Для того чтобы заказчик получил право на возмещение расходов, понесенных на устранение им недостатков в выполненной работе (ее результате), стороны в соответствии с п. 1 ст. 723 ГК РФ должны согласовать в договоре его право устранять недостатки. При этом в договоре целесообразно установить, что заказчик может устранить недостатки как своими силами, так и с привлечением третьих лиц.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Заказчик вправе устранить обнаруженные недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения подрядчиком расходов на устранение недостатков".
--------------------------------

При согласовании данного условия необходимо учитывать, что при ненадлежащем качестве работы заказчик, не обращаясь к подрядчику с требованием о безвозмездном устранении недостатков в разумный срок или о соразмерном уменьшении установленной за работу цены, сможет устранить недостатки работы (ее результата), а затем потребовать от подрядчика возмещения расходов на их устранение (см. Риск подрядчика 2.4.1). При этом уведомление подрядчика о выявленных недостатках обязательно (п. п. 1, 4 ст. 720 ГК РФ).
Условие о праве заказчика требовать возмещения расходов на устранение недостатков результата работы предполагает в том числе компенсацию подрядчиком расходов, которые могут быть произведены в будущем в соответствии с п. 1 ст. 393, п. 2 ст. 15 ГК РФ.

- Судебную практику, подтверждающую, что заказчик вправе требовать возмещения будущих затрат на устранение недостатков работы, см. в Путеводителе по судебной практике.

В то же время существует позиция суда, согласно которой заказчик вправе требовать возмещения лишь реально произведенных затрат на устранение недостатков результата работы (см. Постановление ФАС Московского округа от 13.06.2006 N КГ-А40/5237-06).
Стороны также могут ограничить право заказчика на устранение недостатков путем включения в договор условия о том, что он может воспользоваться этим правом, только если недостатки не были устранены подрядчиком в согласованные сроки. В этом случае заказчик, устранивший недостатки без обращения к подрядчику с соответствующим требованием, лишается права на возмещение расходов (см. Риск заказчика 2.4.2).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Заказчик вправе устранять выявленные в результате работы недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц только в случае, если их не устранил подрядчик в согласованные сроки. Заказчик, устранивший недостатки без согласования с подрядчиком, лишается права на возмещение расходов".
--------------------------------

Если стороны не согласовали право заказчика устранять недостатки в выполненной работе
Заказчик не вправе потребовать возмещения своих расходов на устранение недостатков работы и ее результата в силу абз. 4 п. 1 ст. 723 ГК РФ (см. Риск заказчика 2.4.3).

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статья 708 ГК РФ

Условие о сроках выполнения работы определяет период, в течение которого подрядчик обязан выполнить работу, в том числе моменты начала и окончания работы в целом, а также ее отдельных этапов (п. 1 ст. 708 ГК РФ).

Согласование условия о сроках выполнения работы
Условие о сроках выполнения работы является одним из основных условий договора подряда, которые стороны должны согласовать. По смыслу норм гл. 37 ГК РФ договор подряда заключается с целью получить конечный результат, поэтому сторонам важно договориться о том, когда этот результат должен быть достигнут.
Закон предусматривает несколько сроков, указываемых в договоре подряда (п. 1 ст. 708 ГК РФ): срок начала и окончания выполнения работы, а также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Чтобы согласовать данное условие надлежащим образом, сторонам необходимо:
- указать начальный и конечный сроки выполнения работы, которые в силу положений абз. 2 п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 708 ГК РФ признаются существенным условием договора;
- установить промежуточные сроки (по желанию сторон в случае их договоренности о выполнении работы в несколько этапов);
- учитывать правила, установленные в ст. ст. 190, 191, 314 ГК РФ.

Если сроки выполнения работы не согласованы
В случае когда не определены начальный и (или) конечный сроки, суды могут признать договор незаключенным ввиду несогласования его существенного условия (п. 1 ст. 708, п. 1 ст. 432 ГК РФ) и не применить положения договора к отношениям сторон. Промежуточные сроки существенным условием не являются, поэтому их несогласование не влияет на заключенность договора.
В то же время сторона, которая полностью или частично приняла исполнение по договору или другим образом подтвердила его действие, не вправе требовать признания договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств противоречит принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ).
Подробнее о последствиях несогласования сроков см. п. п. 3.1 - 3.3 настоящих Рекомендаций.

3.1. НАЧАЛЬНЫЙ И КОНЕЧНЫЙ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статья 708 ГК РФ

Начальный срок определяет момент, когда подрядчик должен приступить к выполнению работы.
Конечный срок определяет момент, когда подрядчик обязан завершить работу.

Согласование начального и конечного сроков выполнения работы
Начальный и конечный сроки признаются судами существенным условием договора подряда исходя из положений ст. 432, п. 1 ст. 708 ГК РФ. Ранее в судебной практике встречался и противоположный подход, который в настоящее время не применяется.

- Судебную практику, подтверждающую наличие двух позиций по вопросу о существенности условия о сроках выполнения работ, см. в Путеводителе по судебной практике.

Таким образом, сторонам следует указать в договоре оба срока, чтобы подписанный ими договор считался заключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Сроки устанавливаются по правилам ст. ст. 190, 191, 314 ГК РФ (подробнее об этом см. п. 3.3 настоящих Рекомендаций).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть выполнены в следующие сроки:
начало выполнения работы - не позднее "___" _________ 20_ г.,
окончание выполнения работы - не позднее "____" _________ 20_ г.".
--------------------------------

Можно ли в качестве конечного срока выполнения работ указать дату утверждения заказчиком акта сдачи-приемки без претензий?
Ответ: Нет, нельзя.
Обоснование: Подобное условие, в случае когда работы по договору оплачиваются после окончательной сдачи их результатов, дает заказчику возможность отложить оплату по сути бессрочно. Таким образом, оплата выполненных работ ставится в зависимость исключительно от его усмотрения, т.е. от утверждения им акта сдачи-приемки без претензий. Это превращает возмездный договор в безвозмездный, что противоречит правовой природе договора подряда (ст. 702 ГК РФ).

- Судебную практику, подтверждающую, что оплата работ по договору подряда не может быть поставлена в зависимость от утверждения заказчиком акта сдачи-приемки без претензий, см. в Путеводителе по судебной практике.

Данное условие договора будет противоречить ст. 702 ГК РФ и, следовательно, может быть признано недействительным на основании ст. 168 ГК РФ. Исходя из п. 1 данной статьи условие является оспоримым, если в законе не предусмотрены иные последствия нарушения, не связанные с недействительностью. Законом могут быть установлены исключения из правила об оспоримости. В частности, в силу п. 2 ст. 168 ГК РФ договорное условие ничтожно, если посягает на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц и при этом в законе не указано, что оно оспоримо или должны применяться иные последствия, не связанные с недействительностью.

Внимание! Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что в тех случаях, когда условия договора противоречат существу законодательного регулирования соответствующего вида обязательства, он может быть квалифицирован как ничтожный полностью или в части на основании п. 2 ст. 168 ГК РФ даже при отсутствии в законе специальной оговорки о ничтожности такого договора или условия (подтверждение данного вывода см. в Правовых позициях высших судов). Согласование конечного срока выполнения работ указанием на дату утверждения заказчиком акта сдачи-приемки без претензий противоречит существу законодательного регулирования договора подряда, в том числе положениям ст. ст. 702, 711 ГК РФ, которые возлагают на заказчика обязанность оплатить результат работ. Таким образом, указанное условие может быть квалифицировано как ничтожное на основании п. 2 ст. 168 ГК РФ.

В случае признания указанного условия недействительным оно в силу п. 1 ст. 167, ст. 180 ГК РФ не будет порождать юридических последствий для сторон. Соответственно, конечный срок выполнения работ будет считаться несогласованным.

Внимание! Указание в договоре срока его действия (даты вступления в силу и окончания его действия) не является согласованием начального и конечного сроков выполнения работы.

- Судебную практику, подтверждающую, что срок действия договора не является сроком выполнения работы, см. в Путеводителе по судебной практике.

Если начальный и (или) конечный сроки выполнения работы не согласованы
Договор может быть признан незаключенным ввиду несогласования его существенного условия (п. 1 ст. 708, п. 1 ст. 432 ГК РФ). В этом случае подрядчик не сможет обязать заказчика принять и оплатить выполненную работу (см. Риск подрядчика 3.1.1) и должен будет вернуть аванс и уплатить проценты на сумму долга (за пользование чужими денежными средствами) на эту сумму (см. Риск подрядчика 3.1.3).
Кроме того, стороны не смогут взыскать неустойку за нарушение условий договора (см. Риск подрядчика 3.1.2, Риск заказчика 3.1.1).
Такие же последствия возникают при несогласовании только начала (см. Риск заказчика 3.1.2, Риск подрядчика 3.1.4) или только окончания выполнения работы (см. Риск заказчика 3.1.3, Риск подрядчика 3.1.5).
Однако суды признают договор заключенным, если в отсутствие какого-либо существенного условия стороны совместными действиями по исполнению договора устранили необходимость согласовывать такое условие. Подтверждение данного вывода см. в Правовых позициях высших судов.
Подход, выработанный ранее в судебной практике, с 1 июня 2015 г. нашел отражение в законодательстве: сторона, которая полностью или частично приняла исполнение по договору или другим образом подтвердила его действие, не вправе требовать признания договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств противоречит принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ).
Указанное положение означает, что действия заказчика, который принял работы, но не оплатил их, а затем при взыскании с него задолженности и неустойки в суде заявил о незаключенности договора ввиду несогласования сроков выполнения работ, могут быть расценены как недобросовестное поведение (попытка избежать ответственности за нарушение обязательств по оплате). Соответственно, такое заявление, скорее всего, не будет принято во внимание с учетом положений п. 3 ст. 432 ГК РФ.

3.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СРОК (СРОКИ) ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статья 708 ГК РФ

Промежуточный срок (сроки) определяет момент завершения подрядчиком отдельных этапов работы (выполнения отдельных видов работ).

Согласование промежуточного срока (сроков) выполнения работы
Согласование промежуточного срока (сроков) не является обязательным для сторон, однако в интересах заказчика установить его, если работы носят длительный или сложный характер и существует необходимость в контроле хода и качества работы путем приемки ее промежуточных результатов (ст. 715 ГК РФ).
Для согласования промежуточных сроков стороны должны выделить конкретные этапы работы (с определением перечня и объема работы по каждому из них) и с учетом сроков начала и окончания работы указать срок окончания каждого этапа. Сроком завершения последнего этапа работы будет являться конечный срок выполнения всей работы.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик обязуется приступить к выполнению работы не позднее 1 февраля 2023 г. и завершить ее в срок до 28 апреля 2023 г. При этом подрядчик обязуется соблюдать сроки окончания отдельных этапов работы:
I этап. Изготовление оборудования по технической документации заказчика - до 1 марта 2023 г.;
II этап. Монтаж оборудования в помещении заказчика - до 15 марта 2023 г.;
III окончательный этап. Пуск и наладка оборудования - до 28 апреля 2023 г.".
--------------------------------

При согласовании данного условия подрядчику следует учитывать, что он может быть привлечен к ответственности за нарушение промежуточного срока (сроков). В частности, заказчик может потребовать взыскания неустойки (ст. 330 ГК РФ) или возмещения причиненных таким нарушением убытков (ст. 393 ГК РФ). Однако стороны могут исключить ответственность подрядчика за нарушение промежуточного срока (сроков) выполнения работы в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 708 ГК РФ. Подробнее по данному вопросу см. п. 11 "Ответственность сторон по договору подряда" настоящих Рекомендаций.

Если промежуточный срок (сроки) выполнения работы не согласован
В таком случае подрядчик будет обязан завершить всю работу до истечения конечного срока ее выполнения, причем отдельные этапы работы (отдельные виды работы) должны выполняться с таким расчетом, чтобы обеспечить завершение работы в указанный срок (п. 1 ст. 708, п. 2 ст. 715 ГК РФ).
Если стороны согласовали в договоре или приложениях к нему еще какие-либо сроки (помимо начала и окончания работы), но не связали их с выполнением конкретных этапов работ (не определили эти этапы), то такие сроки не считаются промежуточными по смыслу п. 1 ст. 708 ГК РФ. В случае их нарушения заказчик не вправе будет потребовать от подрядчика уплаты неустойки за просрочку выполнения работы, если при этом не нарушен конечный срок (см. Риск заказчика 3.2.1).

3.3. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статьи 190 - 194, 314, 327.1 ГК РФ

Сроки выполнения работы устанавливаются с учетом правил, предусмотренных ст. ст. 190, 191 ГК РФ, и могут быть определены следующим образом:
- календарными датами;
- событием, которое должно неизбежно наступить;
- истечением периода, начало которого может быть определено календарной датой или наступлением согласованного события.
Если срок выполнения работы определяется периодом времени, то стороны могут также установить, что данный период исчисляется с момента исполнения обязанностей заказчиком или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором (п. 1 ст. 314 ГК РФ).

3.3.1. Определение сроков выполнения работ
по договору подряда календарными датами

При определении сроков выполнения работы календарными датами необходимо согласовать даты начала и окончания выполнения работ, указав число, месяц и год.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Начало выполнения работ "___" __________ 20__ г.
Окончание выполнения работ "___" __________ 20__ г.".
--------------------------------

Включается ли дата окончания работ в срок их выполнения, если в согласованной формулировке использован предлог "до"?
Ответ: Нет, не включается.
Обоснование: Суды исходят из того, что применение предлога "до" подразумевает: в установленный срок не включается дата, следующая после указанной в договоре. Последним днем срока в этом случае признается дата, предшествующая согласованной в договоре (см. судебные акты, в которых сделан аналогичный вывод: по договору аренды - Постановление Президиума ВАС РФ от 14.01.2003 N 9523/02, по договору возмездного оказания услуг - Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.01.2016 N Ф05-18550/2015, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 07.07.2014 по делу N А46-9599/2013).
Например, в договоре установлено: работы должны быть выполнены до 20 июня 2023 г., и нет уточнения, что эта дата включается в срок. Следовательно, работы необходимо завершить 19 июня 2023 г., в противном случае срок выполнения работ будет нарушен и заказчик сможет предъявить подрядчику требование о взыскании неустойки (ст. 330, п. 1 ст. 708 ГК РФ).

3.3.2. Определение сроков выполнения работ
по договору подряда указанием на событие

Сроки выполнения работ могут быть определены путем указания на событие, которое должно неизбежно наступить (ст. 190 ГК РФ).
Таковым признается событие, наступление которого не зависит от воли и действий сторон (см. соответствующее толкование ст. 190 ГК РФ в п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой").
Данный способ определения срока мало распространен, так как сложно подобрать событие, обладающее всеми указанными признаками неизбежности.
На практике стороны часто согласовывают сроки путем указания не на события, а на действия сторон или иных лиц. Подробнее см. п. 3.3.3 настоящих Рекомендаций.

3.3.3. Определение сроков выполнения работ
по договору подряда периодом времени

Для согласования условия рекомендуется указать период времени, в течение которого должны быть выполнены работы (в силу ч. 1 ст. 190 ГК РФ он исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами), а также момент, после которого начинается отсчет этого периода. Такой момент может быть определен:
- календарной датой (ст. 191 ГК РФ);

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик должен приступить к выполнению работы по договору не позднее "___" ______ 20_ г. и завершить ее в течение 30 рабочих дней начиная со дня, следующего за указанной датой".
--------------------------------

- наступлением события (ст. ст. 190, 191 ГК РФ);
- исполнением обязанности заказчиком или наличием иного обстоятельства, предусмотренного законом или договором (п. 1 ст. 314 ГК РФ). В этом случае момент начала и окончания срока выполнения работ ставится в зависимость от волеизъявления заказчика либо наступления иных обстоятельств.
Статья 314 ГК РФ в редакции, позволяющей определить начало периода указанием на такие обстоятельства, действует с 1 июня 2015 г.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Срок выполнения работ составляет 30 рабочих дней с момента внесения заказчиком суммы аванса".

"Работы по замене остекления в помещении должны быть выполнены подрядчиком в течение 10 рабочих дней со дня регистрации права собственности заказчика на это помещение".
--------------------------------

Считается ли согласованным срок выполнения работ, который определен в договоре до 1 июня 2015 г. указанием на действия сторон, в частности заказчика?
Ответ: Да, считается.
Обоснование: До 1 июня 2015 г. Гражданский кодекс РФ не содержал норм, из которых можно было сделать вывод о возможности определения срока путем указания на действия лиц. Однако Президиум ВАС РФ признал такое условие о сроке допустимым. Он указал следующее: сроки выполнения работ считаются согласованными в случае, если начало срока определено указанием на действия заказчика (например, уплату аванса) или иных лиц, поскольку предполагается, что такие действия будут совершены в срок, предусмотренный договором, а при его отсутствии - в разумный срок (согласно ст. 314 ГК РФ в редакции, действовавшей до 1 июня 2015 г.). Следовательно, неопределенность в сроках выполнения работ отсутствует. Подтверждение данного вывода см. в Правовых позициях высших судов.
До того как Президиум ВАС РФ дал приведенные разъяснения, суды по-разному решали вопрос о том, является ли надлежащим, в том числе в связи с отсутствием признаков неизбежности, согласование срока с момента:
- уплаты заказчиком аванса (см. Риск заказчика 3.3.1, Риск подрядчика 3.3.1);
- выполнения заказчиком иных действий: передачи объекта для производства работы, согласования, подписания документов и др. (см. Риск заказчика 3.3.2, Риск подрядчика 3.3.2);
- совершения каких-либо действий третьим лицом, не являющимся стороной договора (см. Риск заказчика 3.3.3, Риск подрядчика 3.3.3);
- подписания договора (см. Риск заказчика 3.3.4, Риск подрядчика 3.3.4);
- подписания акта выполненных работ (см. Риск заказчика 3.3.5).

3.4. ИЗМЕНЕНИЕ (ПРОДЛЕНИЕ ИЛИ СОКРАЩЕНИЕ) СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статья 708 ГК РФ

Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы, указанные в договоре, могут быть изменены в случаях и в порядке, которые им предусмотрены (п. 2 ст. 708 ГК РФ).
Условие об изменении сроков выполнения работы означает, что с момента заключения договора до момента его прекращения сроки, согласованные в договоре, могут быть продлены или сокращены в некоторых пределах.

Согласование условия об изменении сроков
Случаи и порядок изменения сроков рекомендуется устанавливать в договоре, если в процессе его исполнения могут возникнуть обстоятельства, по причине которых выполнение работы в установленные сроки окажется невозможным (сбой поставок, приостановка работ и т.п.).
В период действия договора стороны могут изменить сроки, заключив соответствующее соглашение. Кроме того, в договоре можно установить следующие способы изменения сроков:
- автоматическое изменение при наступлении определенных условий;
- одностороннее изменение.

Если условие об изменении сроков выполнения работы не согласовано
В этом случае сроки можно изменить (продлить или сократить) по соглашению сторон, если договором не предусмотрено иное (п. 1 ст. 450 ГК РФ), в судебном порядке при существенном нарушении договора одной из сторон (пп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ), а также в иных случаях, предусмотренных законом (пп. 2 п. 2 ст. 450, ст. 451 ГК РФ). Изменение в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами (п. 1 ст. 310 ГК РФ).

3.4.1. Изменение сроков выполнения работы
по соглашению сторон

Стороны вправе в любой момент изменить сроки выполнения работы в период действия договора по взаимному соглашению, если договором не предусмотрено иное (п. 1 ст. 450 ГК РФ).
Соглашение об изменении сроков следует оформить в той же форме, что и сам договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное (п. 1 ст. 452 ГК РФ).
При заключении соглашения об изменении сроков стороны определяют условия и порядок их изменения по своему усмотрению.

--------------------------------
Пример формулировки условия в дополнительном соглашении к договору:
"Изложить п. ___ договора N ___ от ___ в следующей редакции:
Начало выполнения работы "___" __________ 20__ г.
Окончание выполнения работы "___" __________ 20__ г.
Промежуточные сроки (если есть) ____________________________".
--------------------------------

3.4.2. Автоматическое изменение сроков выполнения работ
по договору подряда при наступлении определенных условий

При таком способе сроки изменяются не по инициативе какой-либо из сторон, а в связи с наступлением обстоятельств и условий, согласованных сторонами (т.е. с момента их наступления стороны обязаны руководствоваться новыми сроками выполнения работы).
Если стороны хотят согласовать автоматическое изменение сроков, в договоре необходимо:
1) указать сроки, которые могут быть изменены (начальный, конечный, промежуточный), и основания их изменения (п. 2 ст. 708 ГК РФ).
В качестве таких оснований могут указываться, например, причины экономического или производственного характера (сбой поставок, приостановка работ и т.п.);
2) привести порядок определения новых сроков: новые сроки или правила их определения (продолжительность и др.) (п. 2 ст. 708 ГК РФ);
3) указать, что при наступлении обстоятельств, предусмотренных договором, новые сроки устанавливаются без подписания дополнительных соглашений;
4) определить период времени, за который та или иная сторона должна уведомить контрагента о наступлении упомянутых оснований и новой продолжительности сроков, и порядок такого уведомления. Данное условие необходимо для защиты интересов обеих сторон.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Срок окончания выполнения работы может быть продлен без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору, если подрядчик приостановил работу по причинам, которые вызваны неблагоприятными погодными условиями. В этом случае срок продлевается на количество календарных дней, в течение которых действовали данные погодные условия. О приостановления работы по указанным причинам подрядчик обязан письменно уведомить заказчика в день ее приостановления. Кроме того, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика о возобновлении работы в день ее возобновления и указать количество дней, на которые продлен срок".
--------------------------------

3.4.3. Одностороннее изменение сроков

Стороны могут предусмотреть в договоре условие о том, что заказчик и (или) подрядчик вправе в одностороннем порядке изменить сроки выполнения работы. Согласовать это условие можно в силу п. 2 ст. 310 ГК РФ.
При принятии решения о включении данного условия в договор нужно учесть следующее. Право на одностороннее изменение договора и случаи изменения могут быть установлены в договоре, если он связан с осуществлением всеми сторонами предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 310 ГК РФ). Если одна из сторон ее не ведет, указанное право может быть предоставлено только этой стороне (п. 2 ст. 310 ГК РФ). В частности, заказчик может приобретать результат работы не для предпринимательской деятельности, а в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (например, некоммерческая организация заказывает изготовление офисной мебели для использования в целях, не связанных с извлечением прибыли). В силу п. 2 ст. 310 ГК РФ право на одностороннее изменение сроков может быть предоставлено только такому заказчику.

Условия, ограничивающие реализацию стороной права на одностороннее изменение сроков выполнения работы
Если стороны согласились установить право какой-либо из них на одностороннее изменение срока, то в интересах другой стороны предусмотреть в договоре следующие условия:
1) об ограничении количества изменений срока за определенный период (например, не чаще одного раза за период действия договора);
2) ограничении периода, на который может быть продлен или сокращен срок;
3) уведомлении стороны об изменении срока за определенный период до его изменения.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик вправе не чаще одного раза за весь период действия договора продлить в одностороннем порядке срок окончания выполнения работы. Срок может быть продлен не более чем на 10 календарных дней. При этом подрядчик обязан за 5 календарных дней до момента изменения срока направить письменное уведомление заказчику".
--------------------------------

3.5. ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА ПО ВИНЕ ЗАКАЗЧИКА
Статья 405 ГК РФ

Если сроки выполнения работ нарушены вследствие неисполнения заказчиком своих обязательств по договору, например он не предоставил подрядчику материалы для выполнения работ, не уплатил аванс, то подрядчик не считается просрочившим исполнение обязательства по выполнению работ (п. 3 ст. 405 ГК РФ). В этом случае заказчик не сможет требовать уплаты неустойки за нарушение таких сроков.

- Судебную практику, подтверждающую, что заказчик не вправе требовать от подрядчика уплаты неустойки или процентов за пользование денежными средствами, если сроки выполнения работ были нарушены в результате ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по договору, см. в Путеводителе по судебной практике.

По вопросу ответственности заказчика по договору подряда см. подробнее разд. 11 данного материала.

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статьи 704, 709, 713, 714, 716, 719 ГК РФ

Условие о предоставлении материалов и оборудования определяет, какие материалы и оборудование необходимы для надлежащего выполнения работ, какая из сторон, в каком порядке и на каких условиях обязана их предоставить (п. 1 ст. 704, ст. 713 ГК РФ).
В нормах закона о подряде (§ 1 гл. 37 ГК РФ) для обозначения вещей, предоставляемых той или иной стороной для выполнения работы по договору подряда, используются следующие правовые понятия: материалы и оборудование.
Материалы - это вещи, которые обычно используются для изготовления иных вещей или служат для обработки других вещей с целью придания им новых свойств, качеств. Так, например, доски являются материалом для изготовления столярных изделий, а лакокрасочные материалы используются для покрытия различных поверхностей.
К материалам приравниваются "вещи, переданные заказчиком для переработки", поскольку правовой статус материалов и таких вещей определяется одними и теми же нормами права (ст. 220, п. 1 ст. 705, п. 1 ст. 716 ГК РФ и др.). Поэтому к указанным вещам применимы рекомендации, касающиеся материалов, переданных для переработки.
Оборудование представляет собой совокупность устройств (механизмов, аппаратов, технических средств, в том числе транспорта), которые предназначены для обработки, производства, перемещения или упаковки материала (см. ГОСТ ЕН 1070-2003 "Безопасность оборудования. Термины и определения").

Согласование условия о предоставлении материалов и оборудования
Работа по договору подряда обычно выполняется иждивением подрядчика - его силами, средствами, из его материалов (ст. 704 ГК РФ), однако стороны вправе договориться об ином и возложить обязанность по предоставлению материалов и оборудования полностью или частично на заказчика (ст. ст. 713, 719 ГК РФ).
Согласование данного условия в договоре подряда в интересах обеих сторон. Если материалы и оборудование предоставляет подрядчик, то заказчику важно обеспечить контроль правомерности их предоставления. Если подрядчик намеревается получить все материалы и оборудование (или часть) от заказчика, ему необходимо установить в договоре перечень материалов и оборудования, а также обязанность заказчика по их предоставлению.
При согласовании условия о предоставлении материалов и оборудования сторонам необходимо распределить между собой обязанности по их предоставлению и в зависимости от этого договориться о других сопутствующих условиях (о правах на материалы и оборудование, их качестве, оплате и т.п.).

4.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ
Статья 704 ГК РФ

Согласование условия о предоставлении материалов и оборудования подрядчиком
В соответствии с п. 1 ст. 704 ГК РФ подрядчик обязан предоставить все необходимые для выполнения работ материалы и оборудование. Поэтому если стороны не договорились о том, чтобы освободить подрядчика от такой обязанности и перенести ее полностью на заказчика, то им не требуется включать условие о предоставлении подрядчиком материалов и оборудования в договор.
Если все материалы и оборудование или их часть предоставляются подрядчиком, то сторонам рекомендуется предусмотреть в договоре следующее:
- условие о контроле заказчиком правомерности предоставления подрядчиком материалов и оборудования для выполнения работы;
- условие о качестве материалов в зависимости от целевого назначения результата работ;
- требования к качеству оборудования (если таковые имеются).

Если условие о предоставлении подрядчиком материалов и оборудования не согласовано
Подрядчик должен будет выполнить работы из своих материалов, с помощью своего оборудования (п. 1 ст. 704 ГК РФ), если только обязанность по предоставлению материалов и оборудования не возложена на заказчика. Подробнее об этом см. п. 4.2 "Предоставление материалов и оборудования заказчиком по договору подряда" настоящих Рекомендаций.

4.1.1. Контроль заказчиком правомерности предоставления
подрядчиком материалов и оборудования

В случае выполнения работ иждивением подрядчика заказчик может не выяснять вопрос о праве подрядчика на предоставленные им материалы и оборудование, поскольку в соответствии со ст. 704 ГК РФ подрядчик несет ответственность, если материалы и оборудование обременены правами третьих лиц. Однако указанная статья не запрещает подрядчику предоставлять материалы и оборудование, которые не принадлежат ему на праве собственности, а используются в силу других вещных прав на них или по договору. Например:
- материалы и оборудование могут принадлежать подрядчику на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и правомерно использоваться им для выполнения работы на основании абз. 2 п. 2 ст. 295 или п. 1 ст. 296, п. 1 ст. 297 ГК РФ при наличии права собственности на них у другого лица - собственника имущества подрядчика (унитарного предприятия). При этом у последнего не возникает права собственности на изготовленную вещь, поскольку подрядчик (унитарное предприятие) распоряжается такими материалами от имени их собственника в силу закона (п. 1 ст. 182 ГК РФ);
- оборудование может быть арендовано подрядчиком у третьего лица и правомерно им использоваться для выполнения работы на основании ст. ст. 606, 615 ГК РФ.
Подрядчик не вправе предоставлять материалы, обремененные правами третьих лиц, поскольку расходование (уничтожение) этих материалов при выполнении работы нарушает права третьих лиц на них, например права залогодержателя (п. 1 ст. 346, пп. 3, 4 п. 1 ст. 343 ГК РФ).
В то же время он может использовать оборудование, обремененное правами третьих лиц, например находящееся в залоге (ст. 346 ГК РФ).
Для предупреждения неправомерного использования подрядчиком материалов и оборудования заказчику рекомендуется закрепить в договоре условия, позволяющие контролировать правомерность предоставления подрядчиком материалов и оборудования.

Условие о контроле правомерности предоставления материалов
Данное условие рекомендуется включить в договор на случай неправомерного предоставления и использования подрядчиком чужих материалов для изготовления новой вещи путем их переработки (п. 1 ст. 220 ГК РФ). Его согласование защищает интересы заказчика, поскольку в таком случае он сможет оперативно обнаружить такие случаи, потребовать устранения выявленных нарушений и своевременно, не доводя дело до обращения третьих лиц в суд, расторгнуть договор подряда в связи с его существенным нарушением (п. 2 ст. 450 ГК РФ) или отказаться от его исполнения (ст. 717 ГК РФ).
Для согласования указанного условия необходимо предусмотреть в договоре следующее:
- обязанность подрядчика предоставить материалы, принадлежащие ему на праве собственности, и передать заказчику документы о приобретении им в собственность этих материалов;

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик обязан предоставить и использовать для выполнения работы материалы, принадлежащие ему на праве собственности, и передать заказчику копии документов о приобретении их в собственность".
--------------------------------

- обязанность подрядчика при предоставлении и использовании материалов, принадлежащих ему на ином вещном праве (хозяйственного ведения, оперативного управления), соблюдать законодательство, регулирующее порядок распоряжения данным имуществом, и передать заказчику документы о соблюдении такого порядка;

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик вправе предоставить для выполнения работ материалы, принадлежащие ему на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, однако при этом он обязан соблюдать установленный законом порядок пользования и распоряжения этими материалами. Подрядчик должен передать по требованию заказчика копии документов о соблюдении данного порядка".
--------------------------------

- порядок и сроки направления запросов и ответа на них, устранения выявленных нарушений;
- условие о том, что неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком указанных обязанностей является существенным нарушением договора и дает право заказчику расторгнуть его в судебном порядке в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 450 ГК РФ.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Копии документов, подтверждающие правомерность предоставления и использования материалов подрядчиком, должны передаваться ____________ (заказным письмом, по факсу, иным способом) в течение __________________ (указывается период времени) после получения письменного запроса заказчика.
Подрядчик обязан в течение _____ (указывается период времени) после получения претензии заказчика заменить неправомерно предоставленные и использованные материалы.
Просрочка предоставления указанных документов более чем на _______ (указывается период времени) или неправомерное использование подрядчиком материалов и неустранение в срок выявленных нарушений являются существенным нарушением договора подряда и дают право заказчику расторгнуть его в судебном порядке в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 450 ГК РФ".
--------------------------------

Если работа состоит не в изготовлении новой вещи, а в обработке существующей вещи заказчика, согласовывать условие о контроле правомерности предоставления материалов не нужно, поскольку риска, связанного с п. 1 или п. 3 ст. 220 ГК РФ, не возникает (материалы в процессе обработки расходуются (уничтожаются) без создания новой вещи).

Если условие о контроле правомерности предоставления подрядчиком материалов не согласовано
Заказчик не сможет своевременно узнать о неправомерном использовании подрядчиком чужих материалов для изготовления новой вещи путем их переработки и до предъявления исков третьих лиц по поводу результата работы расторгнуть договор или отказаться от его исполнения (п. 2 ст. 450, ст. 717 ГК РФ).
В таком случае собственник материалов может истребовать у заказчика переданную ему подрядчиком новую вещь на основании п. 1 или п. 3 ст. 220 ГК РФ (см. Риск заказчика 4.1.1).
Заказчик не лишится права взыскать с подрядчика причиненные изъятием вещи убытки (ст. 15, п. 1 ст. 393 ГК РФ), но понесет значительные временные затраты, а также вынужден будет доказывать размер убытков, в частности упущенной выгоды (что может оказаться затруднительным).
Предъявление третьими лицами претензий подрядчику в связи с нарушением их прав на материалы не освобождает последнего от ответственности перед заказчиком за несоблюдение сроков выполнения работ и других условий договора подряда. Подрядчик будет нести эту ответственность по общим правилам (п. 3 ст. 401, ст. 708, п. 2 ст. 715, ст. 15, п. 1 ст. 393 ГК РФ).

Условие о контроле правомерности предоставления оборудования
Заказчик может настаивать на согласовании условия о контроле правомерности предоставления подрядчиком оборудования для выполнения работы, однако для подрядчика исполнение этого условия может создать затруднения, поскольку ему придется передать заказчику дополнительные документы, обосновывающие правомерность использования оборудования (например, договоры аренды, залога и др.). Подрядчик может отказаться от согласования данного условия, аргументируя это тем, что он несет ответственность за неправомерное предоставление оборудования в силу п. 2 ст. 704 ГК РФ.

Если условие о контроле правомерности предоставления подрядчиком оборудования не согласовано
В этом случае подрядчик, который использует для выполнения работы оборудование в нарушение прав третьих лиц на него, например в нарушение условий договора залога (п. 1 ст. 346 ГК РФ), будет нести ответственность перед заказчиком за несоблюдение сроков выполнения работы, вызванное изъятием оборудования по искам третьих лиц (п. 3 ст. 401, ст. 708, п. 2 ст. 715, ст. 15, п. 1 ст. 393 ГК РФ). В случае просрочки выполнения работы заказчик сможет отказаться от исполнения договора на основании п. 2 ст. 715 ГК РФ или расторгнуть его в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ и потребовать взыскания понесенных убытков (ст. 15, п. 1 ст. 393 ГК РФ).

4.1.2. Качество материалов, предоставляемых подрядчиком

Исходя из содержания п. 2 ст. 704, п. 1 ст. 721, ст. 723 ГК РФ материалы, выбранные подрядчиком, должны обеспечивать надлежащее качество результата работы и его пригодность для использования в целях, которые предусмотрены в договоре, а при отсутствии соответствующего условия - для обычного использования. Согласно п. 2 ст. 704 ГК РФ подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов.
Стороны могут согласовать в договоре условие о качестве материалов. Это особенно важно в том случае, если заказчик планирует использовать результат работы по конкретному назначению.
Согласование качества материалов производится следующими способами:
- указанием на нормативно-правовые акты и нормативные документы;
- описанием свойств материалов в договоре;
- указанием на назначение результата работ, для получения которого используются материалы.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Качество материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ ______ (указываются номер, дата, название стандарта)".

"Качество материалов должно соответствовать следующим требованиям: ______________ (указываются требования к качеству материалов, необходимые характеристики)".

"Материалы должны быть пригодны для того, чтобы обеспечить возможность использования результата работ по следующему назначению __________________ (указывается назначение результата работ)".
--------------------------------

Заказчик может настаивать на согласовании качества материалов, предоставляемых подрядчиком, однако для последнего исполнение этого условия может создать затруднения, поскольку на момент заключения договора подрядчик может не знать, какие материалы будут в наличии при выполнении работы.
Подрядчик может отказаться от согласования данного условия, аргументируя это тем, что он несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных материалов и результата работы в силу п. 2 ст. 704, п. 1 ст. 721, ст. 723 ГК РФ.

Внимание! Независимо от согласования в договоре требований к качеству материалов подрядчик исходя из п. 2 ст. 721 ГК РФ должен соблюдать обязательные требования, которые установлены законом, иными правовыми актами или в определенном ими порядке.

Подрядчик, являющийся профессиональным участником, обязан немедленно предупредить заказчика о несоответствии предусмотренных в проектной документации материалов обязательным требованиям и до получения от заказчика указаний приостановить работу (п. 1 ст. 716 ГК РФ).

Если условие о качестве материалов не согласовано
Заказчик будет вправе предъявить требования в связи с ненадлежащим качеством результата работы на основании ст. 723 ГК РФ. При этом подрядчик не вправе ссылаться на некачественность приобретенных им у третьего лица материалов для выполнения работы.

- Судебную практику, подтверждающую, что подрядчик несет ответственность за недостатки работы, выполненной с использованием материалов ненадлежащего качества, см. в Путеводителе по судебной практике.

Качество материала, выбранного подрядчиком для выполнения работы, может не позволить использовать результат работы по тому назначению, которое предполагалось при заключении договора. В этом случае в соответствии с п. 1 ст. 711, п. 1 ст. 721, п. п. 3, 5 ст. 723 ГК РФ заказчик будет вправе отказаться от оплаты выполненной работы (см. Риск подрядчика 4.1.1).

4.1.3. Качество оборудования, предоставляемого подрядчиком

При наличии каких-либо особых требований к качеству оборудования заказчик может предложить включить эти требования в договор. Однако если подрядчик на момент заключения договора не знает, какое оборудование будет в наличии в процессе выполнения работы, он может отказаться от согласования качества оборудования, аргументируя это тем, что несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленного оборудования и результата работы в целом в силу п. 2 ст. 704, п. 1 ст. 721, ст. 723 ГК РФ.

Если качество оборудования не согласовано
Заказчик будет вправе предъявить требования в связи с ненадлежащим качеством результата работы на основании ст. 723 ГК РФ. При этом подрядчик не вправе ссылаться на некачественность приобретенного или арендованного им у третьего лица оборудования для выполнения работы.

- Судебную практику, подтверждающую, что подрядчик несет ответственность за недостатки работы, выполненной с использованием оборудования ненадлежащего качества, см. в Путеводителе по судебной практике.

4.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ЗАКАЗЧИКОМ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статьи 704, 713 ГК РФ

Согласование условия о предоставлении материалов и оборудования заказчиком
Стороны вправе договориться о том, что все материалы и оборудование или их часть обязан предоставить заказчик (п. 1 ст. 704, ст. 713 ГК РФ). Согласование данного условия защищает интересы подрядчика, поскольку в случае его нарушения заказчиком подрядчик вправе самостоятельно приобрести недостающие материалы и оборудование и взыскать понесенные расходы с заказчика (см. Риск заказчика 4.2.1) либо приостановить работы в порядке п. 1 ст. 719 ГК РФ (см. Риск заказчика 4.2.2).
Подрядчику рекомендуется, помимо указанной обязанности, согласовать в договоре следующее:
- перечень материалов и оборудования, которые должны быть переданы заказчиком;
- право, которое предоставляется подрядчику на материалы и оборудование, и обязанность подрядчика по их оплате;
- требования к качеству материалов и оборудования, предоставляемых заказчиком;
- условие о предоставлении подрядчиком отчета об израсходовании материалов;
- условие о возврате остатков материала;
- условие об уменьшении цены работ за счет стоимости оставшегося у подрядчика материала.

Если обязанность заказчика предоставить материалы и (или) оборудование договором не предусмотрена
В таком случае подрядчик должен будет выполнить работы из своих материалов, с помощью своего оборудования (п. 1 ст. 704 ГК РФ). При этом он не сможет потребовать возмещения понесенных расходов на приобретение материалов и аренду оборудования.

4.2.1. Перечень материалов и оборудования,
предоставляемых по договору подряда

В договоре подряда необходимо согласовать перечень материалов и оборудования, которые обязан предоставить заказчик для выполнения работы. Согласование данного условия в интересах подрядчика, поскольку заказчик должен быть осведомлен, какие именно материалы и оборудование и в каком количестве следует передать.
Согласование условия о перечне материалов и оборудования предполагает указание наименований и количества материалов и оборудования, требуемых для выполнения работы. Данный перечень лучше оформить в виде таблицы.
Перечень материалов и оборудования может быть определен:
- непосредственно в тексте договора;
- в приложении, являющемся неотъемлемой частью договора.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Перечень материалов и оборудования содержится в Приложении N 2 к договору".
--------------------------------

Перечень материалов и оборудования может быть согласован и после заключения договора. Так, договор может содержать условие об обеспечении заказчиком потребностей подрядчика в материалах и оборудовании на основе соответствующих заявок последнего. Для подрядчика это условие минимизирует риск нехватки материалов в связи с возможностью дополнительного заказа материалов.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик до начала выполнения работ направляет заказчику заявку на материалы и оборудование по всем видам работ с указанием их наименования, количества, качества и стоимости".
--------------------------------

Если перечень материалов и оборудования не согласован
В таком случае обязанность заказчика по предоставлению материалов и оборудования будет считаться несогласованной и подрядчик должен будет выполнить работы из своих материалов, с помощью своего оборудования (п. 1 ст. 704 ГК РФ). При этом он не сможет потребовать возмещения понесенных расходов на приобретение материалов и оборудования (см. Риск подрядчика 4.2.1).

4.2.2. Право подрядчика на материалы и оборудование
и обязанность подрядчика по их оплате

Сторонам рекомендуется согласовать, на каком праве подрядчик получает материалы и оборудование для выполнения работы: во временное владение и (или) пользование или в собственность.

Предоставление материалов и оборудования во временное владение и (или) пользование подрядчика
Материалы предоставляются подрядчику для выполнения работы, причем после ее завершения их остаток должен быть возвращен заказчику (п. 1 ст. 713 ГК РФ). В связи с этим можно сделать вывод, что материалы предоставляются во временное владение и (или) пользование. Оборудование также предоставляется во временное владение и (или) пользование, поскольку подлежит возврату заказчику по завершении работы или при расторжении договора подряда (ст. 728 ГК РФ).

Передача материалов и оборудования в собственность подрядчика
Стороны могут договориться о передаче материалов и оборудования в собственность подрядчика.
Договор подряда, содержащий такое условие, может быть признан смешанным (п. 3 ст. 421 ГК РФ) и к отношениям сторон по нему могут быть применены в соответствующих частях правила о договорах подряда (ст. 702 ГК РФ) и поставки (ст. 506 ГК РФ). В связи с этим для согласования условия о передаче материалов и оборудования в собственность подрядчика сторонам рекомендуется определить существенные условия договора поставки (п. 1 ст. 432 ГК РФ), а также иные необходимые для надлежащего исполнения этого договора условия:
- наименование и количество материалов и оборудования (п. 1 ст. 454, п. 3 ст. 455, п. 2 ст. 465, ст. 506 ГК РФ);
- срок поставки материалов и оборудования (ст. 506 ГК РФ);
- порядок поставки (доставка, выборка) (ст. ст. 458, 510 ГК РФ);
- цену материалов и оборудования (п. 1 ст. 485 ГК РФ).
Подробнее о согласовании данных условий договора поставки см. п. п. 1, 5, 6, 8 Рекомендаций по заключению договора поставки.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Заказчик обязуется передать в собственность подрядчика, а подрядчик принять и оплатить следующие материалы и оборудование ___________________ (указываются наименование, количество и цена). Поставка материалов и оборудования осуществляется в следующие сроки ___________ (указываются календарная дата или период времени с определенного события) путем их доставки по адресу: ___________ (указывается адрес)".
--------------------------------

При согласовании условия о передаче материалов и оборудования в собственность подрядчика ему необходимо учитывать, что заказчик сможет потребовать от подрядчика оплаты переданных материалов и оборудования в соответствии с п. 3 ст. 421, ст. ст. 486, 516 ГК РФ.
Кроме того, подрядчик не вправе будет воспользоваться правами, предоставленными ему п. 1 ст. 716 ГК РФ, и приостановить работу при обнаружении некачественности материалов и оборудования, поскольку заказчик выступает как обычный контрагент подрядчика - поставщик материалов и оборудования, а не предоставляет их подрядчику для выполнения работы в рамках п. 1 ст. 704, ст. 713 ГК РФ. По указанной причине к отношениям сторон также не будут применяться ст. ст. 714, 728 ГК РФ.

Стороны могут определить, что передача заказчиком материалов и оборудования в собственность подрядчика является содействием заказчика в соответствии с п. 1 ст. 718 ГК РФ. Данное условие в интересах подрядчика, поскольку в случае непоставки он получит дополнительные права по договору подряда согласно ст. 718 ГК РФ (например, право требовать перенесения сроков исполнения работы либо увеличения указанной в договоре цены работы).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Передача материалов и оборудования в собственность подрядчика является содействием заказчика в выполнении работы в соответствии с п. 1 ст. 718 ГК РФ".
--------------------------------

Подробнее о согласовании условия о содействии заказчика см. п. 5.3 "Содействие заказчика при выполнении работ по договору подряда" настоящих Рекомендаций.

Если условие о передаче материалов и оборудования в собственность подрядчика не согласовано
В этом случае материалы и оборудование считаются переданными во временное владение и (или) пользование на период выполнения работы (ст. ст. 713, 728 ГК РФ).
Право собственности на материалы остается у заказчика вплоть до их уничтожения при переработке или обработке вещи заказчика. Данный вывод подтверждается положениями ст. ст. 220, 712, 713, 714, 728 ГК РФ.

4.2.3. Требования к качеству материалов и оборудования,
предоставляемых заказчиком по договору подряда

Поскольку заказчик не обязан знать, какими качественными характеристиками должны обладать материалы и оборудование для того, чтобы быть пригодными для выполнения конкретной работы, он может предоставить любые материалы и оборудование, соответствующие обязательным требованиям технических регламентов, а также ГОСТ и др. нормативных документов. Однако в интересах обеих сторон согласовать требования к качеству материалов, чтобы избежать ситуации, когда закупленный материал или предоставленное оборудование, которые соответствуют обязательным требованиям указанных документов, тем не менее, окажутся непригодными для выполнения конкретного вида работ, требующих особых качественных характеристик материалов и оборудования, что повлечет простой для подрядчика или дополнительные расходы для заказчика в связи с заменой неподходящего материала или оборудования.
Для согласования требований к качеству материалов и оборудования в договоре нужно отразить их свойства, состояние, а также цели, для выполнения которых они должны быть пригодны (ст. ст. 716, 721 ГК РФ).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Качество материалов должно соответствовать следующим требованиям: __________ (указываются требования, необходимые характеристики), а качество оборудования следующим требованиям: ____________ (указываются требования, необходимые характеристики)".
--------------------------------

Данное условие стороны могут согласовать также и другими способами:
- путем ссылки на нормативно-правовые акты и нормативные документы, содержащие требования к качеству материалов и оборудования (технические регламенты, ГОСТы и т.п.);
- с помощью указания на целевое назначение материалов и оборудования, их пригодность для получения результата работ с конкретными качественными характеристиками.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Качество материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ ______ (указываются номер, дата, название стандарта), а качество оборудования - требованиям ГОСТ ______ (указываются номер, дата, название стандарта)".

"Материалы и оборудование должны быть пригодны для изготовления продукции со следующими характеристиками __________________ (указываются требования к качеству результата работы)".
--------------------------------

Внимание! Независимо от согласования требований к качеству материалов и оборудования, предоставленных подрядчику для выполнения работы в соответствии со ст. 713 ГК РФ, подрядчик должен осуществлять их проверку и немедленно сообщать заказчику о некачественности или непригодности материалов и оборудования для выполнения работ, а также приостанавливать работы до получения указаний от заказчика (п. 3 ст. 713, ст. 716 ГК РФ).
В противном случае подрядчик будет нести ответственность за ненадлежащее выполнение работы, в частности за некачественный результат работ, обусловленный недостатками материала заказчика, если не докажет, что недостатки не могли быть обнаружены при надлежащей приемке.

- Судебную практику, подтверждающую, что подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работы, вызванное недостатками материала заказчика, если не докажет, что эти недостатки нельзя было обнаружить при надлежащей приемке, см. в Путеводителе по судебной практике.

4.2.4. Предоставление подрядчиком отчета
об израсходовании материалов

На основании п. 1 ст. 713 ГК РФ подрядчик, использовавший в работе материалы заказчика, обязан по окончании работ представить последнему отчет об израсходовании материала.
Отчет может служить доказательством того, что материал израсходован полностью либо что у подрядчика имеются остатки, которые должны быть возвращены заказчику. Таким образом, возврат остатков материала заказчику должен сопровождаться предоставлением отчета об использованных материалах (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.01.2007 по делу N А26-7105/2005-19).
Подробнее о согласовании условия о возврате материала и возможности зачета стоимости неиспользованного материала в счет оплаты работы см. п. п. 4.2.5, 4.2.6 настоящих Рекомендаций.

Согласование формы и содержания отчета
Обязанность подрядчика по представлению отчета установлена ст. 713 ГК РФ. Однако форма и содержание отчета, а также порядок его предоставления законом не урегулированы, поэтому стороны могут согласовать соответствующие условия в договоре.
Поскольку отчет может быть использован как доказательство при рассмотрении споров о возврате остатков материала, то с учетом процессуальных требований к предоставлению доказательств (ст. ст. 64, 65, 71 АПК РФ) целесообразно предусмотреть представление отчета в письменной форме - в виде документа, подписанного подрядчиком (ст. 160 ГК РФ).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"По окончании работы подрядчик должен в письменной форме представить заказчику отчет об израсходовании материалов. Отчет должен быть подписан уполномоченным представителем подрядчика и скреплен печатью".
--------------------------------

Стороны могут установить любые требования к содержанию отчета. Рекомендуется предусмотреть наличие в нем следующих сведений:
- наименование и количество (по каждому наименованию) переданных заказчиком материалов;
- наименование и количество (по каждому наименованию) израсходованных подрядчиком материалов;
- цели расходования материалов (по каждой позиции);
- сведения об остатке материалов (с указанием их наименования и количества);
- иные значимые для сторон сведения (показатели), например стоимость материалов и др.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Отчет подрядчика об использовании материалов заказчика должен содержать:
- наименование, количество и стоимость предоставленных материалов;
- наименование, количество и стоимость использованных материалов отдельно по каждому виду работ;
- наименование, количество и стоимость оставшихся материалов;
- место хранения оставшихся материалов".
--------------------------------

Стороны могут разработать образец отчета и утвердить его в качестве приложения к договору. При составлении образца можно использовать различные типовые формы документов, которые используются в иных видах деятельности для подтверждения расходования продукции, сырья (например, авансовый отчет - унифицированная форма N АО-1, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 N 55).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Образец отчета об израсходовании материалов, предоставленных заказчиком, утвержден сторонами и является приложением N 2 к настоящему договору".
--------------------------------

Согласование порядка и срока передачи отчета заказчику
Стороны также могут закрепить порядок направления отчета заказчику. Рекомендуется установить такой порядок, который позволит подтвердить отправку и получение отчета. Это возможно, например, при его отправлении ценным письмом с описью вложения, телеграфным сообщением, отправке нарочным.
Кроме того, стороны могут установить в договоре срок передачи отчета. При этом следует руководствоваться правилами ст. ст. 190, 191 ГК РФ, в силу которых срок может быть определен следующим образом:
- календарной датой;
- событием, которое должно неизбежно наступить;
- истечением периода времени, начало которого связано с календарной датой или наступлением согласованного события.
Если срок передачи отчета определяется периодом времени, то стороны могут согласовать, что данный период исчисляется с момента исполнения обязанностей заказчиком или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором (п. 1 ст. 314 ГК РФ).
Подробнее о правилах определения сроков см. п. 3.3 настоящих Рекомендаций.
Однако следует учитывать, что обязательство по предоставлению отчета возникает у подрядчика после окончания работы (п. 1 ст. 713 ГК РФ). Соответственно, срок представления отчета об израсходовании материала не может быть установлен ранее этого момента.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Одновременно с результатом работ Подрядчик передает Заказчику отчет об использовании материалов Заказчика".

"Отчет об израсходовании предоставленного Заказчиком сырья должен быть представлен в течение ___ (_________) рабочих дней после окончания работы по договору и сдачи результата Заказчику".

"Подрядчик передает Заказчику отчет о расходовании материалов и сырья, предоставленных Заказчиком, не позднее "___" ______ 20___ г.".
--------------------------------

Отсутствие отчета не позволяет заказчику отсрочить оплату до его представления (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.04.2010 по делу N А13-12641/2009).
Заказчик может обеспечить исполнение подрядчиком обязательства по представлению отчета одним из способов, установленных гл. 23 ГК РФ, и (или) включить в договор условие о выплате подрядчиком неустойки в случае непредставления такого отчета. Подробнее о согласовании условия о неустойке см. п. 11.3 настоящих Рекомендаций.

Если условие о представлении отчета договором не предусмотрено
Подрядчик обязан представить заказчику отчет после окончания работы (п. 1 ст. 713 ГК РФ). Отчет должен быть представлен в течение семи дней после предъявления заказчиком соответствующего требования (п. 2 ст. 314 ГК РФ).
В некоторых случаях отчетом подрядчика об использовании материала может быть признан акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный обеими сторонами, содержащий указание на количество исходного материала и количество полученной готовой продукции (см. судебный акт, в котором сделан аналогичный вывод при рассмотрении налогового спора: Постановление ФАС Московского округа от 03.09.2008 N КА-А40/8214-08).

4.2.5. Возврат подрядчиком остатка предоставленного
заказчиком материала

Обязанность подрядчика по возврату остатков предоставленных заказчиком материалов (сырья) установлена п. 1 ст. 713 ГК РФ. Однако порядок и сроки возврата неиспользованного материала законом напрямую не урегулированы, поэтому рекомендуется установить их в договоре.
Стороны могут согласовать, что остатки сырья передаются заказчику одновременно с результатом работ либо отдельно от него в иные сроки после окончания работ. Срок возврата неиспользованного материала определяется по правилам ст. ст. 190, 191 ГК РФ, а именно:
- календарной датой;
- событием, которое должно неизбежно наступить;
- истечением определенного периода времени, начало которого связано с наступлением календарной даты или определенного события.
Если срок возврата неиспользованного материала определяется периодом времени, то стороны могут также согласовать, что данный период исчисляется с момента исполнения обязанностей заказчиком или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором (п. 1 ст. 314 ГК РФ).
Подробнее о правилах определения сроков см. п. 3.3 настоящих Рекомендаций.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Подрядчик обязан передать Заказчику неиспользованные материалы в течение ___ (_______) дней после сдачи-приемки результата работ".

"Остаток предоставленного Заказчиком материала должен быть возвращен Подрядчиком не позднее "___" ______ 20___ г.".
--------------------------------

Стороны также могут установить определенное место возврата материала: по соглашению сторон остаток материала может быть доставлен подрядчиком по определенному адресу либо получен заказчиком на складе подрядчика.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Возврат неиспользованного материала осуществляется путем его доставки на склад заказчика по следующему адресу: __________".

"Выдача заказчику остатков неиспользованного материала производится на складе подрядчика по адресу: __________".
--------------------------------

Если срок и порядок возврата неиспользованного материала договором не установлены
Согласно ст. 713 ГК РФ остаток материала должен быть возвращен заказчику после окончания работ. Срок возврата в этом случае будет определяться по правилам п. 2 ст. 314 ГК РФ.
Обязательство по передаче остатков материала должно быть исполнено подрядчиком в месте хранения неиспользованного материала - при условии, что это место известно заказчику (абз. 4 п. 1 ст. 316 ГК РФ), либо в месте нахождения подрядчика (абз. 7 п. 1 ст. 316 ГК РФ).

4.2.6. Уменьшение цены работ за счет стоимости
оставшегося у подрядчика материала

По смыслу ст. 713 ГК подрядчик вправе не возвращать остатки материала, получив на это согласие заказчика и соразмерно уменьшив цену работ. Согласие может быть получено подрядчиком еще на этапе заключения договора. Так, стороны могут договориться о том, что остатки материала не подлежат возврату и поступают в собственность подрядчика, а цена работ уменьшается на стоимость невозвращенных материалов.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Неизрасходованную часть материала Подрядчик вправе по своему выбору вернуть Заказчику либо оставить себе, уменьшив цену работ на стоимость неизрасходованного материала".

"Остатки материалов не подлежат возврату заказчику и переходят в собственность подрядчика. Подрядчик обязан зачесть стоимость неиспользованных материалов в счет уменьшения стоимости выполненных работ".
--------------------------------

Внимание! Если подрядчик не вернул остатки материалов и при этом взыскивает задолженность за выполненные работы без учета стоимости этих материалов, цена работ может быть уменьшена судом в соответствии с п. 1 ст. 713 ГК РФ.
Однако по данному вопросу в судебной практике есть и другая позиция, согласно которой для уменьшения цены заказчик должен заявить встречное исковое требование.

- Судебную практику, подтверждающую, что существует две позиции по вопросу о праве суда уменьшить цену работ на стоимость остатков материалов, не возвращенных подрядчиком, см. в Путеводителе по судебной практике.

4.2.7. Возврат стоимости неиспользованного
и невозвращенного подрядчиком материала

В соответствии с п. 1 ст. 713 ГК РФ в случае невозврата подрядчиком остатка неиспользованного материала цена работы уменьшается на его стоимость с согласия заказчика.
Из приведенной нормы прямо не следует, что стороны могут согласовать в договоре иное. Есть судебный акт, в котором суд указывает на императивный характер п. 1 ст. 713 ГК РФ (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.06.2010 по делу N А56-72589/2009).
Вместе с тем в судебной практике есть решения, согласно которым в договоре может быть предусмотрена обязанность подрядчика оплатить заказчику стоимость неиспользованных материалов в случае их невозврата, поскольку ст. 713 ГК РФ не ограничивает право сторон урегулировать отношения по поводу этих материалов.
В Постановлении Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах" даны разъяснения по вопросу квалификации нормы, регулирующей права и обязанности по договору, в качестве императивной либо диспозитивной. Судам предлагается отходить от презумпции императивности в тех случаях, когда отсутствует указание на возможность предусматривать соглашением сторон иное.
В соответствии с п. 2 Постановления норма является императивной, если содержит явно выраженный запрет установить иное. При отсутствии такого запрета она квалифицируется как императивная только в следующих случаях, приведенных в п. 3 Постановления (критерии императивности):
- императивность необходима для недопущения грубого нарушения баланса интересов сторон;
- изменение нормы или исключение ее применения создаст противоречие с существом законодательного регулирования соответствующего договора;
- императивность необходима для защиты особо значимых интересов (например, публичных интересов, интересов третьих лиц или слабой стороны договора), на защиту которых направлена норма.
Во всех остальных случаях норма должна рассматриваться как диспозитивная. В связи с этим стороны вправе в соглашении исключить применение нормы или установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При этом отличие условий договора от нормы не является основанием для признания договора или отдельных его условий недействительными по ст. 168 ГК РФ (п. 4 Постановления).
В ст. 713 ГК РФ отсутствуют как запрет на установление иного, так и критерии императивности, указанные в п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах". Это позволяет предположить, что данная норма является диспозитивной в части регулирования отношений сторон в случае невозврата подрядчиком неиспользованного материала. Следовательно, стороны вправе согласовать условие, отличное от предусмотренного в ст. 713 ГК РФ, в том числе обязанность подрядчика оплатить заказчику стоимость неиспользованных материалов в случае их невозврата.
Согласование подобного условия рекомендуется на случай прекращения договорных отношений, например посредством расторжения договора или одностороннего отказа стороны от его исполнения, если на этот момент у подрядчика имеется невозвращенный остаток материала, стоимость которого не компенсирована заказчику, а расчеты между сторонами уже произведены.
При установлении в договоре обязанности подрядчика вернуть стоимость неиспользованного и невозвращенного материала целесообразно согласовать также срок и порядок ее исполнения.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"В случае невозврата в согласованный срок предоставленного заказчиком и не использованного подрядчиком материала подрядчик обязан выплатить его стоимость в течение _____ дней с момента выставления заказчиком счета".
--------------------------------

Если условие о возврате стоимости неиспользованного и невозвращенного материала не согласовано
В случае неисполнения подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 1 ст. 713 ГК РФ, заказчик в соответствии со ст. ст. 15, 393 ГК РФ вправе предъявить требование о взыскании убытков в размере стоимости невозвращенных и неиспользованных материалов.
Статьей 713 ГК РФ не предусмотрена обязанность подрядчика вернуть стоимость оставшихся у него материалов, в связи с чем эта стоимость не признается его задолженностью. В то же время некоторые суды взыскивают стоимость остатка неиспользованного материала на основании п. 1 ст. 713 ГК РФ как задолженность.
Существует также судебная позиция, согласно которой стоимость неиспользованных и невозвращенных материалов может быть взыскана в качестве неосновательного обогащения на основании ст. 1102 ГК РФ.
Кроме того, некоторые суды приходят к выводу об отсутствии у заказчика права требовать взыскания стоимости материалов, если он не заявлял требования об уменьшении стоимости работ или возврате неиспользованных материалов.

- Судебную практику, подтверждающую, что существует несколько позиций судов по вопросу о возможности взыскания стоимости неиспользованного и невозвращенного материала, см. в Путеводителе по судебной практике.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статьи 703, 715, 1068 ГК РФ

Условие о порядке выполнения работы определяет, какими способами подрядчик будет выполнять работу, по каким вопросам и каким образом заказчик будет контролировать ее выполнение.

5.1. СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
(ЗАДАНИЯ ЗАКАЗЧИКА)
Статьи 703, 715 ГК РФ

Условие о способе выполнения работы (задания заказчика) определяет, с помощью каких технологий (методов, приемов и т.п.) и в каком режиме подрядчик будет выполнять работы, а также в каком порядке будет использоваться предоставленное ему оборудование.

Согласование способа выполнения работы
Если выбранный подрядчиком способ выполнения работы может повлиять на качество (надежность, долговечность) результата работы, на хозяйственную деятельность заказчика и третьих лиц, то в интересах заказчика включить в договор данное условие.
Для согласования указанного условия в договоре необходимо определить:
- технологию выполнения работы;
- способы и порядок использования оборудования при выполнении работы;
- режим выполнения работы;
- право заказчика давать указания подрядчику о способе выполнения работы в процессе ее выполнения.

Если условие о способе выполнения работы не согласовано
В таком случае подрядчик выполняет работы способом, который он определил самостоятельно (п. 3 ст. 703 ГК РФ).

5.1.1. Технология выполнения работы по договору подряда

Под технологией выполнения работы в настоящих Рекомендациях понимаются перечень (виды) производственных операций, их содержание и последовательность выполнения, а также материалы и оборудование, применяемые в работе.
Толкование данного понятия дано на основе анализа нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, в которых оно используется при описании рекомендательных или обязательных требований к подрядчику при выполнении работы (например, связанных с ее качеством или безопасностью). Определение технологии работы также устанавливается в этих документах для разработки национальных стандартов в различных отраслях производства, устранения терминологических расхождений и других целей. См., например, п. 4 МДС 12-47.2008 "Устройство кровли из металлочерепицы. Проект производства работ", пп. 159 п. 2 "ГОСТ 34103-2017. Межгосударственный стандарт. Удобрения органические. Термины и определения", Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на содержание машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных организациях, п. 6 "ГОСТ Р 9.316-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы контроля".
От выбора технологии могут зависеть качество, срок службы результата работы, степень вредного воздействия на окружающую среду в процессе выполнения работы. Если работа может быть выполнена путем применения различных технологий и у заказчика есть особые требования к технологии, намерение улучшить качественные и другие характеристики результата работы по сравнению с обычными, снизить негативное воздействие на окружающую среду, то в интересах заказчика согласовать в договоре технологию выполнения работы.
Подрядчик обязан будет соблюдать согласованную технологию. В случае ее нарушения суд, ссылаясь на п. 1 ст. 702 и п. 1 ст. 711 ГК РФ, может признать, что выполнены работы, не предусмотренные заданием заказчика, и поэтому они не подлежат оплате (см. Риск подрядчика 5.1.1). Кроме того, заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если в ходе контроля за выполнением работ обнаружит отклонения от согласованной технологии (п. 3 ст. 715 ГК РФ).
Согласование технологии выполнения работ может осуществляться путем:
- указания на нормативный документ, в котором она описана (см., например, МДС 12-47.2008 "Устройство кровли из металлочерепицы. Проект производства работ");

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Работа должна быть выполнена подрядчиком по технологии согласно требованиям ______ (указываются номер, дата, название нормативного документа)".
--------------------------------

- описания технологии в договоре (включая, при необходимости, условие о требуемых материалах и оборудовании). Подробнее по вопросу согласования условий о предоставлении материалов и оборудования для выполнения работы см. п. 4 настоящих Рекомендаций.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"При выполнении работы подрядчик обязан выполнить производственные операции в следующей последовательности:
1. ______________________,
2. ______________________,
3. ______________________ (указываются виды производственных операций и последовательность их совершения).
Для выполнения указанных операций требуется следующее оборудование (материалы): ______ (указываются наименование или технические характеристики оборудования, наименование и количество материалов) _______. Обязанность предоставить это оборудование (материалы) возложена на ______ (указывается сторона договора - заказчик или подрядчик)".
--------------------------------

Стороны должны учитывать, что в отношении некоторых видов работ законом, иными правовыми актами или в определенном ими порядке могут быть установлены обязательные требования к применяемой подрядчиком технологии (п. 2 ст. 721 ГК РФ).
Такие требования могут содержаться в следующих документах:
- технических регламентах Российской Федерации (см. ст. ст. 2, 6, 7 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", далее - Закон о техническом регулировании);
- технических регламентах государств - участников Таможенного союза (в состав Союза, кроме Российской Федерации, входят Казахстан и Республика Беларусь) и документах Европейского союза, если содержащиеся в них требования введены в качестве обязательных Правительством РФ до дня вступления в силу технического регламента в соответствии с п. 6.2 ст. 46 Закона о техническом регулировании;
- технических регламентах Таможенного союза;
- нормативных правовых актах РФ и нормативных документах федеральных органов исполнительной власти, обязательных в силу п. 1 ст. 46 Закона о техническом регулировании.
Если к технологии работы установлены обязательные требования, подрядчик должен их соблюдать независимо от того, предусмотрено ли это договором (п. 2 ст. 721 ГК РФ). Поэтому технология, согласованная в договоре, должна соответствовать обязательным или более высоким по сравнению с ними требованиям (п. 1 ст. 422 ГК РФ).

Внимание! Если в рамках судебного рассмотрения спора о качестве работы экспертиза установит, что недостатки результата работы возникли в связи с нарушением подрядчиком требований к технологии работы, закрепленных нормативными документами, в частности ГОСТами, СП, СНиПами, заказчик может привлечь его к ответственности в соответствии со ст. 723 ГК РФ.

- Судебную практику, подтверждающую, что выполнение работы с нарушением требований ГОСТа, СП, СНиПа свидетельствует о некачественности ее результата, см. в Путеводителе по судебной практике.

Если технология выполнения работы не согласована
Подрядчик вправе самостоятельно выбрать технологию для выполнения работы (п. 3 ст. 703 ГК РФ), за исключением случаев, когда установлены обязательные требования к ней (п. 2 ст. 721 ГК РФ).
При этом если в договоре предусмотрена возможность изменения цены договора подрядчиком в одностороннем порядке и он выбрал более дорогостоящую технологию из имеющихся в его распоряжении, подрядчик вправе потребовать от заказчика оплаты работы по более высокой цене (см. Риск заказчика 5.1.1).

Технология изготовления деталей, составляющих результат работы
Если результатом работ является сложная вещь, состоящая из различных частей, деталей, то от того, будут ли изготовлены эти детали самим подрядчиком либо закуплены у других изготовителей, может зависеть надежность, качество результата работы в целом или цена работы. В таком случае в интересах заказчика согласовать обязанность подрядчика самостоятельно изготовить детали.
Для согласования данной обязанности необходимо определить в договоре перечень и содержание работ по изготовлению требуемых деталей.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Детали, составляющие результат работы, изготавливаются подрядчиком самостоятельно. Для изготовления детали __________________ (указывается наименование детали) подрядчик должен выполнить следующие работы: ________________________ (указывается перечень работ)".
--------------------------------

Если у заказчика есть специальные требования к последовательности производственных операций по изготовлению деталей, а также к применяемым материалам и оборудованию, их необходимо закрепить в договоре.

Если перечень и содержание работ по изготовлению деталей не согласованы
В таком случае по смыслу п. 3 ст. 703 ГК РФ подрядчик вправе приобрести детали для изготовления результата работы у третьих лиц, а не изготавливать их самостоятельно, и заказчик, согласно п. 1 ст. 723, п. 1 ст. 711 ГК РФ, не вправе будет сослаться на ненадлежащее выполнение работ и будет обязан оплатить работу по согласованной цене (см. Риск заказчика 5.1.2).

5.1.2. Способы и порядок использования оборудования
при выполнении работы по договору подряда

Если оборудование для выполнения работы предоставляет заказчик, в его интересах согласовать в договоре способы и порядок использования оборудования (правила эксплуатации), чтобы избежать возможной поломки оборудования вследствие неосведомленности подрядчика.
Согласование данного условия может осуществляться путем:
- указания на нормативный документ, в котором содержатся правила эксплуатации оборудования: на инструкцию завода-изготовителя либо инструкцию, утвержденную государственными органами (см., например, Типовую инструкцию по безопасной эксплуатации стреловых самоходных кранов РД-10-74-94);

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"При эксплуатации оборудования заказчика подрядчик обязан соблюдать требования ______ (указываются номер, дата, название нормативного документа - инструкции завода-изготовителя или инструкции, утвержденной государственными органами)".
--------------------------------

- согласования собственных правил эксплуатации оборудования в договоре. При этом заказчик может установить дополнительные требования к тем, которые закреплены в инструкции завода-изготовителя или инструкции, утвержденной государственными органами.
Инструкция по эксплуатации может быть включена в качестве отдельного раздела в договор или согласована в виде приложения к нему.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"При эксплуатации оборудования заказчика подрядчик обязан соблюдать следующие требования ______ (указывается перечень требований)".

"При использовании оборудования заказчика подрядчик обязан соблюдать инструкцию по эксплуатации завода-изготовителя, а также следующие требования ______ (указывается перечень требований)".
--------------------------------

При согласовании правил эксплуатации сторонам необходимо учитывать, что в отношении эксплуатации отдельных видов оборудования законом и иными правовыми актами могут быть установлены обязательные требования. При наличии таких требований правила, согласованные сторонами в договоре, должны им соответствовать.
Такие требования могут быть установлены в следующих документах:
- технических регламентах Российской Федерации (см. ст. ст. 2, 6, 7 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании");
- технических регламентах государств - участников Таможенного союза (в состав Союза, кроме Российской Федерации, входят Казахстан и Республика Беларусь) и документах Европейского союза, если содержащиеся в них требования введены в качестве обязательных Правительством РФ до дня вступления в силу технического регламента в соответствии с п. 6.2 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ;
- технических регламентах Таможенного союза;
- нормативных правовых актах РФ и нормативных документах федеральных органов исполнительной власти, обязательных в силу п. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ (см., например, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н).

Если способ и порядок использования оборудования не согласованы
В таком случае по смыслу п. 3 ст. 703 ГК РФ их определяет подрядчик с соблюдением обязательных требований и правил. При этом он несет ответственность за несохранность оборудования заказчика (ст. 714 ГК РФ). В случае поломки оборудования заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков (ст. 15, п. 1 ст. 393 ГК РФ).

5.1.3. Режим выполнения работы по договору подряда

Условие о режиме выполнения работы определяет, в какое конкретно время в течение срока выполнения работы подрядчик будет выполнять производственные действия (например, в какие часы в течение каждого дня при недельном сроке выполнения работы).
Если выполнение работы подрядчиком в определенное время может прервать или затруднить хозяйственную деятельность заказчика (например, в связи с производственным шумом при работе в помещении заказчика или необходимостью согласовать по времени действия заказчика и подрядчика) либо помешать деятельности третьих лиц, занимающих помещения по соседству с заказчиком, в интересах заказчика установить режим выполнения работы. Для этого нужно определить период времени в течение каждого дня, недели и т.д., в который допускается выполнение работы.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик обязан выполнять работу в течение согласованных в договоре сроков, соблюдая следующий режим ее выполнения: ежедневно с 7.00 до 11.00 утра".
--------------------------------

Если режим рабочего времени у сотрудников заказчика и подрядчика не совпадают, но необходимы их согласованные действия, в интересах заказчика установить такой режим, при котором графики работы подрядчика и работников заказчика совпадут.
Заказчик должен учитывать, что если подрядчиком является физическое лицо, то установление в договоре режима работы может послужить основанием для его квалификации как трудового. Подробнее по данному вопросу см. материалы п. 1.2 раздела "Переквалификация гражданско-правового договора в трудовой" Энциклопедии спорных ситуаций по НДФЛ и взносам во внебюджетные фонды. Путеводитель по налогам.

Если режим выполнения работы не согласован
В таком случае подрядчик вправе выполнять работу в любое время по своему усмотрению в течение срока выполнения работы (п. 3 ст. 703 ГК РФ). Исключение составляют случаи, когда законодательством установлены ограничения режима деятельности подрядчика или его работников:
- о запрете производства определенных работ в ночное время, влекущих нарушения покоя и тишины граждан, а также превышение предельно допустимого уровня шума, см., например, п. 1 ст. 2 Закона г. Москвы от 12.07.2002 N 42 "О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве", Предписание Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу от 01.08.2002 N 3;
- о запрете труда отдельных категорий лиц в ночное время см. ст. 96 ТК РФ;
- о режиме труда и отдыха работников некоторых профессий см. ч. 2 ст. 100 ТК РФ.

5.1.4. Право заказчика давать подрядчику указания
о способе выполнения работы в процессе ее выполнения

Если работы носят сложный характер или их выполнение требует значительного периода времени, может возникнуть необходимость в изменении заказчиком способа выполнения работы в процессе ее производства в целях сокращения издержек, сроков выполнения работ. В связи с этим в интересах заказчика согласовать право давать указания подрядчику о способе выполнения работы в процессе ее выполнения. В этом случае подрядчик будет обязан выполнять указания заказчика (п. 3 ст. 703 ГК РФ).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Заказчик вправе давать указания подрядчику о способе выполнения работы в процессе ее исполнения".
--------------------------------

Согласование данного условия правомерно, поскольку норма п. 3 ст. 703 ГК РФ о самостоятельном определении подрядчиком способа выполнения работы применяется, если договором не предусмотрено иное, т.е. является диспозитивной. В связи с этим стороны вправе на основании п. 4 ст. 421 ГК РФ в договоре закрепить условие, отличное от предусмотренного в п. 3 ст. 703 ГК РФ.
Условие о праве заказчика давать указания подрядчику о способе выполнения работы в процессе выполнения работы не противоречит п. 1 ст. 715 ГК РФ. Подтверждением данного вывода являются нормы закона, упоминающие возможность заказчика давать указания подрядчику о способе исполнения работы (п. 1 ст. 716 ГК РФ). Кроме того, право заказчика давать указания подрядчику прямо закреплено в нормах строительного подряда (п. 3 ст. 748 ГК РФ).

Если условие о праве заказчика давать указания подрядчику о способе выполнения работы в процессе ее выполнения не согласовано
Подрядчик может отказаться выполнять указания заказчика на основании п. 3 ст. 703, п. 1 ст. 715 ГК РФ.

5.2. КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статьи 715, 1068 ГК РФ

Условие о контроле заказчиком выполнения работы определяет, какие вопросы подлежат контролю, является этот контроль обязательным либо производится по усмотрению заказчика, в каких формах и в каком порядке он осуществляется. Необходимо учитывать, что согласно п. 1 ст. 715 ГК РФ заказчик вправе проверять ход и качество работы во всякое время.

Согласование условия о контроле заказчиком выполнения работы
Наличие в договоре такого условия защищает интересы обеих сторон, поскольку исключает возможные разногласия при проведении контроля в ходе выполнения работы.
При согласовании данного условия сторонам необходимо обратить внимание на следующие моменты:
- недопустимость ограничения или исключения права заказчика на контроль хода и качества работы;
- определение дополнительных вопросов, которые вправе или обязан контролировать заказчик;
- установление форм и порядка контроля.

Если условие о контроле заказчиком выполнения работы не согласовано
Между сторонами могут возникнуть разногласия по поводу форм и порядка осуществляемой заказчиком в силу п. 1 ст. 715 ГК РФ проверки хода и качества работы.
Кроме того, заказчик не вправе будет контролировать какие-либо другие вопросы, кроме перечисленных в законе, поскольку это будет считаться вмешательством в самостоятельную деятельность подрядчика (п. 1 ст. 715, п. 3 ст. 703 ГК РФ).

5.2.1. Недопустимость ограничения или исключения
права заказчика на контроль хода и качества
работы по договору подряда

Согласно п. 1 ст. 715 ГК РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Нормы п. 1 ст. 715 ГК РФ не предусматривают для сторон возможности исключить право заказчика на контроль хода и качества работы или ограничить его каким-либо образом, например определенной периодичностью (п. 4 ст. 421 ГК РФ).
При этом проверка хода работы подразумевает проверку соблюдения подрядчиком начального, промежуточных и конечного сроков работы и темпа ее выполнения (ст. 708, п. 2 ст. 715 ГК РФ). Проверка качества работы заключается в проверке качества предоставляемых подрядчиком материалов и оборудования, промежуточных результатов работы, соблюдения обязательных для подрядчика требований относительно способа ее выполнения (п. 2 ст. 715, п. 2 ст. 704, п. 3 ст. 703, ст. 721, п. 5 ст. 723 ГК РФ).

Если право заказчика контролировать ход и качество работы ограничено или исключено договором
Такое условие договора будет противоречить п. 1 ст. 715 ГК РФ, в связи с чем оно может быть признано недействительным на основании ст. 168 ГК РФ.
Если указанное условие признано недействительным, оно в силу п. 1 ст. 167, ст. 180 ГК РФ не будет порождать юридических последствий для сторон. В связи с этим заказчик будет вправе осуществлять контроль хода и качества работы во всякое время, не вмешиваясь в деятельность подрядчика (п. 1 ст. 715 ГК РФ).

5.2.2. Дополнительные вопросы, которые
вправе или обязан контролировать заказчик
в ходе работ по договору подряда

Стороны могут расширить перечень вопросов, контролируемых заказчиком при выполнении подрядчиком работы, и включить в договор следующие условия:
- контроль безопасности выполняемой работы;
- контроль соблюдения требований охраны окружающей среды и др.
При этом рекомендуется определить формы и порядок осуществления контроля. По данному вопросу см. п. 5.2.3 настоящих Рекомендаций.

Право заказчика контролировать дополнительные вопросы
В интересах заказчика согласовать право контролировать указанные вопросы, поскольку так заказчик сможет своевременно обнаружить допущенные подрядчиком нарушения, потребовать их устранения и тем самым избежать причинения подрядчиком вреда окружающей среде или здоровью и (или) имуществу третьих лиц.
Кроме того, заказчику рекомендуется согласовать данное условие, если он передает для выполнения работы оборудование только во временное пользование подрядчика (например, при передаче в пользование станка, находящегося в помещении заказчика) и такое оборудование признается источником повышенной опасности в силу п. 1 ст. 1079 ГК РФ. В этом случае заказчику необходимо контролировать безопасность выполняемой работы и соблюдение подрядчиком требований охраны окружающей среды, поскольку именно заказчик, как владелец источника повышенной опасности, несет ответственность за вред, причиненный таким оборудованием (абз. 2 п. 1 ст. 1079 ГК РФ).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Заказчик вправе осуществлять контроль безопасности выполняемой подрядчиком работы и соблюдения им требований охраны окружающей среды в форме и порядке, которые предусмотрены договором".
--------------------------------

Если право контроля дополнительных вопросов не согласовано
В таком случае заказчик не вправе будет контролировать дополнительные вопросы в процессе выполнения работы, поскольку это будет считаться вмешательством в самостоятельную деятельность подрядчика (п. 1 ст. 715 ГК РФ). Кроме того, он не сможет предотвратить причинение подрядчиком вреда окружающей среде или здоровью и (или) имуществу третьих лиц.
Заказчик будет обязан возместить вред, причиненный в результате использования подрядчиком оборудования, которое является источником повышенной опасности и предоставлено подрядчику только во временное пользование (абз. 2 п. 1 ст. 1079, ст. 15 ГК РФ). Заказчик по возмещении вреда получит право обратного требования (регресса) к подрядчику в размере выплаченной суммы, если иной размер не установлен законом (п. 1 ст. 1081 ГК РФ), однако такое требование связано с дополнительными временными и материальными затратами заказчика по ведению дел в суде.
В остальных случаях подрядчик несет ответственность за причиненный им вред (п. 1 ст. 1064, п. 1 ст. 1068 ГК РФ).

Обязанность заказчика по контролю дополнительных вопросов
Если подрядчиком является гражданин, выполняющий работу по гражданско-правовому, а не по трудовому договору, в его интересах согласовать обязанность заказчика осуществлять контроль безопасности выполняемой работы и соблюдения требований охраны окружающей среды.
В этом случае ответственность за вред, причиненный при выполнении работы окружающей среде или здоровью и (или) имуществу третьих лиц, будет возложена на заказчика в порядке п. 1 ст. 1068 ГК РФ (см. Риск заказчика 5.2.1). Заказчик по возмещении вреда получит право обратного требования (регресса) к подрядчику в размере выплаченной суммы, если иной размер не установлен законом (п. 1 ст. 1081 ГК РФ), однако осуществление такого права связано с дополнительными временными и материальными затратами заказчика по ведению дела в суде. В связи с этим заказчику не рекомендуется согласовывать данную обязанность.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Заказчик обязан осуществлять контроль безопасности выполняемой подрядчиком работы и соблюдения им требований охраны окружающей среды в форме и порядке, которые предусмотрены договором".
--------------------------------

Если обязанность заказчика по контролю дополнительных вопросов не согласована
В таком случае согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ подрядчик будет обязан возмещать причиненный им ущерб (см. Риск подрядчика п. 5.2.1).

5.2.3. Формы и порядок контроля заказчиком выполнения
работы по договору подряда

Контроль хода и качества работ, а также согласованных сторонами дополнительных вопросов может проводиться в следующих формах:
- запрос у подрядчика сведений и документов, которые касаются вопросов, подлежащих контролю (подробнее о согласовании вопросов, подлежащих контролю, см. п. 5.2 настоящих Рекомендаций);
- непосредственный осмотр и проверка выполняемой работы, а также предоставленных подрядчику материалов и оборудования.
Осуществление контроля именно в таких формах позволяет заказчику своевременно получить достоверную информацию о том, что подрядчик не приступил к выполнению работ или выполняет их ненадлежащим образом и с нарушением согласованных сроков, и на этих основаниях отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п. п. 2, 3 ст. 715 ГК РФ).
Для эффективного осуществления каждой из форм контроля сторонам необходимо согласовать порядок их проведения.

Порядок запроса сведений и документов
Для его согласования рекомендуется указать в договоре:
- срок ответа на запросы заказчика;
- форму направления запроса и ответа на него;
- порядок вручения: заказным письмом с уведомлением о вручении, письмом с объявленной ценностью и описью вложения, с нарочным, телеграммой, по факсу, по электронной почте и т.д.
Для того чтобы исключить возможные споры, касающиеся содержания сведений и документов или факта их передачи, сторонам рекомендуется согласовать в договоре, что сведения и документы должны представляться в письменной форме с нарочным либо письмом с объявленной ценностью с уведомлением о его вручении и описью вложения.

Внимание! Пленум Верховного Суда РФ в п. 65 Постановления от 23.06.2015 N 25 разъяснил, что юридически значимое сообщение может быть направлено в любой форме, соответствующей характеру сообщения и отношений, если иное не установлено законом, договором, не следует из обычая или практики, установившейся во взаимоотношениях сторон. При выборе формы необходимо учитывать наличие возможности достоверно установить впоследствии, от кого исходило сообщение и кому было адресовано.
В соответствии с п. 64 указанного Постановления стороны вправе согласовать, что запросы в ходе контроля работ направляются исключительно предусмотренным договором способом. В этом случае направление такого запроса иным способом (например, электронным письмом вместо установленного договором направления телеграммой) будет считаться ненадлежащим.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик обязан ответить на запросы заказчика о предоставлении сведений и документов в течение ________ (указывается срок ответа) после их получения. Запросы и ответы на них направляются сторонами в письменной форме с нарочным либо письмом с объявленной ценностью с уведомлением о его вручении и описью вложения".
--------------------------------

Если срок и форма направления запросов заказчиком и ответов на них не согласованы
Срок ответа на запросы заказчика - семь дней со дня предъявления соответствующего требования (п. 2 ст. 314 ГК РФ). Запросы и ответы сторон при осуществлении контроля составляются в простой письменной форме (п. 3 ст. 159, п. 1 ст. 161 ГК РФ).

Адрес стороны для направления корреспонденции в ходе контроля работ

Внимание! Пленум Верховного Суда РФ в п. 63 Постановления от 23.06.2015 N 25 разъяснил, что юридически значимые сообщения, адресованные гражданину, должны направляться по адресу его регистрации или по названному им адресу либо его представителю. Сообщения юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) следует посылать по адресу, содержащемуся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), либо по указанному адресатом.
В соответствии с п. 64 упомянутого Постановления стороны вправе согласовать, что корреспонденция в ходе контроля работ направляется строго по указанному в договоре адресу. В этом случае направление сообщения по иному адресу (в том числе по адресу, указанному в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)) будет являться ненадлежащим. Исключение составляют случаи, когда лицо, направившее корреспонденцию, знало или должно было знать о недостоверности адреса, указанного в договоре.

Стороны вправе определить в договоре адреса, по которым они направляют корреспонденцию в рамках контроля хода работ (запросы заказчика, ответы подрядчика). Такие адреса могут отличаться от адресов, указанных в отношении юридического лица в ЕГРЮЛ, а в отношении индивидуального предпринимателя - в ЕГРИП. Запретов для этого законом не предусмотрено. Однако в данной ситуации важно учитывать следующее.
Адрес в ЕГРЮЛ отражается для целей осуществления связи с юридическим лицом (пп. "в" п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"). В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, которые поступили по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего органа или представителя. Такие сообщения считаются полученными, даже если юридическое лицо по данному адресу не находится.
Соответственно, если сторона, которой по этому адресу направлена корреспонденция, не примет мер к ее получению, она не сможет в дальнейшем ссылаться на то, что отправление не было ею получено. Данный вывод следует также из п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица". Кроме того, в п. 1 названного Постановления Пленум ВАС РФ разъяснил, что в отношениях с третьими лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ, юридическое лицо не вправе ссылаться на недостоверность информации, которая отражена в реестре, и на сведения об адресе, в нем не указанные. Исключение составляют случаи, предусмотренные в абз. 2 п. 2 ст. 51 ГК РФ.
Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей осуществляется по месту жительства (п. 3 ст. 8 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ). Сведения о соответствующем адресе вносятся в ЕГРИП (пп. "д" п. 2 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ). Однако в Законе не указано, что адрес места жительства отражен в ЕГРИП для осуществления связи с индивидуальным предпринимателем.
В соответствии с п. 3 ст. 23 ГК РФ к индивидуальным предпринимателям применяются нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие деятельность юридических лиц - коммерческих организаций, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения. Таким образом, на деятельность индивидуальных предпринимателей распространяются положения абз. 2 п. 2 ст. 51 ГК РФ о том, что в отношениях с третьими лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ, юридическое лицо не вправе ссылаться на недостоверность отраженной в реестре информации, за исключением случаев, которые предусмотрены указанной нормой. Следовательно, можно сделать вывод, что адрес места жительства отражен в ЕГРИП для осуществления связи с индивидуальным предпринимателем.
Судебные решения, затрагивающие вопросы о том, надлежащим ли образом доставлена судебная корреспонденция, данный вывод подтверждают. Кроме того, суды указывают, что индивидуальный предприниматель несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, которые поступили по его адресу, указанному в ЕГРИП (Определение ФАС Уральского округа от 19.02.2014 N Ф09-1139/14, Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2013 N 15АП-9001/2013).
В связи с изложенным можно предположить, что положения абз. 2 п. 3 ст. 54 ГК РФ применяются и к индивидуальным предпринимателям в силу п. 3 ст. 23 ГК РФ.
Таким образом, получателю следует принять меры для получения корреспонденции как по адресу, предусмотренному в договоре, так и по месту своей государственной регистрации. Это связано с тем, что направление уведомления по адресу, который указан в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), в силу абз. 2 п. 3 ст. 54 ГК РФ, п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 может быть признано надлежащим способом извещения адресата.
Так, суд не принял во внимание доводы заказчика о том, что результаты работ были направлены ему по месту государственной регистрации, а не на адрес, отраженный в договоре. При этом суд указал, что юридическое лицо в силу закона должно обеспечить получение корреспонденции по своему юридическому адресу (Постановление ФАС Уральского округа от 24.10.2013 N Ф09-10886/13).
Отправителю рекомендуется посылать юридически значимые сообщения не только на указанный в договоре адрес получателя, но и на все известные адреса последнего. В противном случае возникает риск ненадлежащего уведомления. Например, в споре из договора поставки суд не признал надлежащим доказательством соблюдения претензионного порядка рассмотрения споров направление претензии на предусмотренный в договоре адрес покупателя, по которому последний корреспонденцию не получил. По адресу государственной регистрации поставщик претензию не посылал, хотя этот адрес был ему известен, поскольку именно его стороны согласовали в качестве места доставки товара. Суд отметил, что поставщик не привел доводов в подтверждение наличия у покупателя обязанности получать корреспонденцию не по месту своего нахождения, указанному в ЕГРЮЛ (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2014 N 17АП-10314/2014-ГК).
Вместе с тем если в договоре согласован адрес для направления корреспонденции, то предполагается, что сторона, действуя разумно и добросовестно, должна надлежащим образом исполнять условия обязательства (п. 5 ст. 10, ст. 309 ГК РФ). Соответственно, ей следует направить сообщение по такому адресу вне зависимости от того, было ли оно послано на адрес, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Данный вывод находит отражение в судебной практике. Так, суд отметил, что если в договор включены адреса контрагента, отличные от юридического, то уведомление об одностороннем отказе должно быть направлено по всем известным из договора адресам (Постановление ФАС Центрального округа от 27.11.2013 по делу N А09-908/2013).
Для обеспечения выполнения этой обязанности стороны вправе предусмотреть в договоре условие о неустойке, например о штрафе.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Если сообщение в ходе контроля работ не направлено по адресу, указанному в настоящем договоре в качестве адреса для направления корреспонденции, сторона-получатель вправе потребовать от стороны-отправителя уплаты штрафа в размере ________ рублей".
--------------------------------

Момент доставки корреспонденции в ходе контроля работ
Правовые последствия юридически значимых сообщений (в том числе запросов и ответов в ходе контроля работ) наступают для лица, которому сообщения адресованы, с момента их доставки самому лицу или его представителю (абз. 1 п. 1 ст. 165.1 ГК РФ). Согласно абз. 2 п. 1 ст. 165.1 ГК РФ сообщение считается доставленным адресату и в том случае, если оно фактически не было получено по причинам, зависящим от адресата. Так, запрос заказчика будет считаться доставленным подрядчику, если последний его не получил по своей вине. Корреспонденция считается доставленной, если она была возвращена по истечении срока хранения в отделении связи, поскольку адресат уклонился от ее получения (абз. 2 п. 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.15 N 25).
Необходимо учитывать, что норма п. 1 ст. 165.1 ГК РФ диспозитивна в силу прямого указания закона (п. 2 ст. 165.1 ГК РФ). Следовательно, стороны вправе предусмотреть в договоре иной порядок направления и получения юридически значимых сообщений.

Порядок непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы
Для согласования данного порядка следует определить:
- лиц, ответственных за осуществление такого контроля с обеих сторон (дополнительно нужно согласовать выдачу этим лицам доверенностей, подтверждающих, что они имеют право осуществлять контроль, направлять запросы, предъявлять претензии, составлять акты по результатам контроля);
- срок и форму уведомления заказчиком о необходимости предоставить доступ к месту выполнения работы, материалам и оборудованию, результату работы;
- случаи составления и содержание актов по результатам контроля.
Для того чтобы исключить возможные споры, касающиеся содержания уведомления заказчика или факта его передачи, сторонам рекомендуется согласовать в договоре, что оно должно представляться в письменной форме с нарочным либо письмом с объявленной ценностью с уведомлением о его вручении и описью вложения, а также указать адрес, по которому его нужно направить.

Внимание! Пленум Верховного Суда РФ в п. 63 Постановления от 23.06.2015 N 25 разъяснил, что юридически значимые сообщения, адресованные гражданину, должны направляться по адресу его регистрации или по названному им адресу, либо его представителю. Сообщения юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) следует посылать по адресу, содержащемуся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), либо по указанному адресатом.
В п. 65 Постановления разъяснено, что юридически значимое сообщение может быть направлено в любой форме, соответствующей характеру сообщения и отношений, если иное не определено законом, договором, не следует из обычая или практики взаимоотношений сторон. При выборе формы необходимо учитывать наличие возможности достоверно установить впоследствии, от кого исходило сообщение и кому было адресовано.
В соответствии с п. 64 упомянутого Постановления стороны вправе согласовать, что уведомление подрядчику направляется исключительно тем способом, который предусмотрен в договоре, или строго по приведенному в договоре адресу. В этом случае направление уведомления иным способом (например, электронным письмом вместо согласованного в договоре направления телеграммой) или по иному адресу (в том числе указанному в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или месту регистрации гражданина) будет считаться ненадлежащим, если только заказчик не знал и не должен был знать о недостоверности адреса, отраженного в договоре.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Заказчик обязан известить подрядчика о проведении непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы за _____ (указывается период времени) до ее проведения в письменной форме с нарочным либо письмом с объявленной ценностью с уведомлением о его вручении и описью вложения по адресу, приведенному в настоящем договоре. Стороны назначают лиц, ответственных за осуществление такого контроля, и выдают им доверенности на его осуществление, направление запросов, предъявление претензий, составление актов по результатам контроля, о чем уведомляют друг друга в обусловленной выше форме в течение _____ (указывается период времени) со дня заключения договора".

"Если при проведении осмотра и проверки заказчиком выполняемой подрядчиком работы будут выявлены нарушения технологии ее выполнения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены все выявленные недостатки".
--------------------------------

Подрядчику для защиты его интересов рекомендуется согласовать также периодичность проведения контроля. Однако необходимо помнить, что такое согласование невозможно при проведении контроля хода и качества работы, поскольку в силу п. 1 ст. 715 ГК РФ заказчик вправе осуществлять такой контроль во всякое время (подробнее по данному вопросу см. п. 5.2.1 "Недопустимость ограничения или исключения права заказчика на контроль хода и качества работы по договору подряда" настоящих Рекомендаций).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Заказчик вправе проводить непосредственный осмотр и проверку безопасности выполнения подрядчиком работы, а также соблюдения им требований охраны окружающей среды не чаще чем ________________ (указывается количество проверок за определенный период времени)".
--------------------------------

Если порядок непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы не согласован
Права и обязанности сторон договора при проведении контроля осуществляют их постоянно действующие исполнительные органы или лица, действующие по доверенности (п. 1 ст. 182 ГК РФ). Срок предоставления доступа к месту выполнения работы, материалам и оборудованию, результату работы - семь дней со дня предъявления соответствующего требования (п. 2 ст. 314 ГК РФ). Сроки промежуточной и окончательной приемки результата работы определяются договором подряда (п. 1 ст. 720 ГК РФ). Указанное уведомление составляется в простой письменной форме (п. 3 ст. 159, п. 1 ст. 161 ГК РФ).
Если в договоре не будет приведен адрес для направления уведомления, то заказчик может использовать адрес постоянно действующего исполнительного органа подрядчика - юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, либо адреса места жительства, если подрядчиком выступает индивидуальный предприниматель. Подробнее об этом см. п. 5.2.3 настоящих Рекомендаций.

5.3. СОДЕЙСТВИЕ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
РАБОТ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статья 718 ГК РФ

Содействие заказчика подразумевает оказание помощи подрядчику, которая заключается в выполнении заказчиком согласованных сторонами действий, способствующих качественному и своевременному осуществлению работы.

Согласование условия о содействии заказчика
Наличие в договоре подряда данного условия, согласованного надлежащим образом, защищает в большей степени интересы подрядчика в тех случаях, когда ему для более быстрого и эффективного выполнения работы необходимо совершение со стороны заказчика дополнительных действий, не относящихся к основным его обязанностям (ст. ст. 702, 711, 720 ГК РФ), поскольку обязывает заказчика совершить эти действия в соответствии с положениями договора.
В случае неисполнения заказчиком обязанности по содействию подрядчик получает право предъявлять требования, установленные абз. 2 п. 1 ст. 718 ГК РФ. В частности, подрядчик вправе потребовать возмещения издержек, вызванных простоем, и других убытков (см. Риск заказчика 5.3.1). Заказчик не сможет привлечь подрядчика к ответственности за нарушение сроков выполнения работ, вызванное неоказанием содействия (см. Риск заказчика 5.3.2).
Если подрядчику для выполнения работы нужны какие-либо товары, работы, услуги, имущество во временное владение или пользование, и он намерен получить их именно от заказчика ввиду определенных причин (низкая цена, уникальный продукт и т.п.), подрядчик может предложить оформить соответствующие сделки в качестве содействия заказчика. В таком случае при нарушении заказчиком условий этих сделок подрядчик сможет дополнительно к обычным правовым последствиям их нарушения (ст. ст. 463, 520, 620 ГК РФ и др.) применить последствия, предусмотренные абз. 2 п. 1 ст. 718 ГК РФ.
Для согласования условия о содействии необходимо определить в договоре:
- виды (формы) содействия, объем и порядок его оказания заказчиком;
- дополнительные условия о содействии, если оно будет осуществляться в виде исполнения заказчиком обязанностей по гражданско-правовому договору, предусмотренному ГК РФ.

Если договор не содержит условия о содействии заказчика
Подрядчик не вправе требовать от заказчика оказания содействия и должен осуществить своими силами и средствами действия, необходимые для выполнения работы (п. 1 ст. 704 ГК РФ), за исключением случаев, когда договор содержит условие о предоставлении материалов и оборудования заказчиком. Подробнее по данному вопросу см. п. 4.2 "Предоставление материалов и оборудования заказчиком по договору подряда" настоящих Рекомендаций.
Также подрядчик не сможет применить последствия неисполнения заказчиком обязанности по содействию, предусмотренные ст. 718 ГК РФ, в частности требовать возмещения убытков, увеличения цены договора (см. Риск подрядчика 5.3.1). При этом он будет не вправе ссылаться на то, что заказчик не оказал содействия, и будет обязан уплатить неустойку за просрочку выполнения работы (см. Риск подрядчика 5.3.2).

5.3.1. Виды (формы), объем содействия и порядок
его оказания заказчиком в рамках договора подряда

В договоре подряда сторонам необходимо определить вид (форму) содействия, т.е. те действия, которые должен будет совершить заказчик в помощь подрядчику в выполнении работы, а также согласовать их объем и порядок осуществления.

Виды (формы) содействия
Стороны могут предусмотреть в договоре следующие обязанности заказчика в качестве видов (форм) содействия:
- передача подрядчику документов и сведений, необходимых для выполнения работы. При этом рекомендуется согласовать их перечень. В противном случае, если заказчик не предоставит какие-либо документы или сведения, подрядчик не сможет сослаться на неоказание содействия (ст. 718 ГК РФ) и будет привлечен к ответственности за просрочку выполнения работы, установленную законом или договором (см. Риск подрядчика 5.3.3);
- согласование выполнения работы в государственных органах и получение разрешительных и иных документов;
- оказание подрядчику различных услуг (консультации по вопросам выполнения работы, правовое обслуживание при выполнении работ, обеспечение предоставления подрядчику коммунальных услуг (ст. 779 ГК РФ));
- предоставление подрядчику во временное пользование и (или) владение и пользование зданий, помещений, сооружений, земельных участков, необходимых для хранения материалов и оборудования, размещения офисов и производства, проживания сотрудников подрядчика, их социально-культурного, коммунально-бытового обслуживания; транспортных средств для перевозки материалов и оборудования, работников подрядчика к месту работы; средств связи, оргтехники, инструментов и т.д. (ст. ст. 606, 632, 642, 650, 689 ГК РФ);
- выполнение для подрядчика разных видов работ, например предварительная обработка вещи, передаваемой для выполнения работы, монтаж и установка различных конструкций, строительные, проектно-изыскательские работы и НИОКР (ст. ст. 702, 740, 758, 769 ГК РФ);
- продажа подрядчику материалов, оборудования (ст. ст. 454, 506 ГК РФ);
- перевозка материалов, оборудования, сотрудников подрядчика при выполнении работы (ст. 784 ГК РФ);
- предоставление подрядчику прав на использование объектов интеллектуальной собственности заказчика (ст. ст. 1234, 1235 ГК РФ);
- выполнение заказчиком других действий.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Заказчик обязан оказать содействие подрядчику в виде перевозки материалов и оборудования подрядчика к месту производства работы".

"Заказчик обязан оказать подрядчику содействие, необходимое для выполнения работы, а именно получить разрешение на производство работ в органе местного самоуправления в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством РФ".
--------------------------------

Сторонам не рекомендуется указывать в договоре, что содействием является уплата заказчиком аванса, поскольку условие о выплате аванса определяет порядок и сроки оплаты работы, т.е. основное взаимное обязательство заказчика, предусмотренное п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 711 ГК РФ, и не признается формой содействия (см. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.02.2000 N А56-17032/99). Поэтому подрядчик не вправе будет требовать перенесения сроков выполнения работы в порядке, установленном ст. 718 ГК РФ, ссылаясь на невыплату или несвоевременную выплату заказчиком аванса.

Объем содействия и порядок его оказания
При согласовании содействия стороны помимо вида действий должны предусмотреть в договоре:
- объем содействия, т.е. количественную характеристику действий заказчика (количество товара, объем работы, услуги и т.д.);
- порядок оказания содействия, т.е. способ и сроки совершения действий заказчика, права и обязанности сторон в ходе их осуществления.
Объем содействия и порядок его оказания могут быть установлены в договоре либо в отдельном соглашении со ссылкой на договор подряда.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Заказчик обязан оказать подрядчику содействие в виде предоставления следующей документации, необходимой для выполнения работы ____________ (указывается перечень документов). Указанная документация должна быть предоставлена в течение _____ с момента заключения договора в количестве ___ экз. в бумажном виде в формате _____ и на электронном носителе ______".

"Заказчик обязан оказать подрядчику содействие в форме предоставления консультаций специалистами заказчика по вопросу _________ (указывается предмет консультаций). Количество консультаций, порядок и сроки их проведения определяются письменным соглашением сторон".

"Настоящее соглашение заключено во исполнение обязанности заказчика по содействию подрядчику в выполнении работы по договору подряда ____________ (указываются номер, дата договора), заключенному между сторонами".
--------------------------------

Если в договоре не указаны вид (форма), объем и порядок оказания содействия
Обязанность заказчика по содействию будет считаться несогласованной.
Подрядчик в этом случае не вправе будет требовать переноса сроков выполнения работы согласно п. 1 ст. 718 ГК РФ или обосновывать их нарушение ссылкой на неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязанности по содействию (ст. 406 ГК РФ) и будет нести ответственность за просрочку, установленную законом (ст. ст. 708, 405, п. 2 ст. 715, ст. 395 ГК РФ) и договором (ст. 330 ГК РФ) (см. Риски подрядчика 5.3.4, 5.3.5).

5.3.2. Дополнительные условия о содействии заказчика
в рамках договора подряда в виде исполнения обязанностей
по гражданско-правовому договору

Выбранный сторонами вид (форма) содействия может представлять собой правовую модель какого-либо гражданско-правового договора, предусмотренного Гражданским кодексом РФ. Например, условие о передаче заказчиком материалов в собственность подрядчика за плату означает исполнение заказчиком обязанностей продавца по договору купли-продажи, поставки (ст. ст. 454, 506 ГК РФ). Подробнее о видах содействия см. п. 5.3.1 "Согласование видов (форм), объема содействия и порядка его оказания заказчиком в рамках договора подряда".
Если условие о содействии согласовано в договоре в указанной форме, то договор может быть признан смешанным (п. 3 ст. 421 ГК РФ) - с элементами договора подряда и договора, в рамках которого оказывается содействие (аренды, поставки и т.п.). В связи с этим при включении в договор подряда условия о содействии в виде исполнения обязанностей по гражданско-правовому договору стороны должны согласовать в договоре подряда все существенные условия того договора, исполнение которого будет являться содействием (п. 3 ст. 421, п. 1 ст. 432 ГК РФ).
О согласовании существенных условий договоров поставки, аренды, возмездного оказания услуг см. п. 1 "Предмет договора поставки", п. 5.1 "Срок поставки товара" Рекомендаций по заключению договора поставки; п. 1 "Предмет договора" Рекомендаций по заключению договора аренды, п. 1.1 "Общие условия о предмете договора возмездного оказания услуг"; п. 4.1 "Сроки оказания услуг" Рекомендаций по заключению договора возмездного оказания услуг.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Заказчик обязан оказать содействие подрядчику в виде передачи в его собственность следующих товаров: (указываются наименование и количество). Поставка товаров производится в срок до "___" __________ г.".
--------------------------------

Стороны могут заключить отдельный договор, исполнение которого будет являться содействием заказчика в выполнении работ по договору подряда (например, договор поставки материалов, аренды оборудования и т.п.). В этом случае необходимо:
- в договоре подряда сделать ссылку на договор, в котором будут содержаться условия оказания содействия;
- в договоре, исполнение которого является содействием, согласовать все существенные для данного вида договора условия (п. 3 ст. 421, п. 1 ст. 432 ГК РФ) и сделать соответствующую ссылку на договор подряда.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Настоящий договор аренды заключен во исполнение обязанности заказчика по содействию подрядчику в выполнении работы по договору подряда (указываются номер, дата подписания договора), заключенному между сторонами".

"Заказчик обязан оказать подрядчику содействие в выполнении работы по настоящему договору подряда в виде аренды оборудования. Объем и порядок данного содействия определяются договором аренды (указываются номер, дата договора), заключенным между сторонами во исполнение настоящего договора подряда".
--------------------------------

Если существенные условия договора, исполнение которого является содействием заказчика, не согласованы
Обязанность заказчика оказывать услуги, передавать имущество, поставлять товар и т.п. (т.е. оказывать содействие подрядчику) не возникает, поскольку соответствующий договор (если он заключался отдельно) либо смешанный договор в части этих обязательств является незаключенным и не порождает прав и обязанностей сторон (п. 1 ст. 432, п. 3 ст. 421, п. 1 ст. 420 ГК РФ). В таком случае подрядчик не вправе будет требовать от заказчика совершения каких-либо действий в помощь при выполнении работы, а будет обязан самостоятельно обеспечить себя всем необходимым для исполнения обязательств по договору подряда (п. 1 ст. 704 ГК РФ).
Вместе с тем сторона, которая полностью или частично приняла исполнение по договору или другим образом подтвердила его действие, не вправе требовать признания договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ).

6. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД
Статьи 702, 706 ГК РФ

В соответствии с п. 1 ст. 706 ГК РФ подрядчику предоставлено право привлекать к исполнению своих обязательств по договору других лиц (субподрядчиков), если только из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично. В случае привлечения субподрядчиков подрядчик выступает в роли генерального подрядчика, а договор между ним и заказчиком определяется как договор генерального подряда.
При заключении договоров генерального подряда и субподряда взаимодействие заказчика с субподрядчиками осуществляется через генерального подрядчика, который имеет право контролировать выполнение работ субподрядчиками (ст. 715 ГК РФ) и несет ответственность перед заказчиком за ненадлежащее исполнение ими обязательств и перед субподрядчиками за нарушение заказчиком условий договора генерального подряда (п. 3 ст. 706 ГК РФ). Однако заказчик и субподрядчики вправе урегулировать взаимоотношения между собой (например, по вопросам оплаты, приемки работы, взаимной ответственности и т.п.) иным образом. Подробнее по согласованию условий договоров генерального подряда и субподряда см. п. 6.1 и 6.2 настоящих Рекомендаций.
Если в договор включается условие, запрещающее подрядчику поручать выполнение каких-либо работ субподрядчикам (т.е. установлена обязанность выполнить все работы лично), отношения генерального подряда не возникают. Как правило, такое условие вносится в договор по требованию заказчика, если личность подрядчика имеет для него существенное значение. Подробнее по согласованию данного условия см. п. 6.3 "Выполнение работы подрядчиком лично" настоящих Рекомендаций.

6.1. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА
О ПРИВЛЕЧЕНИИ СУБПОДРЯДЧИКОВ
Статья 706 ГК РФ

Договор генерального подряда представляет собой договор, по которому подрядчик вправе привлекать для выполнения работы субподрядчиков на согласованных с заказчиком условиях.

Согласование условия о привлечении субподрядчиков
Привлечение субподрядчиков может потребоваться подрядчику при заключении, например, договоров на выполнение работ с участием специалистов различного профиля (которых нет в штате у подрядчика) или работ, состоящих из нескольких производственных операций, каждая из которых может быть предметом отдельного договора подряда. В таком случае в интересах подрядчика не включать в договор условие о выполнении работы лично (п. 1 ст. 706 ГК РФ).
Если стороны при заключении договора подряда допускают возможность привлечения подрядчиком субподрядчиков, то в договоре можно предусмотреть следующее:
- дополнительные условия для привлечения подрядчиком субподрядчиков (согласование определенных лиц, перечня работ и т.п.);
- оплата работ субподрядчика непосредственно заказчиком;
- право заказчика предъявлять субподрядчику требования в связи с нарушением договора субподряда.

Если условие о привлечении субподрядчиков к выполнению работ не согласовано
Подрядчик вправе будет привлечь субподрядчиков для выполнения своих обязательств по договору подряда. Исключение составляет случай, когда обязанность подрядчика выполнить работу лично предусмотрена законом (п. 1 ст. 706 ГК РФ).

6.1.1. Дополнительные условия для привлечения
к выполнению работы субподрядчиков

При согласовании условия о привлечении субподрядчиков стороны могут установить в договоре подряда дополнительные требования, при соблюдении которых подрядчик будет вправе привлечь к выполнению работы третьих лиц. Включение в договор данных положений отвечает интересам заказчика, поскольку выполнение работы конкретными субподрядчиками при определенных условиях может служить для него гарантией соблюдения сроков выполнения работы и высокого качества результата работы, а также влиять на рыночную стоимость изготовленных вещей (вещи, произведенные с участием известных и зарекомендовавших себя субподрядчиков, могут иметь более высокую рыночную стоимость).
В договоре подряда можно предусмотреть следующие условия привлечения субподрядчиков:
- перечень конкретных лиц, которых подрядчик вправе привлекать к выполнению работы (в том числе указать реквизиты, идентифицирующие этих лиц, - наименование, ОГРН и (или) ИНН для организаций, полное имя и реквизиты удостоверяющего личность документа для физических лиц);

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик вправе привлекать для выполнения работы только следующих субподрядчиков: ________ (указываются наименование, ОГРН, ИНН)".
--------------------------------

- перечень лиц, которые не могут быть привлечены к выполнению работ (с указанием сведений, позволяющих идентифицировать этих лиц);

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"К выполнению работ по настоящему договору не могут быть привлечены следующие лица: ___________".
--------------------------------

- обязанность подрядчика в случае возникновения необходимости в привлечении к исполнению своих обязательств субподрядчиков получить письменное согласие заказчика на такое привлечение;

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик не вправе привлекать к выполнению работ субподрядчиков до получения в письменной форме согласия заказчика".
--------------------------------

- обязанность подрядчика письменно уведомить заказчика о заключении договора субподряда (содержание уведомления, порядок и срок его направления также рекомендуется определить договором);

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Не позднее 3 (трех) рабочих дней после заключения договора субподряда с целью исполнения обязательств по настоящему договору подрядчик направляет заказчику уведомление о привлечении к выполнению работ третьих лиц (форма уведомления - приложение N ____ к настоящему договору)".
--------------------------------

- обязанность подрядчика письменно согласовать с заказчиком выбор субподрядчиков (порядок, форма и срок направления запросов и ответов на них устанавливаются в договоре);

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик вправе привлекать к выполнению работы только субподрядчиков, кандидатуры которых предварительно согласованы с заказчиком в письменной форме. Согласование кандидатур производится в следующем порядке: __________________________".
--------------------------------

- право подрядчика привлекать субподрядчиков только к выполнению отдельных видов работ.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков к выполнению следующих видов работ: _______________ (указываются виды работ). Остальные работы, согласованные сторонами по договору, подрядчик обязан исполнить лично".

"Подрядчик не вправе привлекать третьих лиц для выполнения следующих видов работ: _____________(указываются виды работ). Остальные работы могут быть выполнены с привлечением субподрядчиков".
--------------------------------

Последствия нарушения дополнительных требований к привлечению субподрядчиков
Если субподрядчики привлечены с нарушением установленных в договоре ограничений, заказчик на основании п. 2 ст. 706 ГК РФ вправе потребовать от подрядчика возмещения убытков, причиненных участием субподрядчиков в исполнении договора. Указанные убытки подлежат взысканию не с субподрядчика, который непосредственно выполнял работы, а с подрядчика. Этот вывод находит подтверждение в судебной практике и дополнительно обосновывается отсутствием договорных отношений между заказчиком и субподрядчиком (см. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.05.2005 N Ф04-3207/2005(11590-А75-8)). В свою очередь, подрядчик будет не вправе требовать возмещения убытков в виде расходов, понесенных в связи с оплатой работ субподрядчикам (см. Риск генерального подрядчика 6.1.1).
Кроме того, в силу п. 6 ст. 393 ГК РФ при нарушении подрядчиком ограничений на привлечение субподрядчиков, а также в случае возникновения реальной угрозы указанного нарушения заказчик независимо от возмещения убытков может потребовать от подрядчика пресечения соответствующих действий (отстранения от выполнения работ субподрядчиков, устранения угрозы нарушения).
Вместе с тем привлечение подрядчиком субподрядчика в нарушение условий договора не дает заказчику права отказаться от оплаты работ в случае их принятия.
В соответствии с п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) и при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом подрядчику.
Если заказчик отказался принимать выполненные работы и представил мотивированный отказ, то подрядчик должен доказать, что работы выполнены им качественно и в объеме, предусмотренном договором. Подробнее об этом см. п. 9.3.4 настоящих Рекомендаций.
Представляется, что в случае выполнения работ субподрядчиками, привлеченными в нарушение условий договора, у заказчика не будет оснований для отказа от их принятия, если подрядчик докажет, что работы выполнены с надлежащим качеством и в согласованном объеме. Следовательно, по смыслу п. 1 ст. 711 ГК РФ заказчик не вправе будет отказаться и от оплаты выполненных работ.
Чтобы обеспечить исполнение подрядчиком согласованных сторонами дополнительных условий для привлечения субподрядчика, следует предусмотреть в договоре уплату неустойки в виде штрафа за неисполнение данной обязанности (§ 2 гл. 23 ГК РФ).
Если заказчик не заинтересован в выполнении работы кем-либо, кроме подрядчика, то в договоре следует установить обязанность подрядчика выполнять работы лично (п. 1 ст. 706 ГК РФ). О выполнении подрядчиком работы лично см. п. 6.3 настоящих Рекомендаций.

Если дополнительные условия для привлечения подрядчиком к выполнению работы субподрядчиков не согласованы
Подрядчик вправе привлечь любых субподрядчиков для выполнения всех или отдельных видов работ по договору (п. 1 ст. 706 ГК РФ). При этом он несет ответственность перед заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком (п. 3 ст. 706 ГК РФ).

6.1.2. Расчеты заказчика непосредственно с субподрядчиком

По договору субподряда генеральный подрядчик выступает в роли заказчика, поэтому на нем лежит обязанность по оплате выполненной субподрядчиком работы (п. 1 ст. 702, ст. 711 ГК РФ). Однако нередко исполнение данной обязанности зависит от финансирования работ заказчиком. Поэтому для упрощения расчетов стороны могут договориться о том, что работу субподрядчика будет оплачивать непосредственно заказчик, минуя генерального подрядчика (ст. 706 ГК РФ, п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").
Данное условие защищает интересы заказчика, так как он непосредственно производит оплату работ, выполненных субподрядчиком, и может обеспечивать ее своевременное осуществление. В связи с этим исключаются риски, связанные с просрочкой оплаты работ субподрядчиков по вине генерального подрядчика. Условие о непосредственных расчетах заказчика и субподрядчика защищает также интересы генерального подрядчика, поскольку в таком случае субподрядчик сможет взыскать с заказчика задолженность по оплате, освободив тем самым генерального подрядчика от обязанности оплачивать работы и от ответственности за ее неисполнение.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик вправе привлечь для выполнения работы по настоящему договору другое лицо (субподрядчика). Оплата работ, выполненных этим субподрядчиком, осуществляется непосредственно заказчиком на основании следующих документов, подтверждающих надлежащее выполнение порученной субподрядчику работы: копии договора субподряда, заверенной генеральным подрядчиком, оригинала акта о принятии выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями генерального подрядчика и субподрядчика, счета и счета-фактуры, выставленных указанным субподрядчиком. Оплата осуществляется в срок, установленный договором".
--------------------------------

Условие об оплате работ, выполненных субподрядчиком, непосредственно заказчиком должно быть включено также в договор субподряда. Подробнее по данному вопросу см. п. 6.2.3 "Плательщик по договору субподряда" настоящих Рекомендаций.
Стороны могут указать в договоре генерального подряда, что оплата выполненных субподрядчиком работ производится непосредственно заказчиком на основании соответствующего поручения (распоряжения) подрядчика. Однако следует учитывать, что в отсутствие таких распоряжений, а также доказательств возникновения взаимных обязательств заказчика и субподрядчика последний не может взыскать задолженность с заказчика. Ответственность за неоплату работ перед субподрядчиком в этом случае сохраняется за подрядчиком (см. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 04.09.2006 по делу N А29-10684/2005-4).

Если условие о расчетах заказчика непосредственно с субподрядчиком не согласовано
Субподрядчик вправе требовать от генерального подрядчика оплаты выполненного и принятого результата работы независимо от того, произвел заказчик расчет с генеральным подрядчиком или нет (п. 3 ст. 706 ГК РФ) (см. Риск генерального подрядчика 6.1.2). При этом заказчик не вправе предъявлять субподрядчику какие-либо требования, связанные с оплатой работ последнего генеральным подрядчиком (см. Риск заказчика 6.1.2).

6.1.3. Право заказчика предъявлять субподрядчику требования
в связи с нарушением договора субподряда

При некачественном выполнении работы субподрядчиком или нарушении им сроков выполнения заказчик предъявляет требования, предусмотренные ст. ст. 715, 723 ГК РФ, к генеральному подрядчику, который несет ответственность перед заказчиком за последствия ненадлежащего исполнения или неисполнения субподрядчиком обязательств (п. 3 ст. 706 ГК РФ).
Однако в некоторых случаях более эффективным будет обращение с такими требованиями непосредственно к субподрядчику. Для того чтобы у заказчика была такая возможность, в договоре генерального подряда необходимо предусмотреть право заказчика предъявлять субподрядчику требования (претензии) в связи с нарушением субподрядчиком условий договора субподряда (абз. 2 п. 3 ст. 706 ГК РФ), например об устранении недостатков результата работы или возмещении ущерба, причиненного ненадлежащим выполнением работы субподрядчиком (см. Риск субподрядчика 6.1.3).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Если недостатки результата работы возникли вследствие ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, которого подрядчик привлек к выполнению работы, заказчик вправе потребовать их устранения непосредственно от этого субподрядчика".
--------------------------------

Для исполнения данного условия в договор субподряда должна быть включена обязанность субподрядчика выполнить требование, предъявленное заказчиком. По данному вопросу см. п. 6.2.4 "Ответственность субподрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора субподряда" настоящих Рекомендаций.
Также право заказчика предъявлять субподрядчику требования (претензии) в связи с нарушением последним условий договора, может быть предусмотрено в трехстороннем договоре между указанными лицами и генеральным подрядчиком.

Если по условиям договора заказчик не вправе предъявлять субподрядчику требования, связанные с нарушением договора субподряда
Ответственность за последствия ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств в соответствии с п. 3 ст. 706 ГК РФ будет нести генеральный подрядчик, в том числе возмещать убытки, которые возникли, например, в связи с устранением заказчиком недостатков результата работы или ликвидацией последствий аварии, пожара и т.п., случившихся по обстоятельствам, за которые отвечает субподрядчик (см. Риск генерального подрядчика 6.1.4).
Заказчик в свою очередь не вправе предъявлять требования о возмещении убытков, связанных с нарушением договора субподряда, непосредственно субподрядчику (см. Риск заказчика 6.1.3).

6.2. ДОГОВОР СУБПОДРЯДА
Статьи 702, 706 ГК РФ

Договор субподряда заключается подрядчиком для привлечения других лиц к исполнению обязательств, обусловленных договором с заказчиком, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить работы лично (п. 1 ст. 706 ГК РФ). По своей юридической природе данный договор является договором подряда и должен содержать все существенные условия последнего (п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 702, ст. 708 ГК РФ). По отношению к субподрядчику подрядчик по договору субподряда выступает в роли заказчика, а субподрядчик - в роли подрядчика. В связи с этим стороны имеют по отношению друг к другу соответствующие права и обязанности, предусмотренные гл. 37 ГК РФ.

Согласование условий договора субподряда
Договор субподряда имеет некоторые особенности по сравнению с обычным договором подряда. При его заключении стороны должны обратить внимание на следующие моменты:
- содержание и объем работы, поручаемой субподрядчику;
- оплата работ по договору субподряда;
- плательщик по договору субподряда;
- ответственность субподрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора субподряда;
- передача заказчику результата выполненной работы;
- двойной субподряд.

6.2.1. Содержание и объем работы, поручаемой субподрядчику

Генеральный подрядчик вправе поручить субподрядчику выполнение, как части, так и всей работы, обусловленной договором генерального подряда (п. 1 ст. 706 ГК РФ). Однако при согласовании в договоре субподряда содержания и объема работы ему следует учитывать условия договора о привлечении субподрядчиков.
Если договором генерального подряда разрешено передавать субподрядчикам только отдельные виды работ, это означает, что остальную работу подрядчик должен выполнить лично. Соответственно, он не вправе привлечь субподрядчика для выполнения всей работы. Подробнее по данному вопросу см. п. 6.1.1 "Согласование дополнительных условий для привлечения подрядчиком к выполнению работы субподрядчиков" настоящих Рекомендаций.

6.2.2. Оплата работ по договору субподряда

При согласовании условия об оплате работ, выполненных субподрядчиком, стороны нередко ставят оплату в зависимость от следующих обстоятельств:
1) генподрядчик сдает результат работ заказчику или получает от него оплату. Условие договора субподряда о том, что срок оплаты выполненных субподрядчиком работ исчисляется с момента, когда генподрядчик сдал их результат заказчику или получил от него оплату, само по себе не противоречит законодательству. Подтверждение данного вывода см. в Правовых позициях высших судов.

Примечание. Ранее арбитражные суды на основании п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 признавали не соответствующим закону условие договора субподряда об оплате выполненных субподрядчиком работ с момента получения генподрядчиком оплаты от заказчика (см., например, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.08.2016 N Ф07-6246/2016 по делу N А56-85047/2015);

2) подписан акт приемки законченного строительством объекта. Судебная практика по вопросу о том, можно ли ставить окончательную оплату выполненных субподрядчиком работ в зависимость от данного обстоятельства, неоднозначна. Более распространен подход, согласно которому такое условие допустимо.

- Судебную практику, подтверждающую существование двух позиций по вопросу о возможности поставить окончательную оплату выполненных субподрядчиком работ в зависимость от подписания акта приемки законченного строительством объекта, см. в Путеводителе по судебной практике.

Примечание. Судебная практика по указанному условию сформирована по договорам, заключенным до 1 июня 2015 г., т.е. до того, как в ГК РФ появилась ст. 327.1. Верховный Суд РФ указал: согласно п. 1 ст. 314 ГК РФ исчисление срока исполнения обязательства допускается в том числе с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором. Подобным же образом в силу ст. 327.1 ГК РФ исполнение обязанностей, а равно и осуществление, изменение и прекращение определенных прав по договорному обязательству могут быть обусловлены совершением или несовершением одной из сторон обязательства определенных действий либо наступлением иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон (см. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2017), утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017).

6.2.3. Плательщик по договору субподряда

Поскольку по договору субподряда генеральный подрядчик выступает в роли заказчика, на нем лежит обязанность по оплате выполненной субподрядчиком работы (п. 1 ст. 702, ст. 711 ГК РФ) независимо от того, произвел с ним расчеты заказчик или нет (п. 3 ст. 706 ГК РФ). Однако стороны договора могут согласовать условие о том, что выполненную субподрядчиком работу оплачивает непосредственно заказчик, минуя генерального подрядчика (ст. 706 ГК РФ, п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").
Данное условие защищает интересы генподрядчика и субподрядчика, поскольку в таком случае последний сможет взыскать задолженность по оплате работы непосредственно с заказчика, освободив тем самым генерального подрядчика от обязанности оплачивать работу и от ответственности за ее неисполнение.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Оплату выполненных по настоящему договору работ осуществляет лицо, являющееся заказчиком по договору генерального подряда N ____ от "____"________ 200_ г., во исполнение которого заключен настоящий договор субподряда".
--------------------------------

Условие об оплате работ, выполненных субподрядчиком, непосредственно заказчиком должно быть включено также в договор генерального подряда. Подробнее по данному вопросу см. п. 6.1.2 "Условие о расчетах заказчика непосредственно с субподрядчиком" настоящих Рекомендаций.

Если условие о расчетах заказчика непосредственно с субподрядчиком не согласовано
Выполненные работы подлежат оплате генеральным подрядчиком в порядке, установленном договором и законом (п. 1 ст. 711 ГК РФ). Субподрядчик, согласно п. 3 ст. 706 ГК РФ, не вправе требовать оплаты работ от заказчика (см. Риск генерального подрядчика 6.1.2).

Солидарная ответственность заказчика и генерального подрядчика за нарушение условия об оплате работы
По соглашению сторон может быть предусмотрена солидарная ответственность заказчика и генерального подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком либо заказчиком (если на него возложена обязанность по оплате) обязательства по оплате субподрядчику выполненной работы (абз. 2 п. 3 ст. 706 ГК РФ, ст. 322, п. 4 ст. 421 ГК РФ). Такая ответственность может быть установлена:
- в трехстороннем соглашении между заказчиком, генеральным подрядчиком и субподрядчиком;
- в договоре субподряда, который должен также подписать заказчик, принимающий на себя только эту ответственность.
В обоих случаях рекомендуется согласовать право субподрядчика требовать оплаты выполненной работы как от заказчика и генерального подрядчика совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (п. 1 ст. 323 ГК РФ), возмещения в том же порядке причиненных убытков, уплаты неустойки и процентов на сумму долга (ст. ст. 15, 393, 330, 395 ГК РФ).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Заказчик и генеральный подрядчик несут солидарную ответственность за нарушение последним обязанности по оплате выполненной субподрядчиком работы. При нарушении генеральным подрядчиком указанной обязанности субподрядчик вправе потребовать оплаты выполненной работы, возмещения убытков, уплаты неустойки за просрочку оплаты, а также процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, как от заказчика и генерального подрядчика совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга".
--------------------------------

Если условие о солидарной ответственности генерального подрядчика и заказчика не согласовано
Субподрядчик вправе предъявить требование об оплате только генеральному подрядчику. В случае неисполнения последним обязанности по оплате заказчик не будет нести ответственности перед субподрядчиком (см. Риск субподрядчика 6.2.1).

6.2.4. Ответственность субподрядчика за неисполнение
или ненадлежащее исполнение договора субподряда

В соответствии с нормами гл. 37 ГК РФ субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работы (в том числе за некачественное выполнение, недостатки результата работы или нарушение сроков ее выполнения) перед генеральным подрядчиком в рамках заключенного между ними договора. Генеральный подрядчик в свою очередь отвечает перед заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком (п. 3 ст. 706 ГК РФ).
В интересах подрядчика закрепить в договоре право заказчика предъявлять претензии по поводу ненадлежащего качества работы непосредственно субподрядчику, поскольку в таком случае заказчик сможет потребовать от последнего возмещения убытков и уплаты штрафных санкций за нарушение договора субподряда (см. Риск субподрядчика 6.1.3).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"При обнаружении каких-либо недостатков в результате работ субподрядчик обязан их устранить по требованию, предъявленному генеральным подрядчиком либо лицом, являющимся заказчиком по договору генерального подряда N ___ от "___"______ 200_ г.".
--------------------------------

Право заказчика предъявлять претензии по поводу ненадлежащего качества работы непосредственно субподрядчику должно быть предусмотрено также в договоре генерального подряда. По данному вопросу см. п. 6.1.3 "Право заказчика предъявлять субподрядчику требования в связи с нарушением договора субподряда" настоящих Рекомендаций.

Если договором не предусмотрено право заказчика предъявлять требования непосредственно субподрядчику
Заказчик не может предъявлять субподрядчику требование о возмещении убытков, причиненных нарушением договора субподряда (Риск заказчика 6.1.3), и должен обратиться с этим требованием к генеральному подрядчику (п. 3 ст. 706 ГК РФ).

6.2.5. Передача заказчику результата выполненной
субподрядчиком работы

Субподрядчик обязан сдать результат выполненной работы генеральному подрядчику, а тот в свою очередь - заказчику по договору генерального подряда (п. 1 ст. 702 ГК РФ).
Однако стороны могут включить в договор субподряда обязанность субподрядчика передать результат работы непосредственно заказчику. В этом случае последний должен будет принять предложенное субподрядчиком исполнение (п. 1 ст. 313 ГК РФ), правомерность которого будет подтверждаться договором субподряда.

Если условие о передаче заказчику результата работы не согласовано
Субподрядчик не вправе будет передать результат работы заказчику вместо генерального подрядчика. Если стороны договорились устно, но не включили такое условие в договор и субподрядчик предложил заказчику принять у него работу, последний может отказаться от приемки до получения от генерального подрядчика подтверждения, что обязанность по передаче результата работы заказчику действительно возложена на субподрядчика (п. 1 ст. 702, ст. 313 ГК РФ).

6.2.6. Двойной субподряд

Субподрядчик вправе привлечь к выполнению работы по договору субподряда другое лицо, если из закона или договора субподряда не вытекает обязанность субподрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично (п. 1 ст. 706 ГК РФ). В этом случае субподрядчик является основным (главным, генеральным) субподрядчиком, а привлеченное лицо - субподрядчиком. Основной субподрядчик по отношению к своему субподрядчику выступает в качестве заказчика и генерального подрядчика (ст. 706 ГК РФ). С другими лицами: заказчиком, генеральным подрядчиком - субподрядчик, привлеченный основным субподрядчиком, договорных отношений не имеет.
Привлечение основным субподрядчиком к выполнению работы субподрядчика осуществляется по правилам, изложенным в настоящих Рекомендациях, путем заключения между основным субподрядчиком и субподрядчиком договора субподряда, который по своей юридической природе является договором подряда (гл. 37 ГК РФ).

6.2.7. В каких случаях и каком объеме подрядчик несет
ответственность за действия привлеченного им субподрядчика

Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за последствия, наступившие в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком. Исключение - случаи, когда законом или договором предусмотрено право заказчика предъявлять требования, связанные с нарушением договоров, которые заключены каждым из них с подрядчиком, непосредственно к субподрядчику (п. 3 ст. 706 ГК РФ).
Заказчик, право которого нарушено, может требовать от подрядчика полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором подряда не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (п. 1 ст. 15 ГК РФ).
Так, если субподрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать от подрядчика возмещения убытков (п. 3 ст. 706, п. 2 ст. 715 ГК РФ).
В случае когда субподрядчик выполнил работы некачественно, заказчик с учетом п. 3 ст. 706 ГК РФ вправе, если иное не установлено законом или договором, предъявить к подрядчику требования, установленные ст. 723 ГК РФ.
Так, если субподрядчик выполнил работы с недостатками, которые делают результат работ непригодным для предусмотренного в договоре подряда использования, заказчик вправе по своему выбору потребовать от подрядчика безвозмездно устранить недостатки в разумный срок, соразмерно уменьшить установленную за работу цену, возместить свои расходы на устранение недостатков при условии, что право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (п. 1 ст. 723 ГК РФ).

6.3. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКОМ ЛИЧНО
Статьи 702, 706 ГК РФ

В договоре подряда можно установить обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично. В этом случае подрядчик не вправе будет привлекать к ее выполнению субподрядчиков (п. 1 ст. 706 ГК РФ).
Согласование указанного условия в интересах заказчика, так как выполнение работы непосредственно подрядчиком при определенных условиях может служить для заказчика гарантией соблюдения сроков выполнения работы и высокого качества результата работы, также влиять на рыночную стоимость изготовленных вещей.
Для согласования такого условия в договоре необходимо указать, что работы должны выполняться лично подрядчиком, либо установить запрет на привлечение к выполнению работы третьих лиц (субподрядчиков).

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Подрядчик обязан выполнять все предусмотренные договором работы лично".

"Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков)".
--------------------------------

Последствия нарушения обязанности выполнить работы лично
Если подрядчик, несмотря на обязанность выполнять работы лично, привлек к исполнению договора подряда субподрядчика, заказчик в соответствии с п. 2 ст. 706, ст. 15 ГК РФ вправе потребовать от генерального подрядчика возмещения убытков, причиненных участием субподрядчика в исполнении договора.
Кроме того, в силу п. 6 ст. 393 ГК РФ в случае привлечения к выполнению работ третьих лиц в нарушение обязательства не привлекать их либо при возникновении реальной угрозы указанного нарушения заказчик независимо от возмещения убытков может потребовать от подрядчика пресечения соответствующих действий (отстранения таких лиц от выполнения работ, устранения угрозы нарушения).
Условие договора о выполнении работ лично подрядчиком сформулировано как позитивное (обязанность совершить определенное действие). Однако оно может быть истолковано и как негативное (обязанность воздержаться от определенного действия - привлечения третьих лиц). Поэтому можно предположить, что такая формулировка условия договора дает заказчику право заявлять требование по п. 6 ст. 393 ГК РФ.

Если условие о личном выполнении работы подрядчиком не согласовано
Подрядчик вправе будет привлечь к выполнению работы субподрядчиков, за исключением случая, когда обязанность подрядчика выполнить работу лично предусмотрена законом (п. 1 ст. 706 ГК РФ). Заказчик в этом случае не вправе будет отказаться от оплаты выполненной работы в связи с привлечением к ее выполнению субподрядчиков (Риск заказчика 6.3.1). Указание в договоре на то, что подрядчик производит работы своими силами и средствами, не признается согласованием обязанности выполнить работы лично (см. Риск заказчика 6.3.2).

7. ЦЕНА РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статьи 709, 710 ГК РФ

7.1. СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕНЫ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

Цена работы представляет собой денежное выражение стоимости работы (как самого процесса, так и его результата) в единицах определенной валюты.

Согласование цены работы
Договор подряда является возмездным договором (ст. ст. 423, 702 ГК РФ) и должен содержать условие о цене, которую заказчик обязан уплатить подрядчику за работу (ст. 709 ГК РФ).
Некоторые суды указывают, что условие о цене является существенным условием договора подряда и, следовательно, обязательно должно быть согласовано. В то же время в судебной практике имеется и иная позиция, в соответствии с которой цена работы не является для договора подряда существенным условием.

- Судебную практику, подтверждающую наличие двух позиций по вопросу признания условия о цене работы существенным для договора подряда, см. в Путеводителе по судебной практике.

Условие о цене будет существенным, когда в ходе переговоров одна из сторон заявила о необходимости его согласования, даже если оно восполнялось бы диспозитивной нормой. В этом случае п. 3 ст. 424 ГК РФ не восполняет отсутствие согласия по условию о цене или порядке ее определения и договор не будет заключен до тех пор, пока стороны не согласуют названное условие, или сторона, предложившая условие о цене или заявившая о ее согласовании, не откажется от своего предложения, или отказ не будет следовать из ее поведения (п. 1 ст. 432 ГК РФ, п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49, п. 11 Обзора судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165)).
Чтобы цена работы не стала предметом споров, сторонам следует согласовать:
- размер цены или способ ее определения;
- условие о том, включается ли НДС в цену работы;
- смету (если стороны намерены определить цену таким образом);
- условие о распределении экономии, полученной подрядчиком.

Если условие о цене работы не согласовано
Цена может быть признана судом существенным условием договора подряда. В таком случае при ее несогласовании договор будет являться незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Однако судебная практика неоднозначна. Некоторые суды не считают условие о цене существенным. В силу п. 1 ст. 709 ГК РФ заказчик обязан оплатить работу по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные работы согласно п. 3 ст. 424 ГК РФ (см. Риск заказчика 7.1.1, Риск подрядчика 7.1.1).
Если одна из сторон заявила о необходимости согласования условия о цене, но стороны не достигли соглашения, договор будет признан незаключенным, поскольку при данных обстоятельствах это условие признается существенным и не восполняется п. 3 ст. 424 ГК РФ (п. 1 ст. 432 ГК РФ, п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49, п. 11 Обзора судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165)).
Вместе с тем сторона, которая полностью или частично приняла исполнение по договору или другим образом подтвердила его действие, не вправе требовать признания договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств противоречит принципу добросовестности. Например, если работы выполнены до согласования всех существенных условий договора подряда, но впоследствии сданы подрядчиком и приняты заказчиком, то к их отношениям применяются правила о подряде и между сторонами возникают соответствующие обязательства (п. 3 ст. 432 ГК РФ, п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49, п. 7 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2020)).

7.1.1. Размер цены работы по договору подряда
или способ ее определения

Стороны могут указать цену непосредственно в договоре в виде определенной суммы денежных средств, уплачиваемых за всю работу в целом.
Цена может быть установлена в рублях, условных денежных единицах (у. е.) или валюте иностранного государства. Однако в соответствии с п. 1 ст. 317, ст. 140 ГК РФ расчеты на территории РФ должны производиться только в рублях, за исключением случаев, предусмотренных законом (см. п. 3 ст. 317 ГК РФ, Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.11.2002 N 70 "О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации"). Поэтому, указав цену в у. е. или в иностранной валюте, стороны должны обязательно согласовать курс, по которому она будет пересчитана в рубли для осуществления платежа (п. 2 ст. 317 ГК РФ).
Подробнее по этому вопросу см. п. 8.1.1 "Расчеты денежными средствами" настоящих Рекомендаций.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Цена работы составляет ________ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей".

"Цена работы составляет сумму в рублях, эквивалентную _____________ (указывается сумма цифрами и прописью) долларам в США по курсу ЦБ РФ на момент осуществления платежа".
--------------------------------

Если на момент заключения договора сторонам не известен точный размер цены, они могут указать в договоре способ ее определения (п. 1 ст. 709 ГК РФ), например:
- согласование базовой части цены работы и индекса цен, который рассчитывается уполномоченным государственным органом, либо коэффициента. Цена работы при этом может определяться путем умножения базовой части на индекс, действующий на момент, установленный договором. Согласование цены указанным способом позволяет произвести ее расчет в ходе исполнения договора без дополнительных согласований.

- Судебную практику, подтверждающую возможность согласования способа определения цены, позволяющего рассчитать ее на момент исполнения договора, см. в Путеводителе по судебной практике.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Цена работы определяется путем умножения базовой части, которая составляет _________ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей, на индекс ________ (указывается название индекса и государственный орган, который его определяет), действующий на момент оплаты".

"Цена работы составляет ___________ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей и подлежит ежемесячной индексации в соответствии с индексом потребительских цен на товары и услуги населению по РФ, определяемым Росстатом".
--------------------------------

Данный способ позволяет произвести расчет цены без дополнительных согласований. Поэтому если указанный в договоре индекс или коэффициент возрастет, то заказчик будет обязан оплатить работу по более высокой цене и не вправе будет ссылаться на то, что стороны не согласовали увеличение цены работы (см. Риск заказчика 7.1.2).

- согласование тарифа (цены) на аналогичную работу, утвержденного государственным или муниципальным органом для государственных и муниципальных предприятий и действующего на момент, установленный договором (например, на дату выставления счета, осуществления платежа и т.п.). Цена работы будет определяться в соответствии с этим тарифом;

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Цена работы определяется согласно тарифам на __________ (указывается вид работ), утвержденным ____________ (указывается вид и название документа о тарифах, дата принятия и принявший орган), действующим на момент _____________".
--------------------------------

- согласование тарифа по нормам времени и объема работы. Цена в этом случае определяется путем умножения данных показателей.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Цена работы по изготовлению мебели определяется согласно расценкам на работу специалистов подрядчика и нормативам их работы:
- столяр-плотник - 1000 рублей в час, норматив - 3 часа на одно изделие;
- лакокрасочник - 500 рублей в час, норматив - 1 час на одно изделие.
Виды и количество заказанных изделий указаны в приложении N 1 к договору".
--------------------------------

Возмещение дополнительных расходов подрядчика должно быть закреплено в договоре (п. 1 ст. 709, ст. ст. 421, 309.2 ГК РФ). По умолчанию все издержки включены в цену (п. 2 ст. 709 ГК РФ).
В отношении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ предусмотрены особые правила. Заказчик обязан возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика. Иное может быть установлено в договоре (ст. 762 ГК РФ).

Если размер и (или) способ определения цены в договоре не указаны
Цена может быть признана судом существенным условием договора подряда. В таком случае при ее несогласовании договор будет являться незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ). В то же время в судебной практике существует и иная позиция, согласно которой цена работы не является существенным условием договора подряда. Подробнее о последствиях несогласования цены при применении судами указанных позиций см. Риск заказчика 7.1.1, Риск подрядчика 7.1.1.
Если одна из сторон заявила о необходимости согласования условия о размере и (или) способе определения цены, но стороны не достигли соглашения, то договор также может быть признан незаключенным, поскольку при данных обстоятельствах это условие признается существенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ, п. 11 Обзора судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165)). Подробнее об этом см. п. 7.1 настоящих Рекомендаций.
Вместе с тем сторона, которая полностью или частично приняла исполнение по договору или другим образом подтвердила его действие, не вправе требовать признания договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ).

7.1.2. Включение НДС в цену работы по договору подряда

В договоре рекомендуется отразить, включает ли цена работы налог на добавленную стоимость (НДС). Если стороны предусмотрели, что цена включает НДС, то необходимо определить, какая ее часть является собственно стоимостью работ, а какая - НДС (например, указать действующую ставку налога).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Цена работы составляет _________ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей и включает в себя НДС (____%) в сумме ____________ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей".
--------------------------------

Стороны могут предусмотреть, что цена не включает НДС. В этом случае заказчик будет обязан уплатить подрядчику сумму налога сверх установленной цены.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Цена работы составляет ___________ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей и не включает в себя НДС. Сумма НДС (____%) подлежит оплате заказчиком сверх цены работы, указанной в договоре".
--------------------------------

Если подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения и на сумму цены работы НДС не начисляется, рекомендуется отразить это обстоятельство в договоре.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Цена работы составляет ___________ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей. В связи с применением подрядчиком упрощенной системы налогообложения и на основании уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения от "__" ___________ 20__ г. N _________ налог на добавленную стоимость не уплачивается".
--------------------------------

Если в договоре не указано, что НДС не входит в цену работы
Подрядчик может получить оплату по договору в меньшем размере, чем рассчитывал при заключении договора, поскольку из нее будет выделена сумма НДС (см. Риск подрядчика 7.1.3).

7.1.3. Составление сметы по договору подряда

Стороны могут определить цену путем составления и согласования сметы (п. 3 ст. 709 ГК РФ). Смета представляет собой расчет, в котором детально указываются виды работ, их объем и стоимость, стоимость предоставляемых подрядчиком материалов и оборудования и др. Общая цена работы по договору определяется путем сложения всех статей сметы. Смета может содержаться в тексте договора подряда, а может быть оформлена в виде приложения к нему.
Составление сметы защищает в первую очередь интересы заказчика, поскольку смета позволяет детально зафиксировать стоимость, как всей работы, так и ее отдельных этапов или видов работ, получить представление о составе цены, о соотношении издержек и вознаграждения подрядчика, о наименовании, количестве и стоимости предоставляемых подрядчиком материалов и оборудования. Кроме того, наличие сметы помогает избежать необоснованного завышения или занижения цены работы.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Цена работы указана в смете (приложение N 1 к договору)".
--------------------------------

В соответствии с договором подряда обязанность по составлению сметы может быть возложена на подрядчика. В таком случае смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента ее подтверждения заказчиком (п. 3 ст. 709 ГК РФ). Подтверждением можно считать подписание сметы уполномоченным представителем заказчика.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Цена работы определяется сметой, которую обязан составить подрядчик в течение ___________ (указывается период времени) со дня заключения договора. Смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента ее подтверждения заказчиком".
--------------------------------

Если смета не согласована
В таком случае условие о цене работы будет не согласовано, если в тексте договора отсутствует цена работы или способ ее определения. О последствиях несогласования цены см. п. 7.1 "Согласование цены работы" настоящих Рекомендаций.
Кроме того, несогласование сметы, при отсутствии в договоре условия о предмете, может повлечь признание договора незаключенным (п. 1 ст. 432, ст. 702 ГК РФ). Соответственно, подрядчик не вправе будет требовать оплаты выполненной работы, а также уплаты неустойки. Однако в судебной практике есть подход, в соответствии с которым документально подтвержденный факт выполнения и приемки работ влечет обязанность заказчика по их оплате (см. Риск подрядчика 7.1.2).
Сторона, которая полностью или частично приняла исполнение по договору или другим образом подтвердила его действие, не вправе требовать признания договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ).

7.1.4. Распределение экономии подрядчика

Экономия подрядчика представляет собой разницу между размером издержек подрядчика, которые были заложены в цену (п. 2 ст. 709 ГК РФ), и суммой фактических расходов, понесенных при выполнении работы (ст. 710 ГК РФ).
Экономия подрядчика может возникнуть в результате использования им более эффективных методов выполнения работы либо вследствие изменения рыночных цен на те материалы и оборудование, которые учитывались при определении цены (в смете).
В связи с этим не признается экономией подрядчика уменьшение расходов в связи с применением более дешевого по сравнению с предусмотренным договором или сметой материала.

- Судебную практику, подтверждающую, что использование более дешевых по сравнению с предусмотренными договором материалов не образует экономию подрядчика, см. в Путеводителе по судебной практике.

По смыслу ст. 710 ГК РФ экономия подрядчика допустима только при соблюдении первоначального объема работ.

- Судебную практику, подтверждающую указанный вывод, см. в Путеводителе по судебной практике.

Следовательно, выполнение подрядчиком меньшего по сравнению с предусмотренным договором объема работы не считается его экономией.
В договоре подряда может быть предусмотрено распределение полученной подрядчиком экономии между сторонами (п. 2 ст. 710 ГК РФ), например в процентном соотношении.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Полученная подрядчиком экономия подлежит распределению между сторонами в следующем соотношении: заказчику ___________ процентов, подрядчику ____________ процентов".
--------------------------------

Могут ли стороны предусмотреть в договоре условие о том, что сумма экономии, полученной при исполнении договора, подрядчику не выплачивается?
Ответ: Судебная практика по данному вопросу неоднозначна.
Обоснование: Некоторые суды указывают, что условие о невыплате подрядчику экономии противоречит положениям ст. 710 ГК РФ и является недействительным (ст. ст. 10, 168 ГК РФ). В то же время существует подход, согласно которому п. 2 ст. 710 ГК РФ допускает отклонение от общего правила п. 1 ст. 710 ГК РФ, в том числе в виде согласования данного условия.

- Судебную практику, подтверждающую наличие двух позиций по вопросу о том, является ли недействительным условие о невыплате подрядчику суммы экономии, полученной при исполнении договора, см. в Путеводителе по судебной практике.

Если условие о распределении между сторонами полученной подрядчиком экономии не согласовано
Подрядчик сохраняет право на оплату работы по предусмотренной договором цене, если заказчик не докажет, что в результате экономии ухудшилось качество работ (п. 1 ст. 710 ГК РФ).

7.2. ТВЕРДАЯ И ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА РАБОТЫ (СМЕТА)
ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статья 709 ГК РФ

Согласование условия о твердой или приблизительной цене (смете)
Согласование цены или сметы в качестве твердой или приблизительной (п. 4 ст. 709 ГК РФ) зависит от того, допускают ли стороны ее изменение в процессе исполнения договора в связи с обстоятельствами, по причине которых выполнение работы по прежней цене может оказаться невыгодным той или иной стороне (например, необходимость производства дополнительных работ, изменение стоимости материалов и оборудования, уровня инфляции, изменение рыночных или нормативно установленных индексов цен, коэффициентов и т.п.).
В зависимости от своих намерений стороны могут согласовать:
- условие о твердой цене (смете);
- условие о приблизительной цене (смете).

Если в договоре не указано, какой является цена - твердой или приблизительной
Цена будет считаться твердой, и каждая из сторон не вправе потребовать ее изменения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов (п. 6 ст. 709 ГК РФ).
Подрядчик вправе потребовать увеличения твердой цены только в случае, предусмотренном абз. 2 п. 6 ст. 709 ГК РФ.

7.2.1. Твердая цена (смета) работы по договору подряда

Условие договора о твердой цене выгодно преимущественно заказчику, поскольку при его согласовании цена не может быть изменена по требованию подрядчика в случае необходимости проведения дополнительных работ или увеличения фактических затрат последнего (см. Риски подрядчика 7.2.2, 7.2.3).
На практике для обозначения твердой цены работы используются следующие термины: "закрытая цена", "фиксированная цена", "окончательная цена". В договоре также может быть указано на то, что цена работы не подлежит изменению. Однако во избежание спорных ситуаций рекомендуется употреблять понятие, используемое в п. 4 ст. 709 ГК РФ, - "твердая цена (смета) работы".
Твердая цена может быть выражена в определенной сумме денежных средств, уплачиваемых за выполненные работы.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Цена работы по настоящему договору является твердой и составляет _______ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей".

"Цена работы определяется согласно смете (приложение N 1 к настоящему договору). Смета является твердой, изменению не подлежит".
--------------------------------

7.2.2. Приблизительная цена (смета)
работы по договору подряда

Если стороны не могут заранее определить полный объем работ, подлежащих выполнению по договору подряда, и (или) размер необходимых расходов, в том числе количество и стоимость материалов и оборудования, предоставляемых подрядчиком, объем и стоимость услуг, оказываемых подрядчику третьими лицами, другие издержки подрядчика, сторонам рекомендуется определить в договоре цену приблизительно (п. п. 4, 5 ст. 709 ГК РФ).
Согласование условия о приблизительной цене в большей степени защищает интересы подрядчика, поскольку в случае необходимости выполнения дополнительных, не учтенных договором подряда работ он может увеличить цену на стоимость этих работ. Такое увеличение возможно при условии своевременного предупреждения об этом заказчика и отсутствия с его стороны возражений на превышение указанной в договоре подряда цены работы согласно абз. 1 п. 5 ст. 709 ГК РФ (см. Риск заказчика 7.2.1). Подрядчик также сможет увеличить приблизительную цену на сумму превышения фактических затрат (см. Риск заказчика 7.2.2).
На практике для обозначения приблизительной цены работы используются следующие термины: "открытая цена", "ориентировочная цена", "предварительная цена", "договорная цена". При этом не рекомендуется включать в договор условие о том, что изменение ориентировочной цены возможно по соглашению сторон, поскольку в этом случае цена не будет считаться приблизительной (см. Риск подрядчика 7.2.1).

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Приблизительная цена работы составляет ____________ (указывается сумма цифрами и прописью) рублей. Окончательная сумма, подлежащая уплате за выполненные работы, определяется на основании акта о приемке результата работ, в котором указана стоимость дополнительно выполненных подрядчиком и согласованных заказчиком работ".

"Цена работы указана в смете (приложение N 1 к настоящему договору). Смета является приблизительной и подлежит уточнению при согласовании сторонами дополнительного объема работы в порядке, установленном договором".
--------------------------------

Заказчику при согласовании цены следует учесть, что наличие в договоре условия о корректировке цены в зависимости от каких-либо обстоятельств свидетельствует о согласовании приблизительной цены, даже если она определена в конкретной сумме денежных средств. В случае наступления указанных в договоре обстоятельств цена может быть изменена даже после оплаты заказчиком стоимости работ, согласованной при заключении договора (см. Риск заказчика 7.2.3).

Если условие о приблизительной цене работы не согласовано
В этом случае цена работы считается твердой и подрядчик не вправе будет требовать ее увеличения, а заказчик - уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов (п. 4, абз. 1 п. 6 ст. 709 ГК РФ). Так, подрядчик не сможет потребовать увеличения цены, ссылаясь на необходимость проведения дополнительных работ (см. Риск подрядчика 7.2.2) или на увеличение своих расходов (см. Риск подрядчика 7.2.3), за исключением ситуации, когда цена работы изменилась по причине существенного возрастания стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которое нельзя было предусмотреть при заключении договора (абз. 2 п. 6 ст. 709 ГК РФ).

7.3. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статья 709 ГК РФ

Условие об изменении цены работы означает, что с момента заключения договора до момента его прекращения согласованный размер цены может быть увеличен или уменьшен на определенную сумму.

Согласование изменения цены работы
Цена договора подряда после его заключения может быть изменена по соглашению сторон, или на условиях договора, или в установленном законом порядке (п. 2 ст. 424, п. п. 5, 6 ст. 709 ГК РФ).
В ряде случаев у сторон может возникнуть необходимость изменить договорную цену. Например, это касается случаев, когда в процессе исполнения договора появились обстоятельства, из-за которых выполнение работы по прежней цене становится невыгодным той или иной стороне (изменение стоимости материалов и оборудования, уровня инфляции, рыночных или нормативно установленных индексов цен, коэффициентов и т.п.).
Стороны могут согласовать в договоре следующие способы изменения цены:
- изменение цены по соглашению сторон;
- одностороннее изменение цены;
- автоматическое изменение цены при наступлении определенных условий.

Если условие об изменении цены не согласовано
Цена может быть изменена по соглашению сторон (п. 1 ст. 450, п. 2 ст. 424 ГК РФ) либо по требованию подрядчика в следующих случаях:
- при согласовании твердой цены - в связи с существенным изменением обстоятельств, на которое стороны не рассчитывали (абз. 2 п. 6 ст. 709 ГК РФ);
- при согласовании приблизительной цены - в порядке, установленном п. 5 ст. 709 ГК РФ.
Также изменение цены, как и других условий договора, возможно в судебном порядке по основаниям, указанным в п. 2 ст. 450 и ст. 451 ГК РФ.

Является ли уменьшение или увеличение объема работы основанием для изменения ее цены
Увеличить цену работы по договору подряда на стоимость дополнительно выполненного объема работ подрядчик может в том случае, если цена работы определена приблизительно (п. 4 ст. 709 ГК РФ). Условием такого увеличения является своевременное предупреждение заказчика о необходимости выполнения дополнительного объема работ и отсутствие возражений с его стороны (п. 5 ст. 709 ГК РФ). Согласие заказчика считается полученным и в том случае, если он принял эти работы без возражений. Подробнее см. Риск заказчика 7.2.1.
Уменьшить цену работы, которая определена приблизительно, заказчик по договору подряда может в том случае, если выполненный подрядчиком объем работы оказался меньше учтенного при согласовании цены. Полагаем, такой вывод можно сделать на основании п. 1 ст. 702 и п. 4 ст. 709 ГК РФ.
При изменении объема работы, за которую установлена твердая цена, подрядчик не вправе требовать ее увеличения, а заказчик - уменьшения, даже если в момент заключения договора было невозможно предусмотреть полный объем работ (п. 6 ст. 709 ГК РФ). Исключением является договор строительного подряда. При выполнении работ по нему подрядчик вправе требовать пересмотреть смету, если стоимость работ по независящим от него причинам превысила смету не менее чем на 10% (п. 3 ст. 744 ГК РФ).
Вместе с тем существует позиция судов о том, что, если заказчик принял дополнительные работы без возражений по актам, в которых указаны вид и стоимость работ, это означает, что он согласовал их выполнение. В таком случае подрядчик вправе требовать оплаты. См. Путеводитель по судебной практике.

Внимание! По договору бытового подряда цена работы не может быть выше устанавливаемой или регулируемой госорганами (ст. 735 ГК РФ). Из этого следует, что в случае выполнения дополнительных работ по нему окончательная цена не должна превышать установленный или урегулированный предел.

В каких случаях можно изменить (увеличить или уменьшить) твердую цену работы по договору подряда
По общему правилу подрядчик не может требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, даже если в момент заключения договора подряда невозможно было предусмотреть полный объем работ или расходов (п. 6 ст. 709 ГК РФ).
Вместе с тем твердую цену можно изменить:
- по соглашению сторон;
- при определенных условиях заказчиком или подрядчиком в одностороннем порядке, если это установлено в договоре;
- автоматически при наступлении определенных условий, закрепленных в договоре;
- по иным основаниям, предусмотренным законом, в установленном законом порядке (п. 2 ст. 424 ГК РФ).
Закон предусматривает следующие основания, по которым можно изменить твердую цену, в частности:
- существенно возросла стоимость материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, либо услуг, оказываемых ему третьими лицами, что нельзя было предусмотреть при заключении договора. В этом случае подрядчик вправе требовать увеличить цену, а при отказе заказчика - расторгнуть договор (абз. 2 п. 6 ст. 709 ГК РФ).
Договор строительного подряда имеет особенность: подрядчик вправе требовать пересмотреть смету, если стоимость работ по независящим от него причинам превысила смету не менее чем на 10% (п. 3 ст. 744 ГК РФ).
По договору бытового подряда цена работы не может быть выше устанавливаемой или регулируемой госорганами. Из чего следует, что окончательная цена не может превышать установленный или урегулированный предел (ст. 735 ГК РФ);
- подрядчик выполнил работы с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования. В этом случае заказчик вправе требовать соразмерно уменьшить цену, установленную за работу (абз. 3 п. 1 ст. 723 ГК РФ).

В каких случаях заказчик может уменьшить цену работы по договору подряда
При определенных условиях заказчик вправе уменьшить цену работы в одностороннем порядке, если это предусмотрено договором подряда.
Если цена работы является приблизительной и, например, выполненный подрядчиком объем работы оказался меньше учтенного при согласовании цены, заказчик может требовать ее уменьшить. Полагаем, такой вывод можно сделать на основании п. 1 ст. 702 и п. 4 ст. 709 ГК РФ.
Если подрядчик выполнил работы с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования, заказчик также вправе потребовать соразмерно уменьшить цену работы (как твердую, так и приблизительную) (абз. 3 п. 1 ст. 723 ГК РФ).
Кроме того, заказчик вправе уменьшить цену в судебном порядке по основаниям, указанным в п. 2 ст. 450 и ст. 451 ГК РФ.

7.3.1. Изменение цены работы по соглашению сторон
в рамках договора подряда

Стороны вправе изменить цену работ в любой момент в течение срока действия договора по взаимному согласию (п. 1 ст. 424, п. 1 ст. 450 ГК РФ) независимо от того, была цена в договоре определена как твердая или как приблизительная.
Соглашение об изменении цены договора подряда заключается в той же форме, что и договор (п. 1 ст. 452 ГК РФ). То есть при заключении договора в письменной форме изменение его условий осуществляется в такой же форме, например путем подписания дополнительного соглашения к договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ).
Соглашение об изменении цены может быть заключено в любой момент в течение срока действия договора. Однако допускается согласование изменения цены и после выполнения работ. Так, подписание сторонами соглашения о выполнении дополнительных работ после их фактического выполнения будет означать согласие заказчика на выполнение этих работ и увеличение цены.
Если цена по договору определяется в соответствии со сметой, то для изменения цены необходимо внести соответствующие корректировки в смету. Смета может быть включена в текст дополнительного соглашения или оформлена в виде приложения к нему. Изменение цены по видам работ в пределах сметной стоимости также должно быть согласовано сторонами.

- Судебную практику, подтверждающую, что изменение цены по видам работ в пределах сметной стоимости возможно в случае согласования соответствующего условия сторонами, см. в Путеводителе по судебной практике.

--------------------------------
Примеры формулировки условия дополнительного соглашения к договору:
"Стороны настоящим соглашением договорились изложить пункт ___ (указывается номер пункта договора, содержащего условие о цене) договора N ____ от ________ в следующей редакции:
"п. ___. Цена работы по настоящему договору устанавливается в размере _____________ рублей (указывается новая цена цифрами и прописью)".

"Стороны договорились об изменении сметной стоимости работ, установленной в договоре подряда N _____ от _______. Новая смета является Приложением N ___ к настоящему дополнительному соглашению".
--------------------------------

При заключении соглашения об изменении цены стороны определяют условия и порядок ее изменения по своему усмотрению. Однако в соглашении рекомендуется определить, по какой цене должны быть оплачены работы, которые были выполнены подрядчиком (полностью или частично) ранее достижения указанного соглашения.

--------------------------------
Пример формулировки условия дополнительного соглашения к договору:
"С 03.04.2023 цена работ по договору N __ от 10.01.2023 определяется в соответствии с новыми почасовыми ставками, приведенными в пункте __ настоящего дополнительного соглашения. Работы, выполненные до 03.04.2023, должны быть оплачены по ставкам, предусмотренным договором до заключения настоящего дополнительного соглашения".
--------------------------------

Если в соглашении об изменении цены не указано, по какой цене оплачиваются ранее выполненные работы
Заказчик будет обязан оплатить эти работы в соответствии с условиями соглашения, т.е. по новой цене (п. 3 ст. 453, ст. 709 ГК РФ).

Изменение цены путем подписания актов сдачи-приемки работ
На практике встречаются ситуации, когда стороны устанавливают твердую цену работы, соглашений об ее изменении в ходе исполнения договора не заключают, однако впоследствии подписывают акты сдачи-приемки работ, в которых указана цена работы, отличающаяся от согласованной в договоре (смете). Следует учитывать, что в таких случаях суды по-разному решают вопрос об определении цены договора.
Так, подписание заказчиком указанного акта может быть не признано согласием с изменением цены, поскольку заказчик не лишается права оспорить поименованные в акте объем и стоимость работ. В то же время некоторые суды взыскивают задолженность, исходя из цены, зафиксированной в акте сдачи-приемки работ, подписанном заказчиком без замечаний, даже если цена, указанная в нем, отличается от договорной.

- Судебную практику, подтверждающую две позиции относительно возможности изменения цены путем подписания акта сдачи-приемки работ в отсутствие дополнительного соглашения, см. в Путеводителе по судебной практике.

7.3.2. Одностороннее немотивированное изменение
цены (сметы) по договору подряда

В договоре можно предусмотреть условие о праве любой из сторон в одностороннем порядке изменить цену работ. Это допустимо в силу положений п. 2 ст. 424 ГК РФ.
Однако при принятии решения о включении в договор такого условия нужно учесть следующее. Право на одностороннее изменение условий договора и случаи такого изменения могут быть установлены в договоре, если он связан с осуществлением всеми сторонами предпринимательской деятельности (абз. 1 п. 2 ст. 310 ГК РФ). Если одна из сторон такую деятельность не осуществляет, право на одностороннее изменение договора может быть предоставлено только ей (абз. 2 п. 2 ст. 310 ГК РФ).
В п. 2 ст. 424 ГК РФ, положения которой по смыслу п. 1 ст. 307.1 ГК РФ имеют приоритет по отношению к ст. 310 ГК РФ, нет ограничений, аналогичных установленным в п. 2 ст. 310 ГК РФ. Однако ст. 424 ГК РФ прямо не регулирует вопросы одностороннего изменения цены, поэтому есть риск, что в случае спора суд при защите интересов стороны, не являющейся предпринимателем, с учетом положений п. 2 ст. 310 ГК РФ может признать условие о праве на отказ для другой стороны (предпринимателя) не соответствующим закону. В связи с этим в договоре, заключенным с заказчиком, который предпринимательскую деятельность не осуществляет, право подрядчика на изменение цены устанавливать не рекомендуется.
Условие о праве подрядчика изменить цену в одностороннем порядке невыгодно заказчику, поскольку без его согласия подрядчик может увеличить цену в процессе исполнения договора (см. Риск заказчика 7.3.1).
Если стороны договорились установить право подрядчика на одностороннее изменение цены, то для соблюдения баланса интересов сторон в договор целесообразно внести следующие условия:
- об ограничении количества изменений цены за определенный период (например, не чаще чем два раза в год);
- об ограничении размера, на который может быть изменена цена;
- об обязательном предварительном уведомлении заказчика об изменении цены;
- о моменте, с которого к отношениям сторон применяются изменения цены;
- об оплате работ, выполненных подрядчиком до получения заказчиком уведомления об изменении стоимости, по прежней цене.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик вправе изменять цену работ, выполняемых по настоящему договору, в одностороннем порядке не чаще чем ________ (указывается период времени) и не более чем на _______ (указывается предел изменения цены). При этом подрядчик обязан предварительно направить письменное уведомление об изменении цены работ на адрес заказчика.
Все изменения цены применяются к отношениям сторон, возникшим после уведомления заказчика об изменении цены".
--------------------------------

В случае несогласия заказчика с изменением цены он также имеет право на односторонний немотивированный отказ от исполнения договора (ст. 717 ГК РФ). При этом он должен будет оплатить работы, выполненные до получения извещения об отказе.
Норма ст. 717 ГК РФ диспозитивна, поэтому стороны вправе согласовать иные условия об одностороннем отказе заказчика. Соответственно, в договоре может быть установлено его право отказаться от исполнения договора на новых условиях в течение определенного периода времени с момента получения уведомления об изменении цены работ. Однако в этом случае есть риск того, что заказчик лишится возможности реализовать право на отказ, предусмотренное ст. 717 ГК РФ, поскольку договором установлено иное. Подробнее о согласовании условий одностороннего отказа от исполнения договора, отличающихся от указанных в ст. 717 ГК РФ, и возникающих в связи с этим рисках см. п. 13.3 настоящих Рекомендаций.
При согласовании условия о праве заказчика на отказ от договора в связи с изменением цены в договоре рекомендуется указать:
- порядок отказа (например, способ и срок направления уведомления об отказе);
- цену, по которой должны быть оплачены работы, выполненные с момента получения заказчиком уведомления об изменении цены работ до момента получения подрядчиком уведомления заказчика об отказе от исполнения договора.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Заказчик вправе отказаться от исполнения договора на новых условиях в течение ______ (указывается период времени) с момента получения уведомления об изменении цены. Заказчик обязан направить на указанный в договоре адрес подрядчика уведомление об отказе от исполнения договора в связи с изменением цены работ. Договор считается расторгнутым с момента получения подрядчиком уведомления об отказе заказчика от исполнения договора. Расчет за работы, выполненные до расторжения договора, производится по цене, действующей до даты получения заказчиком уведомления об изменении подрядчиком цены работ".
--------------------------------

Если стороны не согласовали право подрядчика на одностороннее изменение цены
В этом случае цена может быть изменена по соглашению сторон (п. 2 ст. 424 ГК РФ). Приблизительная цена может быть изменена также в порядке п. 5 ст. 709 ГК РФ. Что касается твердой цены, то она не может быть изменена по требованию одной из сторон, даже если в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. Изменение твердой цены по требованию подрядчика будет возможно только в связи с существенным изменением обстоятельств, на которое стороны не рассчитывали (абз. 2 п. 6 ст. 709 ГК РФ).
Также изменение цены, как и других условий договора, возможно в судебном порядке по основаниям, указанным в п. 2 ст. 450 и ст. 451 ГК РФ.

7.3.3. Автоматическое изменение цены договора
подряда при наступлении определенных условий

Стороны могут предусмотреть в договоре возможность автоматического изменения цены (как приблизительной, так и твердой). В этом случае изменение цены происходит не по инициативе какой-либо из сторон, а в связи с наступлением согласованных сторонами обстоятельств и условий (т.е. с момента их наступления подрядчик вправе требовать оплаты, а заказчик оплачивать работы по новой цене).
Если стороны намерены согласовать условие об автоматическом изменении цены, в договоре необходимо предусмотреть:
- основания изменения цены (например, изменение цен на материалы, если выполнение работы сопряжено с использованием конкретных материалов). Основанием изменения цены может быть также изменение тарифа на работы определенного вида;
- новый размер цены работ или показатели, позволяющие его рассчитать (коэффициент, процент и др.);
- условие о том, что в предусмотренных договором случаях заказчик оплачивает работы по новой цене без подписания каких-либо дополнительных соглашений;
- срок уведомления контрагента о наступлении оснований изменения цены работ и ее новом размере, порядок такого уведомления.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"В случае повышения цены на пленку пластиковую марки _________, артикул ___________ стоимость работ увеличивается прямо пропорционально увеличению этой цены. При наступлении указанного основания заказчик оплачивает услуги по новой цене без подписания дополнительного соглашения".
--------------------------------

Если условие об автоматическом изменении цены работы не согласовано
В этом случае изменение цены будет возможно по соглашению сторон (п. 2 ст. 424 ГК РФ). Приблизительная цена может быть изменена также в порядке п. 5 ст. 709 ГК РФ. Что касается твердой цены, то она не может быть изменена по требованию одной из сторон, даже если в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. Изменение твердой цены по требованию подрядчика будет возможно только в связи с существенным изменением обстоятельств, на которое стороны не рассчитывали (абз. 2 п. 6 ст. 709 ГК РФ).

8. ОПЛАТА РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

8.1. ФОРМА РАСЧЕТОВ ЗА РАБОТУ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статьи 140, 317, 711, 854, 861, 874 ГК РФ

Условие о форме расчетов определяет, какими средствами и способами осуществляется оплата работы.

Согласование условия о форме расчетов
Стороны могут установить в договоре следующие формы расчетов:
- расчеты денежными средствами;
- расчеты с помощью встречных договоров (поставка, подряд, возмездное оказание услуг, аренда).

Если форма расчетов не согласована
В этом случае расчеты должны осуществляться денежными средствами в рублях (ст. ст. 317, 140 ГК РФ). При этом плательщик (заказчик) вправе выбрать форму расчетов из предусмотренных гл. 46 ГК РФ (см. п. 2 ст. 861, ст. 862 ГК РФ):
- в безналичном порядке в одной из форм, установленных п. 1 ст. 862 ГК РФ;
- наличными деньгами (но не более установленного размера) (см. Указание Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов", п. 2 ст. 861 ГК РФ).

8.1.1. Расчеты за работу по договору подряда
денежными средствами

Стороны вправе согласовать в договоре следующие формы и способы расчетов денежными средствами:
- оплата работы в безналичном порядке через банк или иную кредитную организацию (п. 3 ст. 861, ст. 862 ГК РФ);
- внесение наличных денег в кассу подрядчика (п. 2 ст. 861 ГК РФ). Для наличных расчетов между юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями в законодательстве установлено ограничение. В соответствии с Указанием Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" предельный размер наличных расчетов в рамках одного договора равен 100 000 руб. либо сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 руб. по официальному курсу Банка России на дату их проведения.
Названный документ, кроме прочего, содержит положение о том, что наличные расчеты в пределах указанной суммы производятся по обязательствам, исполняемым как в период действия договора, так и после окончания срока его действия. Следовательно, стоимость работ, оплаченных после окончания срока действия договора, будет учитываться при определении того, соответствует ли уплаченная сумма допустимому пределу наличных расчетов.
Таким образом, не рекомендуется согласовывать условие об оплате наличными, если стоимость работ превышает указанную сумму. Заказчик, нарушивший ограничение, может быть привлечен к административной ответственности по ст. 15.1 КоАП РФ.

Валюта и сумма платежа
Оплата осуществляется в сумме, определенной договором. При этом в соответствии со ст. 317 ГК РФ расчеты на территории РФ производятся в рублях. Валютные операции между резидентами РФ запрещены в силу ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". В данной норме перечислены исключения из общего правила, однако ни одно из них не затрагивает отношения, возникающие из договора подряда.
При указании цены в условных единицах (у. е.) или иностранной валюте для расчета суммы платежа в договоре необходимо согласовать курс условной единицы или соответствующей валюты по отношению к рублю и момент его определения (п. 2 ст. 317 ГК РФ).

Определение курса валют по отношению к рублю
Данный курс может быть:
а) установлен в твердом размере (например, одна у. е. равна определенной сумме в рублях);

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Оплата работы производится в рублях по курсу 50 рублей за одну условную единицу".
--------------------------------

б) привязан к курсу валюты, установленному Банком России (биржей и т.п.) на определенный момент времени:
- дату окончательной сдачи результата работы;
- дату зачисления денежных средств на расчетный счет подрядчика;
- дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка подрядчика;
- дату списания денежных средств с расчетного счета заказчика;
- дату списания денежных средств с корреспондентского счета банка заказчика;
- дату подачи заказчиком платежного поручения на оплату в банк;
- определенный день каждого месяца;
- дату выставления счета на оплату и т.п.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Оплата работы производится в рублях по курсу Банка России на момент списания денежных средств с расчетного счета заказчика".

"Оплата работы производится в рублях по курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на __.__.20__".
--------------------------------

Курс валюты на дату оплаты работы может отличаться от курса на дату, на которую он установлен в договоре. В таком случае у заказчика может возникнуть переплата или недоплата, а у подрядчика - долг или право требования доплаты с заказчика.
Например, если договором подряда предусмотрена обязанность заказчика оплатить выполненную работу в установленный срок после окончательной сдачи ее результата, а курс валюты определен на момент поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика или корреспондентский счет его банка, то заказчик, не зная курса Банка России в указанный момент, не сможет внести точную сумму. Следовательно, у заказчика возникнет переплата (если на момент подачи платежного поручения в банк курс будет выше, чем на дату зачисления денежных средств на счет подрядчика) либо недоплата (если курс увеличится на момент зачисления).
Если же, например, договором подряда предусмотрена предварительная оплата работы, а курс валюты по отношению к рублю установлен на момент окончательной сдачи результата работы, у подрядчика может возникнуть долг перед заказчиком в связи с тем, что курс на момент сдачи результата работы будет меньше, чем на дату перечисления предоплаты. В случае увеличения курса валюты к моменту сдачи работы задолженность по оплате работы возникнет уже у заказчика.
Во избежание подобных ситуаций рекомендуется определять в договоре курс иностранной валюты на дату подачи заказчиком платежного поручения в банк либо внесения денег в кассу подрядчика.

Если договором курс иностранной валюты или у. е. к рублю не согласован
При определении цены в валюте или у. е., на которые установлен официальный курс, оплата будет осуществляться по этому курсу на день платежа (см. п. 2 ст. 317 ГК РФ, п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54).
Если официального курса нет, цена работы определяется на основании данных о курсе валюты или у. е., который устанавливает банк соответствующего государства или международная организация к одной из валют или у. е., котируемых Банком России (п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54).

8.1.2. Расчеты с помощью встречных договоров
(поставка, подряд, возмездное оказание услуг, аренда)

В силу принципа свободы договора (п. 3 ст. 421 ГК РФ) стороны могут установить, что работа частично или полностью оплачивается путем встречной передачи товара, выполнения работ, оказания услуг.
Также в договоре может быть согласовано, что заказчик предоставляет подрядчику имущество в аренду, а арендная плата признается равной стоимости работ.

- Судебную практику, подтверждающую возможность согласования в договоре подряда условия об оплате работы посредством предоставления подрядчику имущества в аренду, см. в Путеводителе по судебной практике.

Для этого им необходимо согласовать ряд условий:
- предмет встречного договора: наименование и количество товара (договор поставки), содержание и объем работ (договор подряда), вид и объем услуг (договор возмездного оказания услуг), объект аренды (договор аренды);
- цену товара, работы, услуги, размер арендной платы;
- срок поставки, выполнения работ, оказания услуг, срок аренды;
- иные условия, являющиеся существенными для данного вида договора.
Подробнее по вопросам согласования указанных условий см.:
- п. 1 "Предмет договора подряда", п. 3 "Сроки выполнения работы по договору подряда", п. 7 "Цена работы по договору подряда" настоящих Рекомендаций;
- п. п. 1, 5, 6 Рекомендаций по заключению договора поставки, п. п. 1, 4, 5 Рекомендаций по заключению договора возмездного оказания услуг, п. п. 1, 3, 6 Рекомендаций по заключению договора аренды.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Оплата работы производится путем встречного выполнения работы заказчиком. Заказчик обязан выполнить следующую работу ____________ в объеме _____________________ в сроки с ____________ до ________________. Цена работы, подлежащей встречному исполнению, признается равной цене работы, определенной договором".
--------------------------------

Если стороны согласовали, что работа оплачивается частично деньгами, а частично путем встречной передачи товара (выполнения работ, оказания услуг, предоставления имущества в аренду), то в договоре подряда, помимо указанных выше условий, необходимо определить, какая часть цены работы оплачивается деньгами, а какая - путем исполнения заказчиком встречного договора.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Оплата работы производится частично денежными средствами, частично путем поставки заказчиком следующих товаров _________________ (указывается наименование и количество товаров) по цене __________ рублей. Срок поставки - до "____"________ 200_ г. Оставшаяся часть цены работы, не покрытая встречной поставкой, подлежит оплате денежными средствами".
--------------------------------

Внимание! Цена работы должна быть согласована сторонами независимо от того, какую форму расчетов (денежными средствами или с помощью встречных договоров) они избрали. Подробнее по вопросу согласования цены см. п. 7 "Цена работы по договору подряда" настоящих Рекомендаций.

Если в договоре подряда не указаны условия встречного договора
Такая форма расчетов является несогласованной. Заказчик должен будет оплатить работу денежными средствами (п. 1 ст. 711, ст. ст. 140, 861 ГК РФ).

8.2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статья 711 ГК РФ

Условие о порядке оплаты определяет, в какой срок (до или после передачи работы), какими частями (или единовременно) и кто будет рассчитываться за работу.
В договоре подряда можно согласовать различные способы оплаты работ: предварительная оплата (аванс) и оплата после сдачи результата работ. Подробнее по вопросам согласования варианта оплаты см. п. 8.3 "Предварительная оплата работы по договору подряда (аванс)", п. 8.4 "Оплата работы по договору подряда после окончательной сдачи ее результата" настоящих Рекомендаций.

Согласование порядка оплаты работы
Для согласования порядка оплаты стороны должны установить в договоре подряда следующее:
- срок оплаты;
- момент исполнения заказчиком обязанности по оплате (момент оплаты);
- срок и размеры платежей при оплате частями;
- условие о финансировании работы третьим лицом (плательщиком, инвестором).

Если оплата работ осуществляется в безналичной форме, то в отношениях, связанных с такими расчетами, непосредственное участие принимают банки, с которыми у сторон заключены соответствующие договоры. Их участие, в особенности при отзыве банковской лицензии, влияет на исполнение обязанности по оплате работ. Подробнее об этом см. п. 8.2.5 настоящих Рекомендаций.

Если условие о порядке оплаты не согласовано
В этом случае заказчик обязан будет лично оплатить выполненную работу после окончательной сдачи ее результата при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (п. 1 ст. 711 ГК РФ).

8.2.1. Срок оплаты работы по договору подряда

Срок оплаты определяется в договоре по правилам ст. ст. 190, 191 ГК РФ, т.е. следующим образом:
- календарной датой;
- событием, которое должно неизбежно наступить;
- истечением периода, начало которого может быть определено календарной датой или наступлением согласованного события.
Подробнее о правилах согласования сроков см. п. 3.3 настоящих Рекомендаций.
Ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты по договору подряда такая же, как и при других нарушениях им договора.
О процентах, начисляемых на сумму долга по ст. 395 ГК РФ, см. п. 11.2 настоящих Рекомендаций.
О неустойке по договору подряда см. п. 11.3 настоящих Рекомендаций.
О том, как рассчитать и взыскать неустойку с заказчика по договору подряда, см. Готовое решение.
О взыскании неустойки в случае, если заказчик, по мнению подрядчика, нарушил сроки оплаты работ по договору подряда, см. Перспективы и риски арбитражного спора.
По вопросу о том, в каких случаях подрядчик не сможет взыскать неустойку за нарушение срока оплаты с полной суммы, см. Важнейшую практику по ст. 711 ГК РФ.

Возможность определения срока оплаты с момента совершения действий стороной договора
Исполнение обязанностей с 1 июня 2015 г. может быть обусловлено совершением одной из сторон указанных в договоре действий или наступлением иных предусмотренных договором обстоятельств, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон (ст. 327.1 ГК РФ).
Срок исполнения обязательств, определяемый периодом времени, может исчисляться с момента исполнения обязанностей одной из сторон договора или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором (п. 1 ст. 314 ГК РФ).
Так, в практике признается, что стороны договора строительного субподряда вправе предусмотреть окончательную оплату работ после того, как все работы выполнены подрядчиком и наступили поименованные в договоре обстоятельства, в частности, подписан акт приемки законченного строительством объекта (см. "Правовые подходы, применяемые Арбитражным судом Уральского округа при рассмотрении споров по договорам строительного подряда, а также по государственным (муниципальным) контрактам на выполнение строительных работ", утверждены на заседании президиума Арбитражного суда Уральского округа 18.12.2015). Подробнее см. п. 6.2.2.2 настоящих Рекомендаций.
В то же время Верховный Суд РФ, рассматривая спор по договору строительного подряда, счел допустимым условие, согласно которому оплата работ поставлена в зависимость от предоставления подрядчиком банковской гарантии на период гарантийного срока. Ранее суды придерживались противоположной позиции по данному вопросу.

- Судебную практику, подтверждающую наличие двух позиций по вопросу о том, лишается ли подрядчик, не предоставивший на период гарантийного срока банковскую гарантию, права на оплату принятых заказчиком работ до истечения указанного срока, если она по договору поставлена в зависимость от предоставления гарантии, см. в Путеводителе по судебной практике.

Если срок оплаты не согласован
Заказчик должен оплатить работу после окончательной сдачи ее результата (п. 1 ст. 711 ГК РФ). Конкретный срок исполнения обязанности по оплате в ст. 711 ГК РФ не указан.
В судебной практике отсутствует единая позиция о том, как определяется срок оплаты выполненной работы в случае его несогласования сторонами и, соответственно, в какой момент наступает просрочка исполнения заказчиком обязанности по оплате. Так, суд может признать, что заказчик должен оплатить работу в день подписания акта-приема передачи ее результата и несет ответственность за просрочку оплаты, начиная со следующего дня после подписания акта (см. Риск заказчика 8.2.1). Некоторые суды считают, что срок оплаты, не установленный договором, определяется по правилам п. 2 ст. 314 ГК РФ и поэтому просрочка наступает по истечении семи дней после получения заказчиком счета-фактуры, выставленного подрядчиком (см. Риск заказчика 8.2.2).
В связи с различным толкованием судами п. 1 ст. 711 ГК РФ при установлении срока оплаты негативные последствия возникают и для подрядчика. Суд, определив срок оплаты в соответствии с п. 2 ст. 314 ГК РФ, может отказать ему во взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ, если подрядчик не направил заказчику требование об уплате долга (Риск подрядчика 8.2.1), или же уменьшить их сумму, исключив из расчета период до истечения семи дней с момента направления такого требования (Риск подрядчика 8.2.2).

8.2.2. Срок и размеры платежей при оплате
работы по договору подряда частями

Если стороны согласовали, что оплата работы производится несколькими частями, необходимо определить срок внесения каждой части (платежа) и ее размер, который может выражаться в процентах от цены работы или в сумме денежных средств. Стороны могут указать эти данные в графике платежей, который будет являться приложением к договору.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Оплата выполненной работы осуществляется заказчиком в следующем порядке:
- ____% от цены работы подлежит уплате в течение ____ дней с момента окончательной сдачи ее результата подрядчиком;
- оставшиеся ___% от цены работы должны быть уплачены в срок не позднее "___"________ 20__ г.".

"Оплата работы осуществляется заказчиком по завершении выполнения подрядчиком каждого этапа работы в соответствии с графиком платежей, согласованным сторонами в приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора".
--------------------------------

Если срок частичной оплаты и размеры платежей не согласованы
В таком случае заказчик должен оплатить работу в полном объеме единовременно после сдачи ее результата (п. 1 ст. 711 ГК РФ).

8.2.3. Момент исполнения заказчиком обязанности
по оплате (момент оплаты) работ по договору подряда

Сторонам рекомендуется определить в договоре, в какой момент заказчик считается исполнившим обязательство по оплате выполненной работы, во избежание разногласий по данному вопросу.
В Гражданском кодексе РФ нет прямого указания на то, в какой момент денежное обязательство считается исполненным. Этот момент может быть определен исходя из положений ст. 316 ГК РФ о месте исполнения обязательства.
Местом исполнения денежного обязательства при уплате наличных денег является место нахождения (жительства) кредитора, при безналичных расчетах - место нахождения банка (его филиала, подразделения), обслуживающего кредитора (абз. 5, 6 п. 1 ст. 316 ГК РФ). Данное правило применяется, если иное не определено в законе, ином правовом акте или договоре, не явствует из обычаев либо существа обязательства (абз. 1 п. 1 ст. 316 ГК РФ).

8.2.3.1. Момент оплаты работ по договору подряда
при расчете наличными деньгами

Моментом исполнения обязанности заказчика по оплате работ наличными деньгами будет являться момент внесения денежных средств в кассу подрядчика или передачи денежных средств подрядчику по месту его жительства. Такое условие может быть согласовано в договоре.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Обязанность заказчика по оплате считается исполненной в момент внесения денежных средств в кассу подрядчика".
--------------------------------

Внимание! Момент оплаты выполненных работ по договору, заказчиком по которому выступает гражданин-потребитель, регулируется Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей". Его обязанность по оплате путем наличных расчетов будет считаться исполненной с момента внесения наличных денежных средств подрядчику либо платежному агенту (субагенту) подрядчика, а при переводе наличных денежных средств через кредитную организацию без открытия банковского счета - с момента внесения наличных денежных средств в кредитную организацию (абз. 1 и 2 п. 3 ст. 16.1 указанного Закона).

8.2.3.2. Момент оплаты работ по договору
подряда при безналичных расчетах

В силу свободы договора (п. 4 ст. 421 ГК РФ) стороны могут согласовать в договоре момент исполнения обязанности по оплате при безналичных расчетах. При этом следует учитывать, что для случаев, когда заказчиком по договору выступает гражданин-потребитель, момент оплаты выполненных работ установлен Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей". Так, при безналичных расчетах обязанность по оплате будет считаться исполненной с момента подтверждения исполнения распоряжения о переводе денежных средств обслуживающей потребителя кредитной организацией (абз. 3 п. 3 ст. 16.1 названного Закона). Стороны не вправе определять в договоре более поздний момент исполнения потребителем обязанности по оплате, поскольку это условие может быть признано недопустимым условием, ущемляющим его права. Такие условия ничтожны (п. 1 ст. 16 указанного Закона).
Момент оплаты работ может быть определен в договоре как:
- момент зачисления денежных средств на расчетный счет подрядчика;
- момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка подрядчика;
- момент списания денежных средств с расчетного счета заказчика или корреспондентского счета банка заказчика.

Зачисление денежных средств на расчетный счет подрядчика как момент оплаты
Такое условие выгодно подрядчику, поскольку до поступления денежных средств на его расчетный счет выполненная работа будет считаться неоплаченной. Следовательно, подрядчик вправе взыскать с заказчика задолженность, даже если деньги уже списаны с расчетного счета заказчика, но не зачислены на счет подрядчика по вине обслуживающего его банка (см. Риск заказчика 8.2.3).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Обязанность заказчика по оплате считается исполненной в момент зачисления денежных средств на расчетный счет подрядчика".
--------------------------------

При таком определении момента оплаты выполненной работы для защиты заказчика от недобросовестности банка подрядчика в договоре рекомендуется предусмотреть:
- обязанность подрядчика содействовать заказчику в защите его прав (предъявлять банку претензии и требования при ненадлежащем исполнении им договора банковского счета);
- штраф за неисполнение подрядчиком данной обязанности.

Зачисление денежных средств на корреспондентский счет банка подрядчика как момент оплаты
В случаях когда моментом исполнения обязанности по оплате услуг признается зачисление денежных средств на корреспондентский счет банка подрядчика, сторонам следует учитывать, что обязательство заказчика не будет считаться надлежаще исполненным, если в банк подрядчика не представлены документы, являющиеся основанием для зачисления денежных средств на расчетный счет подрядчика (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 03.04.2002 N 8202/01).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Обязанность заказчика по оплате считается исполненной в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка подрядчика".
--------------------------------

Списание денежных средств с расчетного счета заказчика
Такое условие защищает интересы заказчика на случай недобросовестности банка одной из сторон, но влечет негативные последствия для подрядчика, который может не получить деньги за выполненную работу по вине банка заказчика.

Списание денежных средств с корреспондентского счета банка заказчика
При выборе такого способа согласования условия следует учитывать, что в случае недобросовестности банка заказчика обязательство по оплате работ будет считаться неисполненным, даже если денежные средства будут списаны с расчетного счета заказчика.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Обязанность заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка заказчика".

"Обязанность заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета заказчика".
--------------------------------

При таком определении момента оплаты выполненной работы (т.е. когда работа считается оплаченной еще до поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика) в договоре рекомендуется предусмотреть:
- обязанность заказчика содействовать подрядчику в защите его прав (предъявлять банку претензии и требования при ненадлежащем исполнении им договора банковского счета);
- штраф за неисполнение заказчиком данной обязанности.

Внимание! У банка подрядчика либо банка заказчика может быть отозвана лицензия, в связи с чем деньги за выполненные работы могут не поступить на расчетный счет подрядчика либо он не сможет ими воспользоваться. В таком случае сторонам (в особенности заказчику) потребуется принять определенные меры в целях недопущения просрочки исполнения своих обязательств. Подробнее об этом см. п. 8.2.5 настоящих Рекомендаций.

Если в договоре подряда момент оплаты при безналичных расчетах не определен
В таком случае моментом исполнения заказчиком обязательства по оплате работ является зачисление денежных средств на корреспондентский счет банка подрядчика. Если заказчика и подрядчика обслуживает один банк, моментом оплаты работ будет зачисление банком денежных средств на счет подрядчика (см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54).

8.2.4. Финансирование работы по договору подряда
третьим лицом (плательщиком, инвестором)

По общему правилу работа оплачивается заказчиком (ст. ст. 702, 711 ГК РФ).
Договором подряда может быть установлено, что оплату (финансирование производства работ) осуществляет не заказчик, а иное лицо (плательщик, инвестор). Однако сторонам следует учитывать, что если это лицо не является стороной договора, то обязанность по оплате у него не возникает (п. 3 ст. 308 ГК РФ), а сохраняется у заказчика. Соответственно, в случае отказа третьего лица от оплаты заказчик должен будет сам оплатить работу и понесет ответственность перед подрядчиком за просрочку оплаты по вине третьего лица (см. Риск заказчика 8.2.4).
Для установления обязанности третьего лица по оплате рекомендуется заключить трехсторонний договор (между заказчиком, подрядчиком и плательщиком). В интересах подрядчика предусмотреть в этом договоре солидарную обязанность (ответственность) заказчика и плательщика по оплате работы (ст. 322 ГК РФ). В таком случае подрядчик приобретет права кредитора при солидарной ответственности должников (ст. 323 ГК РФ), в том числе право предъявить требование об оплате к обоим должникам совместно или к каждому в отдельности, а также привлечь их к солидарной ответственности за неоплату или несвоевременную оплату работы.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Заказчик и плательщик несут солидарную обязанность (ответственность) по оплате выполненной подрядчиком работы в порядке и в сроки, предусмотренные договором. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения данной обязанности подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной работы, возмещения убытков, уплаты неустойки за просрочку оплаты, а также процентов за пользование чужими денежными средствами как от заказчика и плательщика совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга".
--------------------------------

8.2.5. Исполнение обязанности по оплате работ в случае
отзыва лицензии у банка подрядчика или заказчика

Лицензия на осуществление банковских операций может быть отозвана у банка стороны договора по основаниям, предусмотренным в ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности". Возникающие последствия влияют на исполнение заказчиком обязанности по оплате работ и зависят от того, у банка какой из сторон отозвана лицензия.

8.2.5.1. Исполнение обязанности по оплате работ в случае
отзыва лицензии у банка подрядчика (кредитора)

С момента отзыва лицензии прекращаются прием и осуществление по корреспондентским счетам кредитной организации платежей на счета клиентов кредитной организации (физических и юридических лиц). Кредитные организации и учреждения Банка России осуществляют возврат платежей, поступающих после дня отзыва лицензии на осуществление банковских операций в пользу клиентов кредитной организации, на счета плательщиков в банках-отправителях (п. 5 ч. 9 ст. 20 указанного Закона).
Таким образом, если заказчик оплатит работы, перечислив соответствующую сумму на счет подрядчика в банке, у которого отозвана лицензия, платеж вернется на счет заказчика, и он, соответственно, не будет считаться исполнившим свою обязанность.
В данном случае заказчику, чтобы минимизировать риск наступления ответственности за просрочку оплаты, необходимо:
- незамедлительно сообщить подрядчику (кредитору) о невозможности произвести платеж, а также запросить новые реквизиты. Как указал, руководствуясь ст. ст. 309 и 310 ГК РФ, Президиум ВАС РФ в Постановлении от 27.11.2012 N 9021/12, на должнике лежит первичная обязанность совершения необходимых действий и принятия разумных мер по исполнению обязательства;
- внести причитающиеся с него денежные средства в депозит нотариуса в соответствии со ст. 327 ГК РФ с целью преодоления возникшего препятствия по исполнению обязательства. Должник вправе прибегнуть к указанному способу вследствие, в частности, уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны (пп. 4 п. 1 ст. 327 ГК РФ). Внесение денежной суммы в депозит нотариуса в силу п. 2 ст. 327 ГК РФ признается исполнением обязательства.

Внимание! Заказчику (должнику), допустившему просрочку исполнения своего обязательства на момент отзыва лицензии у банка подрядчика (кредитора), необходимо иметь в виду следующее. Должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения наряду с убытками, причиненными такой просрочкой (п. 1 ст. 405 ГК РФ). В этом случае кредитора нельзя считать просрочившим в соответствии со ст. 406 ГК РФ, и последствия отзыва лицензии у банка кредитора в любом случае ложатся на должника. Указанная позиция следует из Постановления Президиума ВАС РФ от 27.11.2012 N 9021/12.

Подрядчик не сможет пользоваться своим счетом в случае отзыва лицензии у его банка. Соответственно, для расчетов с заказчиком ему потребуется заключить договор с другим банком, что повлечет изменение реквизитов расчетного счета. Об этом изменении подрядчику следует известить заказчика в порядке, предусмотренном договором (например, направив уведомление в письменной форме способом, который позволяет зафиксировать факт его получения другой стороной), или внести изменения в договор путем заключения дополнительного соглашения с соблюдением требований п. 1 ст. 452 ГК РФ к его форме.
Если подрядчик, узнав об отзыве лицензии у своего банка, не примет мер по изменению реквизитов и уведомлению об этом заказчика, последний может перечислить деньги по известным ему реквизитам, указанным в договоре. При поступлении денег на счет подрядчика несмотря на отзыв лицензии банка заказчик может быть признан исполнившим обязанность по оплате с этого момента исходя из положений ст. ст. 316, 863 ГК РФ. Уведомление об изменении реквизитов, выполненное способом, который не предусмотрен договором, может быть признано ненадлежащим доказательством (см. судебный акт, в котором суд установил, что указанный вывод следует из договора купли-продажи: Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2012 по делу N А35-7047/2012).
Момент исполнения обязанности по оплате может быть определен иным образом, помимо поступления денежных средств на расчетный счет кредитора (подробнее об этом см. в п. 8.2.3 настоящих Рекомендаций).

8.2.5.2. Исполнение обязанности по оплате работ
в рамках договора подряда в случае отзыва лицензии
у банка заказчика (должника)

Отзыв лицензии у банка - контрагента заказчика, влекущий нарушение банком обязательств перед должником (заказчиком), не признается обстоятельством непреодолимой силы и не освобождает должника (заказчика) от исполнения им обязательств перед кредитором (подрядчиком). Это следует из содержания п. 3 ст. 401 ГК РФ, в соответствии с которым к форс-мажорным обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
В судебной практике есть примеры того, что прекращение операций банком не расценивается как обстоятельство непреодолимой силы. Так, при рассмотрении спора о возврате излишне уплаченных средств по договору аренды суд указал, что возникшая невозможность пользоваться расчетным счетом и, как следствие, распоряжаться денежными средствами относится к риску предпринимательской деятельности и не освобождает должника от ответственности (Постановление ФАС Поволжского округа от 21.04.2011 по делу N А57-9656/2010).
Таким образом, отзыв лицензии у банка заказчика составляет предпринимательский риск и не освобождает заказчика от исполнения обязанности по оплате работ.

8.3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА РАБОТЫ
ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА (АВАНС)
Статьи 711, 823 ГК РФ

Предварительная оплата работы (аванс) означает, что заказчик обязан полностью или частично оплатить работу или ее отдельные этапы до окончательной сдачи результата работы или ее этапов (п. 1 ст. 711 ГК РФ).

Согласование условия о предварительной оплате (авансе)
Предварительная оплата (аванс) снижает риск неполучения подрядчиком платы за выполненную работу, а также позволяет подрядчику на начальной стадии производства работы приобрести необходимые материалы и оборудование, если у него недостаточно для этого собственных средств.
Заказчик может быть менее заинтересован в согласовании условия о предоплате, поскольку для него это сопряжено с изъятием из оборота денежных средств. Кроме того, он может столкнуться с риском неисполнения подрядчиком обязательства по выполнению работы и перспективой судебного разбирательства по поводу возврата уплаченного аванса.
Если заказчик нарушит обязанность по внесению аванса, подрядчик вправе взыскать его в судебном порядке, однако в судебной практике существует и противоположная позиция (см. Риск заказчика 8.3.1).
При согласовании в договоре условия о предварительной оплате работы рекомендуется указать срок уплаты аванса и его размер, а также определить, предоставляется ли подрядчику коммерческий кредит на сумму аванса.

Если условие о предварительной оплате (авансе) не согласовано
В таком случае согласно п. 2 ст. 711 ГК РФ подрядчик не вправе потребовать выплаты ему аванса. Заказчик обязан будет оплатить работу после окончательной сдачи результата работы (п. 1 ст. 711 ГК РФ).

8.3.1. Срок и размер предварительной оплаты
работы по договору подряда (аванса)

В договоре подряда необходимо согласовать срок внесения предварительной оплаты (аванса). Этот срок в силу ст. ст. 190, 191 ГК РФ может быть определен:
- календарной датой, которая предшествует окончательной сдаче результата работы или ее отдельного этапа;
- событием, которое неизбежно должно наступить;
- истечением периода, начало которого может быть определено календарной датой или наступлением согласованного события.
Если срок предварительной оплаты определяется периодом времени, то стороны могут согласовать, что данный период исчисляется с момента исполнения обязанностей подрядчиком или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором (п. 1 ст. 314 ГК РФ).
Кроме того, следует установить размер предоплаты (в процентах от цены работы или в определенной сумме).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Заказчик обязан внести предоплату в размере ___% от цены работы в течение ___ дней с даты получения подрядчиком разрешительной документации на проектирование и строительство объекта, предусмотренного в Приложении N __ к договору".
--------------------------------

В случае частичной предоплаты необходимо также согласовать срок осуществления окончательной оплаты и размер платежа. О согласовании срока оплаты работы после окончательной сдачи ее результата см. п. 8.4 настоящих Рекомендаций.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Заказчик обязан уплатить аванс в размере __________ (указывается сумма цифрами и прописью) не позднее чем "___"________ 20__ г. Оставшуюся часть _____________ (указывается сумма цифрами и прописью) заказчик обязан внести в течение ____________ дней с момента окончательной сдачи результата работы подрядчиком".
--------------------------------

Если срок и размер предварительной оплаты (аванса) не определены
В этом случае условие о предварительной оплате считается несогласованным и подрядчик не вправе потребовать выплаты ему аванса в соответствии с п. 2 ст. 711 ГК РФ (см. Риск подрядчика 8.3.1).
Заказчик в свою очередь обязан оплатить работу в срок, предусмотренный в договоре, а при отсутствии такого срока - в определенный срок после окончательной сдачи результатов работы (п. 1 ст. 711 ГК РФ). Подробнее о последствиях несогласования срока оплаты см. п. 8.2.1 настоящих Рекомендаций.

8.3.2. Предварительная оплата (аванс) как предоставление
подрядчику коммерческого кредита

Внесение предварительной оплаты (аванса) может рассматриваться как предоставление подрядчику коммерческого кредита (п. 1 ст. 823 ГК РФ).
В судебной практике неоднозначно решен вопрос о том, в каких случаях можно считать коммерческий кредит предоставленным. Преобладает позиция, в соответствии с которой для того, чтобы установить отношения по коммерческому кредитованию, необходимо прямо оговорить это в договоре. Вместе с тем существует следующий подход: коммерческое кредитование возникает при несовпадении моментов оплаты и встречного предоставления, даже если в договоре указание на выдачу коммерческого кредита отсутствует.

- Судебную практику, подтверждающую, что существует две позиции судов по вопросу о том, в каких случаях коммерческий кредит считается предоставленным, см. в Путеводителе по судебной практике.

Если стороны не хотят, чтобы на сумму аванса начислялись проценты, нужно указать в договоре, что данная сумма не является для подрядчика коммерческим кредитом и проценты на нее не начисляются.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Сумма аванса, перечисленного заказчиком, не является коммерческим кредитом для подрядчика, проценты на сумму аванса не начисляются".
--------------------------------

Внимание! Кредитор по денежному обязательству может получить проценты за период пользования денежными средствами в случаях, когда это предусмотрено законом или договором (п. 1 ст. 317.1 ГК РФ). Представляется, что указанная норма не применяется, если выплачивается аванс. Это обусловлено тем, что обязанность по оплате в рамках договора подряда лежит на заказчике, следовательно, кредитором по данному денежному обязательству выступает подрядчик. При перечислении аванса у заказчика не возникает денежного требования.

В случае когда стороны пришли к соглашению о начислении процентов на сумму аванса, рекомендуется включить в договор условие о предоставлении подрядчику коммерческого кредита.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчику предоставляется коммерческий кредит на сумму аванса, уплачиваемого заказчиком".
--------------------------------

Размер и порядок уплаты процентов за пользование коммерческим кредитом
В случае когда в договор включено условие о предоставлении подрядчику коммерческого кредита, на сумму предварительной оплаты подлежат начислению проценты, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 1 ст. 809, п. 2 ст. 823 ГК РФ).
Размер процентов за пользование коммерческим кредитом стороны, как правило, устанавливают в договоре. Если такое условие отсутствует, размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в периоды пользования кредитом (п. 1 ст. 809, п. 2 ст. 823 ГК РФ)).
Заказчик вправе требовать уплаты процентов с момента внесения аванса до даты окончательной сдачи результата работы, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от 08.10.1998 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами"). При отсутствии иного соглашения данные проценты подрядчик выплачивает ежемесячно (п. 3 ст. 809 ГК РФ).
Размер процентов за пользование коммерческим кредитом стороны могут установить (п. 2 ст. 809 ГК РФ):
- выбрав годовую процентную ставку фиксированной величины;
- выбрав годовую процентную ставку изменяемой величины в зависимости от предусмотренных договором условий, в том числе в зависимости от изменения переменной величины;
- иным путем, позволяющим определить размер процентов на момент их уплаты.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"На сумму аванса начисляются проценты за пользование коммерческим кредитом в размере __% годовых за каждый день с момента завершения подрядчиком первого этапа работ до момента ____________________________. Начисленные проценты подрядчик должен уплачивать ежемесячно не позднее 5-го числа очередного календарного месяца".
--------------------------------

8.4. ОПЛАТА РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
ПОСЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СДАЧИ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТА
Статьи 317.1, 711, 823 ГК РФ

В случае когда стороны не согласовали условие о полной или частичной предоплате (авансе), заказчик в соответствии с п. 1 ст. 711 ГК РФ уплачивает установленную договором цену в полном размере единовременно после окончательной сдачи результата работы.
При оплате работы после окончательной сдачи ее результата в договоре рекомендуется определить срок такой оплаты. Подробнее о согласовании условия о сроке оплаты см. п. 8.4.1 настоящих Рекомендаций.
При оплате работ после их выполнения заказчик может определенное время пользоваться причитающимися подрядчику денежными средствами. В этом случае сторонам необходимо решить, будут ли начисляться на данную сумму проценты.
Возможность согласовать начисление процентов на сумму денежного обязательства за период пользования денежными средствами предусмотрена п. 1 ст. 317.1 ГК РФ. Подробнее об этих процентах см. п. 8.4.3 настоящих Рекомендаций.
Кроме того, в договор может быть включено условие о коммерческом кредите (ст. 823 ГК РФ). Подробнее об этом см. п. 8.4.2 настоящих Рекомендаций.

8.4.1. Срок оплаты работы по договору подряда
после сдачи ее результата

Статья 711 ГК РФ не предусматривает конкретного срока для исполнения обязанности по оплате выполненной подрядчиком работы, поэтому сторонам рекомендуется согласовать этот срок в договоре. В силу ст. ст. 190, 191 ГК РФ он может быть определен:
- календарной датой, которая наступает после окончательной сдачи результата работы;
- периодом времени, который начинается после окончательной сдачи результата работы;
- событием, которое неизбежно должно наступить.
Если срок оплаты определяется периодом времени, то стороны, руководствуясь п. 1 ст. 314 ГК РФ, могут согласовать, что данный период исчисляется с момента исполнения обязанностей подрядчиком или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Заказчик обязан оплатить выполненные работы в течение ___ дней после выставления подрядчиком счета-фактуры".

"Заказчик обязан оплатить выполненную работу в течение _____ рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки результата работы".
--------------------------------

Если срок оплаты работы после сдачи ее результата не согласован
В судебной практике отсутствует единая позиция о том, как определяется срок оплаты выполненной работы в случае его несогласования сторонами и, соответственно, в какой момент наступает просрочка исполнения заказчиком обязанности по оплате. Так, суд может признать, что заказчик должен оплатить работу в день подписания акта-приема передачи ее результата и несет ответственность за просрочку оплаты, начиная со следующего дня после подписания акта (см. Риск заказчика 8.2.2). Некоторые суды считают, что срок оплаты при его отсутствии в договоре определяется по правилам п. 2 ст. 314 ГК РФ и поэтому просрочка наступает по истечении семи дней после получения заказчиком счета-фактуры, выставленного подрядчиком (см. Риск заказчика 8.2.3).
В связи с различным толкованием судами п. 1 ст. 711 ГК РФ при установлении срока оплаты негативные последствия возникают и для подрядчика. Суд, определив срок оплаты в соответствии с п. 2 ст. 314 ГК РФ, может отказать ему во взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ, если подрядчик не направил заказчику требование об уплате долга (см. Риск подрядчика 8.2.1), или же уменьшить их сумму, исключив из расчета период до истечения семи дней с момента направления такого требования (см. Риск подрядчика 8.2.2).

8.4.2. Отсрочка (рассрочка) оплаты работ по договору
подряда как предоставление коммерческого кредита

Отсрочка (рассрочка) оплаты выполненных работ может рассматриваться как предоставление заказчику коммерческого кредита (п. 1 ст. 823 ГК РФ).
В судебной практике неоднозначно решен вопрос о том, при каком условии коммерческий кредит можно считать предоставленным. Одни суды указывают, что для установления отношений по коммерческому кредитованию необходимо прямо оговорить это в договоре. Другие полагают, что коммерческое кредитование возникает при любом несовпадении моментов оплаты и встречного предоставления, даже если в договоре нет указания на выдачу коммерческого кредита.

- Судебную практику, подтверждающую, что существует две позиции судов по вопросу о том, в каких случаях коммерческий кредит считается предоставленным, см. в Путеводителе по судебной практике.

Если стороны не заинтересованы в том, чтобы на сумму долга начислялись проценты, в договоре нужно указать, что отсрочка (рассрочка) не является для заказчика коммерческим кредитом и проценты на сумму долга не начисляются.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Сумма долга за выполненные подрядчиком работы не является коммерческим кредитом для заказчика, проценты за пользование денежными средствами не начисляются".
--------------------------------

В случае когда стороны пришли к соглашению о начислении процентов на сумму долга, в договор рекомендуется включить условие о предоставлении заказчику коммерческого кредита.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Заказчику предоставляется коммерческий кредит на сумму долга по оплате выполненных работ".
--------------------------------

Размер и порядок уплаты процентов за пользование коммерческим кредитом
Когда в договоре есть условие о предоставлении заказчику коммерческого кредита, на сумму долга начисляются проценты, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 1 ст. 809, п. 2 ст. 823 ГК РФ).
Если размер процентов договором не установлен, он определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (п. 1 ст. 809 ГК РФ).
Подрядчик вправе требовать уплаты процентов с момента окончательной сдачи результата работ до момента уплаты долга, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от 08.10.1998 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами"). Данные проценты заказчик должен выплачивать ежемесячно (п. 3 ст. 809 ГК РФ).
Поскольку норма п. 1 ст. 809 ГК РФ диспозитивна, стороны вправе установить в договоре размер процентов за пользование коммерческим кредитом и порядок их уплаты. Размер процентов следует установить способом, позволяющим определить надлежащий размер процентов на момент их уплаты (п. п. 1, 2 ст. 809 ГК РФ).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"За пользование коммерческим кредитом ежедневно начисляются проценты в размере __% от суммы долга. Начисленные проценты заказчик уплачивает единовременно при внесении оплаты за выполненные работы".
--------------------------------

8.4.3. Проценты по денежному обязательству, начисляемые
по п. 1 ст. 317.1 ГК РФ (законные проценты)
в рамках договора подряда

На сумму денежного обязательства за период пользования денежными средствами могут начисляться проценты, если это предусмотрено законом или договором (п. 1 ст. 317.1 ГК РФ).
Размер законных процентов, начисляемых по п. 1 ст. 317.1 ГК РФ, определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Иной размер может быть установлен законом или договором.
Данные положения вступили в силу с 1 августа 2016 г.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"С момента принятия результата работ до момента их фактической оплаты подрядчик вправе начислять на сумму денежного обязательства заказчика проценты в соответствии с п. 1 ст. 317.1 ГК РФ в размере ______% годовых".
--------------------------------

За просрочку уплаты процентов по п. 1 ст. 317.1 ГК РФ, являющихся платой за пользование денежными средствами, могут быть начислены проценты по ст. 395 ГК РФ или неустойка (см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54). В связи с этим стороны, в частности, могут предусмотреть в договоре условие о неустойке в качестве меры ответственности за просрочку выплаты процентов по п. 1 ст. 317.1 ГК РФ.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"При просрочке исполнения обязательства по выплате процентов в соответствии с п. 1 ст. 317.1 ГК РФ, заказчик обязан выплатить неустойку в размере _____% от суммы задолженности по просроченным процентам за каждый день просрочки".
--------------------------------

До 1 августа 2016 г.

Из архива материалов, актуальных на 31.07.2016

"В случае когда обе стороны договора подряда являются коммерческими организациями, подрядчик вправе требовать от заказчика уплаты процентов на основании п. 1 ст. 317.1 ГК РФ, если иное не установлено законом или договором. Такое требование может быть заявлено по договорам, заключенным с 1 июня 2015 г. Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что положения об уплате процентов на основании п. 1 ст. 317.1 ГК РФ не применяются к правам и обязанностям, возникшим из договоров, которые заключены до указанной даты (абз. 1 п. 83 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7).
По смыслу п. 1 ст. 317.1 ГК РФ рассматриваемые проценты начисляются на сумму долга заказчика по оплате выполненных работ в течение всего периода пользования указанной суммой, т.е. с момента приемки заказчиком работ до момента их оплаты. В отличие от процентов, предусмотренных п. 1 ст. 395 ГК РФ, проценты, установленные ст. 317.1 ГК РФ, не являются мерой ответственности, а представляют собой плату за пользование денежными средствами (см. Правовые позиции высших судов).
Норма п. 1 ст. 317.1 ГК РФ диспозитивна, поэтому, если стороны не заинтересованы в начислении процентов по указанному основанию, в договор следует включить соответствующее условие. В этом случае подрядчик не сможет потребовать от заказчика их уплаты.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик не вправе начислять на сумму долга заказчика по оплате выполненных работ проценты на основании п. 1 ст. 317.1 ГК РФ".
--------------------------------

Размер процентов по денежному обязательству
В силу п. 1 ст. 317.1 ГК РФ размер процентов, начисляемых в соответствии с указанной нормой, определяется ставкой рефинансирования Банка России, действующей в соответствующий период.

Примечание. С 1 января 2016 г. самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается. Ее значение приравнивается к показателю ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату (Указание Банка России от 11.12.2015 N 3894-У).

Однако норма п. 1 ст. 317.1 ГК РФ диспозитивна, поэтому стороны могут определить в договоре иной размер.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"С момента окончательной сдачи результата работ до момента внесения заказчиком оплаты подрядчик вправе начислять проценты за пользование денежными средствами в соответствии с п. 1 ст. 317.1 ГК РФ в размере __% годовых от суммы долга заказчика".
--------------------------------

9. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННОЙ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА РАБОТЫ
Статья 720 ГК РФ

Условие о приемке выполненной работы (ее результата) определяет права и обязанности сторон, связанные с принятием, осмотром и проверкой соответствия работы (ее результата) условиям договора подряда, а также с выявлением недостатков.
В силу п. п. 1, 4 ст. 720 ГК РФ обязанность заказчика по приемке включает в себя:
- осмотр и принятие выполненной работы (ее результата) с участием подрядчика;
- извещение подрядчика о выявленных недостатках и несоответствиях работы (ее результата) условиям договора.
Конкретные сроки и порядок осуществления приемки (в том числе отдельных действий в рамках ее проведения) законом не установлены и должны быть предусмотрены в договоре во избежание споров и разногласий по этому поводу.
Стороны вправе разработать собственные правила приемки. В этих правилах они могут установить дополнительные права и обязанности сторон, связанные с приемкой, а также изменить положения о приемке, предусмотренные диспозитивными нормами закона, например, согласовать условие о принятии работы без проверки (п. 3 ст. 720 ГК РФ), указать иной порядок продажи результата работы в случае уклонения заказчиком от приемки (п. 6 ст. 720 ГК РФ).
Для согласования условия о приемке стороны должны договориться о том, какие правила и процедуры приемки они будут применять, и определить способ их согласования (ссылка на нормативные акты или разработка собственных правил).

9.1. СПОСОБЫ СОГЛАСОВАНИЯ УСЛОВИЯ О ПРИЕМКЕ
ВЫПОЛНЕННОЙ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА РАБОТЫ

Сроки, порядок и другие условия приемки работы (ее результата) должны быть предусмотрены в договоре (п. 1 ст. 720 ГК РФ). Стороны могут выбрать следующие способы согласования данных условий:
- с помощью правовых актов и нормативных документов;
- путем разработки собственных правил;
- с использованием всех перечисленных способов (смешанный способ).

9.1.1. Согласование порядка приемки работы
по договору подряда с помощью нормативных
правовых документов

Согласование порядка приемки с помощью документов, применяемых добровольно
Стороны вправе предусмотреть в договоре, что приемка работы (ее результата) осуществляется в соответствии с документами по стандартизации, которые применяются добровольно по соглашению сторон, например национальными стандартами, сводами правил, стандартами организаций (ст. 2, п. 1 ст. 4, ст. 14, п. 1 ст. 26 Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации").

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Заказчик обязан принять выполненную работу в сроки и в порядке, предусмотренные ________________ (указывается название, дата и номер нормативного документа)".
--------------------------------

Стороны могут согласовать в договоре применение к приемке работы (ее результата) таких добровольно применяемых документов, как Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6 (далее - Инструкция N П-6), и Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 (далее - Инструкция N П-7).
Положения Инструкций N П-6, N П-7 обычно применяются к отношениям по договорам поставки и только в случаях, предусмотренных договором (см. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18). Однако стороны договора подряда вправе согласовать приемку результата работы (например, изготовленной или переработанной продукции) по количеству и качеству в соответствии с данными инструкциями. Для этого в договоре нужно сделать на них ссылку, указать лиц, уполномоченных каждой из сторон осуществлять приемку, а также документы, подтверждающие эти полномочия.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Приемка результата работы осуществляется в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6 и от 25.04.1966 N П-7.
Приемку будут осуществлять:
- со стороны заказчика __________ (указываются Ф.И.О., должность), действующий на основании __________ (указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия);
- со стороны подрядчика __________ (указываются Ф.И.О., должность), действующий на основании __________ (указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия)".
--------------------------------

Внимание! Ссылаясь в договоре на Инструкции N П-6 и N П-7, следует иметь в виду, что они содержат очень подробный порядок приемки. Поэтому необходимо детально ознакомиться с ними, чтобы понять, исполним ли этот порядок в отношениях с данным контрагентом. При нарушении порядка приемки, изложенного в Инструкции N П-7, заказчик не вправе ссылаться на ненадлежащее качество принятого результата работы (см. Риск заказчика 9.1.1).

Если применение Инструкций N П-6 и N П-7 договором подряда не предусмотрено
В таком случае стороны в обоснование требований друг к другу не вправе будут ссылаться на нарушение другой стороной правил приемки, установленных в этих инструкциях. Однако есть вероятность, что суд может признать применение Инструкций N П-6 и N П-7 обычаем (см. Риск заказчика 9.1.2).

Обязательные требования к приемке работы
Если законом и иными правовыми актами установлены обязательные требования и правила в отношении приемки работы (ее результата), условия о приемке, предусмотренные в договоре, должны им соответствовать (ст. 422 ГК РФ).
Такие требования могут быть предусмотрены, в частности, техническими регламентами, разработанными в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании". Например, приемка результата работы на судне должна соответствовать порядку, предусмотренному Техническим регламентом о безопасности объектов морского транспорта, утв. Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 N 620.

9.1.2. Разработка сторонами собственных правил
приемки работы (ее результата) по договору подряда

Чтобы осуществлять приемку по индивидуальным правилам, сторонам необходимо их самостоятельно разработать. Правила должны быть составлены с учетом всех особенностей выполняемой работы (техническая сложность работы или ее результата, требующая специальных методов измерения веса, объема, определения качества и т.п.).
Такие правила приемки стороны могут включить в текст договора либо отразить в отдельном приложении к нему, а в договоре сделать ссылку на это приложение как на неотъемлемую часть договора.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Приемка выполненной в соответствии с договором работы осуществляется заказчиком в соответствии с правилами, разработанными сторонами и являющимися приложением N 1 к настоящему договору".
--------------------------------

Если стороны не включили в договор собственные правила приемки работы
В этом случае заказчик должен принять работу (ее результат) в соответствии с обязательными правилами и процедурами, если таковые установлены законом, иными правовыми актами, либо в соответствии с обычаями или иными обычными требованиями (ст. 309, п. 5 ст. 421 ГК РФ).

9.1.3. Смешанный способ согласования условия
о приемке работы по договору подряда

Стороны вправе установить такой порядок приемки работы (ее результата), который будет частично регламентироваться нормативными документами (например, каким-либо стандартом) и частично договором. В этом случае в договоре необходимо подробно описать, в какой части отношения сторон по сдаче-приемке работы регулируются нормативными документами, а в какой - договором.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Заказчик должен осуществить приемку выполненной работы в соответствии с ______________________ (указывается название, дата, номер нормативного документа), а в части ______________________________ (указываются действия, совершаемые при приемке работы) - в соответствии с пунктами ____ и ______ настоящего договора".
--------------------------------

9.2. СОБСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМКИ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

Если стороны договорились производить приемку выполненной работы (ее результата) по собственным правилам, то они вправе предусмотреть в них следующее:
- состав лиц, участвующих в приемке;
- условие об извещении подрядчиком заказчика о готовности работы к сдаче;
- сроки приемки выполненной работы;
- место приемки выполненной работы;
- порядок извещения подрядчика о недостатках работы;
- право заказчика предъявить требования в связи с явными недостатками работы, принятой без проверки;
- право подрядчика продать результат работы при уклонении заказчика от его принятия;
- условие о предоставлении подрядчиком информации о результате работы;
- условие о передаче результата выполненных работ в электронном виде.

9.2.1. Состав лиц, участвующих в приемке
работы по договору подряда

Приемка работы (ее результата) осуществляется при участии заказчика и подрядчика (п. 1 ст. 720 ГК РФ). Стороны могут установить в договоре уполномоченных представителей, которые будут производить приемку. Для этого в нем необходимо указать:
- Ф.И.О. и должность полномочного лица;
- подтверждающие его полномочия документы, которые должны быть предъявлены при приемке.
Если обе стороны являются юридическими лицами, то приемку вправе осуществлять:
- органы юридического лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом (п. 1 ст. 53 ГК РФ). В частности, в хозяйственных обществах это - единоличный исполнительный орган: директор, генеральный директор, президент (ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах");
- представители (сотрудники организации, иные лица), действующие от имени юридического лица на основании надлежащим образом оформленной доверенности (абз. 1 п. 1 ст. 182, п. 4 ст. 185.1 ГК РФ). Полномочия представителя также могут явствовать из обстановки, в которой он действует (абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Приемку выполненной работы и ее результата будут осуществлять: со стороны заказчика генеральный директор __________________, действующий на основании устава; со стороны подрядчика - главный инженер ____________________, действующий на основании доверенности N __, выданной "__" _______ ___ г. Для подтверждения полномочий на осуществление приемки работы представители сторон представляют заверенные копии указанных документов, а также документы, удостоверяющие личность".
--------------------------------

Иные лица, участвующие в приемке
К приемке выполненной работы (ее результата) могут привлекаться и иные лица, например специалисты для проведения испытаний результата работы по качеству, эксперты для определения объема, качества и стоимости выполненной работы (ее результата) и др. Для этого в договоре рекомендуется указать:
- перечень лиц, которые могут быть привлечены к участию в приемке;
- порядок привлечения таких лиц к приемке и оплаты их услуг (заключение с ними договора или вызов их по заявке через экспертную организацию, уведомление их о месте и времени приемки, распределение расходов на оплату услуг данных лиц и предельный размер этих расходов и т.п.);
- документы, которые должны быть предъявлены для подтверждения полномочий лиц, привлекаемых к участию в приемке.

9.2.2. Извещение подрядчиком заказчика
о готовности работы к сдаче

Стороны могут закрепить в договоре подряда обязанность подрядчика известить заказчика о готовности выполненной работы (ее результата) к сдаче и необходимости явки заказчика для ее осмотра и принятия. В этом случае в договоре также следует указать:
- срок направления извещения (например, до окончания срока выполнения работы);
- содержание извещения (сообщение о готовности выполненной работы (ее результата) к сдаче заказчику, место и время приемки);
- порядок и форму направления извещения (по телефону, факсу, электронной почте, почтовым отправлением, с курьером). Для защиты интересов подрядчика следует выбрать письменную форму извещения и способ отправки, который позволит ему доказать, что сообщение заказчиком получено (например, заказное письмо с уведомлением о вручении либо письмо с объявленной ценностью с уведомлением о его вручении и описью вложения), а также определить в договоре адрес заказчика для направления корреспонденции.

Внимание! Пленум Верховного Суда РФ в п. 65 Постановления от 23.06.2015 N 25 разъяснил, что юридически значимое сообщение может быть направлено в любой форме, соответствующей характеру сообщения и отношений, если иное не установлено законом, договором, не следует из обычая или практики, установившейся во взаимоотношениях сторон. При выборе формы необходимо учитывать наличие возможности достоверно установить впоследствии, от кого исходило сообщение и кому было адресовано.
В соответствии с п. 64 указанного Постановления стороны вправе согласовать, что извещение о готовности работы к сдаче направляется исключительно предусмотренным договором способом. В этом случае направление такого извещения иным способом (например, ценным письмом с описью вложения вместо согласованного в договоре направления курьером) будет считаться ненадлежащим.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик обязан в срок до "___"_______200_ г. известить заказчика о готовности результата работы к сдаче и необходимости явки заказчика для его осмотра, проверки и принятия. Извещение должно содержать сведения о месте и времени приемки и быть направлено письмом с уведомлением о вручении и описью вложения либо вручено с нарочным. Заказчик обязан приступить к приемке в течение ________ дней с момента получения данного извещения".
--------------------------------

Если стороны договорились о том, что извещение не требуется, в интересах подрядчика отразить это в договоре. Тогда заказчик обязан будет произвести приемку в порядке и сроки, которые установлены договором, не дожидаясь извещения от подрядчика.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Приемка выполненной работы производится заказчиком в течение ________ дней с момента окончания срока выполнения работы по следующему адресу: ______________________, без извещения заказчика о готовности выполненной работы (ее результата) к сдаче".
--------------------------------

Если в договоре не согласовано условие об извещении заказчика о готовности выполненной работы к сдаче или не указан адрес для направления корреспонденции
При отсутствии в договоре указания на то, что подрядчик не должен извещать заказчика о готовности выполненной работы к сдаче, суд может применить к отношениям сторон по аналогии нормы, регулирующие договор строительного подряда (п. 1 ст. 753 ГК РФ), и признать, что подрядчик обязан направить заказчику извещение о готовности работы к сдаче. Если подрядчик не направил заказчику такое извещение, он не считается сдавшим работу и не вправе требовать ее принятия и оплаты на основании составленных им односторонних актов (см. Риск подрядчика 9.2.1).

Адрес заказчика для направления извещения о готовности работы к сдаче

Внимание! Пленум Верховного Суда РФ в п. 63 Постановления от 23.06.2015 N 25 разъяснил, что юридически значимые сообщения, адресованные гражданину, должны направляться по адресу его регистрации или по названному им адресу либо его представителю. Сообщения юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) следует посылать по адресу, содержащемуся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), либо по указанному адресатом.
С учетом разъяснений, данных в п. 64 Постановления, если стороны согласовали, что извещение о готовности работы к сдаче направляется строго по указанному в договоре адресу, направление такого сообщения по иному адресу (в том числе указанному в ЕГРЮЛ или по месту регистрации гражданина) будет ненадлежащим. Исключение составляют случаи, когда подрядчик знал или должен был знать о недостоверности адреса, указанного в договоре.

Стороны вправе определить в договоре адрес, по которому подрядчик направляет заказчику извещение о готовности работы к сдаче. Он может отличаться от адреса, указанного в отношении юридического лица в ЕГРЮЛ, а в отношении индивидуального предпринимателя - в ЕГРИП. Запретов для этого законом не предусмотрено. Однако в данной ситуации важно учитывать следующее.
Адрес в ЕГРЮЛ отражается для целей осуществления связи с юридическим лицом (пп. "в" п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"). В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, которые поступили по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего органа или представителя. Такие сообщения считаются полученными, даже если юридическое лицо по данному адресу не находится.
Соответственно, если заказчик, которому по этому адресу направлена корреспонденция, не примет мер к ее получению, он не сможет в дальнейшем ссылаться на то, что извещение не было им получено. Данный вывод следует также из п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица". Кроме того, в п. 1 названного Постановления Пленум ВАС РФ разъяснил, что в отношениях с третьими лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ, юридическое лицо не вправе ссылаться на недостоверность информации, которая отражена в реестре, и на сведения об адресе, в нем не указанные. Исключение составляют случаи, предусмотренные в абз. 2 п. 2 ст. 51 ГК РФ.
Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей осуществляется по месту жительства (п. 3 ст. 8 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ). Сведения о соответствующем адресе вносятся в ЕГРИП (пп. "д" п. 2 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ). Однако в Законе не указано, что адрес места жительства отражен в ЕГРИП для осуществления связи с индивидуальным предпринимателем.
В соответствии с п. 3 ст. 23 ГК РФ к индивидуальным предпринимателям применяются нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие деятельность юридических лиц - коммерческих организаций, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения. Таким образом, на деятельность индивидуальных предпринимателей распространяются положения абз. 2 п. 2 ст. 51 ГК РФ о том, что в отношениях с третьими лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ, юридическое лицо не вправе ссылаться на недостоверность отраженной в реестре информации, за исключением случаев, которые предусмотрены указанной нормой. Следовательно, можно сделать вывод, что адрес места жительства отражен в ЕГРИП для осуществления связи с индивидуальным предпринимателем.
Судебные решения, затрагивающие вопросы о том, надлежащим ли образом доставлена судебная корреспонденция, данный вывод подтверждают. Кроме того, суды указывают, что индивидуальный предприниматель несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, которые поступили по его адресу, указанному в ЕГРИП (Определение ФАС Уральского округа от 19.02.2014 N Ф09-1139/14, Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2013 N 15АП-9001/2013).
В связи с изложенным можно предположить, что положения абз. 2 п. 3 ст. 54 ГК РФ применяются и к индивидуальным предпринимателям в силу п. 3 ст. 23 ГК РФ.
Таким образом, заказчику следует принять меры для получения корреспонденции как по адресу, предусмотренному в договоре, так и по месту своей государственной регистрации. Это связано с тем, что направление корреспонденции по адресу, который указан в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), в силу абз. 2 п. 3 ст. 54 ГК РФ, п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 может быть признано надлежащим способом извещения о готовности работы к сдаче.
Так, суд не принял во внимание доводы заказчика о том, что результаты работ были направлены ему по месту государственной регистрации, а не на адрес, отраженный в договоре. При этом суд указал, что юридическое лицо в силу закона должно обеспечить получение корреспонденции по своему юридическому адресу (Постановление ФАС Уральского округа от 24.10.2013 N Ф09-10886/13).
Подрядчику рекомендуется посылать извещение не только на указанный в договоре адрес заказчика, но и на все известные адреса последнего. В противном случае возникает риск ненадлежащего уведомления. Например, в споре из договора поставки суд не признал надлежащим доказательством соблюдения претензионного порядка рассмотрения споров направление претензии на предусмотренный в договоре адрес покупателя, по которому последний корреспонденцию не получил. По адресу государственной регистрации поставщик претензию не посылал, хотя этот адрес был ему известен, поскольку именно его стороны согласовали в качестве места доставки товара. Суд отметил, что поставщик не привел доводов в подтверждение наличия у покупателя обязанности получать корреспонденцию не по месту своего нахождения, указанному в ЕГРЮЛ (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2014 N 17АП-10314/2014-ГК).
Вместе с тем если в договоре согласован адрес для направления корреспонденции, то предполагается, что сторона, действуя разумно и добросовестно, должна надлежащим образом исполнять условия обязательства (п. 5 ст. 10, ст. 309 ГК РФ). Соответственно, ей следует направить сообщение по такому адресу вне зависимости от того, было ли оно послано на адрес, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Данный вывод находит отражение в судебной практике. Так, суд отметил, что если в договор включены адреса контрагента, отличные от юридического, то уведомление об одностороннем отказе должно быть направлено по всем известным из договора адресам (Постановление ФАС Центрального округа от 27.11.2013 по делу N А09-908/2013).
Для обеспечения выполнения этой обязанности стороны вправе предусмотреть в договоре условие о неустойке, например о штрафе.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Если извещение о готовности работ к сдаче не направлено по адресу, указанному в настоящем договоре в качестве адреса для направления корреспонденции, заказчик вправе потребовать от подрядчика уплаты штрафа в размере ________ рублей".
--------------------------------

Момент доставки извещения о готовности работы к сдаче
Правовые последствия юридически значимых сообщений (в том числе извещения о готовности работы к сдаче) наступают для лица, которому они адресованы, с момента их доставки самому лицу или его представителю (абз. 1 п. 1 ст. 165.1 ГК РФ). Согласно абз. 2 п. 1 ст. 165.1 ГК РФ сообщение считается доставленным адресату и в том случае, если оно фактически не было получено по причинам, зависящим от адресата. Таким образом, извещение будет считаться доставленным заказчику, если он не получил его по своей вине. Например, извещение считается доставленным, если оно было возвращено по истечении срока хранения в отделении связи, поскольку адресат уклонился от получения корреспонденции (абз. 2 п. 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.15 N 25).
Необходимо учитывать, что норма п. 1 ст. 165.1 ГК РФ диспозитивна в силу прямого указания закона (п. 2 ст. 165.1 ГК РФ). Следовательно, стороны вправе предусмотреть в договоре иной порядок направления и получения юридически значимых сообщений.

9.2.3. Сроки приемки выполненной по договору
подряда работы (ее результата)

В договоре целесообразно установить сроки приемки выполненной работы (ее результата). В частности, рекомендуется согласовать:
- срок, в который заказчик обязан приступить к приемке (например, в течение определенного периода времени после получения извещения подрядчика о готовности работы к сдаче либо по истечении конечного срока выполнения работы).

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Заказчик обязан приступить к приемке в течение _________ дней с момента истечения конечного срока выполнения работы".

"Заказчик обязан приступить к приемке в течение _______ дней с момента получения извещения подрядчика о готовности результата работы к сдаче".
--------------------------------

- срок осмотра и проверки работы и ее результата на соответствие условиям договора (например, в течение определенного периода времени с начала приемки).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Заказчик обязан осуществить с участием подрядчика осмотр и проверку выполненной работы и ее результата на соответствие условиям договора в срок не позднее _____ дней с даты начала приемки, установленной договором".
--------------------------------

Стороны могут согласовать срок осуществления приемки в целом, включая осмотр, проверку и принятие работы.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Заказчик обязан осуществить приемку, в том числе осмотр, проверку и принятие работы, с участием подрядчика в срок не позднее чем через ________ дней после истечения конечного срока выполнения работы".

"Заказчик обязан осмотреть и принять выполненную работу в течение _______ рабочих дней с момента получения извещения подрядчика о готовности результата работы к сдаче".
--------------------------------

Если сроки приемки договором не установлены
Заказчик обязан осуществить приемку в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования (п. 2 ст. 314 ГК РФ).
Суд может применить к отношениям сторон по аналогии положения п. 1 ст. 753 ГК РФ и указать, что подрядчик обязан был направить извещение о готовности работы к сдаче и установить время для осмотра и принятия работы. Соответственно, до направления извещения подрядчик не считается выполнившим работу и не может требовать ее принятия и оплаты (см. Риск подрядчика 9.2.2).

9.2.4. Место приемки выполненной по договору
подряда работы (ее результата)

Стороны вправе определить любое место приемки работы (ее результата). Это может быть место нахождения какой-либо из сторон, место выполнения работы или иное согласованное место. При этом выбирать место приемки следует с таким расчетом, чтобы в ней смогли участвовать обе стороны, поскольку их участие является обязательным в силу п. 1 ст. 720 ГК РФ.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Приемка выполненной работы осуществляется сторонами в месте нахождения подрядчика/заказчика по адресу: ______________________".

"Заказчик обязан осуществить приемку результата работы по настоящему договору на складе подрядчика по адресу: _______________".
--------------------------------

В согласованном сторонами месте приемки осуществляются также осмотр и проверка результата работы на соответствие условиям договора подряда. Если для проверки результата работы необходимо, например, специальное оборудование или участие экспертов, то стороны могут договориться провести проверку после принятия результата работы в месте, отличном от места принятия. В таком случае в интересах заказчика предусмотреть в договоре право предъявлять претензии по явным недостаткам после принятия работы (п. 3 ст. 720 ГК РФ). Подробнее по данному вопросу см. п. 9.2.7 настоящих Рекомендаций.

Если место приемки не указано
В этом случае местом приемки признается место нахождения (место жительства) заказчика (абз. 7 п. 1 ст. 316 ГК РФ).

9.2.5. Порядок извещения подрядчика о недостатках работы

В силу п. п. 1 - 4 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан известить подрядчика обо всех отступлениях от условий договора, ухудшающих результат работы, и иных недостатках работы, выявленных как при приемке (явные недостатки), так и после нее (скрытые недостатки).
Явными называются недостатки, которые могут быть обнаружены при обычном способе приемки (проверки), в том числе при визуальном осмотре (п. п. 1 - 3 ст. 720 ГК РФ).
Скрытые недостатки не могут быть установлены при обычной приемке и выявляются в ходе использования результата работы. К ним относятся также недостатки, которые подрядчик умышленно скрыл (п. 4 ст. 720 ГК РФ).
Сторонам рекомендуется согласовать порядок извещения о недостатках, который включает в себя:
- сроки, форму, порядок составления и подписания актов о недостатках. По смыслу п. 1 ст. 720 ГК РФ акты должны быть подписаны обеими сторонами. Однако стороны вправе предусмотреть в договоре условие о привлечении к составлению и подписанию актов других лиц (см. п. 9.2.1 "Состав лиц, участвующих в приемке работы по договору подряда" настоящих Рекомендаций). В договоре может быть указано, что недостатки, выявленные при приемке, отражаются в акте приемки выполненной работы.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"При обнаружении недостатков результата работы дополнительно к акту приемки выполненных работ составляется акт о недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения";
--------------------------------

- срок направления подрядчику извещений о выявленных недостатках в работе и требований об их устранении, в частности о скрытых недостатках (п. 4 ст. 720 ГК РФ).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Извещение об обнаружении заказчиком скрытых недостатков в результате работы должно быть направлено подрядчику не позднее ________________ (указывается период времени) с момента их обнаружения";
--------------------------------

Стороны вправе также установить срок предъявления требования (претензии) по недостаткам работы. При несоблюдении данного срока заказчик лишается права предъявлять требования, связанные с несоответствием результата работы условиям договора (см. Риск заказчика 9.2.1).

Если порядок извещения подрядчика о выявленных недостатках не согласован
Заказчик обязан сообщить подрядчику о явных недостатках работы (ее результата) немедленно при приемке (п. 1 ст. 720 ГК РФ), а о скрытых недостатках - в разумный срок по их обнаружении (п. 4 ст. 720 ГК РФ). Извещение должно быть сделано в письменной форме (п. 1 ст. 161, п. 1 ст. 162, п. 2 ст. 720 ГК РФ).
Если в ходе судебного разбирательства между сторонами будет установлено, что разумный срок для направления извещения об обнаружении скрытых недостатков истек, суд откажет заказчику в удовлетворении требований, связанных с несоответствием результата работы условиям договора (см. Риск заказчика 9.2.2).

9.2.6. Экспертиза в отношении недостатков
выполненной по договору подряда работы

Согласно п. 5 ст. 720 ГК РФ в случае спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.
Экспертиза - исследование, в результате которого эксперт дает заключение по вопросам, требующим специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. Это понятие определено с учетом современного экономического словаря под ред. Б.А. Райзберга, Л.П. Лозовского, Е.Б. Стародубцевой, а также исходя из смысла ст. 9 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон об экспертной деятельности).
Проведение экспертизы возможно как при урегулировании спора без его передачи на рассмотрение суда (внесудебная), так и на стадии судебного разбирательства (судебная).

Порядок проведения судебной экспертизы
Экспертно-судебная деятельность регулируется нормами Закона об экспертной деятельности, ст. ст. 82 - 87 АПК РФ, ст. ст. 79 - 87 ГПК РФ.
Судебная экспертиза по общему правилу проводится государственными судебно-экспертными учреждениями. Ими являются специализированные учреждения уполномоченных федеральных государственных органов, органов исполнительной власти субъектов РФ, созданные для организации и производства судебной экспертизы (ст. 11 Закона об экспертной деятельности).
Абзац 1 ст. 41 Закона об экспертной деятельности предусматривает проведение судебной экспертизы лицами, не являющимися государственными экспертами. Кроме того, в соответствии с разъяснениями ВАС РФ такую экспертизу можно проводить в негосударственной экспертной организации либо привлекать к ее проведению лиц, которые обладают специальными знаниями, но не являются работниками учреждения или организации (п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе").
В рамках гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции проведение экспертизы может быть поручено как государственному судебно-экспертному учреждению, так и негосударственной экспертной организации, конкретному эксперту или экспертам (Обзор судебной практики по применению законодательства, регулирующего назначение и проведение экспертизы по гражданским делам, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 14.12.2011).
Однако Правительство РФ может устанавливать перечень видов судебных экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-экспертными организациями (ч. 3 ст. 41 Закона об экспертной деятельности).
Необходимо отметить, что суд назначает экспертизу лишь в том случае, когда разъяснение возникших у него вопросов требует специальных познаний (ст. 82 АПК РФ, ст. 79 ГПК РФ). Иными словами, удовлетворение ходатайства о проведении экспертизы является правом, а не обязанностью суда.

- Судебную практику, подтверждающую, что судебная экспертиза назначается в случаях, когда для разрешения вопросов права необходимы специальные познания, и требование одной из сторон договора подряда о проведении такой экспертизы не создает обязанности суда ее назначить, см. в Путеводителе по судебной практике.

Порядок проведения внесудебной экспертизы
Внесудебные экспертизы проводятся негосударственными экспертными учреждениями и лицами, не обладающими статусом государственных экспертов. При проведении таких экспертиз эксперты должны руководствоваться нормами Закона об экспертной деятельности, в частности о проведении экспертизы, правах и обязанностях эксперта, содержании экспертного заключения (абз. 2 ст. 41 Закона об экспертной деятельности).
В целях фиксации и формирования доказательственной базы допущенных подрядчиком нарушений сторонам рекомендуется согласовать в договоре порядок проведения внесудебной экспертизы для установления причины и момента возникновения недостатков.
На основании норм о свободе договора (ст. 421 ГК РФ) стороны могут указать конкретную экспертную организацию или конкретного эксперта либо определить критерии их выбора, например:
- уровень образования;
- ученую степень;
- профиль деятельности в исследуемой сфере;
- наличие опыта работы в экспертной деятельности;
- эффективность проведенных экспертиз;
- признание профессиональным сообществом;
- владение информационно-коммуникационными технологиями.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Внесудебная экспертиза по вопросу наличия недостатков в выполненной работе проводится ________________ (указать наименование экспертной организации или фамилию, имя, отчество конкретного эксперта)".

"Внесудебная экспертиза по вопросу наличия недостатков в выполненной работе проводится экспертом, имеющим высшее техническое образование, степень кандидата технических наук, соответствующий вопросам экспертизы профиль работы".
--------------------------------

Распределение расходов на проведение экспертизы
Порядок распределения расходов на проведение экспертизы предусмотрен п. 5 ст. 720 ГК РФ. В соответствии с данной нормой такие расходы несет подрядчик. Исключения составляют случаи, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений договора с его стороны или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных ситуациях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению сторон, - обе стороны поровну.
При назначении экспертизы на стадии судебного разбирательства положения п. 5 ст. 720 ГК РФ не применяются и расходы взыскиваются по правилам процессуального законодательства о порядке внесения сторонами сумм, подлежащих выплате экспертам (ст. ст. 108 - 110 АПК РФ, ст. ст. 95 - 96, 98, 102 - 103 ГПК РФ).

- Судебную практику, подтверждающую, что нормы п. 5 ст. 720 ГК РФ не применяются к порядку распределения расходов по проведению экспертизы, назначенной в ходе судебного разбирательства, см. в Путеводителе по судебной практике.

9.2.7. Право заказчика предъявить требования
в связи с явными недостатками работы по договору
подряда, принятой без проверки

Стороны вправе договориться о том, что выполненная работа принимается без проверки ее соответствия условиям договора, например, если в силу характера работы приемка может быть осуществлена только на территории подрядчика, однако проверить работу в этом месте надлежащим образом невозможно (ввиду ее большого объема или отсутствия специального оборудования).
В таком случае заказчику необходимо закрепить в договоре право предъявлять к подрядчику претензии, связанные с обнаружением явных недостатков после приемки (п. 3 ст. 720 ГК РФ). Тогда он сможет отказаться от исполнения договора и потребовать вернуть уплаченные по нему денежные средства, если работа выполнена с нарушением условий договора (см. Риск подрядчика 9.2.3).

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Проверка качества результата работы осуществляется заказчиком на его складе в течение десяти дней после принятия. Заказчик вправе предъявлять претензии по всем недостаткам результата работы, выявленным в ходе такой проверки".

"Заказчик вправе предъявлять претензии по явным недостаткам результата работы, выявленным в течение десяти дней после его приемки".
--------------------------------

Если право заказчика предъявить требования в связи с явными недостатками работы, принятой без проверки, не согласовано
Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на ее недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (п. 3 ст. 720 ГК РФ), и будет обязан оплатить выполненную работу в соответствии с п. 1 ст. 711 ГК РФ (см. Риск заказчика 9.2.3).

9.2.8. Право подрядчика продать результат работы
при уклонении заказчика от его принятия

В силу п. 6 ст. 720 ГК РФ при уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик имеет право продать ее результат и из вырученной суммы удовлетворить свои требования по оплате работы. Он вправе сделать это через месяц со дня, когда результат должен был быть передан, после двукратного предупреждения заказчика.
Однако стороны могут изменить порядок реализации такого права (например, увеличить или уменьшить срок, по истечении которого подрядчик вправе продать результат работы, а также изменить количество предупреждений о продаже, согласовать срок, форму и порядок направления этих предупреждений и т.п.).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"При уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении двух месяцев со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего трехкратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ".
--------------------------------

Стороны могут также исключить данное право подрядчика. В этом случае он не сможет распорядиться результатом работы в порядке п. 6 ст. 720 ГК РФ, а задолженность по оплате работы ему придется взыскивать в судебном порядке.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"При уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик не вправе продавать результат работы в соответствии с п. 6 ст. 720 ГК РФ".
--------------------------------

9.2.9. Предоставление подрядчиком информации
о результате работы

Информация о результате работы - это сведения (данные), касающиеся эксплуатации и иного использования результата работы (ст. 726 ГК РФ, ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"). Такая информация обычно представлена в виде документов на бумажном или электронном материальном носителе.
К документации, необходимой для использования результата работы, относится, в частности, техническая документация, например паспорт изделия (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2011 N 17АП-6956/2011-ГК по делу N А60-4473/2011).
Заказчик заинтересован в получении вместе с результатом работы всех необходимых сведений о нем, которые позволят полноценно им пользоваться. Для этого рекомендуется прямо указать в договоре обязанность подрядчика сопроводить результат работ информацией о его использовании (ст. 726 ГК РФ). Если такая обязанность будет согласована, подрядчик не сможет отказаться от ее исполнения в объеме, установленном договором, даже если по каким-либо причинам часть информации у него отсутствует (см. Риск подрядчика 9.2.4).

Внимание! Необходимо учитывать, что некоторые суды связывают возникновение обязанности подрядчика передать информацию о результате работы с фактом передачи готового результата работ, основываясь на буквальном значении слова "результат" (ст. 431 ГК РФ). Соответственно, если работы не завершены и их конечный результат отсутствует, но договор при этом еще действует, заказчик не сможет понудить подрядчика к исполнению указанной обязанности.

Заказчику также может быть отказано в истребовании документации, касающейся результата работы, если по условиям договора она передается после окончания работы и работы еще не завершены (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.12.2008 по делу N А29-3146/2008, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.11.2009 по делу N А56-23666/2009).
Однако применение ст. 726 ГК РФ к незавершенному результату работы допускается, если результат передается заказчику и это влечет за собой обязанность оплатить его - например, при отказе заказчика от договора в порядке ст. 717 ГК РФ (см. Постановление ФАС Московского округа от 11.03.2010 N КГ-А40/1339-10) или в случае, когда договор расторгнут по иным основаниям, но заказчик намерен завершить работы.

- Судебную практику, подтверждающую, что заказчик может требовать передачи информации, относящейся к незавершенному результату работы, в случае расторжения договора, см. в Путеводителе по судебной практике.

В договоре, помимо обязанности передать информацию, следует определить:
- объем информации, например, путем указания состава или перечня необходимых документов или описания характера необходимых заказчику сведений (сведения о правилах безопасной эксплуатации результата работы, об особенностях его хранения, о каких-либо технических параметрах результата и т.п.);
- форму предоставления информации и требования к ее оформлению (вид материального носителя - бумажный или электронный, язык информации, передача документов в оригинале или в виде заверенных надлежащим образом копий, количество экземпляров, наличие определенных реквизитов в документе, печати и подписи подрядчика, отметок о согласовании документов в компетентных органах и др.);
- способ передачи информации (лично в руки уполномоченному представителю заказчика, почтой или с помощью службы доставки, по электронной почте и т.п.);
- срок передачи информации (например, одновременно с передачей результата работы или через какое-то время после его передачи).

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Подрядчик обязан передать заказчику следующую информацию об эксплуатации и ином использовании результата работы: __________________ (указывается перечень документов, количество их экземпляров, требования к их оформлению). Информация должна быть передана одновременно с результатом работы, факт ее передачи фиксируется сторонами в акте приема-передачи выполненных работ".

"Подрядчик обязан передать заказчику информацию об использовании результата работы в следующем объеме: __________________ (указывается характер сведений о результате работы). Данная информация должна быть представлена в виде письменных документов на русском языке в количестве 1 экземпляра каждого документа и направлена заказчику в течение 5 дней с момента окончания срока выполнения работы заказным письмом с уведомлением".
--------------------------------

Рекомендуется также установить в договоре ответственность в виде неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязанности по передаче информации.
Подробнее о согласовании условия о неустойке см. п. 11.3 настоящих Рекомендаций.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"В случае просрочки передачи информации о результате работы подрядчик уплачивает заказчику пени в размере 0,01% от стоимости работы за каждый день просрочки".
--------------------------------

Если информация должна быть предоставлена одновременно с результатом работы, в договоре может быть предусмотрено право заказчика приостановить приемку работ в случае неисполнения подрядчиком указанной обязанности. Заказчик должен учитывать, что если он не воспользуется данным правом и примет работы, он не вправе будет отказаться от оплаты работ, ссылаясь на непередачу подрядчиком информации (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.05.2007 по делу N А29-3829/2006-4э).
На практике для обеспечения исполнения подрядчиком обязанности по передаче информации стороны включают в договор условие о том, что оплата работ производится лишь при условии исполнения этой обязанности. Такое условие противоречит ст. ст. 702, 711 ГК РФ, в связи с чем договор в соответствующей части может быть признан судом недействительным на основании ст. 168 ГК РФ (см. Риск заказчика 9.2.4).

Если условие о предоставлении информации о результате работы не согласовано
Подрядчик в силу ст. 726 ГК РФ обязан будет предоставить ее, если характер результата работы таков, что без указанной информации его использование для целей, указанных в договоре, невозможно.
Объем информации, которую должен предоставить подрядчик, зависит от технической сложности и новизны результата работы (см. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2011 N 15АП-5895/2011, оставленное без изменения Постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от 02.11.2011 по делу N А53-2858/2010).
Если договором установлена обязанность передать информацию, но не указан ее объем или требования к оформлению, заказчик не сможет требовать передачи информации или отказываться от оплаты работ в связи с неисполнением подрядчиком указанной обязанности (см. Риск заказчика 9.2.6).

9.2.10. Передача результата выполненных по договору
подряда работ в электронном виде

Стороны с учетом п. 4 ст. 421 ГК РФ вправе согласовать в договоре условие о необходимости предоставить результат выполненных работ не только в письменной, но и в электронной форме (в частности, посредством направления файлов по электронной почте). Такая потребность может возникнуть, например, в случае, когда предметом договора выступает выполнение работ по составлению документации (чертежей, планов, схем, расчетов и т.д.).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик обязан передать заказчику два письменных экземпляра разработанной в рамках настоящего договора документации, а также направить файлы с документацией на электронную почту".
--------------------------------

Такое условие выгодно обеим сторонам: подрядчик может более оперативно сдать, а заказчик получить результат работ и проверить его качество, не дожидаясь доставки письменных экземпляров документации.
При согласовании условия о направлении результата работ по электронной почте сторонам рекомендуется указать в договоре конкретный адрес такой почты (например, корпоративная почта организации, адрес конкретного лица, ответственного за приемку выполненных работ, руководителя организации).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик обязан направить заказчику файл с разработанной в рамках настоящего договора документацией на электронную почту: _____________________".
--------------------------------

Наличие в договоре указанного условия может быть полезно подрядчику в случае возникновения между сторонами спора о сроке выполнения работ.
Так, при рассмотрении дела о взыскании задолженности с заказчика суд установил, что подрядчик своевременно в соответствии с условиями договора направил проектную документацию сначала по электронной почте, затем в письменной форме. При этом в качестве доказательства того, что результат работ был направлен в срок, суд принял электронную переписку сторон в виде скриншотов (снимков с экрана), представленных подрядчиком. Дата отправки электронного сообщения с документацией была признана датой, с наступления которой заказчик должен был выполнить условия договора по приемке результата работ (подписать акт либо направить мотивированный отказ).

- Судебную практику, подтверждающую, что переписка сторон по электронной почте может быть признана доказательством своевременного направления результата работ заказчику, если возможность передачи такого результата в электронном виде предусмотрена в договоре, см. в Путеводителе по судебной практике.

9.3. АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статьи 720, 753 ГК РФ

Акт выполненных работ - это подписанный заказчиком и подрядчиком документ, в котором фиксируются факт и результаты приемки работы.
Обязательное составление акта при приемке работы предусмотрено только для договора строительного подряда (п. 4 ст. 753 ГК РФ). Статья 720 ГК РФ не содержит требования об оформлении результатов приемки в письменном виде. Однако акт выполненных работ может быть использован сторонами в качестве письменного доказательства в суде (ст. 75 АПК РФ, ст. 71 ГПК РФ). Кроме того, составление письменного документа позволяет однозначно зафиксировать дату приемки работы, что имеет существенное значение для определения момента перехода к заказчику риска случайной гибели работы (ст. 705 ГК РФ) и возникновения обязанности заказчика оплатить работу (п. 1 ст. 711 ГК РФ).
Следует иметь в виду, что согласно сложившейся судебной практике акт фиксирует исполнение подрядчиком его обязанностей по договору и не может рассматриваться в качестве сделки по смыслу ст. 153 ГК РФ. По этой причине акт не может быть признан недействительным по правилам о недействительности сделок (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.03.2012 по делу N А43-29613/2010, Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2010 N КГ-А41/7506-10). То, что акты выполненных работ не являются сделками, означает также, что при их составлении не требуется соблюдение порядка, предусмотренного ст. ст. 78 - 79 Федерального Закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" для заключения крупных сделок (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.03.2009 по делу N А05-3246/2008). Равным образом при составлении акта не применяются правила о заключении крупных сделок в обществе с ограниченной ответственностью (ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью") и правила заключения сделок с заинтересованностью (ст. ст. 81 - 84 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"). Отметим, что принадлежность акта выполненных работ к сделкам отрицается не только в судебной практике, но и в юридической литературе (Ершов О.Г. Подписание акта приемки результата строительных работ: сделка, сделкоподобные или фактические действия? // "Право и экономика", 2012, N 7).

Согласование условия о составлении акта
В соответствии с п. 4 ст. 421, п. 1 ст. 720 ГК РФ стороны могут предусмотреть в договоре, что приемка работы оформляется двусторонним актом выполненных работ (актом приемки-сдачи работ).
В таком случае в договоре могут быть определены:
- форма акта выполненных работ;
- содержание акта;
- порядок составления, направления и подписания акта;
- последствия отказа заказчика от подписания акта;
- оформление приемки выполненных работ с помощью универсального передаточного документа.

9.3.1. Форма акта выполненных работ по договору подряда

Глава 37 ГК РФ не содержит требований к форме акта выполненных работ. В п. 4 ст. 753 ГК РФ, регулирующей приемку работ по договору строительного подряда, указано лишь, что сдача-приемка работ оформляется актом, подписанным обеими сторонами.
Формы актов приемки некоторых видов работ содержатся в подзаконных нормативных актах. Например, Постановлением Госкомстата от 11.11.1999 N 100 утверждены унифицированные формы первичной учетной документации, в том числе форма КС-2 для приемки строительно-монтажных работ.
Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" не содержит положений об обязательном применении названных форм. Однако стороны могут предусмотреть использование формы КС-2 при заключении договора строительного подряда, а также взять ее за основу при составлении акта приемки других работ (не связанных со строительством). Условие о приемке работы по акту формы КС-2 позволит сторонам не перечислять в договоре все необходимые реквизиты акта.
Следует учесть, что некоторые реквизиты формы КС-2 применимы только к строительным работам и их не следует включать в форму акта, используемого для оформления приемки других видов работ.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Приемка выполненной работы оформляется сторонами путем составления и подписания акта выполненных работ по форме КС-2, предусмотренной Постановлением Госкомстата от 11.11.1999 N 100".
--------------------------------

Согласно ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Формы первичных учетных документов для организаций бюджетной сферы устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством РФ. Если стороны не являются организациями бюджетной сферы, они могут использовать форму, утвержденную подрядчиком или заказчиком, или разработать ее совместно и закрепить в приложении к договору.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"При приемке работ стороны составляют акт выполненных работ по форме, согласованной в Приложении N 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора".
--------------------------------

Если в договоре требования к форме акта выполненных работ не согласованы
Стороны могут использовать форму, определенную руководителем заказчика или подрядчика в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Также они могут применить форму универсального передаточного документа, рекомендованную письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@. Подробнее о форме универсального передаточного документа см. п. 9.3.5 настоящих Рекомендаций.
Акт выполненных работ по договору подряда может быть составлен в электронной форме. Чтобы при исполнении договора использовать электронный акт, сторонам нужно договориться о порядке обмена электронной информацией. В ходе него обе стороны должны использовать электронную подпись (Письмо ФНС России от 23.04.2018 N ЕД-4-15/7760). Обмениваться такими документами можно с использованием корпоративной информационной системы, например через оператора электронного документооборота (ОЭД). Другой вариант - обмен без его участия, например, через собственную информационную систему или по электронной почте.
Акт выполненных работ по договору подряда в электронной форме должен быть заверен электронной подписью. Порядок использования электронной подписи (ЭП) при составлении акта зависит от ее вида и выбранного способа обмена электронными документами.
По общему правилу при обмене документами без участия ОЭД стороны могут выбрать любой вид ЭП. Чтобы использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), достаточно, например, включить в договор условие об этом и согласовать процедуру обмена (ч. 1 ст. 6 Закона об электронной подписи, п. 17 ФСБУ 27/2021, пп. "б", "в" п. 7 Информационного сообщения Минфина России от 10.06.2021 N ИС-учет-33).
Чтобы в таком же порядке обмениваться документами, подписанными простой ЭП, сторонам нужно дополнительно согласовать (ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 9 Закона об электронной подписи):
- правила определения лица, подписывающего электронный документ, по его простой ЭП;
- обязанность лица, создающего (использующего) ключ простой ЭП, соблюдать его конфиденциальность.
Для применения неквалифицированной ЭП соглашение сторон должно предусматривать порядок ее проверки (ч. 2 ст. 6 Закона об электронной подписи).
ФНС России рекомендует включить в соглашение об использовании простой и усиленной неквалифицированной ЭП и другие условия, например перечень форматов электронных документов. Составляя такой перечень, нужно учитывать, что если потребуется представить акт выполненных работ в электронной форме в налоговый орган, то нужно соблюсти формат, утвержденный ФНС России. Предусмотреть составление акта можно и в ином формате, но, в случае его представления в налоговый орган, нужно представить заверенную налогоплательщиком бумажную копию или сканированный документ, подписанный усиленной электронной подписью (п. 7 ст. 80, п. 2 ст. 93 НК РФ, Приказ ФНС России от 28.07.2022 N ЕД-7-26/691@, Приказ ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/552@, п. 1.3 Методических рекомендаций ФНС России).
Чтобы обмениваться документами через ОЭД, каждая сторона должна заключить договор с оператором. Желательно, чтобы операторы были зарегистрированы в реестре ОЭД. В этом случае технология обмена электронными документами между ними будет стандартной, соответствующей технологии, размещенной на сайте ФНС России. Обычно ОЭД предлагают использовать УКЭП. Возможность использования других видов ЭП зависит от системы электронного документооборота. Рекомендуем сторонам согласовать порядок обмена документами через ОЭД и виды используемых ЭП, в том числе для составления актов. По общему правилу порядок использования ЭП устанавливает ОЭД (п. 1.4, пп. 4.1.1 п. 4.1 Методических рекомендаций ФНС России, пп. "б", "в" п. 7 Информационного сообщения Минфина России от 10.06.2021 N ИС-учет-33).
Порядок электронного документооборота должен быть отражен в учетной политике каждой из сторон договора (п. 4 ПБУ 1/2008).
О том, как закрепить в договоре условие об электронном документообороте, см. Готовое решение; что нужно знать об электронной подписи, см. в Путеводителе.

9.3.2. Содержание акта выполненных работ
по договору подряда

В Гражданском кодексе РФ не предусмотрены требования к содержанию акта выполненных работ. Однако с учетом того, что такой акт используется для целей бухгалтерского учета, в нем рекомендуется предусмотреть обязательные реквизиты, которые должны содержаться в первичных учетных документах в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". К ним относятся:
- наименование документа (акт выполненных работ);
- дата составления;
- наименование экономического субъекта, составившего документ (в данном случае - наименование или ФИО заказчика и подрядчика);
- содержание факта хозяйственной жизни (т.е. сведения о видах и объеме выполненных подрядчиком работ);
- величина натурального или денежного измерения факта хозяйственной жизни (сведения о цене работ);
- должности и личные подписи лиц, совершивших сделку, операцию и ответственных за ее оформление, с указанием фамилий и инициалов (т.е. подпись лиц, уполномоченных действовать от имени заказчика и подрядчика).

Обязательно ли проставлять печать на акте выполненных работ?
Ответ: Нет, не обязательно.
Обоснование: Оттиск печати организации не относится к числу реквизитов, которые согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" должен содержать первичный учетный документ (в том числе акт выполненных работ).
Печать, в соответствии с п. 5.24 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016, заверяет подлинность подписи должностного лица.
Отсутствие печати само по себе не свидетельствует об отсутствии полномочий на подписание акта оказанных услуг (см. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 02.06.2015 N Ф03-1931/2015 по делу N А51-24609/2014). Однако стороны, как правило, требуют от контрагента ставить печать, поскольку доступ к ней может подтвердить полномочия лица подписывать акт (см. Постановления Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17.05.2016 N Ф01-1606/2016 по делу N А39-4488/2015, от 31.03.2016 N Ф01-729/2016 по делу N А43-281/2015, Арбитражного суда Уральского округа от 31.01.2017 N Ф09-12312/16 по делу N А76-817/2016).
Общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества не обязаны иметь печать. При ее наличии сведения о печати должны быть зафиксированы в уставе общества (п. 5 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", п. 7 ст. 2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). Если у стороны есть печать и это отражено в уставе, она может ее использовать, в том числе при составлении акта.

Стороны вправе включить в акт и иные данные (п. 4 ст. 421 ГК РФ). В частности, во избежание возможных споров рекомендуется предусмотреть включение в акт:
- реквизитов договора подряда, во исполнение которого составлен акт;
- сведений о выявленных недостатках в работе.

9.3.2.1. Включение в акт реквизитов договора подряда

Для определения того, во исполнение какого договора выполнялись работы и был составлен акт, в акте выполненных работ следует указать дату заключения и номер договора. Это особенно важно в случаях, когда между заказчиком и подрядчиком заключено несколько договоров подряда.

--------------------------------
Пример формулировки в акте:
"Работы выполнены по договору N _____ от 01.03.2023, заключенному между _________".
--------------------------------

Если реквизиты договора, по которому выполнялись работы, в акте не предусмотрены:
У сторон могут возникнуть затруднения при использовании акта в качестве доказательства выполнения работ, так как он может быть признан не имеющим отношения к делу (ч. 1 ст. 67 АПК РФ, ст. 59 ГПК РФ). Однако если акт подписан обеими сторонами без замечаний и другой договор подряда сторонами не заключался, то акт, не содержащий ссылки на договор, будет признан доказательством выполнения работ.

- Судебную практику, подтверждающую, что акт, не содержащий ссылку на договор подряда, является доказательством выполнения работ, если между сторонами не заключались другие договоры подряда, см. в Путеводителе по судебной практике.

9.3.2.2. Включение в акт сведений о видах, объеме
и стоимости выполненных по договору подряда работ

В акте следует указать виды произведенных работ и их объем. Это позволит определить, надлежащим ли образом выполнены подрядчиком обязательства по договору.

--------------------------------
Пример формулировки:
"Подрядчиком выполнены следующие виды работ:
1)_________;
2)_________;
3)_________.
В силу возникшей необходимости подрядчиком также проведены дополнительные виды работ:
1)_________;
2)_________".
--------------------------------

Также в акте выполненных работ должна быть указана их стоимость.
Если в соответствии с п. 4 ст. 709 ГК РФ цена в договоре является приблизительной, в акте следует указать окончательную цену работ. После подписания акта сторонами работа будет подлежать оплате по этой цене. Однако в дальнейшем заказчик сможет доказывать в суде, что цена была завышена.

- Судебную практику, подтверждающую, что если по договору цена является приблизительной, то применяется цена, указанная в акте, см. в Путеводителе по судебной практике.

Если цена работы по договору является твердой, но в акте указана цена, отличная от установленной договором, суды по-разному определяют цену, по которой должна быть оплачена работа. Согласно одной позиции работа оплачивается по цене, указанной в договоре, согласно другой - применяется цена, содержащаяся в акте.

- Судебную практику, подтверждающую, что существует две позиции судов по вопросу о том, по какой цене оплачиваются работы, если цена, указанная в акте, отличается от твердой цены по договору, см. в Путеводителе по судебной практике.

Если сведения об объеме и стоимости выполненных работ в акте не предусмотрены:
Акт, не содержащий сведений об объеме и стоимости выполненных работ, не будет признан доказательством выполнения работы.

- Судебную практику, подтверждающую, что не является доказательством выполнения работ акт, в котором не содержатся сведения об их объеме и стоимости, см. в Путеводителе по судебной практике.

9.3.2.3. Включение в акт сведений об обнаруженных
недостатках выполненной по договору подряда работы

Если в ходе приемки заказчик обнаружил в работе недостатки, он вправе указать на них в акте выполненных работ (п. 2 ст. 720 ГК РФ).

--------------------------------
Пример формулировки:
"При осмотре результата работы заказчиком выявлены следующие недостатки:
1)_________;
2)_________;
3)_________.".
--------------------------------

Следует иметь в виду, что при подписании акта заказчик может не иметь технической возможности включить в него сведения о недостатках работы. Это возможно, если акт был подготовлен подрядчиком и не содержит соответствующего раздела или в случае, когда стороны предусмотрели использование формы КС-2, установленной Приказом Госкомстата от 11.11.1999 N 100, в которой также не предусмотрено графы для указания на недостатки. В такой ситуации заказчику следует отказаться от подписания акта с указанием мотивов отказа (обнаружение недостатков) и изложить сведения о недостатках в отдельном документе, который в соответствии с п. 1 ст. 720 ГК РФ должен быть вручен или направлен подрядчику. Подробнее об извещении подрядчика о выявленных недостатках см. п. 9.2.5 настоящих Рекомендаций.

Если сведения о недостатках не включены в акт выполненных работ:
В судебной практике существует позиция, согласно которой подписание акта выполненных работ без замечаний может лишить заказчика права в дальнейшем ссылаться на недостатки работ. В то же время существует и другая точка зрения, в соответствии с которой заказчик в этой ситуации лишается права ссылаться только на явные недостатки. Кроме того, есть практика, в соответствии с которой за заказчиком сохраняется право предъявить претензии по качеству работы, если он представит доказательства.

- Судебную практику, подтверждающую, что существуют различные позиции судов по вопросу о последствиях подписания акта без замечаний, см. в Путеводителе по судебной практике.

Следует учитывать, что заказчик после приемки работы вправе заявить о выявленных им скрытых недостатках (п. 4 ст. 720 ГК РФ). В то же время, если он принял работу без проверки и подписал акт, то в дальнейшем он не сможет ссылаться на недостатки, которые могли быть выявлены при проверке (явные недостатки), если иное не установлено договором подряда (п. 3 ст. 720 ГК РФ). Подробнее о праве заказчика предъявить требования, связанные с явными недостатками принятой без проверки работы, см. п. 9.2.7 настоящих Рекомендаций.

9.3.3. Порядок направления и подписания
акта выполненных по договору подряда работ

В соответствии с п. 1 ст. 720 ГК РФ осмотр и приемка работы осуществляются заказчиком в присутствии подрядчика. Одновременно с приемкой составляется и подписывается акт выполненных работ. Однако в ряде случаев возможно направление акта выполненных работ ранее осмотра их результата. Так, направление акта подрядчиком и получение его заказчиком может быть использовано подрядчиком как уведомление о готовности работы к приемке.

- Судебную практику, подтверждающую, что направление акта о приемке выполненных работ заказчику и получение его адресатом свидетельствуют об извещении о готовности работ и возможности их приемки, см. в Путеводителе по судебной практике.

С учетом возможности направления акта заказчику в договоре следует согласовать порядок его направления. В частности, можно предусмотреть адрес, по которому направляется акт выполненных работ, и перечень документов, необходимых заказчику для приемки. Следует также установить срок, в который заказчик обязан осмотреть и принять результат работы и подписать акт выполненных работ.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"После завершения работы подрядчик направляет заказчику акт выполненных работ по адресу: _________. К акту прилагаются: ____________. Заказчик осматривает, принимает работу и подписывает акт в течение _______ дней".
--------------------------------

Стороны в соответствии с п. 4 ст. 421 ГК РФ вправе предусмотреть в договоре направление акта не только по почте, но и с использованием факсимильной связи.
Также акт может быть направлен посредством электронной связи. Для того чтобы акт, направленный по факсу или электронной почте, мог быть использован в суде в качестве доказательства, сторонам следует согласовать в договоре возможность использования документов, полученных посредством факсимильной, электронной или иной связи (ч. 3 ст. 75 АПК РФ). Для снижения вероятности споров относительно получения факсимильного сообщения другой стороной в договоре рекомендуется предусмотреть номера телефонов сторон, используемых для отправления факса, а также установить, что факсимильное сообщение должно быть зафиксировано в журнале учета факсимильных отправлений.

Внимание! Пленум Верховного Суда РФ в п. 65 Постановления от 23.06.2015 N 25 разъяснил, что юридически значимое сообщение может быть направлено в любой форме, соответствующей характеру сообщения и отношений, если иное не установлено законом, договором, не следует из обычая или практики, установившейся во взаимоотношениях сторон. При выборе формы необходимо учитывать наличие возможности достоверно установить впоследствии, от кого исходило сообщение и кому было адресовано.
В соответствии с п. 64 указанного Постановления стороны вправе согласовать, что акт выполненных работ направляется исключительно предусмотренным договором способом. В этом случае направление такого акта иным способом (например, ценным письмом с описью вложения вместо согласованного в договоре направления курьером) будет считаться ненадлежащим.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Акт выполненных работ может быть направлен посредством факсимильной связи (N факса ________). Акт, направленный с использованием факсимильной связи, признается доказательством выполненных работ, если он направлен с факса подрядчика на факс заказчика по указанному в договоре номеру, а сведения об отправке факса внесены в журнал учета факсимильных отправлений подрядчика".
--------------------------------

Если порядок составления и направления акта выполненных работ не согласован
В этом случае акт должен быть подписан сторонами в момент приемки (п. 1 ст. 720 ГК РФ) или подписан подрядчиком и направлен заказчику по адресу его государственной регистрации (п. п. 2, 3 ст. 54 ГК РФ).
Акт должен быть составлен и подписан на бумажном носителе, поскольку акт, представленный в иной форме (если она не предусмотрена договором), может быть не принят судом в качестве доказательства выполнения работы на основании ч. 3 ст. 75 АПК РФ.
В то же время в судебной практике акт, направленный с помощью факсимильной связи, признается надлежащим доказательством выполнения работы.

Подписание акта выполненных работ
Для придания акту доказательственной силы он должен быть подписан уполномоченными лицами заказчика и подрядчика.
Стороны могут определить в договоре лиц, имеющих право на осуществление приемки работы. Для этого следует указать:
- Ф.И.О. этих лиц;
- подтверждающие полномочия документы, которые будут предъявлены при подписании акта.
Если стороны являются юридическими лицами, то указанный документ могут подписывать:
- органы юридического лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом (п. 1 ст. 53 ГК РФ). Например, в хозяйственных обществах это единоличный исполнительный орган: директор, генеральный директор, президент (ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах");
- представители (сотрудники организации, иные лица), действующие от имени юридического лица на основании надлежащим образом оформленной доверенности (абз. 1 п. 1 ст. 182, п. 4 ст. 185.1 ГК РФ). Полномочия представителя также могут явствовать из обстановки, в которой он действует (абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ).
Как правило, акт подписывает уполномоченное лицо лично. Однако в силу п. 4 ст. 421 ГК РФ стороны вправе предусмотреть в договоре возможность использовать в акте факсимильное воспроизведение или иной аналог собственноручной подписи.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"При подписании акта выполненных работ допускается использование факсимильного воспроизведения подписи генерального директора заказчика".
--------------------------------

При отсутствии соответствующего условия акт выполненных работ, подписанный с использованием факсимиле подписи, может быть не признан надлежащим доказательством по делу (Риск подрядчика 9.3.1).

Если порядок подписания акта выполненных работ не согласован
Акт должен быть подписан либо заказчиком и подрядчиком собственноручно (если это физические лица или индивидуальные предприниматели), либо лицами, действующими от их имени на основании доверенности (ст. ст. 182, 185, 185.1 ГК РФ), либо в соответствии с п. 1 ст. 53 ГК РФ уполномоченными органами юридических лиц (если стороны - юридические лица).

9.3.4. Отказ заказчика от подписания акта
выполненных по договору подряда работ

После того как подрядчик завершил работы и направил заказчику акт выполненных работ, может сложиться ситуация, когда заказчик отказывается от подписания акта.
Заказчик может отказаться от принятия результата работ, т.е. от подписания акта выполненных работ, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Так, в силу п. 2 ст. 405, п. 3 ст. 708 ГК РФ заказчик вправе не принимать работу, если подрядчик нарушил сроки исполнения договора и заказчик утратил интерес к исполнению.

- Судебную практику, подтверждающую, что заказчик вправе отказаться от подписания акта выполненных работ, если в результате просрочки он утратил интерес к исполнению, см. в Путеводителе по судебной практике.

Если заказчик отказался принимать выполненные работы и представил мотивированный отказ, то подрядчик должен доказать, что работы выполнены им качественно и в объеме, предусмотренном договором.

- Судебную практику, подтверждающую, что если заказчик отказался принимать выполненные работы и представил мотивированный отказ, подрядчик должен доказать, что работы выполнены им качественно и в объеме, предусмотренном договором, см. в Путеводителе по судебной практике.

Заказчик, отказавшийся от принятия результата работ в соответствии с п. 2 ст. 405 ГК РФ, вправе потребовать от подрядчика возмещения убытков. Подробнее об основаниях для возмещения убытков см. п. 11.1.1 настоящих Рекомендаций.
Кроме того, стороны могут установить в договоре основания и последствия отказа заказчика от приемки работы и, соответственно, от подписания акта выполненных работ. Так, они могут предусмотреть, что заказчик, обнаруживший недостатки в выполненной работе, вправе заявить об этом подрядчику, отказавшись от приемки работы и подписания акта выполненных работ.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Заказчик вправе отказаться от приемки работы и подписания акта выполненных работ, если в момент приемки в работе выявлены недостатки".
--------------------------------

Немотивированный отказ заказчика от подписания акта выполненных работ
На практике заказчик может отказаться от подписания акта без какого-либо обоснования. Однако следует учитывать, что при этом он не освобождается от оплаты выполненных работ.

- Судебную практику, подтверждающую, что немотивированное уклонение заказчика от подписания акта выполненных работ не освобождает его от их оплаты, см. в Путеводителе по судебной практике.

При немотивированном отказе заказчика от подписания акта подрядчик может подписать акт в одностороннем порядке и использовать его в суде в качестве доказательства выполнения работы.

- Судебную практику, подтверждающую, что акт, подписанный подрядчиком в одностороннем порядке, может являться доказательством выполнения работы, если заказчик немотивированно отказался от его подписания, см. в Путеводителе по судебной практике.

Однако для того чтобы акт выполненных работ, подписанный только подрядчиком, мог быть принят в качестве доказательства, подрядчик, завершив работу, должен уведомить об этом заказчика (направить ему акт выполненных работ или оповестить иным образом). При неисполнении данной обязанности неподписанный заказчиком акт не признается доказательством выполнения работы.

- Судебную практику, подтверждающую, что акт, подписанный только подрядчиком, не признается доказательством выполнения работы, если подрядчик не известил заказчика об окончании работ, см. в Путеводителе по судебной практике.

9.3.5. Универсальный передаточный документ как форма
акта приемки работ, выполненных по договору подряда

Стороны могут составить акт приемки выполненных работ в форме универсального передаточного документа (УПД), предложенной к использованию ФНС России в Письме от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе счета-фактуры".
Форма УПД основана на форме счета-фактуры и объединяет в себе указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" обязательные реквизиты первичных учетных документов и информацию счетов-фактур, используемых в целях исполнения законодательства по налогам и сборам, которая предусмотрена ст. 169 НК РФ.
В договор подряда стороны могут включить условие о составлении акта приемки выполненных работ в форме УПД. Это не противоречит ни положениям гл. 37 ГК РФ о подряде, ни требованиям ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Подробнее о форме акта выполненных работ см. п. 9.3.1 настоящих Рекомендаций.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Приемка выполненной работы оформляется сторонами путем составления и подписания универсального передаточного документа по форме, предусмотренной в письме ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@".
--------------------------------

Предложенная ФНС форма предполагает два возможных статуса УПД:
- документ, объединяющий счет-фактуру и передаточный акт (статус документа "1");
- только передаточный акт (статус документа "2").
Во втором случае не заполняются поля (или в них ставятся прочерки), которые предназначены для показателей, установленных в качестве обязательных исключительно для счета-фактуры. Статус УПД указывается при заполнении формы путем проставления отметки в соответствующей графе. Однако важно помнить, что фактический статус зависит от заполнения полей (реквизитов) формы (Приложение N 4 к Письму ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@). Если заполнены только поля, предназначенные для первичного учетного документа (передаточного акта), то УПД может использоваться для подтверждения факта выполнения работ, но не будет применяться в качестве счета-фактуры.
ФНС России в указанном Письме отметила, что форма универсального передаточного документа носит рекомендательный характер и не ограничивает права хозяйствующих субъектов на использование иных соответствующих условиям ст. 9 Закона N 402-ФЗ форм первичных учетных документов (из действовавших ранее альбомов или самостоятельно разработанных) и формы счета-фактуры, установленной Постановлением от 26.12.2011 N 1137.
Стороны имеют право по своему усмотрению дополнить образец формы УПД любыми сведениями и данными, которые отражают специальные условия сделки. В том числе это могут быть показатели, необходимые для выполнения требований к заполнению счета-фактуры (Письма ФНС России от 22.04.2019 N ЕД-4-15/7638, 23.12.2015 N ЕД-4-15/22619).

9.4. ПОСЛЕДСТВИЯ УКЛОНЕНИЯ ИЛИ НЕМОТИВИРОВАННОГО ОТКАЗА
ЗАКАЗЧИКА ОТ ПРИЕМКИ РАБОТЫ
Статьи 720, 738 ГК РФ

Обязанность заказчика принять результат работы прямо установлена законом (п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 720 ГК РФ).
Немотивированный отказ или уклонение от приемки работы не освобождает заказчика от обязанности оплатить такую работу, если она выполнена надлежащим образом и в установленный срок либо с согласия заказчика досрочно (ст. 309, п. 1 ст. 310, п. 1 ст. 711 ГК РФ). Подробнее об этом см. п. 9.3.4 настоящих Рекомендаций.
Уклонение заказчика от приемки работы влечет следующие последствия:
- у подрядчика появляется право продать результат работы.
Если иное не установлено договором, подрядчик вправе сделать это по истечении месяца со дня, когда по договору результат работы должны были передать заказчику. При этом важно выполнить условие о последующем двукратном предупреждении заказчика. Вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, подрядчик должен внести на имя заказчика в депозит в порядке, который предусмотрен ст. 327 ГК РФ (п. 6 ст. 720 ГК РФ).
Когда работа выполнена по договору бытового подряда, данное право реализуется несколько иначе. При уклонении заказчика от приемки подрядчик вправе, письменно предупредив его, продать результат работы по истечении двух месяцев со дня предупреждения. Цена продажи должна быть разумной. Вырученная сумма, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, также вносится в депозит в указанном порядке (ст. 738 ГК РФ);
- если уклонение заказчика от приемки повлекло просрочку в сдаче работы, то риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к заказчику в момент, когда ее передача должна была состояться (п. 7 ст. 720 ГК РФ).

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ СТОРОНАМИ РИСКОВ СЛУЧАЙНОЙ
ГИБЕЛИ ИМУЩЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
Статья 705 ГК РФ

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы либо материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи и иного имущества, используемого для исполнения договора, - это риск понести убытки в связи с порчей или утратой указанного результата или имущества по причинам, за которые ни подрядчик, ни заказчик не отвечают вследствие непреодолимой силы или противоправных действий третьих лиц (ст. ст. 211, 705 ГК РФ).

Согласование условия о распределении рисков случайной гибели
Для согласования данного условия стороны должны в договоре определить, кто из сторон несет риски случайной гибели или случайного повреждения в отношении имущества, используемого для выполнения работы, и результата работы:
- распределение рисков случайной гибели имущества, используемого для выполнения результата работы;
- распределение рисков случайной гибели результата работы.

Если в договоре распределение риска случайной гибели между сторонами не согласовано
В этом случае стороны должны руководствоваться общими нормами закона, согласно которым:
- риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона (абз. 2 п. 1 ст. 705 ГК РФ);
- риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик (абз. 3 п. 1 ст. 705 ГК РФ).

Согласование условия о форс-мажоре в договоре подряда
Под непреодолимой силой (форс-мажором) понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство, должно доказать, что исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. В противном случае оно будет нести ответственность за нарушение обязательств (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретительные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия".
--------------------------------

Подробнее по вопросу формулирования условия о форс-мажоре см. Готовое решение.

10.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИМУЩЕСТВА,
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статья 705 ГК РФ

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 705 ГК РФ если заказчик предоставляет подрядчику материалы, оборудование (ст. ст. 704, 713 ГК РФ), вещь для переработки (обработки) и иное имущество для исполнения договора, то он несет риск их случайной гибели или случайного повреждения. Условиями договора стороны могут возложить данный риск на подрядчика. При этом в случае наступления указанных обстоятельств подрядчик будет обязан возместить заказчику причиненные убытки (абз. 2 п. 1 ст. 705, ст. 15 ГК РФ).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Риск случайной гибели или случайного повреждения предоставленных заказчиком материалов, оборудования, переданной им для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет подрядчик".
--------------------------------

Если же работы выполняются иждивением подрядчика (п. 1 ст. 704 ГК РФ), он несет риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, которые он предоставляет для выполнения работы (абз. 2 п. 1 ст. 705 ГК РФ). Договором подряда стороны могут возложить данные риски на заказчика. Тогда в случае их наступления заказчик будет обязан возместить подрядчику причиненные убытки в соответствии со ст. ст. 393, 15 ГК РФ.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Риск случайной гибели или случайного повреждения предоставленных подрядчиком материалов, оборудования или иного используемого для исполнения договора имущества несет заказчик".
--------------------------------

Если в договоре распределение рисков случайной гибели или повреждения имущества не согласовано
При случайной гибели или случайном повреждении предоставленных заказчиком материалов, оборудования, вещи для переработки (обработки) и иного имущества, используемого для исполнения договора, заказчик не вправе будет требовать от подрядчика возмещения убытков в силу с абз. 2 п. 1 ст. 705, ст. ст. 15, 713 ГК РФ (см. Риск заказчика 10.1.1).
При случайной гибели или случайном повреждении предоставленных подрядчиком материалов и оборудования для выполнения работы подрядчик не сможет требовать от заказчика возместить убытки и будет обязан предоставить указанное имущество вновь согласно условиям договора (абз. 2 п. 1 ст. 705, ст. 15, п. 1 ст. 704 ГК РФ).

10.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ СЛУЧАЙНОЙ
ГИБЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статья 705 ГК РФ

В силу абз. 3 п. 1 ст. 705 ГК РФ риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик. Условиями договора стороны могут возложить данный риск на заказчика. В таком случае он должен будет оплатить работу в соответствии со ст. 711 ГК РФ и условиями договора, даже если результат работы погиб или поврежден.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет заказчик".
--------------------------------

Если в договоре не установлено, что риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до ее приемки несет заказчик
Данный риск будет нести подрядчик в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 705 ГК РФ. При случайной гибели или случайном повреждении результата выполненной работы до ее приемки подрядчик не вправе будет требовать оплаты работы (см. Риск подрядчика 10.2.1) и должен будет возместить по требованию заказчика причиненные убытки (см. Риск подрядчика 10.2.2).

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статьи 15, 330, 331, 332, 393, 394, 395, 400, 401, 714,
715, 716, 717, 718, 719, 723, 728, 729 ГК РФ

Гражданско-правовая ответственность по договору заключается в применении к стороне, нарушившей договор полностью или в части, имущественных санкций, которые предполагают возложение на нее невыгодных имущественных последствий и направлены на восстановление нарушенной имущественной сферы другой стороны (см., например, Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1).
Ответственность может быть установлена в виде:
- возмещения причиненных убытков (ст. ст. 15, 393 ГК РФ);
- уплаты процентов на сумму долга (ст. 395 ГК РФ);
- уплаты неустойки за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по договору (ст. 330 ГК РФ). Неустойка является способом обеспечения исполнения обязательств. Ее взыскание помогает компенсировать имущественные потери стороны, понесенные в связи с нарушением договора другой стороной. Кроме того, неустойка признается судами мерой имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (см. Определение Конституционного Суда РФ от 22.01.2004 N 13-О, Определение Конституционного Суда РФ от 07.10.1999 N 137-О). Поэтому обязанность по ее уплате обычно указывается в общем разделе договора об ответственности.
Для согласования условия об ответственности сторонам рекомендуется определить в договоре основания для привлечения к ответственности, а также ее объем. При этом необходимо учитывать правила применения нескольких мер ответственности за нарушение одного и того же договорного условия, обязательства.

Убытки и неустойка
По общему правилу, если установлена неустойка за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательства, убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (абз. 1 п. 1 ст. 394 ГК РФ, п. 60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7). Такая неустойка признается зачетной.
В отношении стороны, которая нарушила обязательство, законом или договором может быть предусмотрено взыскание (абз. 2 п. 1 ст. 394 ГК РФ):
- только неустойки, но не убытков. Такая неустойка называется исключительной;
- убытков либо неустойки по выбору стороны, требующей уплаты. В этом случае неустойка является альтернативной;
- убытков в полной сумме сверх неустойки. Данная неустойка считается штрафной.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ подрядчиком заказчик вправе потребовать взыскания убытков либо выплаты неустойки по своему выбору".
--------------------------------

Убытки и проценты по ст. 395 ГК РФ
Одновременное взыскание убытков и процентов по ст. 395 ГК РФ допустимо, если нарушено денежное обязательство и убытки превышают сумму процентов. Сторона может потребовать возместить убытки в части, не покрытой суммой процентов (п. 2 ст. 395 ГК РФ).

Неустойка и проценты по ст. 395 ГК РФ
В случаях, когда в договоре установлена неустойка за просрочку или неисполнение денежного обязательства, одновременно с ней проценты по ст. 395 ГК РФ не взыскиваются (п. 4 ст. 395 ГК РФ). Данное правило применяется, если иное не предусмотрено законом или договором.
Например, в договоре можно согласовать условие о праве подрядчика взыскать с заказчика, который нарушил срок оплаты выполненных работ, как неустойку, так и проценты на сумму долга.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"При несвоевременной оплате выполненных работ заказчик обязан выплатить подрядчику неустойку в размере _____% от стоимости выполненных работ, а также проценты на сумму долга в размере ___% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки".
--------------------------------

Проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, не взыскиваются, если в отношении установленной неустойки применяются правила абз. 1 п. 1 ст. 394 ГК РФ, т.е. она считается зачетной (п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7). Следовательно, в других случаях (например, когда неустойка является штрафной) одновременно с ней могут взыскиваться проценты по ст. 395 ГК РФ.

Если договором не согласовано условие об ответственности сторон
Сторона, нарушившая договор, обязана возместить причиненные другой стороне убытки, включая упущенную выгоду (ст. ст. 15, 393, 715, 716, 717, 718, 719, 723, 728, 729 ГК РФ), а при неисполнении или ненадлежащем исполнении денежного обязательства - уплатить проценты на сумму долга в порядке ст. 395 ГК РФ.
Неустойка в такой ситуации может быть взыскана, только если она установлена законом в определенном размере. Например, неустойка за просрочку исполнения сторонами обязательств по государственному контракту предусмотрена в ч. 5, 7, 8 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Подробнее о государственном и муниципальном контракте см. Путеводитель по договорной работе.

Ответственность заказчика по договору подряда
Заказчик обязан возместить убытки подрядчика, если есть основания для их возмещения. О том, как возместить убытки, см. Готовое решение.
Ответственность заказчика в виде уплаты неустойки за нарушения обязательств по договору может быть установлена договором или законом. О том, как взыскать неустойку, см. Готовое решение.

Если договором не установлена ответственность заказчика за нарушение его условий, а законом не установлена неустойка
Подрядчик в любом случае вправе требовать возмещения причиненных ему убытков, включая упущенную выгоду (ст. 15, 393 ГК РФ), а в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежного обязательства - взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ).
Ответственность подрядчика по договору подряда предусмотрена, в частности:
- за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц (п. 2 ст. 704 ГК РФ);
- убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора, если подрядчик привлек его к выполнению работ в нарушение запрета, установленного законом или договором (п. п. 1, 2 ст. 706 ГК РФ);
- последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком (п. 3 ст. 706 ГК РФ);
- нарушение начального, конечного, промежуточных сроков выполнения работы, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или договором (п. 1 ст. 708 ГК РФ);
- несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда (ст. 714 ГК РФ);
- ненадлежащее качество работы (ст. 723 ГК РФ).
Подрядчик обязан возместить убытки заказчика, если есть основания для их возмещения. О том, как возместить убытки, см. Готовое решение.
Ответственность подрядчика в виде уплаты неустойки за нарушение обязательств по договору может быть установлена договором или законом. О том, как взыскать неустойку, см. Готовое решение.

Если договором не установлена ответственность подрядчика за нарушение его условий, а законом не установлена неустойка
Заказчик в любом случае вправе требовать возмещения причиненных ему убытков, включая упущенную выгоду (ст. 15, 393 ГК РФ), а в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежного обязательства - взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ).
Ответственность подрядчика перед третьими лицами может возникнуть, в частности, за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юрлица, в процессе выполнения работ подрядчиком. Такой вред по общему правилу подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). Однако, если подрядчик - физлицо и действовал или должен был действовать по заданию заказчика и под его контролем за безопасным ведением работ, то заказчик должен возместить вред, причиненный подрядчиком при исполнении им своих обязанностей по договору (п. 1 ст. 1068 ГК РФ). Риск ответственности по обязательствам, возникающим из-за причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, может быть застрахован по договору страхования (п. 1 ст. 931 ГК РФ).
Если работы выполнены в потребительских целях, а не для использования в предпринимательской деятельности, вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юрлица из-за недостатков работы, а также недостоверной или недостаточной информации о ней, подлежит возмещению подрядчиком независимо от его вины, если он не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил пользования результатами работы (ст. 1095, п. 2 ст. 1096, ст. 1098 ГК РФ).
Солидарную ответственность по договору подряда заказчик и генеральный подрядчик могут нести перед субподрядчиком за неисполнение обязательства по оплате выполненной им работы, если такую ответственность они примут на себя, например, в трехстороннем соглашении. В противном случае заказчик не несет ответственности вместе с генподрядчиком по договору субподряда, так как тот имеет силу только для генподрядчика и субподрядчика. См. судебную практику в Путеводителе по судебной практике.
Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или более, при неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками и соответственно солидарными кредиторами. Если предмет обязательства делим или имеют место другие случаи, предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором, каждое из указанных лиц приобретает права и несет обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли (ст. 707 ГК РФ). См. судебную практику в Путеводителе по судебной практике.

11.1. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статьи 15, 393, 394, 400, 714, 715, 716, 717,
718, 719, 723, 728, 729 ГК РФ

Под возмещением убытков в соответствии со ст. ст. 15, 393 ГК РФ понимается обязанность стороны, нарушившей условия договора, компенсировать добросовестной стороне реальный ущерб (расходы на восстановление нарушенного права, которые она произвела или должна будет произвести, утраченное или поврежденное имущество) и упущенную выгоду (не полученные стороной доходы, на которые она могла бы рассчитывать, если бы договор был исполнен надлежащим образом).
Общим основанием для возмещения убытков является нарушение одним лицом прав другого (п. 1 ст. 15 ГК РФ), в том числе неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств (п. 1 ст. 393 ГК РФ).
По общему правилу убытки подлежат возмещению в полном объеме, если законом или договором не предусмотрен меньший размер возмещения (п. 1 ст. 15, п. 2 ст. 393 ГК РФ). В договоре можно ограничить подлежащие возмещению убытки по составу или размеру.

11.1.1. Основания для возмещения убытков
по договору подряда

Сторона, чье право было нарушено, вправе требовать возмещения причиненных ей убытков при любом неисполнении или ненадлежащем исполнении другой стороной обязательств по договору (п. 1 ст. 393 ГК РФ).
Отдельные основания возмещения убытков (т.е. случаи нарушения или ненадлежащего исполнения условий договора, при которых пострадавшая сторона вправе требовать взыскания убытков) прямо установлены законом как для обеих сторон договора подряда (общие основания), так и для каждой из них отдельно.

Общие основания для возмещения убытков
Законом установлены общие основания для возмещения убытков, применимые к обеим сторонам договора подряда.
1. Изменение или расторжение договора в связи с его существенным нарушением (п. 5 ст. 453, п. 2 ст. 450 ГК РФ). Подробнее о существенных нарушениях, которые могут служить основанием для изменения договора, см. п. 13.2 настоящих Рекомендаций.
2. Досрочное прекращение договора в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) одной из сторон обязательств по нему (ст. 393.1 ГК РФ).
Определение размера убытков будет зависеть от того, заключила ли пострадавшая сторона новый договор взамен прекращенного.
В случае заключения такого договора пострадавшая сторона вправе потребовать убытки в виде разницы между ценой работ по прекращенному договору и ценой на аналогичные работы, согласованной в новом договоре (п. 1 ст. 393.1 ГК РФ).
Если новый договор не был заключен, пострадавшая сторона может взыскать убытки в виде разницы между ценой работ, установленной в прекращенном договоре, и текущей ценой соответствующих работ (абз. 1 п. 2 ст. 393.1 ГК РФ).
В обоих случаях пострадавшая сторона может также потребовать возместить иные убытки, которые возникли у нее в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрагентом обязательств по прекращенному договору (п. 3 ст. 393.1 ГК РФ).
3. Предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения договора (п. 1 ст. 431.2 ГК РФ). Такие обстоятельства могут быть связаны, в частности, с предметом договора, полномочиями на его заключение, наличием у организации лицензий и разрешений, ее финансовым состоянием.
Обязанность возместить убытки возникнет у стороны, которая предоставила недостоверные заверения, если она исходила (имела разумные основания исходить) из того, что вторая сторона будет полагаться на такие заверения (абз. 3 п. 1 ст. 431.2 ГК РФ). В случае когда сторона дала недостоверные заверения при осуществлении предпринимательской деятельности, она должна будет возместить убытки вне зависимости от того, было ли ей известно о недостоверности таких заверений, если иное не предусмотрено соглашением сторон. При данных обстоятельствах предполагается осведомленность предоставившей недостоверные заверения стороны о том, что вторая сторона будет на них полагаться (п. 4 ст. 431.2 ГК РФ).

Основания для возмещения убытков подрядчиком
1. Отказ заказчика от исполнения договора в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работы или таким выполнением работы, при котором становится очевидным, что она не будет закончена в срок или выполнена надлежащим образом (п. п. 2, 3 ст. 715 ГК РФ).
2. Неисполнение требований заказчика об устранении недостатков результата работы в установленный заказчиком разумный срок либо выполнение работы с существенными или неустранимыми недостатками (п. 3 ст. 723 ГК РФ).
3. Участие в исполнении договора субподрядчика, привлеченного подрядчиком в нарушение требований закона или договора (п. 2 ст. 706 ГК РФ).
4. Действия или бездействие подрядчика, повлекшие несохранность (гибель или повреждение) предоставленного заказчиком имущества (ст. 714 РФ).
5. Отказ заказчика принять исполнение обязательств в связи с просрочкой подрядчика, вследствие которой исполнение утратило интерес для заказчика (п. 2 ст. 405 ГК РФ).
6. Отказ заказчика от договора в связи с отсутствием у подрядчика лицензии или членства в саморегулируемой организации, если таковое необходимо для исполнения обязательств по договору (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ).

Внимание! Пленум Верховного Суда РФ в п. 89 Постановления от 23.06.2015 N 25 разъяснил, что совершение сделки лицом, не имеющим необходимой лицензии, не влечет ее недействительности, если законом прямо не установлено иное. Следовательно, если у подрядчика отсутствует лицензия на выполнение работ по договору, заказчик не может требовать признания договора недействительным. Он имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать от подрядчика возместить причиненные убытки (ст. 15, п. 3 ст. 450.1 ГК РФ).

Основания для возмещения убытков заказчиком
1. Отказ подрядчика от исполнения договора, вызванный невыполнением заказчиком своих встречных обязанностей по нему (п. 2 ст. 719 ГК РФ) или непринятием заказчиком необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих годности работы (п. 3 ст. 716 ГК РФ).
2. Неисполнение заказчиком предусмотренной договором обязанности по содействию в выполнении работы (п. 1 ст. 718 ГК РФ).
3. Отказ заказчика от исполнения договора до сдачи ему результата работы (ст. 717 ГК РФ).

11.1.2. Ограничение возмещения убытков по договору подряда

В договор подряда стороны вправе включить условие об ограничении возмещения убытков (п. 1 ст. 15 ГК РФ). Ограничить возмещение можно по составу убытков (например, указать, что не подлежат возмещению упущенная выгода или определенные расходы стороны).

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"При просрочке выполнения работы менее чем _____________ (указывается период времени) подрядчик возмещает только реальный ущерб, понесенный заказчиком в результате такой просрочки, упущенная выгода возмещению не подлежит".

"В случае обнаружения скрытых недостатков результата работы заказчик для их устранения не вправе требовать взыскания с подрядчика расходов по транспортировке результата работы к подрядчику".
--------------------------------

Договором также можно ограничить возмещение убытков по размеру, т.е. установить, что они возмещаются в размере, который не превышает определенной договором суммы.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Сторона, просрочившая исполнение, возмещает другой стороне понесенные ею убытки. Сумма такого возмещения не может превышать 10 процентов цены договора".
--------------------------------

Стороны вправе ограничить договором возмещение убытков по определенным основаниям, допускаемым законом. Например, они могут установить, что подрядчик не несет ответственности за недостатки результата работы, которые обнаружены после приемки. При согласовании ограничения возмещения убытков с подрядчика необходимо учитывать, что условия договора об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождают его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие его виновных действий или бездействия (п. 4 ст. 723 ГК РФ).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик не несет ответственности за недостатки результата работы, которые обнаружены после приемки (скрытые недостатки)".
--------------------------------

Если в договоре не согласовано ограничение возмещения убытков
В этом случае сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, должна будет возместить убытки в полном объеме в соответствии со ст. 15 ГК РФ.
Исключение составляют случаи, когда законом предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (п. 1 ст. 15 ГК РФ). Так, согласно ст. 717 ГК РФ при отказе заказчика от исполнения договора подрядчик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. То есть в данном случае возмещение убытков будет ограничено максимальным пределом.

- Судебную практику, подтверждающую, что подрядчик вправе взыскать убытки за односторонний отказ заказчика от исполнения договора лишь в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и ценой, уплаченной за выполненную работу, см. в Путеводителе по судебной практике.

11.2. ПРОЦЕНТЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ НА СУММУ ДОЛГА ПО СТ. 395 ГК РФ
(ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ), ПО ДОГОВОРУ
ПОДРЯДА
Статья 395 ГК РФ

Проценты, начисляемые на основании ст. 395 ГК РФ, являются мерой ответственности за нарушение обязательства и могут быть взысканы в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате.

Такие проценты взимаются независимо от того, установлены они договором или нет.

Можно ли при просрочке исполнения денежного обязательства требовать от должника уплаты не только процентов по ст. 395 ГК РФ, но и законных процентов по п. 1 ст. 317.1 ГК РФ?
Ответ: Представляется, что это возможно. Однако есть риск, что в некоторых случаях суд откажет во взыскании процентов по ст. 317.1 ГК РФ.
Обоснование: На сумму денежного обязательства за период пользования денежными средствами могут начисляться законные проценты.
С 1 августа 2016 г. такие проценты начисляются, только когда они установлены законом или договором (п. 1 ст. 317.1 ГК РФ). Представляется, что, если в договор подряда после указанной даты включено условие о начислении законных процентов до момента уплаты денег должником, кредитор сможет потребовать за период просрочки проценты как по ст. 395 ГК РФ, так и по п. 1 ст. 317.1 ГК РФ.
До 1 августа 2016 г. норма была другой: законные проценты начислялись по денежному обязательству, сторонами которого являются коммерческие организации, причем включать в договор специальное условие не требовалось. Однако по вопросу о том, уплачиваются ли законные проценты за период просрочки наряду с процентами по ст. 395 ГК РФ, сложилась неоднозначная судебная практика.
Верховный Суд РФ разъяснил, что законные проценты и проценты по ст. 395 ГК РФ имеют разную правовую природу. Законные проценты являются не мерой ответственности, а платой за пользование денежными средствами. Начисление процентов по ст. 395 ГК РФ с момента начала просрочки не влияет на начисление процентов по п. 1 ст. 317.1 ГК РФ (см. Правовые позиции высших судов).
Суды, руководствуясь указанной позицией, взыскивают оба вида процентов (см. Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 15.09.2016 N 05АП-5553/2016 по делу N А51-6605/2016, Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2016 N 13АП-5883/2016).
Однако в споре о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ, которые начисляются на сумму неосновательного обогащения на основании п. 2 ст. 1107 ГК РФ, и процентов по ст. 317.1 ГК РФ суд может отказать во взыскании последних, руководствуясь правилом о приоритете специальной нормы над общей (см. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.06.2016 N Ф05-5662/2016).

Случаи взимания процентов
Подрядчик вправе взыскать проценты на сумму долга, если заказчик не оплатил выполненную и принятую работу (ст. 711 ГК РФ), а также в иных случаях, когда заказчик не исполнил обязанность по уплате цены работы или ее части (п. 5 ст. 709, п. 2 ст. 713, ст. 717, п. 2 ст. 718 ГК РФ).
Несвоевременное перечисление аванса заказчиком не является основанием для начисления процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ.

- Судебную практику, подтверждающую позицию о том, что не подлежат начислению проценты по ст. 395 ГК РФ на сумму аванса, несвоевременно перечисленного заказчиком, см. в Путеводителе по судебной практике.

Заказчик же может потребовать уплаты процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, если, в частности:
- подрядчик не вернул заказчику предоставленные им материалы, иное имущество и не возместил их стоимость (ст. 728 ГК РФ);
- подрядчик, получивший предоплату (аванс), выполнил работу не в полном объеме и должен в соответствии с правилами гл. 60 ГК РФ вернуть сумму неотработанного аванса, если заказчик отказался от договора (абз. 2 п. 4 ст. 453 ГК РФ).

Согласование условия о процентах по ст. 395 ГК РФ
Закон допускает изменить договором некоторые его положения, касающиеся уплаты процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, в частности:
- размер процентов;
- период их взимания.

11.2.1. Размер процентов, начисляемых на сумму долга
по ст. 395 ГК РФ (процентов за пользование чужими
денежными средствами), по договору подряда

Правило определения размера процентов, начисляемых на сумму долга, установлено п. 1 ст. 395 ГК РФ. Оно изменялось дважды: с 1 июня 2015 г. и с 1 августа 2016 г. Размер процентов по п. 1 ст. 395 ГК РФ определяется исходя из правила, отраженного в той редакции этой нормы, которая действовала в соответствующий период (п. 8 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2020), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020).

Процентная ставка по ст. 395 ГК РФ в период просрочки начиная с 1 августа 2016 г.
С этой даты применяется ключевая ставка Банка России, действовавшая в соответствующие периоды, если иной размер процентов не установлен законом или договором (п. 1 ст. 395 ГК РФ).

Процентная ставка по ст. 395 ГК РФ в период просрочки с 1 июня 2015 г. по 31 июля 2016 г.
Применяются имевшие место в соответствующие периоды средние ставки банковского процента по вкладам физических лиц, которые существовали в месте жительства кредитора (если кредитором является юридическое лицо - в месте его нахождения) и были опубликованы Банком России (п. 1 ст. 395 ГК РФ в редакции с 1 июня 2015 г.).
При расчете процентов применяются ставки по федеральному округу, в котором находится место жительства (место нахождения) кредитора в момент заключения договора (подтверждение данного вывода см. в Правовых позициях высших судов).
При нарушении денежного обязательства по договору, вытекающему из деятельности филиала и заключенному работником филиала от имени организации-кредитора, расчет процентов производится исходя из ставок для федерального округа по месту нахождения филиала на момент заключения договора (подтверждение данного вывода см. в Правовых позициях высших судов).
В том случае, если место жительства кредитора расположено за пределами Российской Федерации, применяются ставки, сложившиеся в федеральном округе по месту нахождения суда, который рассматривает спор (подтверждение данного вывода см. в Правовых позициях высших судов).

Процентная ставка по ст. 395 ГК РФ в период просрочки до 1 июня 2015 г.
При расчете процентов применяется учетная ставка банковского процента, существовавшая в месте жительства кредитора (в месте нахождения кредитора - юридического лица) на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, если иной размер процентов не предусмотрен законом или договором (п. 1 ст. 395 ГК РФ в редакции до 1 июня 2015 г.).

Формула расчета процентов
Сумма процентов = сумма долга x ставка процента % x количество дней просрочки / количество дней в году.

Согласование размера процентов в договоре
Стороны вправе согласовать отличный от установленного в законе размер процентов, начисляемых на сумму долга, указав его в договоре (п. 1 ст. 395 ГК РФ).
Стороны не должны устанавливать размер процентов, значительно превышающий предусмотренный законом. Если сумма процентов по договору явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств, суд по заявлению должника может уменьшить ее, но не менее чем до суммы, рассчитанной на основании ставки, которая указана в п. 1 ст. 395 ГК РФ (п. 6 ст. 395 ГК РФ).
К размеру процентов, взыскиваемых по ст. 395 ГК РФ, положения ст. 333 ГК РФ об уменьшении размера неустойки по общему правилу не применяются (п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7, п. 8 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2020), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020). Подробнее о правилах уменьшения неустойки см. п. 11.3 настоящих Рекомендаций.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Размер процентов по ст. 395 ГК РФ, взыскиваемых стороной при неисполнении другой стороной денежного обязательства, определяется следующим образом: ______________________".
--------------------------------

Начисляются ли на сумму НДС, включенную в стоимость выполненных работ, проценты по ст. 395 ГК РФ в случае просрочки оплаты?
Ответ: Да, начисляются.
Обоснование: Проценты по ст. 395 ГК РФ (за пользование чужими денежными средствами) начисляются на сумму задолженности с учетом НДС. Подтверждение данного вывода см. в Правовых позициях высших судов. Следовательно, если в цену работ включен НДС, то при просрочке их оплаты проценты начисляются в том числе на сумму налога.

11.2.2. Период взимания процентов, начисляемых на сумму
долга по ст. 395 ГК РФ (за пользование чужими денежными
средствами), по договору подряда

По общему правилу проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору (п. 3 ст. 395 ГК РФ).
Стороны вправе установить в договоре более короткий период просрочки, за который проценты будут уплачиваться (п. 3 ст. 395 ГК РФ), т.е. ограничить ответственность должника. Договор может содержать условие о том, что проценты взимаются до какого-либо момента, который наступит раньше, чем будет погашена задолженность перед кредитором.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Проценты на сумму долга взимаются до момента предъявления кредитором требования о погашении задолженности".
--------------------------------

Если период взимания процентов по ст. 395 ГК РФ не согласован
В таком случае проценты взимаются по день уплаты задолженности кредитору, если законом или иными нормативными актами не предусмотрен более короткий срок (п. 3 ст. 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства включается в период расчета процентов (п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7).

11.3. НЕУСТОЙКА ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Статьи 330, 331, 332, 333, 394, 400, 708, 723 ГК РФ

Неустойка (штраф, пеня) - это установленная договором или законом денежная сумма, которая выплачивается стороной, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательства по договору (п. 1 ст. 330 ГК РФ). При ее истребовании необходимо доказать факт нарушения обязательства.

Согласование условия о неустойке
Соглашение о неустойке должно быть заключено в письменной форме (ч. 1 ст. 331 ГК РФ). Письменная форма такого соглашения будет считаться соблюденной, если стороны включат условие о неустойке непосредственно в договор подряда. Для этого в договоре необходимо предусмотреть:
- случаи и размер уплаты штрафа;
- случаи и размер уплаты пени;
- ограничения взыскания неустойки.
Кроме того, стороны вправе согласовать условие об удержании заказчиком неустойки из суммы, подлежащей уплате за работы. Подробнее об этом см. п. 11.3.3 настоящих Рекомендаций.

Если условие о неустойке не согласовано
Стороны не вправе будут требовать ее уплаты, если только такая неустойка не установлена законом. Например, неустойка за просрочку исполнения сторонами обязательств по государственному или муниципальному контракту на выполнение работ предусмотрена в ч. 5 - 9 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Подробнее о государственном и муниципальном контракте см. Путеводитель по договорной работе.
Так, подрядчик не сможет взыскать неустойку за просрочку оплаты работы (см. Риск подрядчика 11.3.1), а заказчик - за неисполнение обязанности по выполнению работы в срок (см. Риск заказчика 11.3.1).
Если в договор не включено условие о неустойке за просрочку исполнения денежного обязательства, пострадавшая сторона может требовать уплаты процентов по ст. 395 ГК РФ, а также взыскания причиненных убытков.
В случае отсутствия в договоре соглашения о неустойке, которая взимается за просрочку исполнения неденежного обязательства (нарушение сроков выполнения работы, передачи (замены) материала, оборудования, технической документации и пр.), пострадавшая сторона вправе требовать возмещения причиненных убытков. Если нарушение условий договора повлекло правомерный отказ от него, у нарушившей стороны может возникнуть денежное обязательство по возврату неосновательного обогащения, на сумму которого могут быть начислены проценты по ст. 395 ГК РФ. Например, подрядчик должен будет вернуть сумму неотработанного аванса в связи с отказом заказчика от исполнения договора на основании п. п. 2, 3 ст. 715 ГК РФ.

Момент, до которого начисляется пеня при расторжении договора
При расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства (п. 2 ст. 453 ГК РФ). Следовательно, прекращаются, в частности, те обязательства, существо которых не предполагает их исполнения после расторжения договора (например, обязательство по выполнению работ).
По общему правилу при расторжении договора неустойка начисляется до момента прекращения основного обязательства (п. 4 ст. 329 ГК РФ, п. 66 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7). Таким образом, неустойка, установленная на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности подрядчика выполнить работы, начисляется до даты расторжения договора.
Стороны, руководствуясь п. 4 ст. 421 ГК РФ, вправе установить в договоре неустойку за неисполнение обязанностей, связанных с последствиями прекращения основного обязательства. Данное условие будет действовать и после прекращения этого обязательства (п. 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7). Соответственно, такая неустойка может начисляться за весь период просрочки исполнения обязанности, в том числе после расторжения договора. В частности, неустойкой возможно обеспечить исполнение подрядчиком предусмотренной ст. 728 ГК РФ обязанности возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданные для переработки вещи.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"При несвоевременном возврате предоставленных заказчиком материалов в случае расторжения договора подрядчик обязан выплатить неустойку в размере _____% от стоимости этих материалов за каждый день просрочки".
--------------------------------

Уменьшение неустойки, несоразмерной последствиям нарушения обязательства
По общему правилу суд вправе уменьшить неустойку, рассчитанную согласно условиям договора, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства (п. 1 ст. 333 ГК РФ).
В связи с этим необходимо учитывать следующее.
1. Если должник является коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем либо некоммерческой организацией, деятельность которой приносит доход, ему следует подать обоснованное заявление о снижении неустойки (п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7). Данное заявление (ходатайство) подается по правилам ст. 159 АПК РФ.
Возражения относительно исковых требований не могут рассматриваться как заявление о несоразмерности неустойки и ходатайство о ее снижении (подтверждение данного вывода см. в Правовых позициях высших судов).
Кроме того, должник обязан доказать, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды (п. 2 ст. 333 ГК РФ, п. 77 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7).
2. В случае когда неустойка взыскивается с иных лиц, суд может снизить ее размер на основании ст. 333 ГК РФ как по заявлению должника, так и по собственной инициативе, если установит очевидную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства (п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7).
3. Размер неустойки за просрочку денежного обязательства не может быть уменьшен ниже средних ставок банковского процента по вкладам физических лиц, существующих в соответствующие периоды просрочки в месте жительства кредитора или месте его нахождения, если кредитором является юридическое лицо (п. п. 1, 6 ст. 395 ГК РФ, п. 72 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7).
4. При уменьшении неустойки за нарушение неденежного обязательства предусмотренные п. 6 ст. 395 ГК РФ правила о снижении процентов на сумму долга не применяются, если иное не установлено законом (п. 76 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7).

Внимание! Условие договора об ограничении или запрете применения ст. 333 ГК РФ является ничтожным (п. 69 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7).

11.3.1. Случаи уплаты неустойки по договору подряда
в виде штрафа и его размер

Штраф - это единовременная денежная выплата за допущенное нарушение. Его выгодно установить, если пострадавшей стороне важен факт неисполнения обязательства, а не нарушение срока его исполнения. При согласовании условия о штрафе необходимо определить его размер и основание выплаты.

Основания для уплаты штрафа
Штраф можно предусмотреть за следующие нарушения:
- привлечение подрядчиком к участию в выполнении работы субподрядчика в нарушение обязанности подрядчика выполнить работу лично (п. 1 ст. 706 ГК РФ);
- неисполнение подрядчиком обязанности передать заказчику вместе с результатом работы информацию, определенную ст. 726 ГК РФ;
- другие нарушения по усмотрению сторон.
По смыслу п. 1 ст. 431.2 ГК РФ штраф может быть установлен в договоре за предоставление другой стороне недостоверных заверений об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения договора. Речь идет об обстоятельствах, имеющих отношение в том числе к предмету договора, полномочиям на его заключение, наличию необходимых лицензий и разрешений либо относящихся к третьему лицу. Признание договора незаключенным или недействительным само по себе не будет препятствовать взысканию неустойки (абз. 2 п. 1 ст. 431.2 ГК РФ).
Недостоверными могут оказаться заверения со стороны как подрядчика, так и заказчика (например, заверения подрядчика о наличии у него в законном пользовании техники, необходимой для производства работ, заверения заказчика о наличии действительных полномочий у лица, которое будет осуществлять приемку работ в указанном месте).
Обязанность уплатить штраф возникает, если сторона, предоставившая недостоверные заверения, исходила из того, что контрагент будет полагаться на них, или имела разумные основания исходить из такого предположения (абз. 3 п. 1 ст. 431.2 ГК РФ). Если сторона дала недостоверные сведения при осуществлении предпринимательской деятельности, она должна будет уплатить штраф вне зависимости от того, было ли ей известно о недостоверности таких заверений (иное может быть предусмотрено соглашением сторон). В этом случае сторона, предоставившая недостоверные заверения, предполагается знавшей о том, что контрагент будет на них полагаться (п. 4 ст. 431.2 ГК РФ).

Размер штрафа
Размер штрафа может быть определен указанием либо конкретной суммы, подлежащей уплате в случае нарушения условий договора, либо способа его расчета (например, в процентах от стоимости подлежащей выполнению работы).

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Подрядчик обязан выполнить работу лично. В случае привлечения подрядчиком к исполнению работы субподрядчика в нарушение данной обязанности заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере _______ (указывается сумма) руб.".

"В случае нарушения подрядчиком срока выполнения работы он обязан уплатить заказчику штраф в размере ____% от стоимости работы".
--------------------------------

Стороны вправе включить в договор условие о взыскании неустойки и в том случае, когда норма предусматривает в качестве последствий нарушения одной стороной своих обязательств отказ другой стороны от исполнения договора с возмещением убытков и прямо не устанавливает возможности согласовать иное. Суд признает правомерным такое условие.

- Судебную практику, подтверждающую, что условие договора подряда о взыскании неустойки в пользу стороны, отказавшейся от договора в связи с нарушением другой стороной своих обязательств, не противоречит действующему законодательству, см. в Путеводителе по судебной практике.

Так, в соответствии с п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
В таком случае стороны вправе согласовать в договоре условие, по которому заказчик при одностороннем отказе от исполнения договора в порядке ст. 715 ГК РФ вправе потребовать взыскания с подрядчика неустойки в виде штрафа.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа в размере ___% от стоимости работ".
--------------------------------

Стороны договора вправе установить любой размер штрафа. Однако следует учитывать, что суд может уменьшить неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства (п. 1 ст. 333 ГК РФ). Подробнее о возможности снижения судом размера данной выплаты см. п. 11.3 настоящих Рекомендаций.

Если условие о штрафе в договоре не согласовано
В этом случае добросовестная сторона вправе взыскать убытки (ст. 15, п. 1 ст. 706 ГК РФ). Требовать уплаты штрафа она не сможет ввиду несоблюдения письменной формы о неустойке в соответствии со ст. 331 ГК РФ.

11.3.2. Случаи уплаты неустойки по договору подряда
в виде пени и ее размер

Пеня - это определенная денежная сумма, подлежащая уплате должником за каждый день (час, месяц или иной период) просрочки исполнения обязательства. При установлении пени необходимо определить ее размер и период просрочки исполнения (день, неделя, месяц), за который она устанавливается.

Пеня, уплачиваемая подрядчиком
Пеню можно установить за просрочку исполнения следующих обязанностей подрядчика:
- выполнение работы в установленный договором срок, в том числе нарушение начального, конечного или промежуточных сроков (п. 1 ст. 708 ГК РФ);
- устранение выявленных недостатков результата работы (п. 1 ст. 723 ГК РФ);
- исполнение подрядчиком иного обязательства.
В договорах, предусматривающих только начальный и конечный сроки выполнения работ, неустойку, как правило, устанавливают в виде определенного процента от цены работы.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"В случае нарушения сроков выполнения работы заказчик вправе потребовать взыскания с подрядчика неустойки в размере 0,1 процента цены работы за каждый день просрочки".

"В случае нарушения сроков устранения выявленных недостатков результата работы заказчик вправе потребовать взыскания с подрядчика неустойки в размере 0,1 процента цены работы за каждый день просрочки".
--------------------------------

Если договор предусматривает промежуточные сроки выполнения работ с их поэтапной сдачей и определением стоимости отдельных частей работ, то в интересах сторон установить неустойку в виде процента от стоимости этапа работ, выполнение которого просрочено.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"В случае нарушения сроков выполнения работ заказчик вправе потребовать взыскания с подрядчика неустойки в размере 0,1 процента от стоимости этапа работ, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки".
--------------------------------

Если в договоре, предусматривающем поэтапную сдачу работ, неустойка установлена в процентах не от стоимости каждого этапа, а от всей цены договора, то период просрочки будет рассчитан с момента первого нарушения промежуточных сроков выполнения работ до момента сдачи всех работ. В этом случае размер полученной заказчиком неустойки может оказаться меньше, чем он рассчитывал при согласовании условия (см. Риск заказчика 11.3.3).

Пеня, уплачиваемая заказчиком
Пеню можно установить за просрочку исполнения следующих обязанностей заказчика:
- внесение предоплаты (п. 2 ст. 711 ГК РФ);
- оплата выполненной работы (п. 1 ст. 711 ГК РФ);
- приемка выполненной работы (п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 720 ГК РФ);
- предоставление материалов, оборудования, технической документации, подлежащей переработке (обработке) вещи (п. 1 ст. 719 ГК РФ);
- оказание содействия подрядчику (п. 1 ст. 718 ГК РФ);
- исполнение заказчиком иного обязательства.
В договоре допустимо предусмотреть, что пеня за просрочку оплаты заказчиком выполненных работ за определенный период просрочки рассчитывается как от суммы задолженности, так и от цены договора. Однако суд может прийти к выводу, что подрядчик не вправе начислять неустойку на цену договора без учета частичного исполнения заказчиком обязательства по оплате.

- Судебную практику, подтверждающую наличие двух позиций по вопросу возможности начисления подрядчиком неустойки на всю цену договора, если заказчик оплатил часть работ надлежащим образом, см. в Путеводителе по судебной практике.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"В случае просрочки оплаты выполненной работы подрядчик вправе потребовать взыскания с заказчика неустойки в размере 0,1 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки".

"В случае просрочки оплаты выполненной работы подрядчик вправе потребовать взыскания с заказчика неустойки в размере 0,03 процента от цены договора за каждый день просрочки".
--------------------------------

Размер пени
Стороны договора вправе установить любой размер пени. Однако следует учитывать, что суд может уменьшить неустойку, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства (п. 1 ст. 333 ГК РФ). Подробнее о возможности снижения судом размера данной выплаты см. п. 11.3 настоящих Рекомендаций.
Сторонам следует учитывать, что начисление и взыскание пени не может быть обусловлено выставлением письменного требования, подписанного обеими сторонами, поскольку такое условия договора расценивается судами как ничтожное в силу п. 4 ст. 401 ГК РФ. Сторона, допустившая просрочку, должна будет уплатить пени с момента наступления просрочки независимо от предъявления такой претензии или требования (см. вывод, сделанный судом при рассмотрении спора по договору поставки: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2007, 28.04.2007 N 09АП-4374/2007-ГК по делу N А40-79402/06-62-233).

Правомерно ли при просрочке оплаты работы начислять неустойку на сумму НДС, включенную в цену?
Ответ: Да, правомерно.
Обоснование: При взыскании неустойки за просрочку оплаты работы, в цену которой включен НДС, неустойка начисляется в том числе и на сумму налога (Постановление ФАС Московского округа от 16.12.2009 N КГ-А40/12939-09, Постановление ФАС Уральского округа от 22.12.2009 N Ф09-10277/09-С4). Данный вывод основан на правовой позиции, сформулированной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 22.09.2009 N 5451/09 при разрешении вопроса о правомерности начисления процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, на сумму НДС. Согласно этой позиции НДС в силу п. 1 ст. 168 НК РФ является частью цены товаров (работ, услуг), подлежащей уплате по договору, поэтому обязанность по его уплате в составе цены не является публично-правовой. При просрочке оплаты должник применительно к НДС пользуется не суммой, подлежащей перечислению в бюджет, а денежными средствами кредитора. Соответственно, проценты должны начисляться и на ту часть долга, которая приходится на сумму налога.
Указанная позиция ВАС РФ может быть применена и в случае, когда подрядчик является плательщиком НДС, но по условиям договора налог не включен в цену работы (см. судебный акт, в котором сделан аналогичный вывод при рассмотрении спора по договору поставки: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.01.2011 по делу N А56-3564/2010 (Определением ВАС РФ от 21.04.2011 N ВАС-4938/11 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора)).
Вместе с тем если подрядчик освобожден от уплаты НДС, пеня должна начисляться только на сумму основного долга (см. судебный акт, в котором сделан аналогичный вывод при рассмотрении спора о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами: Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2009 по делу N А08-3540/2009-28).

Если в договоре подряда не согласован размер пени
В такой ситуации условие о неустойке считается не согласованным и стороны не вправе требовать ее уплаты в силу ст. 331 ГК РФ (см. Риск подрядчика 11.3.2). Однако они могут требовать взыскания убытков (ст. ст. 15, 715, 716, 717, 718, 719, 723, 728, 729 ГК РФ), а также процентов по ст. 395 ГК РФ, если допущена просрочка исполнения денежного обязательства.
Если договором определен размер пени, но не установлено, что это размер неустойки, взимаемой за каждый день просрочки, такая неустойка будет расценена в качестве штрафа. Сторона в этом случае сможет взыскать неустойку лишь единовременно (см. Риск заказчика 11.3.2, Риск подрядчика 11.3.3).

Предельный размер пени
Для ограничения размера ответственности при установлении неустойки в форме пени стороны могут согласовать в договоре ее предельный размер (например, не более чем 10 процентов цены работы или суммы задолженности).

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"В случае просрочки выполнения работы заказчик вправе потребовать взыскания с подрядчика неустойки в размере 0,1 процента цены работы за каждый день просрочки, но не более 10 процентов цены работы".

"В случае просрочки оплаты выполненной работы подрядчик вправе потребовать взыскания с заказчика неустойки в размере 0,1 процента суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 процентов суммы задолженности".
--------------------------------

Другим способом ограничения размера пени является установление предельного срока, за который она взимается (например, не более двух месяцев с момента истечения конечного срока выполнения работы или срока оплаты).

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Неустойка за нарушение срока выполнения работы может быть начислена не более чем за два месяца после истечения конечного срока выполнения работы".

"Неустойка за нарушение срока оплаты выполненной работы может быть начислена не более чем за два месяца после срока оплаты".
--------------------------------

Внимание! Установление в договоре предельного размера пени не лишает суд права снизить ее величину, если он сочтет неустойку явно несоразмерной последствиям нарушения обязательства (п. 1 ст. 333 ГК РФ, п. 70 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7). Подробнее о снижении неустойки см. п. 11.3 настоящих Рекомендаций.

Если в договоре предельный размер пени не установлен
В этом случае неустойка будет взыскана полностью и рассчитана до момента исполнения обязательства исходя из условий, согласованных в договоре. Однако, если неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, она может быть снижена судом по правилам ст. 333 ГК РФ. Подробнее о снижении неустойки см. п. 11.3 настоящих Рекомендаций.

11.3.3. Удержание заказчиком неустойки по договору
подряда из суммы, подлежащей уплате за работы

Стороны могут согласовать условие о том, что в случае нарушения подрядчиком обязанностей по договору неустойка засчитывается в счет суммы, подлежащей уплате за работы. В этом случае заказчик может не направлять претензии и не предъявлять иск, а удержать неустойку путем оплаты работ в сумме, уменьшенной на эту неустойку. Согласование такого условия возможно в силу принципа свободы договора, закрепленного в ст. 421 ГК РФ, согласно которому стороны могут определять условия договора по своему усмотрению, кроме случаев, когда их содержание предписано законом или иными правовыми актами.
Правомерность согласования в договоре условия об удержании неустойки была подтверждена Президиумом ВАС РФ в Постановлениях от 19.06.2012 N 1394/12 и от 10.07.2012 N 2241/12. Согласно этим Постановлениям если в договоре предусмотрено условие об удержании неустойки из суммы, подлежащей уплате за работы, то по смыслу п. 1 ст. 407 ГК РФ такое удержание является способом прекращения обязательств и не противоречит требованиям гражданского законодательства. Кроме того, Президиум ВАС РФ сформулировал вывод о том, что встречные требования об уплате неустойки и о взыскании суммы основного долга являются, по существу, денежными, т.е. однородными, и могут быть прекращены зачетом по правилам ст. 410 ГК РФ.
Ранее судебная практика складывалась неоднозначно. Так, одни суды допускали прекращение обязательств по уплате неустойки и основного долга по правилам ст. 410 ГК РФ при наличии заявления о зачете этих встречных требований, поскольку это не противоречит закону (Определение ВАС РФ от 30.09.2008 N 12212/08, Постановление ФАС Поволжского округа от 08.02.2011 по делу N А65-28759/2009 (Определением ВАС РФ от 11.05.2011 N ВАС-6203/11 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора)). Другие суды указывали на то, что зачет невозможен по причине того, что требование об уплате неустойки не имеет бесспорного характера, так как неустойка по своей правовой природе является способом обеспечения исполнения обязательств и ее размер может быть оспорен (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.04.2010 по делу N А82-8771/2009 (Определением ВАС РФ от 25.10.2010 N ВАС-11202/10 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора), Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 04.09.2008 N А33-1238/08-Ф02-4282/08). Существовала также позиция, согласно которой зачет неустойки в счет основного долга невозможен, поскольку такая возможность не предусмотрена законом (Постановление ФАС Уральского округа от 08.02.2010 N Ф09-297/10-С4, Постановление ФАС Уральского округа от 22.01.2007 N Ф09-12319/06-С4).
Позицию, поддержанную Президиумом ВАС РФ в Постановлениях от 19.06.2012 N 1394/12 и от 10.07.2012 N 2241/12, суды нижестоящих инстанций могут учитывать при принятии решений.
Согласно ч. 4 ст. 170 АПК РФ суды могут ссылаться в мотивировочной части решений на постановления Пленума и Президиума Верховного Суда РФ и обзоры судебной практики Верховного Суда РФ, а также на сохранившие силу постановления ВАС РФ.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"В случае нарушения подрядчиком обязательств, предусмотренных п. ___ настоящего договора, заказчик вправе удержать неустойку, начисленную в размере, установленном п. ___ настоящего договора, из суммы, подлежащей уплате за работу".
--------------------------------

Также необходимо учитывать, что условие договора об удержании неустойки из суммы, подлежащей уплате за работы, не является удержанием, которое предусмотрено ст. 359 ГК РФ в качестве способа обеспечения исполнения обязательств (Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.04.2005 N Ф08-1584/2005).
Следует иметь в виду, что в случае удержания заказчиком неустойки из суммы основного долга за выполненные работы подрядчик может поставить вопрос о применении к удержанной неустойке положений ст. 333 ГК РФ в том числе путем предъявления требования о возврате неосновательного обогащения по правилам ст. 1102 ГК РФ (подтверждение данного вывода см. в Правовых позициях высших судов). Заявить требование об уменьшении неустойки можно как в рамках дела по иску подрядчика о взыскании задолженности за выполненные работы, так и путем предъявления самостоятельного иска (подтверждение данного вывода см. в Правовых позициях высших судов).

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Статьи 408, 425, 433 ГК РФ

Срок действия договора - это определенный сторонами момент, в пределах которого действуют условия договора и исполняются предусмотренные в нем обязательства сторон. За пределами данного срока договор не может порождать возникновения прав и обязанностей.
Срок действия договора не является существенным условием договора подряда, поскольку в законе или иных правовых актах указанный срок не определен как существенное или необходимое для этого договора условие.
Важный момент - срок действия договора подряда может выступать существенным условием, когда по заявлению одной из сторон относительно него должно быть достигнуто соглашение (п. 1 ст. 432 ГК РФ, п. п. 1, 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49).
В отличие от сроков выполнения работ срок действия договора подряда не указывает на моменты времени, когда подрядчик обязан приступить к выполнению предусмотренных договором работ или завершить их (ст. ст. 425, 708 ГК РФ).

Согласование условия о сроке действия договора
Для надлежащего согласования данного условия в договоре сторонам необходимо обратить внимание на следующие моменты:
- способы определения срока действия договора;
- применение условий договора к отношениям сторон, возникшим до его заключения;
- прекращение обязательств окончанием срока действия договора.

Если срок действия договора не согласован
В этом случае договор продолжает действовать до установленного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательств (абз. 2 п. 3 ст. 425 ГК РФ). Для договора подряда таким моментом будет выполнение подрядчиком работы в полном объеме и в согласованный срок, сдача ее результата заказчику или оплата заказчиком выполненной работы (см. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.02.2009 по делу N А53-15374/2008, Постановление ФАС Уральского округа от 17.07.2002 N Ф09-1574/02-ГК по делу N А60-5966/02-С4, Постановление ФАС Поволжского округа от 02.12.2008 по делу N А55-6081/08, Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 23.07.2009 по делу N А63-13092/2008, Постановление ФАС Дальневосточного округа от 28.12.2009 N Ф03-7758/2009 по делу N А51-6761/2009, Постановление ФАС Дальневосточного округа от 14.09.2009 N Ф03-4626/2009 по делу N А73-1666/2009).

12.1. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Статьи 190 - 194 ГК РФ

Согласовать срок действия договора можно различными способами, но с соблюдением правил, установленных ст. ст. 190, 191 ГК РФ.
Срок может быть определен:
- указанием на календарную дату, если стороны точно знают дату прекращения взаимоотношений (ст. 190 ГК РФ);

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Настоящий договор действует до 31 декабря 20__ г.".
--------------------------------

- истечением периода времени (ст. ст. 190, 191 ГК РФ);

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Настоящий договор действует в течение года с момента подписания".
--------------------------------

- указанием на событие, которое неизбежно должно наступить, если стороны хотят срок действия договора поставить в зависимость от наступления какого-либо события (абз. 2 ст. 190 ГК РФ).

О способах согласования сроков см. также п. 3.3 "Способы определения сроков выполнения работы по договору подряда", п. 8.2.1 "Срок оплаты работы по договору подряда" настоящих Рекомендаций.

Если срок действия договора определен не по правилам ст. ст. 190 - 194 ГК РФ
В этом случае срок признается несогласованным, и договор подряда будет действовать до момента надлежащего исполнения сторонами своих обязательств по договору, если иное не установлено законом (п. 3 ст. 425, п. 1 ст. 407, п. 1 ст. 408 ГК РФ).
При указании в договоре, что он действует до проведения всех взаиморасчетов сторон, срок действия признается судом несогласованным в связи с тем, что расчеты по договору подряда осуществляет только заказчик (п. 1 ст. 711 ГК РФ), а обязательство сторон провести взаимные расчеты договором не предусмотрено (см. Постановление ФАС Уральского округа от 17.07.2002 N Ф09-1574/02-ГК по делу N А60-5966/02-С4).

12.2. ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ПОДРЯДА К ОТНОШЕНИЯМ
СТОРОН, ВОЗНИКШИМ ДО ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Статья 425 ГК РФ

Стороны могут предусмотреть в договоре, что его положения будут применяться к их отношениям, возникшим до заключения договора (п. 2 ст. 425 ГК РФ).
Это условие может быть необходимо сторонам, если они фактически вступили в подрядные отношения (например, работа выполнялась по устной договоренности), а затем решили оформить их письменным договором, чтобы установить цену работы, детально закрепить все права и обязанности, ответственность сторон. При согласовании данного условия стороны будут вправе требовать исполнения договора применительно к ранее сложившимся отношениям. Так, подрядчик в силу ст. 309, п. 1 ст. 711 ГК РФ сможет потребовать оплаты работы, выполненной до заключения договора, по цене договора (см. Риск заказчика 12.2.1).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Условия настоящего договора применяются к отношениям по выполнению согласованной в нем работы, возникшим до заключения договора".
--------------------------------

Внимание! Рассматриваемое условие не означает, что обязанности сторон по исполнению договора возникают раньше, чем он заключен (п. 1 ст. 425 ГК РФ). В связи с этим стороны не вправе применять друг к другу меры ответственности (требовать возмещения убытков, взыскания договорной неустойки) за период, предшествующий заключению договора (см. Постановление ФАС Поволжского округа от 12.01.2010 по делу N А65-10015/2009).

Сторонам следует учитывать, что в качестве согласования условия о применении договора к возникшим до его заключения отношениям может рассматриваться:
- указание в договоре срока выполнения работы, который наступил ранее даты заключения договора (см. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2009 N 17АП-7165/2009-ГК по делу N А60-12000/2009);
- указание в договоре на выполнение работы, определенной в соответствии с документом, подписанным сторонами до заключения договора. Такой документ может содержать, например, описание предмета и содержания работы, определение вещи, переданной для переработки, обработки (см. Определение ВАС РФ от 31.03.2009 N ВАС-2020/09 по делу N А40-30683/08-58-266).

Если применение условий договора к отношениям, возникшим до его заключения, не согласовано
В этом случае стороны не вправе требовать исполнения обязательств, возникших до заключения договора, в соответствии с его условиями (п. 1 ст. 425 ГК РФ). В частности, подрядчик не вправе требовать оплатить выполненную до заключения договора работу по цене, установленной в договоре. Такая работа будет оплачена по цене, определенной в порядке п. 3 ст. 424 ГК РФ (см. Риск подрядчика 12.2.1).
Исполнение, произведенное стороной до заключения договора, не будет зачтено в счет выполнения условий договора. Так, оплата, осуществленная заказчиком до заключения договора, не погашает его обязательство оплатить работу, выполненную по договору. В этом случае подрядчик вправе взыскать задолженность и неустойку за просрочку оплаты (см. Риск заказчика 12.2.2).

12.3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОКОНЧАНИЕМ
СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Статья 425 ГК РФ

Стороны могут включить в договор условие о том, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств по нему (абз. 1 п. 3 ст. 425 ГК РФ). В таком случае по истечении указанного срока ни одна из сторон не сможет предпринять каких-либо действий или предъявить требований в рамках данного договора (п. 1 ст. 407, ст. 309 ГК РФ).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по нему".
--------------------------------

Однако сторонам необходимо учитывать, что даже при наличии такого условия окончание срока действия договора не освобождает их от ответственности за нарушение обязательств по договору, совершенное в период его действия (п. 4 ст. 425 ГК РФ).

Если стороны не указали, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств по нему
В этом случае договор продолжает действовать до момента надлежащего исполнения сторонами своих обязательств по договору (п. 1 ст. 408 ГК РФ), если иное не предусмотрено законом (абз. 2 п. 3 ст. 425 ГК РФ). В связи с этим заказчик не вправе отказаться от принятия и оплаты работы, выполненной после окончания срока действия договора (см. Риск заказчика 12.3.1), а также требовать уплаты неотработанного аванса в качестве неосновательного обогащения в порядке ст. 1102 ГК РФ (см. Риск заказчика 12.3.2).

13. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Статьи 310, 405, 450, 450.1, 451, 452, 453,
708, 709, 715, 716, 717, 719, 723 ГК РФ

Основания и порядок изменения и расторжения договора подряда урегулированы нормами гл. 29, п. 5 ст. 709, п. п. 2, 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 ГК РФ. Тем не менее стороны могут выбрать и заранее согласовать наиболее подходящий для них способ изменения и прекращения своих отношений по договору.

Согласование условий об изменении и расторжении договора
Сторонам рекомендуется согласовать положения, касающиеся изменения и расторжения договора:
- по соглашению сторон;
- в судебном порядке;
- при одностороннем отказе от исполнения договора.
Право на односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности может быть по соглашению сторон обусловлено необходимостью выплаты определенной денежной суммы (п. 3 ст. 310 ГК РФ). Подробнее о плате за односторонний отказ от договора см. п. 13.5 настоящих Рекомендаций.
Некоторые обязательства могут сохранить свое действие и после расторжения договора. Подробнее об этом см. п. 13.7 настоящих Рекомендаций.

Если условие об изменении и расторжении договора не согласовано
По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной, а также в других установленных законом случаях (пп. 1 п. 2 ст. 450, ст. 451 ГК РФ).
В силу ст. ст. 310, 450.1 ГК РФ сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора (если такой отказ допускается законом), что также влечет расторжение договора.

13.1. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
ПОДРЯДА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН

Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ.
Поскольку право на расторжение договора по соглашению сторон прямо предусмотрено законом, включать в договор соответствующее условие не обязательно. В то же время условие о том, что договор расторгается по соглашению сторон, может быть квалифицировано судом как не допускающее односторонний отказ заказчика от договора в порядке ст. 717 ГК РФ (Риск заказчика 13.1.1).
Соглашение об изменении или расторжении договора подряда совершается в той же форме, в какой был заключен договор (п. 1 ст. 452 ГК РФ), т.е. в простой письменной форме.
Специальных требований к форме договора подряда гл. 37 ГК РФ не содержит. Следовательно, и договор, и соглашение о его изменении (расторжении) могут быть заключены в любой форме с учетом правил ст. ст. 158 - 163 ГК РФ.
Норма п. 1 ст. 452 ГК РФ диспозитивна, поэтому стороны могут самостоятельно установить форму соглашения об изменении или расторжении договора (например, договориться о его составлении в простой письменной или нотариальной форме).
При заключении соглашения о расторжении договора сторонам рекомендуется включить в него условие об обязанности подрядчика вернуть неотработанный аванс либо заказчика - оплатить выполненные работы.
Стороны вправе определить момент изменения и расторжения договора по соглашению сторон. Подробнее о моменте изменения договора см. п. 13.1.2 настоящих Рекомендаций, о моменте прекращения договора - п. 13.6 настоящих Рекомендаций.

13.1.1. Условие о возврате аванса либо оплате стоимости
выполненных по договору подряда работ

Согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ стороны расторгнутого договора не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими до момента расторжения договора, если иное не установлено в законе либо в соглашении сторон. Однако сторона, которая получила исполнение от контрагента, но, в свою очередь, предоставила неравноценное исполнение либо вовсе не исполнила обязательство, по общему правилу должна возвратить неосновательное обогащение в соответствии с правилами гл. 60 ГК РФ (абз. 2 п. 4 ст. 453 ГК РФ).
Так, при расторжении договора заказчик может потребовать от подрядчика вернуть аванс, на сумму которого не были выполнены работы. Если работы выполнены, то взыскивать перечисленные средства заказчик не вправе. Подрядчик, в свою очередь, может потребовать оплаты выполненных работ. Иное может быть предусмотрено законом или договором либо вытекать из существа обязательства (абз. 2 п. 4 ст. 453 ГК РФ). Существо обязательства по оплате выполненных работ предполагает, что после расторжения договора оно не прекращается и, следовательно, должно быть исполнено заказчиком. Подрядчик, таким образом, вправе потребовать оплаты выполненных работ не по правилам о неосновательном обогащении, а в соответствии с п. 1 ст. 702, ст. 711 ГК РФ и условиями договора.
Подробнее о последствиях расторжении договора подряда см. п. 13.5 настоящих Рекомендаций.
Для согласования рассматриваемого условия в договоре или в соглашении о его расторжении рекомендуется определить срок возврата исполненного по договору (аванса и стоимости выполненных работ).

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"В случае изменения или расторжения договора подрядчик обязан в течение ____ рабочих дней вернуть заказчику сумму уплаченного аванса за вычетом стоимости выполненной подрядчиком и принятой заказчиком работы".

"В случае изменения или расторжения договора заказчик обязан в течение ____ рабочих дней вернуть подрядчику принятый, но не оплаченный полностью или частично результат работы".
--------------------------------

--------------------------------
Пример формулировки условия соглашения о расторжении:
"Подрядчик обязуется в течение ________ дней после заключения настоящего соглашения вернуть заказчику сумму ранее полученного аванса в размере _______________ (указывается сумма цифрами и прописью) руб.".
--------------------------------

Если условие о сроке возврата аванса (взыскании стоимости выполненных работ) не согласовано
Выплата должна быть произведена в течение семи дней со дня предъявления кредитором соответствующего требования, если исполнение обязанности в другой срок не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства (п. 2 ст. 314 ГК РФ).

13.1.2. Момент изменения договора подряда
по соглашению сторон

При изменении договора по соглашению сторон новые условия вступают в силу с момента заключения соглашения (п. 3 ст. 453 ГК РФ).
В силу диспозитивности указанной нормы в договоре или соглашении стороны могут установить, что договор считается измененным не с момента заключения соответствующего соглашения, а, например, с указанной в нем даты.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Изменения, предусмотренные настоящим соглашением, вступают в силу с "__" _____ 20__ г.".
--------------------------------

О моменте прекращения договора см. п. 13.6 настоящих Рекомендаций.

Если момент изменения договора не согласован
В этом случае обязательства считаются измененными с момента заключения соглашения сторон об изменении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора (п. 3 ст. 453 ГК РФ).

13.2. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Договор подряда может быть расторгнут по требованию подрядчика в судебном порядке в случае существенного нарушения его условий со стороны контрагента (пп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ), а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами или самим договором (пп. 2 п. 2 ст. 450 ГК РФ).
Расторжение договора подряда в судебном порядке по требованию заказчика также регулируется указанными правилами.

Какие действия (бездействие) сторон признаются существенным нарушением условий договора подряда
Общими нормами о подряде (§ 1 гл. 37 ГК РФ) не установлено, какие нарушения являются существенными и дают одной из сторон право расторгнуть договор в судебном порядке.
Существенным нарушением договора со стороны заказчика суды признают, в частности, просрочку оплаты по договору (см., например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.04.2010 по делу N А56-49409/2008 (Определением ВАС РФ от 12.08.2010 N ВАС-10223/10 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора), Определение ВАС РФ от 13.01.2009 N 16989/08).
Стороны вправе согласовать в договоре виды нарушений, которые они считают существенными (п. 4 ст. 421 ГК РФ).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Нарушение сроков оплаты более чем на _____ (указывается период времени) и (или) неоднократная просрочка оплаты является существенным нарушением условий договора. В случае совершения заказчиком такого нарушения подрядчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении договора".
--------------------------------

Существенным нарушением договора со стороны подрядчика может являться просрочка выполнения работы (см., например, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 14.01.2009 N Ф04-8111/2008(18677-А45-50), Постановление ФАС Уральского округа от 14.01.2009 N Ф09-10140/08-С4).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Нарушение сроков выполнения работы более чем на ___________ (указывается период времени) является существенным нарушением условий договора. В случае совершения подрядчиком такого нарушения заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении договора".
--------------------------------

В договоре можно предусмотреть условие о том, что при определенных нарушениях сторона вправе потребовать расторжения договора без указания на их существенность. Данное условие в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 450 ГК РФ не предполагает оценки судом существенности нарушения. Поэтому для привлечения стороны договора к ответственности достаточно доказать факт совершения ей нарушения (см. Риск заказчика 13.2.1, Риск подрядчика 13.2.1).

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в судебном порядке в случае совершения заказчиком следующих нарушений: ___________ (указываются виды нарушений)".

"Заказчик вправе потребовать расторжения договора в судебном порядке в случае совершения подрядчиком следующих нарушений: _______ (указываются виды нарушений)".
--------------------------------

Если в договоре не указаны основания для расторжения договора в судебном порядке
В этом случае сторона, которая намерена расторгнуть договор в связи с его нарушением другой стороной, вправе обратиться в суд с таким требованием, но при этом она должна доказать факт нарушения и его существенность (п. 2 ст. 450 ГК РФ).
Оценивать, является ли нарушение существенным, будет суд по своему усмотрению в каждом конкретном случае.
Например, суд не посчитал неполную оплату работ существенным нарушением и отказал подрядчику в удовлетворении иска о расторжении договора на основании того, что большая часть работ была оплачена и, кроме того, подрядчик в течение длительного времени не обращался за взысканием задолженности (Постановление ФАС Московского округа от 02.07.2009 N КГ-А40/5892-09).
Подробнее о процедуре расторжения договора в судебном порядке см. Готовое решение.

13.3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА
ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

В силу п. 1 ст. 310 ГК РФ сторона может отказаться от исполнения договора, если такое право предусмотрено Гражданским кодексом РФ, законами, иными правовыми актами.
В Гражданском кодексе РФ установлены основания одностороннего отказа от договора подряда как для заказчика (п. 3 ст. 708, п. 5 ст. 709, п. п. 2, 3 ст. 715, ст. 717, п. 3 ст. 723 ГК РФ), так и для подрядчика (п. 3 ст. 716, п. 2 ст. 719 ГК РФ).
Право заказчика и (или) подрядчика на односторонний отказ от его исполнения по иным основаниям можно предусмотреть в договоре, который связан с осуществлением обеими сторонами предпринимательской деятельности (абз. 1 п. 2 ст. 310 ГК РФ).
С 1 июня 2015 г. указанное право можно согласовать и в случае, если предпринимательскую деятельность осуществляет только одна сторона, например заказчик. Ранее данная позиция уже высказывалась в п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах".
Так, в ситуации, когда предпринимателем является заказчик, в договоре в силу абз. 2 п. 2 ст. 310 ГК РФ может быть установлено право подрядчика отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи результата работы (аналогично праву заказчика, предусмотренному в ст. 717 ГК РФ).
Право на односторонний отказ от исполнения обязательства, которое связано с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, может быть по соглашению сторон обусловлено необходимостью выплаты определенной денежной суммы (п. 3 ст. 310 ГК РФ). Подробнее о плате за односторонний отказ от договора см. п. 13.5 настоящих Рекомендаций.
Сторонам следует учитывать, что условия об одностороннем отказе от исполнения договора, предусмотренные ст. ст. 717, 719 ГК РФ, могут быть изменены соглашением сторон (абз. 2 п. 4 ст. 421 ГК РФ). Так, стороны могут исключить право заказчика на отказ от исполнения договора подряда в любое время до сдачи ему результата работы согласно ст. 717 ГК РФ.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Заказчик не вправе в одностороннем порядке в соответствии со ст. 717 ГК РФ отказаться от исполнения договора".
--------------------------------

Если в договоре предусмотрено, что его расторжение возможно по соглашению сторон, такое условие может быть квалифицировано как исключающее право заказчика в одностороннем порядке отказаться от договора на основании ст. 717 ГК РФ (Риск заказчика 13.1.1).

Договором также могут быть установлены условия об одностороннем отказе, отличающиеся от указанных в ст. 717 ГК РФ. В этом случае заказчик должен их соблюдать и будет не вправе отказаться от исполнения договора в порядке ст. 717 ГК РФ (см. Риск заказчика 13.3.1).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора в случае просрочки подрядчиком выполнения работы более чем на 10 дней".
--------------------------------

В свою очередь заказчик может предложить включить в договор условие об исключении права подрядчика на односторонний отказ от исполнения договора при нарушении заказчиком встречных обязанностей по договору (п. 2 ст. 719 ГК РФ). В этом случае подрядчик не сможет отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, а вправе будет только приостановить работу или не приступать к ней по смыслу п. 1 ст. 719 ГК РФ.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Подрядчик не вправе в одностороннем порядке в соответствии с п. 2 ст. 719 ГК РФ отказаться от исполнения договора".
--------------------------------

Если стороны не исключили право на односторонний отказ от исполнения договора или не согласовали иные условия об отказе
В этом случае заказчик будет вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора (ст. 717 ГК РФ). При этом подрядчик не сможет потребовать признания такого отказа заказчика неправомерным (см. Риск подрядчика 13.3.1).
В свою очередь подрядчик на основании п. 2 ст. 719 ГК РФ сможет отказаться от исполнения договора при неисполнении заказчиком встречных обязательств по договору и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора (см. Риск заказчика 13.3.2).

13.4. ПОРЯДОК ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА
ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

Специальных норм, регламентирующих процедуру отказа от договора подряда, нет. Поэтому в данном случае будут применяться положения п. 1 ст. 450.1 ГК РФ, согласно которому право на односторонний отказ от договора может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от исполнения договора.
Если сторонам важно, чтобы уведомление было направлено определенным образом, в договоре следует закрепить:
- форму уведомления (рекомендуется письменная форма);
- способ направления (например, заказным письмом с уведомлением о вручении).
Подробнее о способе, а также об адресе направления уведомления об отказе от договора см. п. 13.4.1 настоящих Рекомендаций.
Подробнее о моменте доставки уведомления см. п. 13.6 настоящих Рекомендаций.

13.4.1. Способ отправки уведомления об отказе
от договора подряда и адрес для его направления

Внимание! Пленум Верховного Суда РФ в п. 63 Постановления от 23.06.2015 N 25 разъяснил, что юридически значимые сообщения, адресованные гражданину, должны направляться по адресу его регистрации или по названному им адресу либо его представителю. Сообщения юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) следует посылать по адресу, содержащемуся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), либо по указанному адресатом.
В п. 65 Постановления разъяснено, что юридически значимое сообщение может быть направлено в любой форме, соответствующей характеру сообщения и отношений, если иное не установлено законом, договором, не следует из обычая или практики, установившейся во взаимоотношениях сторон. При выборе формы необходимо учитывать наличие возможности достоверно установить впоследствии, от кого исходило сообщение и кому было адресовано.
В соответствии с п. 64 указанного Постановления стороны вправе согласовать, что уведомление направляется исключительно предусмотренным договором способом. В этом случае направление такого уведомления иным способом (например, ценным письмом с описью вложения вместо согласованного в договоре направления курьером) будет считаться ненадлежащим.

Если сторонам важно, чтобы уведомления и иная корреспонденция направлялись контрагенту строго определенным образом, в договоре необходимо закрепить обязательность такого порядка и подробно его описать.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"В случае одностороннего отказа от исполнения договора одна сторона обязана уведомить другую о своем намерении путем направления ей соответствующего уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении".
--------------------------------

Стороны вправе также определить в договоре адрес, по которому следует направлять уведомление об отказе от договора. Он может отличаться от адреса, указанного в отношении юридического лица в ЕГРЮЛ, а в отношении индивидуального предпринимателя - в ЕГРИП. Запретов для этого законом не предусмотрено.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"В случае отказа от договора подрядчик обязан направить заказчику письменное уведомление по следующему адресу: ___________________________________________".
--------------------------------

При определении адреса важно учитывать следующее.
Адрес в ЕГРЮЛ отражается для целей осуществления связи с юридическим лицом (пп. "в" п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"). В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, которые поступили по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего органа или представителя. Такие сообщения считаются полученными, даже если юридическое лицо по данному адресу не находится.
Соответственно, если сторона, которой по этому адресу направлена корреспонденция, не примет мер к ее получению, она не сможет в дальнейшем ссылаться на то, что уведомление не было ею получено, и, как следствие, утверждать, что действие договора не прекратилось. Данный вывод следует также из п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица". Кроме того, в п. 1 указанного Постановления Пленум ВАС РФ разъяснил, что в отношениях с третьими лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ, юридическое лицо не вправе ссылаться на недостоверность информации, которая отражена в реестре, и на сведения об адресе, в нем не указанные. Исключение составляют случаи, предусмотренные в абз. 2 п. 2 ст. 51 ГК РФ.
Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей осуществляется по месту жительства (п. 3 ст. 8 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ). Сведения о соответствующем адресе вносятся в ЕГРИП (пп. "д" п. 2 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ). Однако в Законе не указано, что адрес места жительства отражен в ЕГРИП для осуществления связи с индивидуальным предпринимателем.
В соответствии с п. 3 ст. 23 ГК РФ к индивидуальным предпринимателям применяются нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие деятельность юридических лиц - коммерческих организаций, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения. Таким образом, на деятельность индивидуальных предпринимателей распространяются положения абз. 2 п. 2 ст. 51 ГК РФ о том, что в отношениях с третьими лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ, юридическое лицо не вправе ссылаться на недостоверность отраженной в реестре информации, за исключением случаев, которые предусмотрены указанной нормой. Следовательно, можно сделать вывод, что адрес места жительства отражен в ЕГРИП для осуществления связи с индивидуальным предпринимателем.
Судебные решения, затрагивающие вопросы о том, надлежащим ли образом доставлена судебная корреспонденция, данный вывод подтверждают. Кроме того, суды указывают, что индивидуальный предприниматель несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, которые поступили по его адресу, указанному в ЕГРИП (Определение ФАС Уральского округа от 19.02.2014 N Ф09-1139/14, Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2013 N 15АП-9001/2013).
В связи с изложенным можно предположить, что положения абз. 2 п. 3 ст. 54 ГК РФ применяются и к индивидуальным предпринимателям в силу п. 3 ст. 23 ГК РФ.
Таким образом, получателю следует принять меры для получения корреспонденции как по адресу, предусмотренному в договоре, так и по месту своей государственной регистрации. Это связано с тем, что направление уведомления по адресу, который указан в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), в силу абз. 2 п. 3 ст. 54 ГК РФ, п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 61 может быть признано надлежащим способом извещения об отказе от договора.
Так, суд не принял во внимание доводы заказчика о том, что результаты работ были направлены ему по месту государственной регистрации, а не на адрес, отраженный в договоре. При этом суд указал, что юридическое лицо в силу закона должно обеспечить получение корреспонденции по своему юридическому адресу (Постановление ФАС Уральского округа от 24.10.2013 N Ф09-10886/13). В рассматриваемой ситуации была применена ст. 54 ГК РФ в редакции, действовавшей до 01.09.2014, но можно предположить, что суды, руководствуясь данной нормой в действующей редакции, будут придерживаться аналогичного подхода.
Отправителю рекомендуется послать уведомление об отказе от договора не только на указанный в договоре адрес получателя, но и на все известные адреса последнего. В противном случае возникает риск ненадлежащего уведомления. Например, в споре из договора поставки суд не признал надлежащим доказательством соблюдения претензионного порядка рассмотрения споров направление претензии на предусмотренный в договоре адрес покупателя, по которому последний корреспонденцию не получил. По адресу государственной регистрации поставщик претензию не посылал, хотя этот адрес был ему известен, поскольку именно его стороны согласовали в качестве места доставки товара. Суд отметил, что поставщик не привел доводов в подтверждение наличия у покупателя обязанности получать корреспонденцию не по месту своего нахождения, указанному в ЕГРЮЛ (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2014 N 17АП-10314/2014-ГК).
Вместе с тем если в договоре согласован адрес для направления корреспонденции, то предполагается, что сторона, действуя разумно и добросовестно, должна надлежащим образом исполнять условия обязательства (п. 5 ст. 10, ст. 309 ГК РФ). Соответственно, ей следует направить уведомление по такому адресу вне зависимости от того, было ли оно послано на адрес, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Данный вывод находит отражение в судебной практике. Так, суд отметил, что если в договор включены адреса контрагента, отличные от юридического, то уведомление об одностороннем отказе должно быть направлено по всем известным из договора адресам (Постановление ФАС Центрального округа от 27.11.2013 по делу N А09-908/2013).
Для обеспечения выполнения этой обязанности стороны вправе предусмотреть в договоре условие о неустойке, например о штрафе.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Если уведомление об отказе от договора не направлено по адресу, указанному в настоящем договоре в качестве адреса для направления корреспонденции, сторона-получатель вправе потребовать от стороны-отправителя уплаты штрафа в размере ________ рублей".
--------------------------------

13.5. ПЛАТА ЗА ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Статья 310 ГК РФ

В договоре подряда стороны могут установить плату за реализацию права на односторонний отказ от исполнения обязательства. Однако это возможно только в отношении обязательств, связанных с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 310 ГК РФ).
Условие о плате за отказ позволит второй стороне компенсировать расходы, вызванные преждевременным прекращением договора.
Чтобы согласовать данное условие, следует указать, в каких именно случаях отказ от договора обязывает сторону внести плату, и установить ее размер.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"При отказе от договора в случаях, указанных в п. ___ настоящего договора, подрядчик обязуется выплатить заказчику ___________ (___________) рублей".
--------------------------------

Вместе с тем согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ если право на односторонний отказ от исполнения обязательства установлено императивной нормой, то условие договора о выплате денежной суммы в случае осуществления этого права является ничтожным. Оно противоречит существу законодательного регулирования соответствующего вида обязательства. Равным образом не допускается взимать плату за односторонний отказ от исполнения обязательства, вызванный тем, что другая сторона не исполнила обязательство или исполнила его ненадлежащим образом (см. Постановление от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении").

13.6. МОМЕНТ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Статья 453 ГК РФ

По общему правилу при расторжении договора по соглашению сторон договор считается прекращенным с момента заключения соглашения (п. 3 ст. 453 ГК РФ). Однако стороны могут предусмотреть, что договор расторгается с указанной в соглашении даты или при наступлении определенного события.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"Договор считается расторгнутым с "___" ________ 20__ г.".
--------------------------------

В случае расторжения договора в судебном порядке он считается расторгнутым с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении, если этим решением не предусмотрена дата, с которой обязательства считаются прекращенными. Такую дату суд определяет исходя из существа договора. Она не может быть ранее даты наступления обстоятельств, послуживших основанием для расторжения договора (п. 3 ст. 453 ГК РФ).
При одностороннем отказе от договора он по общему правилу прекращается с момента получения соответствующего уведомления (п. 1 ст. 450.1 ГК РФ). Иное может быть предусмотрено Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором.

--------------------------------
Примеры формулировки условия:
"При одностороннем отказе от исполнения договора последний считается расторгнутым по истечении ________ (указывается период времени) после получения одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны".

"При одностороннем отказе от исполнения договора последний считается расторгнутым по истечении _________________ дней с момента, указанного в соответствующем уведомлении".
--------------------------------

Момент доставки уведомления об отказе от договора
Правовые последствия юридически значимых сообщений (в том числе уведомления об отказе от договора) наступают для лица, которому они адресованы, с момента их доставки самому лицу или его представителю (абз. 1 п. 1 ст. 165.1 ГК РФ). Согласно абз. 2 п. 1 ст. 165.1 ГК РФ сообщение считается доставленным адресату и в том случае, если оно фактически не было получено по причинам, зависящим от адресата. Таким образом, договор может быть признан расторгнутым, если сторона не получила уведомление по своей вине. Например, уведомление считается доставленным, если оно было возвращено по истечении срока хранения в отделении связи, поскольку адресат уклонился от получения корреспонденции (абз. 2 п. 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.15 N 25).
Необходимо учитывать, что норма п. 1 ст. 165.1 ГК РФ диспозитивна в силу прямого указания закона (п. 2 ст. 165.1 ГК РФ). Следовательно, стороны вправе предусмотреть в договоре иной порядок направления и получения юридически значимых сообщений.

13.7. ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Статья 453 ГК РФ

В соответствии с абз. 1 п. 4 ст. 453 ГК РФ стороны после расторжения договора не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон. Однако возможна ситуация, когда до расторжения договора или его изменения одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, свое обязательство не исполнила или предоставила неравноценное встречное исполнение. В этом случае другая сторона вправе потребовать вернуть исполненное на основании норм о неосновательном обогащении (гл. 60 ГК РФ), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.
Данное правило действует с 1 июня 2015 г. в силу абз. 2 п. 4 ст. 453 ГК РФ и закрепляет подход, выработанный ранее судебной практикой.
Так, в п. п. 4, 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения договора" (далее - Постановление N 35) разъяснено, что п. 4 ст. 453 ГК РФ (в редакции до 1 июня 2015 г.) подлежит применению лишь при следующих обстоятельствах (если иное не согласовано сторонами):
- встречные имущественные предоставления по расторгнутому договору к моменту расторжения осуществлены надлежащим образом;
- при делимости предмета обязательства размеры произведенных сторонами имущественных предоставлений эквивалентны.
Во всех остальных случаях, когда эквивалентность встречных предоставлений нарушена вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязанностей, сторона, передавшая имущество, вправе требовать его возврата в той мере, в какой нарушена согласованная эквивалентность.
Правила п. 4 ст. 453 ГК РФ диспозитивны, поэтому стороны могут установить иные последствия расторжения (изменения) договора, чем предусмотрено в данной статье.
Однако в специальных нормах об отдельных видах договоров могут содержаться иные последствия изменения или расторжения договора, чем предусмотрено ст. 453 ГК РФ. В этом случае по смыслу п. 1 ст. 307.1 ГК РФ положения п. 4 ст. 453 ГК РФ будут применяться, если иное не вытекает из специальных норм. Для договора подряда данные последствия определены в том числе в ст. ст. 717, 729 ГК РФ.
При этом в силу абз. 2 п. 2 Постановления N 35 при согласовании таких условий необходимо соблюдать ограничения в отношении свободы договора и злоупотребления правом, перечисленные в Постановлении Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах". Представляется, что данные разъяснения Пленума ВАС РФ сохраняют актуальность и после 1 июня 2015 г.
Дополнительно по вопросу об ограничениях свободы договора см. Аналитический обзор от 8 апреля 2014 года.
Стороны могут также согласовать условие о порядке и сроках возврата аванса либо оплате заказчиком выполненных работ. Подробнее об этом см. п. 13.1.1 настоящих Рекомендаций.

14. ПРИЗНАНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Статьи 166, 167, 180 ГК РФ

Договор подряда признается недействительным по общим основаниям, установленным законом. В зависимости от оснований договор может быть ничтожным либо оспоримым (п. 1 ст. 166 ГК РФ). Общие правила недействительности сделок установлены § 2 гл. 9 ГК РФ.
О недействительности отдельных условий договора подряда см. в настоящем Путеводителе.
Чтобы признать договор подряда недействительным, необходимо подать соответствующий иск.
Подобное требование может быть заявлено не только по оспоримому, но и по ничтожному договору, несмотря на то, что последний недействителен независимо от судебного признания. В случае с ничтожным договором нужно доказать, что у истца есть охраняемый законом интерес в признании договора недействительным (п. п. 1 и 3 ст. 166 ГК РФ).
Ответчик в споре, вытекающем из договора подряда, считающий договор ничтожным, может не подавать встречный иск о признании его недействительным, а ограничиться возражением со ссылкой на недействительность договора. Если же, по мнению ответчика, договор оспорим, то обязательно нужно заявить встречный иск (п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).
Признанный недействительным договор подряда не влечет юридических последствий, кроме тех, которые связаны с его недействительностью, и недействителен с момента его совершения (п. 1 ст. 167 ГК РФ).
По общему правилу каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по недействительному договору (реституция). Если вернуть полученное в натуре невозможно (например, выполненную подрядчиком работу), нужно возместить его стоимость. Иные последствия могут устанавливаться законом (п. 2 ст. 167 ГК РФ).
Подробнее см.: Что нужно знать о недействительности сделок.

15. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
С ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ - НЕРЕЗИДЕНТОМ
Статьи 317, 1186, 1210, 1211 ГК РФ

Договор подряда с иностранной организацией имеет свои особенности.

15.1. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТОМ И НЕРЕЗИДЕНТОМ

Использование иностранной валюты при осуществлении расчетов на территории РФ допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ (п. 3 ст. 317 ГК РФ).
По общему правилу валютные операции между резидентами и нерезидентами проводятся без ограничений (ст. 6 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ). Банк России как орган валютного контроля вправе устанавливать порядок представления этими лицами подтверждающих документов и информации в рамках таких операций (ст. 54 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ, ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ).
Сторона-резидент вправе осуществлять расчеты только через свои счета, открытые в уполномоченном банке или банке-нерезиденте, если сумма обязательств по договору подряда в рублевом эквиваленте равна или превышает (пп. 4.1.3, п. 4.2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И):
- с заказчиком-нерезидентом - 10 млн руб.;
- с подрядчиком-нерезидентом - 3 млн руб.
В этих случаях резидент обязан поставить договор на учет в уполномоченном банке. При этом сумма обязательств определяется на дату заключения договора, а в случае ее изменения - на дату последнего из таких изменений к нему (п. п. 4.2, 5.1 Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И).
Подробнее о том, как поставить договор на учет в банке, см. Готовое решение.
Независимо от того, введены ли иностранным государством меры в отношении уполномоченного банка, который принял на обслуживание экспортный или импортный контракт (далее - банк УК), резидент может проводить операции (как зачисление, так и списание) через счета, открытые в уполномоченном банке, отличном от банка УК (Письмо Банка России от 28.06.2022 N 019-12-4/5875). Подробнее см. Готовое решение.

15.2. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИМЕНЕНИЮ
К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА С ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Право, подлежащее применению к договору подряда с участием иностранной организации, определяется на основании международных договоров РФ, Гражданского кодекса РФ, других законов и обычаев, признаваемых в РФ (п. 1 ст. 1186 ГК РФ).
Стороны договора могут при его заключении или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору. Соглашение должно быть прямо выражено или должно определенно вытекать из условий договора либо совокупности обстоятельств дела (п. п. 1, 2 ст. 1210 ГК РФ).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"К договору применяется право Российской Федерации".
--------------------------------

Если соглашение сторон о выборе права отсутствует
В этом случае к договору подряда по общему правилу применяется право страны, где на момент заключения договора находится место жительства или основное место деятельности подрядчика (п. 1, пп. 5 п. 2 ст. 1211 ГК РФ).

Обратите внимание!
Если договор заключается и в соответствии с его условиями исполняется подрядчиком через филиал или иное обособленное подразделение в другой стране, суд вправе применить не право страны основного места деятельности подрядчика, а право страны, в которой находится его филиал или иное обособленное подразделение (п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 24).

16. РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА
Статья 429.1 ГК РФ

Рамочный договор подряда - это соглашение заказчика и подрядчика, в котором определены только общие условия их сотрудничества.
Условия, которые меняются при каждом исполнении (например, конкретное наименование и объем работы, место ее выполнения), в рамочный договор не включаются (остаются открытыми). Впоследствии они конкретизируются с помощью отдельных договоров, дополнительных соглашений, заявок заказчика или других документов (п. 1 ст. 429.1 ГК РФ).
Несмотря на то что в рамочном договоре обычно отсутствуют существенные условия (чаще всего в нем не конкретизирован предмет договора), это не говорит о его незаключенности. Из ст. 429.1 ГК РФ следует, что сущность рамочного соглашения не предполагает обязательного указания существенных условий сделок, которые будут совершаться на его основании.

16.1. КОГДА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЗАКЛЮЧАТЬ РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА

Рамочный договор удобен для организации долгосрочного сотрудничества по выполнению однотипных работ. Например, его можно использовать при выполнении работ по изготовлению полиграфической продукции.
По сравнению с другими договорами рамочный договор позволяет:
- не согласовывать все условия сотрудничества каждый раз, когда заказчику требуется выполнить работу. В отличие от разовых договоров, заключаемых в отношении конкретной работы, рамочный договор по умолчанию распространяет свои условия на все работы, которые подрядчик выполняет для заказчика. Как следствие, тому не нужно каждый раз искать и проверять подрядчиков, изучать коммерческие предложения и вести переговоры по условиям сотрудничества. Достаточно согласовать наименования и объемы работ по рамочному договору;
- не конкретизировать предмет договора, который может быть уточнен позднее в отдельных документах. Это отличает его от опциона и предварительного договора, которые должны содержать условия, позволяющие определить предмет будущего (будущих) договора (договоров) подряда (п. 3 ст. 429, п. 4 ст. 429.2 ГК РФ);
- не платить за право совершать отдельные сделки на условиях общего (организационного) договора. В этом его отличие от опциона, который по общему правилу предоставляется за плату (п. 1 ст. 429.2 ГК РФ), и от абонентского договора, в котором плата обычно вносится независимо от того, было ли затребовано исполнение (п. 2 ст. 429.4 ГК РФ).

16.2. КАКИЕ УСЛОВИЯ СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧИТЬ
В РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА

В рамочном договоре подряда рекомендуется установить:
- условия о порядке согласования отдельных заказов на конкретную работу. Договор, в котором не согласован предмет, но указан порядок определения существенных условий, может квалифицироваться как рамочный. Данное условие поможет в споре о применении рамочного договора к работе, которая была согласована в порядке, установленном этим договором;
- общие условия взаимодействия при исполнении заказов.

16.2.1. Порядок согласования заказов

В рамочном договоре рекомендуется согласовать, как заказчик будет направлять заказы на отдельные работы и как подрядчик будет их подтверждать или отклонять. В частности, можно указать:
- перечень сведений, которые должен содержать заказ, либо обязанность составить заказ по определенной форме, закрепленной в приложении к договору;
- способ направления заказа (курьерской доставкой, по электронной почте и т.д.);
- сроки рассмотрения и подтверждения заказа подрядчиком;
- способ подтверждения заказа подрядчиком.

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"2. Порядок согласования заявки на выполнение работы:
2.1. Заказчик в течение срока действия настоящего договора может направлять подрядчику заявки на выполнение работ по форме согласно приложению N 1 к настоящему Договору.
2.2. Заявка направляется по электронной почте order@podryadchik_raboty.ru.
2.3. В случае согласия на выполнение работы подрядчик выставляет счет на оплату. Счет направляется по электронной почте на адрес, с которого поступила заявка.
2.4. Заказчик оплачивает счет в течение 5 (пяти) рабочих дней после его получения. При отсутствии оплаты по истечении указанного срока заявка аннулируется.
2.5. Подрядчик приступает к выполнению заявки в течение 3 (трех) рабочих дней после оплаты".
--------------------------------

Согласование заказов с помощью прайс-листа подрядчика
Если у подрядчика сформирован прайс-лист (перечень выполняемых работ с указанием их цены и других условий), с его помощью можно упростить и ускорить процедуру согласования заказа. Для этого достаточно оформить прайс-лист приложением к договору, а в тексте договора указать, что заказчик формирует заявки на основании прайс-листа.
Когда основные параметры заранее согласованы в прайс-листе, можно установить, что подтверждение заявки подрядчиком не требуется и он приступает к выполнению работы после ее получения. Однако в этом случае подрядчик может столкнуться с невозможностью выполнить слишком крупный заказ, а нарушив обязательство, будет нести ответственность. Чтобы избежать этого, рекомендуется предусмотреть в рамочном договоре максимально возможный объем заказа (как общий, так и по отдельным позициям).

--------------------------------
Пример формулировки условия:
"2. Порядок согласования заявки на выполнение работы:
2.1. Заказчик в течение срока действия настоящего договора может направлять подрядчику заявки на выполнение работ, указанных в прайс-листе подрядчика (приложение N 2 к настоящему договору).
2.2. Заявка направляется по электронной почте на адрес order@podryadchik_raboty.ru.
2.3. Подрядчик приступает к выполнению заявки в течение 3 (трех) рабочих дней после ее получения и выполняет работу в сроки, указанные в прайс-листе.
2.4. В заявке, оформленной на основании прайс-листа, может быть указано не более двух работ. Заявка на большее количество работ подлежит согласованию с подрядчиком. Пункт 2.3 настоящего договора к такой заявке не применяется.
2.5. Заказчик вправе направлять заявки не чаще чем раз в 10 (десять) рабочих дней. Заявка, поданная ранее чем через 10 (десять) рабочих дней после предыдущей, подлежит согласованию с подрядчиком. Пункт 2.3 настоящего договора к такой заявке не применяется".
--------------------------------

16.2.2. Общие условия взаимодействия сторон

В рамочном договоре рекомендуется закрепить те условия, которые с высокой долей вероятности не изменятся на протяжении всего периода сотрудничества сторон. Они формулируются так же, как и в обычных договорах подряда. К таким условиям, как правило, относятся:
- виды работ, которые подрядчик намерен выполнять для заказчика (например, работы по изготовлению полиграфической продукции);
- условие о качестве работ;
- условие о предоставлении материалов и оборудования;
- условие о приемке работ;
- условие об оплате;
- условие о распределении между сторонами рисков случайной гибели имущества и результата подрядных работ;
- ответственность сторон;
- порядок изменения и расторжения договора;
- порядок разрешения споров.
Также рекомендуется указать срок действия договора, чтобы четко определить временные рамки сотрудничества сторон. В этом случае сторонам будет проще планировать свою деятельность, в том числе согласовывать общие условия взаимодействия.
Особенно важно установить срок, если стоимость работ не согласовывается по каждой заявке отдельно, а зафиксирована в договоре. Например, речь идет о ситуации, когда стороны договорились согласовывать заказы на конкретные работы с помощью прайс-листа, приложенного к договору. В таком случае условие о сроке действия договора защитит подрядчика от обязанности выполнять работы в течение длительного или неограниченного срока по однажды установленным ценам.

16.3. КАК ПРИМЕНЯТЬ РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР
В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

При работе по рамочному договору необходимо дополнительно согласовывать те условия, которые остались открытыми в договоре: конкретное наименование, объем, цену работы и т.д.

16.3.1. Как согласовать условия о выполнении
конкретной работы

Поскольку открытыми остаются, как правило, существенные условия договора, их нужно согласовывать в простой письменной форме (п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 161 ГК РФ). Это можно сделать несколькими способами, в частности (п. 1 ст. 429.1, п. п. 2, 3 ст. 434 ГК РФ):
- подписать один документ (в том числе электронный), содержащий необходимые для согласования условия;
- обменяться письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными в соответствии с правилами абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ, которые содержат все необходимые для согласования условия;
- совершить определенные действия в ответ на получение документов (например, подрядчик выставляет счет, а заказчик его оплачивает, подтверждая тем самым согласие на выполнение работы на соответствующих условиях).
При согласовании отдельных заявок, если необходимо, можно изменить или исключить условия, содержащиеся в рамочном договоре. В этом случае к конкретной сделке будут применяться правила, отличные от указанных в рамочном договоре (п. 2 ст. 429.1 ГК РФ).

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница  из